Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-221874/23-83-1247

г. Москва

08 декабря 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 05 декабря 2023года

Полный текст решения изготовлен 08 декабря 2023 года

 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-1247), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "ЭКСИСТРОЙ" (ИНН 

<

***>) к ООО "МИРСТРОЙ" (ИНН 

<

***>) о взыскании денежных средств в размере 11.788.886 руб. 27 коп.

Третье лицо: ООО "ДРИМСТРОЙ" (ИНН 

<

***>).

при участии:

от истца – ФИО2 на основании доверенности от 15.11.2023

от ответчика – не явился, извещен

от третьего лица – не явился, извещено 

 

У С Т А Н О В И Л:

ООО "ЭКСИСТРОЙ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "МИРСТРОЙ"   о взыскании денежных средств в размере 11.788.886 руб. 27 коп.

           Представитель ответчика и третьего лица в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в связи с чем, спор рассматривается в отсутствие представителя ответчика и третьего лица в порядке ст.ст.1230156 АПК РФ.             

           Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме. 

           Суд, рассмотрев материалы дела, в силу статей 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, заслушав представителя истца, считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материала дела между  Обществом с ограниченной ответственностью «ДримСтрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Мирстрой» (ООО «Мирстрой», далее по тексту - «Подрядчик») заключен Договор подряда от 25.03.2021 № ПД/С/Д-23 (далее по тексту - «Договор») в соответствии с которым: «Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс строительно-монтажных работ по устройству каменной кладки стен и перегородок на секциях 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и подземному паркингу, устройству кладки порогов из блока ячеистого бетона на секциях 3, 4, 5, 8, 9,( в редакции Дополнительного соглашения №3 от 01.09.2021 г., далее по тексту - «Работы») на объекте: «Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой «Аквилон Парк», расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское» (далее по тексту - «Объект»).

20.09.2023 года Общество с ограниченной ответственностью «ДримСтрой» заключило договор уступки права требования (далее по тексту - «Договор уступки») с Обществом с ограниченной ответственностью «Эксистрой» (далее по тексту - «Истец»). Уведомление об уступке направлено Ответчику 22.09.2023 г.

Согласно п. 2.1. Договора уступки: «Цедент передает Цессионарию все свои права требования, возникшие в период действия Договора подряда к Подрядчику и не исполненные последним, а также права требования, возникшие в связи с расторжением Договора подряда, действительные на дату заключения настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь: пени за нарушение сроков выполнения работ Подрядчиком по договору подряда; сумму неотработанного аванса по договору подряда; проценты (неустойку) за пользование денежным средствами Цедента, оплаченными последним в качестве аванса по Договору подряда; стоимость переданных Цедентом не использованных Подрядчиком и не возвращенных последним давальческих материалов; проценты (неустойку) за невозврат переданных Цедентом и не использованных Подрядчиком давальческих материалов.» Согласно п. 5.1.1. Договора подряда Подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. Договора подряда, своими и/или привлеченными силами и средствами, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором подряда, и сдать результат Работ Заказчику с предоставлением исполнительной документации, согласно условиям Договора подряда.

В соответствии с Графиком производства работ, Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с 25.03.2021 г. и завершить их в полном объеме в срок до 31.10.2021 г., что Подрядчиком не исполнено.

В соответствии с п. 5.1.14. Договора подряда: «После окончания Работ передать Заказчику законченный строительством Объект по Акту приема-передачи Объекта (работ), с оформленным в соответствии с нормативной документацией комплектом исполнительной и иной документации.

Подобной документации Заказчику не представлено.

Конечный срок выполнения работ был изложен в редакции Дополнительного соглашения №3 от 01.09.2021 г.

04.10.2022      г. в адрес Подрядчика было направлено уведомление о расторжении Договора.

Согласно п. 11.2 Договора, при расторжении договора в одностороннем порядке в соответствии с п. 11.1 Договора, Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней со дня отправления Заказчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Таким образом, Договор расторгнут 18.10.2022 г.

В соответствии с п. 11.3 Договора подряда: Подрядчик обязан вернуть денежные средства, полученные в качестве аванса и не подтвержденные фактически, вернуть исполнительную и рабочую документацию, подписать с Заказчиком Акт об объемах, неиспользованный давальческий материал.

Однако данные требования Подрядчик проигнорировал.

11.05.2023  г. в адрес Подрядчика была направлена претензия, которая также была проигнорирована Подрядчиком.

В соответствии с пунктом 9.3 Договора подряда за нарушение Подрядчиком начальных и/или конечных сроков выполнения работ, и/или сроков завершения отдельных этапов работ (промежуточных сроков), установленных Графиком производства работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 000,00 (пятидесяти тысяч) рублей от стоимости Договора подряда за каждый день просрочки до фактического исполнения Подрядчиком нарушенных обязательств, в том числе путем удержания из любых причитающихся Подрядчику платежей по Договору.

Таким образом сумма пени за нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ составляет: период просрочки с 01.11.2021 г. по 18.10.2022 г.=352 дня - 184 дня (дни периода моратория в рамках Постановления Правительства РФ №497 от 28.03.2022 г.)=168 дней 50 000*168= 8 400 000 руб.

Заказчик перевел Подрядчику авансовых платежей на общую сумму 12 448 704 руб. 40 коп., что подтверждается платежными поручениями №431 от 04.05.2021 г., № 628 от 04.06.2021 г., №816 от 26.07.2021 г., № 986 от 01.09.2021 г., №1236 от 13.10.2021 г., №1336 от 29.10.2021 г., №1456 от 24.11.2021 г., №1629 от 27.12.2021 г., №289 от 09.03.2022 г.

Подрядчик выполнил работ на общую сумму 10 448 704,94 руб., что подтверждается формами КС-2 , КС-3: №1 от 30.04.2021 г.,  №2 от 26.05.2021 г., №3 от 19.07.2021 г., №4 от 12.11.2021 г.

12 448 704,40-10 448 704,94 =1 999 999  руб. 46 коп.- сумма неотработанного аванса.

14.09.2023 г. Заказчик направил в адрес Подрядчика уведомление о сальдировании встречных обязательств в размере 549 931,83 руб.  

На текущий момент сумма неотработанного аванса составляет 1 450 067,63 руб. (1 999 999, 46- 549 931, 83= 1 450 067, 63).

На основании пункта 11.3.1. Договора подряда Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента требования Заказчика вернуть денежные средства, полученные им по Договору подряда в качестве аванса и не по подтвержденные фактически выполненными Работами, а также уплатить проценты на сумму аванса, подлежащего возврату Заказчику по ставке 25% годовых, начисляемых с момента получения авансового платежа и до момента возврата суммы аванса Заказчику, что за период с 09.03.2022 по 25.09.2023 составляет  377 414, 86 руб. 

В соответствии с п. 11.3.3 Договора подряда Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней освободить площадку от оборудования, материалов, техники и иного имущества Подрядчика, находящегося на территории строительной площадки, вернуть Заказчику исполнительную документацию, рабочую документацию.

На основании п. 11.8. Договора подряда Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком и не использованные Подрядчиком материалы, оборудование, иное имущество, в течение 5 (пяти) дней с момента расторжения Договора подряда, а если это невозможно -возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока для возврата имущества в натуре. В случае нарушения Подрядчиком срока возврата неиспользованных материалов и оборудования, иного имущества, переданного Заказчиком или срока возмещения стоимости неиспользованных материалов и оборудования, переданного Заказчиком, последний вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости переданных, но не использованных материалов или оборудования за каждый день просрочки.  

Согласно накладным на отпуск материала на сторону формы М-15 и актам о приеме-передаче товарно-материальных ценностей Подрядчику был передан давальческий материал.

Материал Подрядчиком Заказчику не возвращен. В связи с этим Истец требует от Ответчика возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества, переданного Заказчиком и не использованного Подрядчиком в размере 1 195 561,85 руб. и оплатить неустойку от стоимости переданных, но не использованных материалов или оборудования за каждый день просрочки.

Стоимость материалов их количество и отчет Подрядчика о количестве переданного/использованного материала подтверждается следующими документами: накладными на отпуск материалов на сторону по форме М-15, актами приема-передачи товарно-материальных ценностей, формами М-29 и приходными ордерами. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом,иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно ч. 1 ст. 1102 ГК РФ Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Учитывая вышеизложенное, заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине.

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 329, 330, 395, 702, 708, 715, 1102 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "МИРСТРОЙ" (ИНН 

<

***>) в пользу ООО "ЭКСИСТРОЙ" (ИНН 

<

***>) неустойку в размере 8 400 000 руб., денежные средства в размере 1 450 067 руб. 63 коп., проценты в размере 377 414 руб. 86 коп., стоимость давальческого материала в размере 1 195 561 руб. 85 коп., неустойку в размере 365 841 руб. 93 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 81 944 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

            Судья                                                                                                      В.П.Сорокин