ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва                                   Дело № А40-206054/20-68-1331

                                                                    объединено с делом № А40-241297/20-15-1723

27 мая 2021г.

Резолютивная часть решения объявлена 12 мая 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 27 мая 2021 года  

Судья   Абрамова Е.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление по делу по иску

ООО "МОСКАПСТРОЙ - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1" (109147, 

<

...>, ЭТ 7 КОМ 4, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 04.04.2018, ИНН: 

<

***>) к ответчику ООО "МЭЙН ГРУП" (117463, МОСКВА ГОРОД, ПРОСПЕКТ НОВОЯСЕНЕВСКИЙ, ДОМ 32, КОРПУС 1, Э 1 ПОМ VI К 2 ОФ 89, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.04.2018, ИНН: 

<

***>) о взыскании денежных средств в размере 19 692 345,95 рублей и по иску ООО "МЭЙН ГРУП" к ООО "МОСКАПСТРОЙ - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1" о взыскании 19.392.994 руб. 43 коп. 

при участии:

от истца: ФИО2 по дов. от 11.01.2021г.

от ответчика: ФИО3 по дов. от 19.03.2021г., ФИО4 по дов. от 15.01.2021г. 

У С Т А Н О В И Л:

ООО "МОСКАПСТРОЙ - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1" обратилось с иском к ООО "МЭЙН ГРУП" о взыскании  неотработанного аванса в сумме 12.160.822 руб. 42 коп. по договору подряда № МИТ/15072019 от 15.07.2019, задолженности за электроэнергию в размере 56.014 руб. 53 коп., неустойки, предусмотренной договором в размере 7.174.680 руб. 18 коп. за нарушение обязательств по срокам выполнения работ, предусмотренных графиком производства работ за период с 05.11.2019 г. (следующий день за днем окончания выполнения работ по договору по день получения ответчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора- 06.07.2020 г.), штрафа, предусмотренного договором в размере 145.246 руб. 72 коп., процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ, в сумме 155.582 руб. 10 коп. за период с 07.07.2020 г. (следующий день за датой получения ответчиком уведомления об отказе от исполнения договора) по 23.10.2020 г. (дата составления иска).

ООО "МЭЙН ГРУП" обратилось с иском к ООО "МОСКАПСТРОЙ - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1" о взыскании стоимости выполненных по договору подряда № МИТ/15072019 от 15.07.2019 работ в сумме 9.495.430 руб. 83 коп., неустойки за несвоевременную оплату в сумме 2.269.407 руб. 97 коп., убытков в результате отказа заказчика от договора в сумме 7.628.155 руб. 63 коп.      

Определением от 20.01.2021 Арбитражный суд города Москвы объединил в одно производство дела №№ А40-206054/20-68-1331 и А40-241297/20-15-1723 для совместного рассмотрения с присвоением № А40-206054/20-68-1331.

В судебном заседании представитель ООО "МОСКАПСТРОЙ - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1" требования своего иска поддержал, против удовлетворения встречных требований к ООО "МЭЙН ГРУП"  возражал.

к ООО "МЭЙН ГРУП" против удовлетворения иска ООО "МОСКАПСТРОЙ - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1"  возражал, встречные требования поддержал.  

Непосредственно исследовав и оценив все представленные по делу доказательства, выслушав представителей сторон, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, между ООО "МОСКАПСТРОЙ - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1" (заказчик) и ООО «МЭЙН ГРУП» (подрядчик) был заключен договор подряда №МИТ/15072019 от 15.07.2019, согласно которому подрядчик обязался на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами выполнить остатки подрядных работ и ввод в эксплуатацию Административно-бытового корпуса в составе Объекта капитального строительства: Строительство автобусного парка в районе Митино, по адресу: ул. Зенитчиков, район Митино, Северо-Западный административный округ города Москвы в рамках исполнения государственного контракта № 0173200001418000750-RST от 21.08.2018, заключенного между Государственным заказчиком- Департаментом строительства города Москвы и АО «Москапстрой» (генеральный подрядчик), в соответствии с проектной и рабочей документацией, и передать результат работ.

Стоимость работ по договору составила 48.415.574 руб.  34 коп.

В соответствии с п. 7.2.1. договора субподрядчик обязуется качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные договором приложениями к нему, и сдать выполненные работы подрядчику в установленном порядке и срок.

Во исполнение договора  заказчик перечислил подрядчику денежные средства в общем размере 31.291.987 руб. 88 коп.

Ответчиком были выполнены работы на общую сумму 19.131.165 руб. 46 коп., что подтверждается подписанными между сторонами актами по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 от 01.09.2019 г., №2 от 11.09.2019 г., №3 от 30.09.2019 г., № 4 от 15.12.2019 г., № 5 от 16.12.2019 г.

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. 

Условиями договора были определены срок начала работ- с даты заключения договора, то есть 15 июля 2019 года, и срок окончания работ- 04.11.2019 г. Сроки выполнения работы определяются Графиком производства работ (Приложение №2) к договору. 

В соответствии со ст. 715 ГК РФ и п. 14.2.1 договора подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае нарушения субподрядчиком любого из сроков выполнения работ, установленных в графике производства работ, более чем на 10 (десять) дней.

В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ, заказчик на основании п.14.2.1 договора 02.07.2020 направил подрядчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора подряда № МИТ/15072019 от 15 июля 2019 года исх. № 594 от 30.06.2020 г. и просил в соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса РФ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения уведомления: оплатить сумму неотработанного (непогашенного) авансового платежа в размере 12 160 822, 42 рублей на расчетный счет подрядчика, указанный в п. 18 договора, оплатить сумму задолженности за электроэнергию в размере - 56 014,53 руб., сумму штрафа (согласно п. 12.3. договора) в размере 145 246,72 руб., оплатить договорную неустойку (согласно п. 12.1. договора) в размере 6 969 689 руб., оплатить сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 452 373,20 руб., передать строительную площадку по акту приема-передачи (свободную от строительного мусора, принадлежащих субподрядчику инвентаря, инструментов, материалов, бытовок), передать результаты незавершенной работы (фактически выполненные работы), передать полный комплект надлежаще оформленной исполнительной документации на фактически выполненный объем работ, в соответствии с п. 7.2.9, 7.2.11 договора.

Таким образом, на основании п. 1 ст. 450.1 ГК РФ договор подряда № МИТ/15072019 от 15.07.2019 считается расторгнутым с даты получения ООО «МЕЙН ГРУП» настоящего уведомления. 

Согласно п. 14.1 договора, если сторона договора уклоняется от получения письма, то Договор считается расторгнутым на 6-й календарный день с даты отправки (дата отправления письма в указанный 6-тидневньш срок не входит).

Уведомление об отказе от исполнения договора было получено адресатом 06.07.2020. Соответственно, начиная с 06.07.2020, с момента расторжения договора (получения ответчиком уведомления об отказе от исполнения договора в результате одностороннего отказа заказчика от договора) у подрядчика отсутствуют правовые основания для дальнейшего использования перечисленного аванса и возникает обязанность по возврату неотработанного аванса, который по своей правовой природе в силу ст. 1102 ГК РФ является неосновательным обогащением.

Возражая против удовлетворения иска, и предъявляя встречные требования, ООО "МЭЙН ГРУП" сослалось на то, что  он передал заказчику акты по форме КС-2 о приемке выполненных работ на общую сумму 40 787 418,71 руб., а именно:

- акт на сумму 3 539 179,01 руб. о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 01.09.2019 (заказчик подписал);

- акт на сумму 4 936 354,00 руб. о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 11.09.2019 (заказчик подписал);

- акт на сумму 6 099 392,63 руб. о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 3 от 30.09.2019 (заказчик подписал);

- акт на сумму 14.715.322,12 руб. о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 4 от 15.12.2019 (заказчик не подписал, мотивированного отказа не представил);

- акт на сумму 11.497.170,62 руб. о приемке выполненных работ КС-2 № 5 от 15.12.2019 (заказчик не подписал, мотивированного отказа не представил).

Кроме того, актами КС-3 № 1 от 01.09.2019, № 2 от 11.09.2019, № 3 от 30.09.2019 подтверждается, что подрядчик выполнил работы на общую сумму 14.574.925,97 руб.; справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 4 от 14.12.2019, № 5 от 15.12.2019 подтверждается, что подрядчик выполнил работы на общую сумму 26.212.492,74 руб.

Таким образом, подрядчик передал заказчику документы (акты по форме -КС-2 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5; акты о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) , которые подтверждают, что Подрядчик выполнил работы на общую сумму 40.787.418,71 руб. В свою очередь, заказчик не подписал указанные выше акты выполненных работ, однако фактически принял все работы, которые указаны в данных актах.

05.12.2019 МЭЙН ГРУП" направило в адрес заказчика акты выполненных работу по форме КС-2 № 4 от 15.12.2019 и КС-2 № 5 от 15.12.2019; а также соответствующие данным актам и суммам в них справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 4 от 14.12.2019, №5 от 15.12.2019. Это подтверждается письмом исх. № 81, 82 от 05.12.2019

В соответствии с пунктом 10.1.2 договора заказчик должен был в течение 20 рабочих дней рассмотреть акты по форме КС-2, которые 05.12.2010 представил подрядчик, и либо принять выполненный объем работ от подрядчика и подписать акты, либо мотивированно отказаться от принятия работ с указанием недостатков в их выполнении.

Заказчик не подписал указанные выше акт выполненных работ по форме КС-2 № 4 и акт выполненных работ по форме КС-2 № 5, но при этом не заявлял мотивированный отказ от подписания актов, каких-либо претензий подрядчику не направил.

Следовательно, по мнению подрядчика, заказчик принял все работы, указанные в одностороннем акте выполненных работ по форме КС-2 № 4 от 15.12.2019 и акте выполненных работ КС-2 № 5 от 15.12.2019, и должен оплатить их. С учетом перечисленных заказчиком денежных средств его долг составляет 9.495.430 руб. 83 коп. (40.787.418,71 руб. (общая сумма работ, которые подрядчик выполнил и передал) — 31 291 987,88 рублей (сумма, которую заказчик выплатил за работы).

Кроме того, на основании п.12.2 договора в связи с нарушением срока оплаты работ, преданных ему по актам, указанным выше КС-2 №№ 4 и 5 подрядчик начислил неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченных  работ, за период с 13.01.2020 по 07.09.2020 в сумме 2.269.407 руб. 97 коп.    

Также, по мнению подрядчика,  заказчик обязан возместить ему убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Убытки подрядчика в результате одностороннего от исполнения договора заказчиком  составляют сумму 7.628.155,63 руб. (48.415.574,34 руб. (цена договора) — 40.787.418,71 руб.).

Как следует из пункта 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно части 1 статьи 711 ГК РФ установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. 753 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2 статьи 1102 ГК РФ).

Из подписанных в двустороннем порядке актов выполненных работ по форме КС-2 и справок по форме КС-3 следует, что ООО «МЕЙН ГРУП» были выполнены, а ООО "МОСКАПСТРОЙ - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1" приняты по договору подряда № МИТ/15072019 от 15.07.2019 работы на общую сумму 19.131.165,46 руб. 46 коп.: акты по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 №1 от 01.09.2019 г. на сумму 3.539.179,01 руб., №2 от 11.09.2019 г. на сумму 4.936.354,33 руб.), №3 от 30.09.2019 г. на сумму 6.099.392,63 руб., № 4 от 15.12.2019 г. на сумму  1.129.115,70 руб., № 5 от 16.12.2019 г. на сумму 3.427.123,79 руб.

При этом КС-3 № 4 на сумму выполненных работ в размере 15.704.041,67 руб. была подписана сторонами 15.12..2019 г., а КС-3 на сумму выполненных работ в размере  19.131.165,45 руб. – 16.12.2019 г.

ООО «МЭЙН ГРУП» предоставляет акты КС-2 № 4 от 15.12.2019 за отчетный период с 01.10.2019 по 15.12.2019 на сумму 14.715.322 руб. 12 коп. и № 5 от 15.12.2019 за отчетный период с 01.10.2019 по 15.10.2019 на сумму 11.497.170 руб. 62 коп. (которые никем не подписаны), и ссылается на отсутствие со стороны заказчика мотивированного отказа от подписания этих актов. 

Между тем, на исходящих письмах подрядчика, которыми он передавал спорные односторонние акты (исх. 81, 82 от 05.12.2019), стоит отметка сотрудника заказчика, сметчика ФИО5, о том, что данные акты не принимаются до подписания д/с на работы, указанные в КС-2, КС-3 №№ 4-5. 

Представитель заказчика в судебном заседании пояснил, что в спорные актах указаны виды и объемы работ, не предусмотренных договором, сметой. Согласованной сторонами. Дополнительное соглашение не подписано.  

И после передачи спорных актов, а именно: 15.12.2019 и 16.12.2019 стороны подписали КС-2, КС-3 № 4 от 15.12.2019 г. на сумму 1.129.115,70 руб., № 5 от 16.12.2019 г. на сумму 3.427.123,79 руб. за те же отчетные периоды, и на которые ссылается заказчик в своем иске. Акты подписаны со стороны заказчика и подрядчика генеральными директорами с проставлением печатей организаций. О фальсификации этих актов подрядчик не заявил. 

Таким образом, с учетом всех подписанных сторонами актов выполненных работ подтверждено выполнение работ на общую сумму 19.131.165,45 руб., доказательств выполнения работ на большую сумму до расторжения договора в сроки, указанные в нем, подрядчик не представил, с учетом перечисленных ему заказчиком денежных средств (31.291.987 руб. 88 коп.), сумма неотработанного аванса составляет 12.160.822 руб. 42 коп., и подлежит взысканию с подрядчика в виде неосновательного обогащения в порядке ст. 1102 ГК РФ. 

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения встречных требований ООО «МЭЙН ГРУП» о взыскании задолженности, неустойки, начисленной в связи с неоплатой спорной суммы, и убытков не имеется. При этом расторжение договора произведено заказчиком в связи с нарушением подрядчиком срока выполнения полного объема работ, предусмотренного договором, и такое право предусмотрено ст. 715 ГК РФ и п. 14.2.1 договора. В связи с чем, ссылка подрядчика на ст. 717 ГК РФ, когда заказчик обязан  возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу, в данном случае неправомерна. 

В силу п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 Гражданского кодекса РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Сумма процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами  в соответствии со ст. 395 ГК РФ, начисленных на сумму 12.160.822, 42 руб. за период с  07.07.2020 г. по 23.10.2020 г. (следующий день за днем получения ответчиком уведомления об отказе от договора в одностороннем порядке по дату составления искового заявления) составляет 155 582,10 руб.

Расчет процентов судом проверен и признан верным. 

При указанных обстоятельствах требование ООО "МОСКАПСТРОЙ - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1" в части взыскания процентов на основании ст. 395 ГК РФ также подлежит удовлетворению в заявленном размере. 

Согласно п. 12.1. договора за невыполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение №2), подрядчик вправе потребовать уплаты Субподрядчиком неустойки в размере 0,1 % (процента) от стоимости просроченных работ по договору за каждый календарный день просрочки до фактического их завершения.

Заказчиком  произведен следующий расчет неустойки: сумма, от которой произведен расчет неустойки: 29 284 408,88 руб. (сумма неисполненного обязательства), период для начисления неустойки: с 05.11.2019 г. (по истечении срока выполнения работ) по 06.07.2020 г. (расторжение договора): 29 284 408,88 руб. х 245 дн. х 0,1% = 7 174 680,18 руб.

Расчет судом проверен и признан верным. 

Контррасчет неустойки подрядчик не представил, о применении ст. 333 ГК РФ не заявил, а суд таких оснований не усмотрел, поскольку предусмотренный договором размере не превышает обычно применяемый в схожих правоотношениях. 

При указанных обстоятельствах требование заказчика о взыскании неустойки также подлежит удовлетворению в заявленном размере. 

Кроме того, заявлено о взыскании штрафа в сумме 145.246 руб. 72 коп. со ссылкой на п. 12.3 договора.  

Согласно п. 12.3. договора за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением нарушения сроков выполнения работ, подрядчик вправе потребовать от субподрядчика уплаты штрафа в размере 0,3 (процента) цены договора за каждый случай нарушения. Расчет: 48 415 574,34 руб. х 0,3% = 145 246,72 руб. 

Между тем, заказчик не обосновал, за какой именно факт неисполнения и какого именно обязательства со ссылкой на условия договора, он начисляет штраф. При этом за нарушение срока выполнения обязательств в объеме, предусмотренном договором, заказчик начислил неустойку, которая признана судом обоснованной. 

 При указанных обстоятельствах в удовлетворении этого требования суд отказывает. 

 Заказчик также заявил о взыскании задолженности за электроэнергию в сумме  56.014, 53 руб.

Однако доказательств в подтверждение этого не представил. В материалах дела отсутствуют и не указаны в приложении к иску доказательства несения заявленных расходов в указанном размере. Соответствующий акт, подписанный сторонами либо  признание этой задолженности подрядчиком не представлены.

 В связи с изложенным, в удовлетворении требования о взыскании указанной задолженности суд отказывает. 

            Расходы по уплате государственной пошлины по делу распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.  По иску ООО "МОСКАПСТРОЙ - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1" расходы по уплате государственной пошлины в размере, пропорциональном удовлетворенным требованиям, относятся на ответчика. 

По иску ООО "МЭЙН ГРУП" расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца. 

            На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 8, 11, 12, 307-310, 395, 702, 711, 753, 1102, 1107  ГК РФ, ст. ст. 8, 9, 71, 110, 123, 167-171, 180, 181АПК РФ, суд                   

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "МЭЙН ГРУП" в пользу ООО "МОСКАПСТРОЙ - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1" неосновательное обогащение в сумме 12.160.822 руб. 42 коп., проценты в сумме 155.582 руб. 10 коп., неустойку в сумме 7.174.680 руб. 18 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 120.220 руб. 62 коп. 

В удовлетворении остальной части иска отказать.

 В удовлетворении иска ООО "МЭЙН ГРУП" отказать. 

Взыскать с ООО "МЭЙН ГРУП" в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в сумме 119.965 руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

            Судья                                                                               Е.А. Абрамова