АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

дело № А84-7516/2022

24 марта 2023 года

город Севастополь

 

Резолютивная часть решения оглашена 23.03.2023. Полный текст решения составлен 24.03.2023. 

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Погребняка  А.С., при ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрев  дело  

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Экохолмовка»  (Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Холмовка,  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к Государственному унитарному предприятию города Севастополя по  газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз» (г. Севастополь  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельные требования относительно предмет спора:  

Государственного унитарного предприятия Республики Крым  «Крымгазсети» (Республика Крым, г.Симферополь; ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>),  

Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая  дирекция капитального строительства» (г.Севастополь;  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

о понуждении к исполнению обязательств по договору Код доступа к материалам дела: 

 

при участии в судебном заседании: 

от ООО «Экохолмовка»: ФИО2 – представитель по  доверенности;  

от ГУП «Севастопольгаз»: ФИО3 – представитель по  доверенности;  

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Экохолмовка"  обратилось в суд к Государственному унитарному предприятию города  Севастополя по газораспределению и газоснабжению "Севастопольгаз" о  понуждении к исполнению обязательств по договору № 296 от 27.09.2021 г. о  подключении (технологическом присоединении) объекта капитального  строительства к сети газораспределения; подключить объект капитального  строительства «Встроенная котельная» ООО «Экохолмовка»,  расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Бахчисарайский,  Красномакский сельский совет, из раздела земель коллективной  собственности КСП «Украина», поле № 21, участок № 5 (кадастровый номер  90:01:120501:1515) к сети газораспределения.  

Ответчик во встречном иске указал, что Исполнитель не имеет  технической возможности исполнить договор, т.к. Исполнитель  осуществляет свою деятельность на территории города Севастополь, а  указанный земельный участок расположен на территории Республики Крым.  Территориальное расположение земельного участка влияет на тариф, по  которому оплачивается подключенный газ, а так же на организацию, которая  осуществляет подключение (технологическое присоединение) объектов  капитального строительства к сети газораспределения.  

Кроме того, ГУП города Севастополя по газораспределению и  газоснабжению «Севастопольгаз» ссылается на то, что строительство участка  газопровода осуществлялось на основании контракта, заказчиком по  

 

которому выступало ГКУ города Севастополя «Единая дирекция  капитального строительства».  

В судебном заседании 23.03.2023 представитель ГУП города  Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз»  заявила об отказе от встречного иска к Обществу с ограниченной  ответственностью «Экохолмовка» о признании договора № 296 от 27.09.2021  о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального  строительства «Встроенная котельная» к сети газораспределения  расторгнутым.  

В судебном заседании 23.03.2023 оглашена резолютивная часть  определения, в соответствии с которой принят отказ ГУП города  Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз» от  встречного иска к Обществу с ограниченной ответственностью  «Экохолмовка» о признании договора № 296 от 27.09.2021 г. о подключении  (технологическом присоединении) объекта капитального строительства  «Встроенная котельная» к сети газораспределения расторгнутым,  производство по встречному иску по делу № А84-7516/2022 прекращено.  

Судом установлены следующие фактические обстоятельства по  делу.  

27.09.2021 между ООО «Экохолмовка» (Заявитель) и ГУП  «Севастопольгаз» (Исполнитель) был заключён Договор № 296 о  подключении (технологическом присоединении) объектов капитального  строительства к сети газораспределения (далее - Договор), согласно пункту  1.1 которого, Исполнитель принимает на себя обязательство по  подключению (технологическому присоединению) объекта капитального  строительства «Встроенная котельная» к сети газораспределения,  принадлежащей Исполнителю на праве собственности или ином законном  основании, с учётом максимальной нагрузки (часового расхода газа)  газоиспользующего оборудования.  

Обязательства по подключению должно было осуществляться в  

 

пределах земельного участка ООО «Экохолмовка», расположенного по  адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, КСП «Украина», поле №  21, участок № 5, кадастровый номер № 90:01:120501:1717.  

Подключение должно быть осуществлено в соответствии с  полученными Техническими условиями № 174-ТУ от 09.06.2021 (п. 1.2.  Договора).  

Согласно пункту 1.3 Договора, срок осуществления мероприятия по  подключению объекта и пуску газа составляет 8 месяцев со дня заключения  договора.  

В соответствии с пунктом 2.1 Договора, исполнитель обязан, в том  числе:  

разработать проектную документацию на создание (реконструкцию)  сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического  присоединения) на границе земельного участка Заявителя (проект  газоснабжения) и получить на нее положительное заключение экспертизы  (при необходимости создания сети газораспределения) в случае,  предусмотренном законодательством Российской Федерации;  

направить Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения  положительного заключения экспертизы на проектную документацию  информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического  присоединения) (при необходимости создания сети газораспределения);  

осуществить действия по созданию (реконструкции) сети  газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке  сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства  Заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 1.3  Договора;  

Во исполнение обязательств по Договору, в соответствии с пунктом  3.1.2 Договора, истец 17.11.2021 перечислил ответчику согласно платёжному  поручению № 202 за 1 этап работ аванс 50 % в размере 120 941 руб.  

Сумма в размере 35 % должна быть выплачены ответчику после  

 

обустройства сети газопровода, 15 % - после подписания акта выполненных  работ и подключении пуска газа.  

С учётом установленных договором сроков, срок сдачи работ и пуск  газа ГУП «Севастопольгаз» должен был быть осуществлён до 27.05.2022.  

Как указал истец, на дату обращения в суд с иском (02.09.2022)  обязательства по Договору № 296 от 27.09.2021 ответчиком не были  исполнены надлежащим образом.  

Ответчик в отзыве на исковое заявление ссылался на отсутствие  технической возможности подключения объекта истца. Также сослался на  нахождение земельного участка истца на территории другого субъекта  Российской Федерации (Республики Крым), что предполагает иной правовое  регулирование в области тарифов на поставку газа – отличных от  действующих на территории города Севастополя. Также ответчик сослался  на решение от 08.09.2022 об одностороннем отказе от исполнения договора.  

Выслушав пояснения представителей сторон, исследовав  фактические обстоятельства по делу, суд пришел к выводу об  отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований исходя  из следующего.  

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее – ГК РФ), по договору подряда одна сторона (Подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную  работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу  другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать  имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную  деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного  действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его  обязанности (статья 307 ГК РФ).  

В силу статьи 310 ГК РФ, односторонний отказ от принятых на себя  

 

обязательств по договору не допускается.  

С учётом установленных договором сроков, срок сдачи работ и пуск  газа ГУП «Севастопольгаз» должен был быть осуществлён до 27.05.2022.  

Согласно пункту 6.1, Договор может быть расторгнут или изменен по  соглашению Сторон, оформленному в письменной форме, а также по  требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным  Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.  

Согласно статье 407 ГК РФ, обязательство прекращается полностью  или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом,  другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение  обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях,  предусмотренных законом или договором.  

Согласно пункту 1 статьи 451 ГК РФ, существенное изменение  обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора,  является основанием для его изменения или расторжения, если иное не  предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение  обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько,  что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был  бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся  условиях.  

08.09.2022 года ГУП «Севастопольаз» направил в адрес ООО  «Экохолмовка» решение об одностороннем отказе от исполнения договора.  Представитель истца не отрицал факт получения указанного уведомления.  

Отказ от исполнения договора связан с тем, что Исполнитель не имеет  технической возможности исполнить договор, в связи с невозможностью  выполнения технологического присоединения земельного участка ООО  «Экохолмовка» расположенного по адресу: Республика Крым,  Бахчисарайский район, КСП «Украина», поле № 21, участок № 5,  кадастровый номер № 90:01:120501:1717, поскольку Исполнитель  осуществляет свою деятельность на территории города Севастополь, а  

 

указанный земельный участок расположен на территории Республики Крым,  что влияет как на тариф, по которому оплачивается потребляемый газ, так и  на организацию, которая осуществляет подключение (технологическое  присоединение) объектов капитального строительства к сети  газораспределения.  

В соответствии с п. 29 Постановления Правительства Российской  Федерации от 13.09.2021 года № 1547 «Об утверждении Правил  подключения (технологического присоединения) газоиспользующего  оборудования и объектов капительного строительства к сетям  газораспределения и о признании утратившим силу некоторых актов  Правительства Российской Федерации» основанием для отказа от  заключения договора о подключении является отсутствие технической  возможности подключения (технологического присоединения) объекта  капитального строительства к сети газораспределения исполнителя.)  

Поскольку действие заключенного сторонами договора прекращено на  основании решения исполнителя об одностороннем отказе, такое решение  получено истцом и вступило в законную силу, основания для удовлетворения  требований о понуждении к исполнению обязательств по договору  отсутствуют.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

В удовлетворении иска отказать. 

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со  дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не  отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать  первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия через Арбитражный суд города Севастополя.  

Судья А.С. Погребняк 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.03.2023 8:51:00

Кому выдана Погребняк Алексей Станиславович