Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

http://kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

 Дело №

А21-6461/2024

«12»

ноября

2024 года

Резолютивная часть решения объявлена  

 «07» 

ноября

2024 года

Решение изготовлено в полном объеме   

 «12»

 ноября

2024 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Калининградская служба заказчика» к предпринимателю ФИО2 о взыскании 37 579,69 рублей 

при участии в заседании:

от истца: ФИО3 по доверенности

от ответчика: н/я

установил. 

Муниципальное казенное учреждение «Калининградская служба заказчика» обратилось в суд с иском к предпринимателю ФИО2 о взыскании пени в сумме 32 579,69 рублей, штрафа в сумме 5000 рублей.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ.

Судом установлено.

Между сторонами был заключен муниципальный контракт от 26.10.2022 года № 245/2022.

По условиям контракта предприниматель (подрядчик) обязался выполнить работы по капитальному ремонту помещений 

<

...> в учреждение (заказчик) обязалось работы принять и оплатить.

В соответствии с пунктом 2.2 контракта срок выполнения работ 60 календарных дней.

В соответствии с пунктом 4.1 контракта стоимость работ согласована 762 098 рублей.

В соответствии с пунктами 5.2, 5.3 контракта оплата за выполненные работы производится на основании подписанного акта; при ненадлежащем выполнении работ составляются предписания; в случае невыполнения предписаний сумма, подлежащая оплате за работы, корректируется.   

Разделом 11 контракта определена имущественная ответственность сторон за нарушение условий договора.

В соответствии с пунктом 13.4 контракта споры по нему рассматриваются в Арбитражном суде Калининградской области.

Из материалов дела следует, что 28.12.2022 года. 17.01.2023 года, 02.02.2023 года, 20.03.2023 года, 10.04.2023 года в адрес подрядчика направлялись предписания об устранении нарушений в работе.

21.06.2023 года заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с нарушением срока выполнения работ.

Согласно пояснениям представителя заказчика подрядчик результат работ не сдал, исполнительную документацию не представил, требования предписаний не исполнил.

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 15.04.2024 года по делу № А21-11201/2023 с подрядчика в пользу заказчика взысканы убытки в сумме 69752,52 рублей за демонтаж результата работ. Решение суда вступило в силу. 

По настоящему делу заказчик просит взыскать по положениям пункта 11.3 контракта пени за нарушение срока выполнение работ за период с 25.12.2022 года по 13.06.2023 года в сумме 32 579,69 рублей и по положениям пункта 11.5 контракта штраф в сумме 5000 рублей за неисполнение обязательств по контракту.

Доказательства сдачи результата работ по контракту подрядчиком не предоставлено, односторонний отказ заказчика от исполнения контракта не оспорен, требования по праву и по размеру также не оспорены.

При установленных обстоятельствах требования истца подлежат удовлетворению на основании положений статьи 330 ГК РФ, пунктов 11.3, 11.5 контракта. 

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Калининградская служба заказчика» (ОГРН 

<

***>) неустойку в сумме 32 579,69 рублей, штраф в сумме 5000 рублей, в доход Федерального бюджета госпошлину в сумме 2000 рублей.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья О.Н.Шкутко