АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-11203/2017

г. Чебоксары

06 декабря 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 декабря 2017 года.

 

Арбитражный суд в составе: судьи Васильева Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Михайловой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "СтройТрест21", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 428034, 

<

...>,

к обществу с ограниченной ответственностью "Горномарийская строительная компания", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 425350, 

<

...>,

о взыскании 1314195 руб. 68 коп.,

при участии:

от истца - ФИО1 по доверенности от 16.05.2017,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "СтройТрест21" (далее – истец, ООО "СтройТрест21") обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Горномарийская строительная компания" (далее – ответчик, ООО "Горномарийская строительная компания") о взыскании 1314195 руб. 68 коп., в том числе 1250214 руб. 98 коп. долга по договору подряда от 12.07.2016 №35 согласно справкам и актам от 10.01.2017 и от 27.02.2017, 63980 руб. 70 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.01.2017 по 22.09.2017 и далее по день фактической оплаты долга (в редакции утонения искового заявления от 16.10.2017).

В судебном заседании представитель истца иск поддержала. Ранее в дополнительных пояснениях от 13.10.2017 истец указал, что в соответствии с прилагаемым актом сверки взаимных расчетов задолженность ООО "Горномарийская строительная компания" в пользу ООО "СтройТрест21" составляет 3384560 руб. 80 коп. Исковые требования ООО "СтройТрест21" к ООО "Горномарийская строительная компания" о взыскании задолженности по вышеуказанному договору подряда в сумме 2134345 руб. 81 коп. были удовлетворены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 29.06.2017  по делу № А79-3036/2017.

Таким образом, остаток задолженности ООО "Горномарийская строительная компания" составляет 1250214 руб. 98 коп.

Ответчик, в силу статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считающийся извещенным надлежащим образом, своего представителя в суд не направил. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в его отсутствие.

Выслушав представителя истца и изучив материалы дела, суд установил следующее.

Обществом с ограниченной ответственностью "Горномарийская строительная компания" (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "СтройТрест21" (подрядчик) заключен договор подряда № 35 от 12.07.2016 (далее – договор), по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению собственными силами работ по строительству телятника на 350 голов в д. Русские Норваши Янтиковского района ЧР.

Согласно пункту 3.1 договора стоимость поручаемых подрядчику работ определяется договорной ценой и составляет 14551200 руб. 

Срок выполнения работ: 10 недель со дня подписания договора (пункт 1.2 договора).

В соответствии с частью 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Ссылаясь на выполнение работ по договору и неоплату ответчиком стоимости выполненных истцом работ в сумме 1250214  руб. 98 коп., истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту  3.2 договора оплату  за выполненные  работы  заказчик  производит  поэтапно  перечислением  на расчетный счет истца подрядчика  в течение 7 банковских  дней  на основании  подписанных  обеими сторонами  акта  о приемке выполненных  работ  по форме КС-2, справки  о стоимости выполненных  работ и затрат по форме КС-2.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В подтверждение факта выполнения работ по договору истцом представлены подписанные сторонами акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат от 10.01.2017 №5 на сумму 105668 руб. 62 коп., от 27.02.2017 №4 она сумму 367243 руб. 72 коп., от 27.02.2017 №7 на сумму 106916 руб. 51 коп., от 27.02.2017 № 8 на сумму 71809 руб. 58 коп., от 27.02.2017 №9  на сумму 106232 руб. 12 коп., от 27.02.2017 №11 на сумму 143671 руб. 17 коп., от 27.02.2017 №12 на сумму 348673 руб. 26 коп.

Наличие задолженности ответчик не оспорил, доказательств оплаты, как того требует статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представил. 

Согласно пункту 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании суммы задолженности подлежит удовлетворению в заявленном размере. 

Также истцом заявлено требование о взыскании 63980 руб. 70 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.01.2017 по 22.09.2017 и далее по день фактической оплаты долга.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Представленный истцом расчет процентов за период с 20.01.2017 по 22.09.2017 судом проверен и признан верным. С 23.09.2017 проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат взысканию по день фактической уплаты долга, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

Расходы по уплате государственной пошлины суд на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относит на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Горномарийская строительная компания" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СтройТрест21" 1250214 (Один миллион двести пятьдесят тысяч двести четырнадцать) руб. 98 коп. долга, 63980 (Шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят) руб. 70 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.01.2017 по 22.09.2017. Начиная с 23.09.2017 и далее по день фактической уплаты долга производить начисление и взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму долга, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Горномарийская строительная компания" в доход федерального бюджета 26142 (Двадцать шесть тысяч сто сорок два) руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики в течение месяца с момента его принятия.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                   Е.В. Васильев