Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-2948/2021

29 июня 2021 года

город Якутск

 

Резолютивная часть решения объявлена 23.06.2021

Решение в полном объеме изготовлено 29.06.2021

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Гуляевой А. В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "РСМ-Строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Завод базальтовых материалов" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 10 190 474,56 рублей,

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 11.05.2021, представлен диплом,

от ответчика: не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "РСМ-Строй" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Завод базальтовых материалов" о взыскании задолженности по договору подряда от 12.07.2019 № 124 в размере 10 190 474,56 рублей.

В материалы дела от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований. Истец, указывая на то, что между истцом и ответчиком произведен взаимозачет, уточнил исковые требования, с учетом уточнения просит взыскать 2 706 474,56 руб.

Представитель истца поддержал уточнение исковых требований.

Суд в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает уточнение исковых требований.

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик представителей на судебные заседаний не направил, копии определений суда от 04.05.2021 направлены ответчику по адресам:

- 678000, Респ. Саха /Якутия/, у. Хангаласский, 

<

...> (почтовый идентификатор 67799959009268);

- 678000, Респ. Саха /Якутия/, 

<

...> (почтовый идентификатор 67799959009251).

Почтовое отправление с идентификатором 67799959009251 вручено по указанному адресу согласно отчету об отслеживании отправления.

Почтовое отправление с идентификатором 67799959009268 возвращено органом связи с отметкой «Истек срок хранения».

В силу норм ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Кроме того, информация о времени и месте судебного заседания размещена на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://yakutsk.arbitr.ru).

В материалы дела отзыв от ответчика не поступил.

Частью 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления. 

Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Согласно частям 1, 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью "РСМ-Строй" (истец, подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Завод базальтовых материалов" (ответчик, заказчик) заключен договор подряда от 12.07.2019 № 124, согласно пункту 1.1. договора подрядчик обязуется выполнить на объекте «Спортивный комплекс с универсальным залом и плавательным бассейном в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса» (участок 1) комплекс работ по поставке, монтажу и наладке согласно приложению №1, являющейся неотъемлемой частью договора.

В соответствии с пунктом 1.2. договора подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные договором, включая возможные работы, прямо в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения работ на объекте и выполнения обязательств по договору, указанные в п. 1.1 договора собственными силами в соответствии с рабочими чертежами (шифры: 3360-1-ОВ, 3360-1-АОВ, 3360-1-ОВ.1, 3360-1-ВК, 3360-2-АС, 3360-2-ЭОМ, 3360-2-ВК, 3360-46-ОВ, 3360-4а-ОВ, 3360-4а-КВ, 3360-46-ВК, 3360-2-ОВ, 3360-За,Зб-ВК, 3360-За,б-ОВ, 3360-2,Заб,4а,б-АВК, 3660-За,Зб,4а,4б-АС), используя свои строительные материалы, инструменты, технологические материалы и оборудование.

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат и уплатить обусловленную договором цену (пункт 1.3. договора).

Стоимость работ по договору определена в приложении №1 и составляет 71 798 073 рубля, в том числе НДС.

Пунктом 2.2. договора предусмотрено, что договорная цена является окончательной и изменению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных п. 8.3 договора.

Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- Начало работ исчисляется с момента двустороннего подписания настоящего договора;

- Срок завершения общестроительных работ до 30.09.2019;

- Срок полного завершения работ до 30.08.2020 (пункт 3.1. договора).

Позднее дополнительным соглашением от 30.08.2020 № 3 изменен срок завершения работ, срок продлен до 20.12.2020.

Пунктом 6.1. договора предусмотрено, что расчеты между заказчиком и подрядчиком производятся перечислением денежных средств на расчетный счет подрядчика, согласно выставленному счету, в течение 10 рабочих дней после подписания актов приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Ежемесячно подрядчик представляет заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2), сводный расчет затрат к нему, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (пункт 6.2. договора).

В соответствии с пунктом 6.3. договора заказчик приступает к проверке предъявленных подрядчиком актов (КС-2, КС-3 и исполнительной документации) не ранее 25 числа отчетного месяца. Заказчик обязан в течение 10-ти рабочих дней с даты начала проверки, подписать либо направить мотивированный отказ от подписания актов о приемке выполненных работ. Оплата принятых работ осуществляется заказчиком в течение 10 рабочих дней, с момента подписания актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат.

Пунктом 6.4. договора предусмотрено, что оплата 10 000 000 рублей, в том числе НДС от цены договора производится путем предоставления подрядчику базальтового утеплителя «Сахабазальт». Позднее указанный пункт исключен из договора подряда от 12.07.2019 № 124 дополнительным соглашением от 05.12.2019 № 2.

Предоплата по данному договору составляет 10% от общей суммы договора. Заказчик обязан направить авансовый платеж не позднее 10 календарных дней со дня подписания договора (пункт 6.5. договора).

Выполненные исполнителем работы по договору приняты заказчиком в установленном договором порядке без замечаний согласно актам о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) от 25.07.2019 № 1, от 07.10.2019 № 2, от 29.08.2019 № 3, от 25.11.2019 № 4, от 09.01.2020 № 5, от 21.02.2020 № 6, от 25.05.2020 № 7, от 02.07.2020 № 8, от 25.07.2020 № 9, от 24.09.2020 № 10, от 01.10.2020 № 11, от 22.10.2020 № 12, от 15.12.2020 № 13 на сумму 72 062 773,02 руб.

Ответчиком произведена оплата на общую сумму 58 785 920,60 руб., в том числе платежными поручениями от 05.07.2019 № 884, от 03.09.2019 № 1075, от 04.10.2019 № 1273, от 14.10.2019 № 310741, от 12.11.2019 № 310799, от 29.11.2019 № 1466, от 05.12.2019 № 310911, от 28.12.2019 № 1503, от 24.04.2020 № 415, от 29.05.2020 № 370, от 29.06.2020 № 569, от 14.07.2020 № 138, от 28.07.2020 № 183, от 28.08.2020 № 258, от 02.10.2020 № 347, от 05.10.2020 № 677, от 30.10.2020 № 695, от 30.11.2020 № 413, оплата также произведена поставкой базальтового утеплителя "Сахабазальт" на сумму 2 821 677,84 руб.

В связи с отсутствием оплаты работ в полном объеме по вышеуказанному договору, истец направил ответчику письмо от 01.02.2021 № 5, претензионное письмо от 09.02.2021 № 8 о погашении задолженности в размере 12 372 970,21 руб., в том числе задолженности  по договору подряда от 12.07.2019 № 124.

Ответчик задолженность не погасил, в этой связи, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением 27.04.2021.

Из материалов дела усматривается, что претензия от 09.02.2021 № 8 получена ответчиком 09.02.2021.

Таким образом, досудебный порядок урегулирования спора истцом соблюден.

Суд, изучив и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации названы договоры и иные сделки.

В силу требований статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Между сторонами возникли правоотношения, вытекающие из договора подряда, на которые распространяются положения главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

По договору подряда от 12.07.2019 № 124 согласно представленным актам о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) от 25.07.2019 № 1, от 07.10.2019 № 2, от 29.08.2019 № 3, от 25.11.2019 № 4, от 09.01.2020 № 5, от 21.02.2020 № 6, от 25.05.2020 № 7, от 02.07.2020 № 8, от 25.07.2020 № 9, от 24.09.2020 № 10, от 01.10.2020 № 11, от 22.10.2020 № 12, от 15.12.2020 № 13 истец выполнил работы, а ответчик принял работы на сумму 72 062 773,02 руб.

Данные акты и справки подписаны ответчиком без возражений и разногласий, ответчик факт выполнения работ по указанному договору не оспаривает.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

С учетом изложенного, представленные акты формы КС-2 и справки формы КС-3 подтверждают факт выполнения работ на сумму 72 062 773,02 руб.

Материалами дела подтверждается, что ответчиком произведена частичная оплата работ по договору от 12.07.2019 № 124 на сумму 61 607 598,44 руб.

Из акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2021-12.04.2021 следует, что задолженность заказчика перед подрядчиком составляет 10 190 474,56 руб.

В процессе рассмотрения дела истцом представлен акт взаимозачета от 18.06.2021 № 10, из которого следует, что между сторонами произведен взаимозачет на сумму 7 484 000 руб. Из акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2021-18.06.2021 следует, что задолженность заказчика перед подрядчиком составляет 2 706 474,56 руб.

Ответчик факт наличия указанной задолженности не оспаривает, доказательств оплаты работ в полном объеме по указанному договору ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

При таких обстоятельствах, суд считает требование истца о взыскании задолженности в размере 2 706 474,56 руб. обоснованным и подлежащим удовлетворению.

При подаче искового заявления истцу предоставлена отсрочка уплаты госпошлины.

С учетом удовлетворения исковых требований в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  госпошлина в размере 36 532 рублей подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Завод базальтовых материалов" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "РСМ-Строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) основной долг в размере 2 706 474,56 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Завод базальтовых материалов" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 36 532 рубля.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

 

Судья                                                                                                А.В. Гуляева