Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Волгоград                                                                                            Дело №А12-42590/2017

«15» февраля 2018 года

Резолютивная часть решения оглашена 08 февраля 2018 года

Полный текст решения изготовлен 15 февраля 2018 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Шутова С.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бессараб С.Н.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Геокомплексизыскания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности,

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1, доверенность от 10.10.2016г., ФИО2, доверенность №02 от 11.09.2017г., ФИО3, доверенность №01 от 28.04.2017г.,

от ответчика – ФИО4, доверенность №7993-9 от 17.11.2017г.,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Геокомплексизыскания» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области о взыскании основного долга в сумме 2 432 500 руб.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив фактические обстоятельства, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 26.07.2016г. между истцом (Генеральный проектировщик) и ответчиком (Заказчик) заключен государственный контракт №0329100003016000017-0001402-01, по условиям которого Генеральный проектировщик принимает на себя обязательства выполнить проектные и изыскательские работы по объекту: «Реконструкция пожарного депо специальной пожарной части №54 ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы №23 МЧС России», 

<

...>» в соответствии с требованиями и условиями документации об электронном аукционе на право заключения государственного контракта, а Заказчик принимает на себя обязательство по оплате выполненных работ в порядке и на условиях предусмотренных контрактом.

Согласно пункту 1.7 контракта, результатом работ являются:

- проектная документация, прошедшая государственную экспертизу и в отношении которой выдано положительное заключение экспертизы и достоверности определения сметной стоимости;

- рабочая документация;

- технические отчеты о выполненных инженерных изысканиях; технический отчет о результатах обследования;

- энергетический паспорт здания и отчет об энергетическом обследовании;

- откорректированная топографическая съемка участка с подземными коммуникациями (масштаб 1:500, высота сечения рельефа 0.5 м);

- ведомость ресурсов с указанием функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик товаров (в том числе, оборудования, мебели, оргтехники, инвентаря и др.), использование которых предполагается при выполнении работ по реконструкции объекта.

В соответствии с пунктом 2.1 контракта, его цена составляет 2 432 500 руб.

Согласно пункту 2.6 контракта, оплата работ производится по факту выполнения всего комплекса работ, в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, на основании выставленных Генеральным проектировщиком счетов, счетов-фактур (при наличии).

Работы считаются принятыми Заказчиком с момента подписания сторонами акта выполненных работ. В случае если в сроки, установленные разделом для приемки работ, будут обнаружены недостатки, делающие невозможным приемку выполненных работ, Заказчик направляет Генеральному проектировщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ (пункт 4.3 контракта).

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу части 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Во исполнение принятых на себя обязательств по контракту истец 22.09.2017 направил ответчику результат выполненных работ, а именно проектную документацию в количестве 4 экземплярах, содержащую результаты инженерных изысканий, энергетический паспорт здания и отчет об энергетическом обследовании, откорректированная топографическая съемка, рабочую документацию в 4 экземплярах, содержащую смету на строительство, положительные заключения государственной экспертизы, электронный носитель в PDF-формате, что подтверждается накладной приема передачи №1 от 22.09.2017, подписанный представителями сторон, а также акт выполненных работ №12 от 20.09.2017.

Письмом №200/17 от 26.09.2017, полученным ответчиком 27.09.2017, истец направил редактируемый формат ПРД и договор о безвозмездном отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности.

28.09.2017 ответчик отказался от приемки работ, указав на отсутствие оригиналов проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий; подписанного правообладателем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности проект договора о безвозмездном отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности; энергетического паспорта здания; оригинала откорректированной топографической съемки; ведомости ресурсов; проектной документации в электронном виде; рабочей документации в электронном виде.

Письмом №227/17 от 29.09.2017, полученным ответчиком 02.10.2017, истец повторно направил договор о безвозмездном отчуждении исключительного права, а также выразил несогласие с предъявленными замечаниями, указав на то, что энергетический паспорт здания входит в состав раздела 10.1 проектной документации, отчет об энергетическом обследовании находится в подразделе 12.1, откорректированная топографическая съемка представлена в техническом отчете по инженерно-геодезическим изысканиям ведомость ресурсов находится в разделе 16, проектно-сметная и рабочая документация в электронном виде в редактируемом формате направлена с письмом №200/17 от 26.09.2017.

16.10.2017 истец направил ответчику оригиналы титульных листов, подписанные лицами, принимавшими участие в разработке документации, к проектной документации и рабочей документации, результатам инженерных изысканий, оригинал технического отчета, оригиналы информационно-удостоверяющих листов, энергетический паспорт, технический отчет по разработке энергетического паспорта, договор о безвозмездном отчуждении исключительного права.

Указанные документы ответчиком получены и представлены на обозрение суду.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 года № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

В соответствии с частью 1 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (часть 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, учитывая, что работы выполнены истцом в полном объеме, что подтверждается государственными экспертизами, результаты работ переданы ответчику, Заказчиком предъявлялись замечания не содержанию выполненных работ, а к форме их сдачи-приемки, суд признает мотивы отказа ответчика от приемки выполненных работ необоснованными.

С учетом изложенного, исковые требования о взыскании основного долга в сумме 2 432 500 руб. подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в сумме 35 163 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Геокомплексизыскания» основной долг в сумме 2 432 500 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 35 163 руб.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                     С.А.Шутов