5/2023-21129(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-22498/2022

г. Владивосток

14 декабря 2023 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального казённого учреждения  Уссурийского городского округа "Служба единого заказчика - застройщика" (ИНН  

2511031940 , ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Векторстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по контракту от 16.11.2016 № 2770/51 

 Руководствуясь статьями 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Векторстрой» в  течение четырех месяцев со дня вступления решения в законную силу  безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по контракту от  16.11.2016 года № 2770/51 на выполнение работ по строительству объекта  «Объект похоронного назначения (кладбище), адрес ориентира: 2000 м по  направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за  пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, 

<

...>. 1 этап, в рамках гарантийных обязательств, а именно  выполнить работы:  

1. Устранить отсутствие затирочной смеси в швах между напольными  керамогранитными плитами.  

2. Устранить неравномерное примыкание покрытия полов из керамогранитных плит к  стенам.  

3. Устранить трещины в штукатурке и стенах, а также в местах стыка плит перекрытия  здания.  

4. Устранить отслоение отделочных слоев плиты перекрытия. 

5. Выполнить работы по устранению локальных участков с различными зазорами в  местах стыка навесных фасадных панелях.  

6. Устранить поражение поверхностей отмостки биодеструкторами. 

7. Устранить отклонения по монтированию распаянных коробок системы,  

восстановить отделку стен в месте установки коробок. 

8. Устранить коррозию стальных полос системы заземления. 

9. Произвести замену поврежденных кабель-каналов для прокладки кабелей.  

10. Произвести замену неправильно подобранных торцевых накладных планок  замков (конфигурация и размеры) межкомнатных дверей.  

11. Произвести работы по устранению локальных участков с отсутствием  закрепления стальных воздуховодов к вытяжным шкафам и между собой.  

12. Устранить провалы асфальтобетонного покрытия, примыкающего к  общественному туалету, а также разрушение цементно-песчаного покрытия на  входах в общественный туалет.   

13. Установить отсутствующие заглушки дренажных отверстий оконных блоках из  ПВХ профилей.  

14. Произвести монтаж порогов из керамогранитных плит высотой 20 мм в 

санузлах. 

15. Демонтаж окон из ПВХ профилей. Выполнить монтаж деревянных окон с  решетками из брусков, с ранее выполненным демонтажем окон из ПВХ  профилей.  

16. Установить санитарно-технические перегородки в санузлах с дверями.   

17. Выполнить монтаж вытяжного короба из выгребной ямы общественного туалета  согласно проекту.  

18. Выполнить закрепление кабеля электрического обогрева в водосточных трубах.  

19. Устранить несоответствие проекту конструкции покрытия общественного  туалета (лист 27 альбома 68/31 06 15 235 (I-III)-КЖ), а именно: вылет карниза,  сечения стропил и обрешетки. Произвести закрепление стропил к стенам  скрутками из проволоки 2Ø4 Вр-I в конструкции покрытия общественного  туалета.  

20. Смонтировать воздуховод из стальной оцинкованной стали и вентиляционная  решетка системы естественной вентиляции ВЕ13 в помещении электрощитовой.  

21.  В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Векторстрой" в пользу  

муниципального казённого учреждения Уссурийского городского округа "Служба  

единого заказчика - застройщика" 6 000 рублей расходов по оплате государственной  

пошлины по иску. 

 Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя после вступления  

решения в законную силу. 

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  

течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  

Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  

дня вступления решения в законную силу. 

Судья Плеханова Н.А.