АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Дело № А43-21023/2024 

г. Нижний Новгород «17» сентября 2024 года 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

Судьи Левашовой Елены Алексеевны (шифр дела 34-274) 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником ФИО1  

рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Приволжские Электрические  сети" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ответчику: публичному акционерному обществу "Россети Центр и Приволжье" (ИНН  

<

***>; ОГРН 

<

***>)  

о понуждении заключить договор 

при участии представителей:  

 от истца: ФИО2 (доверенность от 26.07.2023),  от ответчика: ФИО3 (доверенность от 01.01.2024),  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Понудить ПАО «Россети Центр и Приволжье»» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) заключить договор об осуществлении технологического  присоединения с ООО «ПЭС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) на следующих  условиях:  

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. По настоящему договору «Сетевая организация» принимает на себя обязательства по  осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств  «Заявителя»(далее – технологическое присоединение):  

-трансформаторной подстанции ТП-2611, расположенной по адресу: Нижегородская  область, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов   №№ 27, 35 (участок 12),в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого  хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению  энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае  необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им  объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов  электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:  

1.1. Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего: 2681 кВт; 

1.1.1. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих  устройств всего: 1981 кВт;  

1.1.2.Максимальная присоединяемых энергопринимающих устройств всего: 700 кВт;  

1.2. Категория по надежности электроснабжения: -II (вторая); 

1.3. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется  технологическое присоединение: - 6 кВ.  

«Заявитель» обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в  соответствии с условиями настоящего договора.  

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта:  «трансформаторная подстанция ТП-2611, расположенная по адресу: Нижегородская  область, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов   №№ 27, 35 (участок 12)».  

3. Технологическое присоединение осуществляется: - ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.628 ПС 110/6 «Кировская»; - ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.605 ПС 110/6 «Кировская». 

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора  (Приложение № 1 к настоящему договору).  

Срок действия технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения  настоящего договора.  

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения настоящего договора. 

При нарушении «Заявителем» обязательств по оплате, в соответствии с п.11  настоящего договора, «Сетевая организация» аннулирует заявку на технологическое  присоединение.  

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.«Сетевая организация» обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том  числе по выполнению возложенных на «Сетевую организацию» мероприятий по  технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными  лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые  энергопринимающие устройства «Заявителя», указанные в технических условиях;  

в течение 10 (десяти) дней со дня уведомления «Заявителем» «Сетевой  организации» о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения  технических условий «Заявителем»;  

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих  устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти  по технологическому надзору;  

не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня уведомления «Заявителем» о получении  разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по  технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов «Заявителя» (при  необходимости), с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора,  осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств «Заявителя» к  электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить  при участии «Заявителя» акт об осуществлении технологического присоединения и  направить его «Заявителю».  

7. «Сетевая организация» при невыполнении «Заявителем» технических условий в  согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической  возможности технологического присоединения вправе по обращению «Заявителя»  продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не  взимается.  

8.«Заявитель» обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том  числе по выполнению возложенных на «Заявителя» мероприятий по технологическому  присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые  энергопринимающие устройства «Заявителя», указанные в технических условиях;  

организовать уведомление о выполнении технических условий (если в соответствии  с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности  разработка проектной документации является обязательной);  

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах  границ участка «Заявителя», предусмотренных техническими условиями, уведомить  «Сетевую организацию» о выполнении технических условий и представить копии  разделов проектной документации, предусматривающих технические решения,  обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме  внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству  электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае  если такая проектная документация не была представлена заявителем в «Сетевую  организацию» до направления «Заявителем» в «Сетевую организацию» уведомления о  выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской  Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации  является обязательной);  

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих  устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по  технологическому надзору;  

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной  власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых  объектов;  

после осуществления «Сетевой организацией» фактического присоединения  энергопринимающих устройств «Заявителя» к электрическим сетям, фактического  приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении  технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от  подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного акта от  «Сетевой организации»;  

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора  обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;  

уведомить «Сетевую организацию» о направлении заявок в иные сетевые  

организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в  отношении которых применяется категория надежности электроснабжения,  предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.  

9.«Заявитель» вправе при невыполнении им технических условий в согласованный  срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности  технологического присоединения обратиться в «Сетевую организацию» с просьбой о  продлении срока действия технических условий.  

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

10.Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с  Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25 ноября 2022  г. № 49/47, в следующем порядке:  

P = С1.1. + С1.2.2., где: 

Р – расходы на покрытие расходов на технологическое присоединение  энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов  электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на  подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку  сетевой организацией выполнения технических условий заявителям, указанным в абзаце  седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за  технологическое присоединение к электрическим сетям (рублей);  

С1.1. - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой  организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий  заявителю,  

 С1.2.2. - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на  

проверку выполнения технических условий Заявителями, указанным в абзаце седьмом  

пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое  

присоединение к электрическим сетям, 

и составляет 13 816,92 (тринадцать тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 92  копейки, в том числе НДС 20% в сумме 2 302,82 (две тысячи триста два) рубля 82  копейки:  

P = 2 787,51 + 8 726,59 = 11 514,1 рублей (без НДС); P = 11 514,1 * 1,2 = 13 816,92 рублей (с НДС). 

11.Оплата по договору производится «Заявителем». 

«Заявитель» обязуются надлежащим образом исполнять указанные в разделе III  настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое  присоединение.  

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется «Заявителем» в  объеме 100 процентов, в течение тридцати календарных дней с даты заключения  настоящего договора, что составляет 13 816,92 (тринадцать тысяч восемьсот  шестнадцать) рублей 92 копейки, в том числе НДС 20% в сумме 2 302,82 (две тысячи  триста два) рубля 82 копейки.  

12. Датой исполнения обязательства «Заявителя» по оплате расходов на  технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или  на расчетный счет «Сетевой организации».  

 IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

СТОРОН. 

13. «Заявитель» несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки  присоединения энергопринимающих устройств заявителя.  

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон  или в судебном порядке.  

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по  основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  

16. «Заявитель» вправе при нарушении «Сетевой организацией» указанных в  настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке  расторгнуть настоящий договор.  

Нарушение «Заявителем» установленного договором срока осуществления  мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими  условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств -  мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии,  что «Сетевой организацией» в полном объеме выполнены мероприятия по  технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает  ранее указанного нарушенного «Заявителем» срока осуществления мероприятий по  технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения  договора по требованию «Сетевой организации» по решению суда.  

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по  технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить  другой стороне неустойку, равную 0,03 процента от указанного общего размера платы за  каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении  срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению «Заявителем»  не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим  абзацем порядке за год просрочки.  

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по  технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить  понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью  принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего  пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты  

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему  договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством  Российской Федерации.  

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием  обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Сторонами  настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение  Сторонами обязательств по настоящему договору.  

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении  настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством  Российской Федерации.  

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 21. Настоящий договор считается заключенным с момента вступления в  законную силу решения суда.  

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

22. Приложение № 1 Технические условия. 

23. Приложение № 2 Заявка на технологическое присоединение  энергопринимающего устройства «Заявителя» Н/ЦЦ-НН-9677270-ПТП от 28.12.2023г.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям 

1. Сетевая организация: Публичное акционерное общество «Россети Центр и  

Приволжье». 

2. Полное наименование «Заявителя»: Общество с ограниченной  

ответственностью «Приволжские электрические сети». 

3. Наименование энергопринимающих устройств «Заявителя»: 

- трансформаторная подстанция ТП-2611, расположенной по адресу:  

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Украинская, в 30 м  

от жилых домов №№ 27, 35 (участок 12). 

4. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения  

которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих  

устройств «Заявителя»: 

«трансформаторная подстанция ТП-2611, расположенной по адресу:  

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Украинская, в 30 м  

от жилых домов №№ 27, 35 (участок 12).» 

5. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств:  

700 кВт. 

5.1. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств:  

1981 кВт. 5.2. Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего: 2681 кВт. 

6. Категория по надежности электроснабжения: 

- 395,9 кВт - I (первая); - 2190,8 кВт – II (вторая); - 94,37 – III (третья). 

7. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется  

технологическое присоединение: 6 кВ. 8. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств «Заявителя»: 2024 г. 

9. Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих  

устройств по каждой точке присоединения: 

- ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.628 ПС 110/6 «Кировская» (1340,5 кВт, в послеаварийном  

режиме 2681 кВт); 

- ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.605 ПС 110/6 «Кировская»(1340,5 кВт, в послеаварийном  

режиме 2681 кВт). 10. Основной источник питания: 

- ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.628 ПС 110/6 «Кировская»; 

- ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.605 ПС 110/6 «Кировская». 11. Резервный источник питания: - ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.605 ПС 110/6 «Кировская». - ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.628 ПС 110/6 «Кировская»; 

12. Обязательства «Сетевой организации» отсутствуют.  13. Обязательства «Заявителя»:  

13.1. Выполнить разработку проектной документации на электроснабжение  объекта «Заявителя» в соответствии с действующими нормами и правилами. При  необходимости, государственную экспертизу проектной документации провести в  установленном законодательством порядке. Разработанную проектную документацию  на электроснабжение представить в филиал «Нижновэнерго» ПАО «Россети и  Приволжье».  

13.2 Электроснабжение ТП-2611 с учетом полной заявленной мощности  выполнить по существующей схеме от ЛЭП-6 кВ от ячейкиф.628 ПС 110/6  «Кировская», ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.605 ПС 110/6 «Кировская»;  

13.3. Выполнить проверку оборудования ТП-2611 на пропускную способность,  с учетом полной заявленной мощности, при необходимости выполнить замену. Тип и  маку уточнить при проектировании.  

13.4. Степень компенсации реактивной мощности для обеспечения tgφ не более  0,35 и необходимость установки регулирующих и компенсирующих устройств  реактивной мощности, их количество, параметры и точки установки определить  проектом и, при необходимости, реализовать проект.  

13.5. Проектом определить и при необходимости выполнить комплекс  технических мероприятий, исключающих ухудшение качества электрической энергии в  соответствии с ГОСТ 32144-13 в точках присоединения к и электрическим сетям во  всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающей  сети.  

13.6. После выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ  предъявить присоединенную электроустановку представителю «Сетевой организации»  для осмотра.  

13.7. Получить от филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»«Нижновэнерго» акт о выполнении технических условий. Получить, при  необходимости, разрешение федерального органа исполнительной власти,  осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, на допуск в  эксплуатацию объектов.  

14. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (два) года со  дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям.  

Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО «ПЭС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  расходы по государственной пошлине в размере 6 000 рублей.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со  дня его принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в арбитражный  суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  его в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.А.Левашова