АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть)

Дело № А59-2118/2020

г. Южно-Сахалинск

22 сентября 2020 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи 

Мисилевич П.Б., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению муниципального казенного учреждение городского  округа «город Южно-Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и  благоустройства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Строительная фирма СаКоРенма»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о возложении обязанности  произвести работы по устранению недостатков в рамках гарантийных  обязательств по муниципальному контракту от 11.07.2017 № 032-044-17,  взыскании неустойки в размере 191 861 рубль 76 копеек, взыскании  денежных средств на случай неисполнения судебного акта,  

При участии: от истца – представителя ФИО2 по  доверенности от 27.08.2020, от ответчика – извещен, не явился,  

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  

«Строительная фирма «САКоРенма» в пользу Муниципального казенного  

учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление  

дорожного хозяйства и благоустройства» неустойку в размере 135 902 рубля  08 копеек.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная  фирма «САКоРенма» в течении тридцати календарных дней с даты  вступления решения суда в законную силу исполнить принятые на себя  обязательства по муниципальному контракту № 032-044-17 от 11.06.2017 и  провести все необходимые работы по устранению выявленных  недостатков на объекте в рамках гарантийных обязательств, а именно:  

- устранить трещины асфальтобетонного покрытия тротуара, 40  пог.м., дворовая территория жилого дома по адресу пр. Победы, 35,  

- устранить разрушение бордюрного камня 100 пог.м., дворовая  территория жилого дома по адресу пр. Победы, 35,  

- устранить разрушение резинового покрытия детской площадки, 5  м2 дворовая территория жилого дома по адресу пр. Победы, 35,  

- устранить разрушение бетонного покрытия крыльца к подъездам   № 1, № 5, 8м2, дворовая территория жилого дома по адресу пр. Победы, 35,  

- устранить просадку асфальтобетонного покрытия вдоль  бордюрного камня, в следствии чего образовываются скопления  поверхностных вод, 15 м2 дворовая территория жилого дома по адресу пр.  Победы, 35.  

 В удовлетворении исковых требований в остальной части – отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительная фирма «САКоРенма» денежные средства на случай  неисполнения судебного акта в размере 3 000 рублей в день за первые 30  календарных дней неисполнения судебного акта, начиная со следующего  дня после истечения 2-двухдневного срока со дня вступления его в  законную силу; 4 000 рублей в день в течении следующих 30 календарных  дней неисполнения судебного акта; 5 000 рублей в день за все последующие  дни неисполнения судебного акта.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительная фирма СаКоРенма» (ОГРН 1036500601642, ИНН  6501104474) в доход федерального бюджета 10 786 рублей  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном  объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.  

 Судья П.Б. Мисилевич 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.07.2020 2:24:26

 Кому выдана Мисилевич Полина Борисовна