АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-27960/2022

Нижний Новгород   15 ноября 2022 года

Дата принятия решения в виде резолютивной части 08.11.2022 

Дата изготовления мотивированного решения 15.11.2022

рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по иску

Администрации Ветлужского муниципального района Нижегородской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Гражданстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки

без вызова сторон

и установил:

Администрация Ветлужского муниципального района Нижегородской области (далее - Администрация) обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Гражданстрой» (далее - ООО «ПСК «Гражданстрой», Общество) о взыскании 232 585 рублей 84 копеек неустойки за неисполнение в срок обязательств по передаче жилых помещений (квартир) и 232 585 рублей 84 копеек неустойки за неисполнение в срок обязательств по государственной регистрации перехода прав собственности жилых помещений (квартир).

Заявленное требование основаны на статьях 71, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивировано тем, что ответчик ненадлежащим образом исполнял свои обязательства по муниципальному контракту от  02.10.2020 № 22, за что должен нести имущественную ответственность.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 08.09.2022 исковое заявление принято к производству и назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Сторонам предоставлено время для направления доказательств и отзыва на исковое заявление, в соответствии с частью 2 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В материалах дела имеются доказательства, подтверждающие надлежащее извещение сторон о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. 

Ответчик против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзыве.

Указанный документ опубликован на сайте федеральных арбитражных судов в разделе Картотека арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru) в режиме ограниченного доступа.

08.11.2022 принято решение в виде резолютивной части согласно части 1 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

09.11.2022 от ответчика поступило заявление о составлении мотивированного решения.

На основании указанного заявления изготовлено мотивированное решение в соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу статей 226, 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в порядке упрощенного производства без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Из документов видно, что 02.10.2020 по результатам проведения аукциона в электронной форме (Протокол № 0332300331019000065-3-1 от 05.12.2019 ИКЗ 193520900267252090100101120806810412) Администрация (заказчик) и ООО «ПСК «Гражданстрой» (поставщик) заключили муниципальный контракт № 22, предметом которого являлось приобретение в муниципальную собственность Ветлужского муниципального района Нижегородской области на первичном рынке благоустроенного жилья, применительно к условиям соответствующего населенного пункта, жилых помещений (квартир № 1, 2, 4, 7, 8, 10), расположенных в черте г. Ветлуга, Ветлужского района, Нижегородской области на ул. Свердлова, в доме 80, для предоставления жителям аварийного фонда по программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» в количестве 6 (шести) штук, указанных в Приложении № 1 «Спецификация» к муниципальному контракту (далее - товар).

В пунктах 1.2, 2.1, 3.1, 3.6 сделки к ней определены:

- цена контракта (11 658 438 рублей 33 копейки);

- поставщик обязался передать в собственность Ветлужского муниципального района Нижегородской области товар, и доли в праве общей собственности на общее имущество жилого дома в соответствии с условиями муниципального контракта;

- поставщик осуществляет сдачу-приемку товара по актам приема-передачи жилых помещений (квартир) (Приложение № 3 к контракту) на каждое жилое помещение (квартиру) заказчику не позднее 10.11.2020. Сроком поставки товара считается день приема-передачи жилых помещений (квартир). На момент подписания актам приема-передачи жилых помещений (квартир) поставщик должен иметь разрешение на ввод в эксплуатацию дома;

- поставщик за свой счет обеспечивает государственную регистрацию перехода прав собственности жилых помещений (квартир), в том числе получение свидетельства о государственной регистрации перехода права собственности, а также технический учет в КП НО «Нижтехинвентаризация» в течение 15 дней со дня подписания актов приема-передачи жилых помещений (квартир).

Ответчик с нарушением установленного государственным контрактом срока передал товар истцу, а также нарушил установленный срок государственной регистрации перехода права собственности жилых помещений (квартир), в том числе получение свидетельства о государственной регистрации перехода права собственности, в связи с чем Администрация направила в адрес ответчика претензию от 09.04.2021 с требованием оплатить неустойку, которая оставлена без удовлетворения.

Согласно статьям 309, 330 (пункту 1) Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

В соответствии с частью 42.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Согласно части 9.1. статьи 34 Закона № 44-ФЗ Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783 утверждены Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом (далее - Правила списания).

Согласно подпункта "а" пункта 3 Правил списания, списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в случае, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5% цены контракта.

Цена контракта составляет 11 658 438 рублей 33 копейки, предъявленная ко взысканию сумма неустойки - 465 171 рубль 68 копеек, что не превышает 5% от цены контракта (582 921 рубль 92 копейки).

В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации на основании Закона № 44-ФЗ, списание неустоек (штрафов, пеней) является обязанностью заказчика (пункт 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017).

Довод Общества о наличии у истца обязанности выплатить в пользу ответчика пени в сумме 25 007 рублей 35 копеек за нарушение сроков оплаты не подлежит рассмотрению в настоящем деле, поскольку заявлен в неустановленных законом процессуальных формах и порядке, что, однако не лишает ООО «ПСК «Гражданстрой» права на обращение в суд с самостоятельным иском.

При таких обстоятельствах по делу суд отказывает в удовлетворении иска.

На основании статей 110 и 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по иску относятся на истца, который освобожден от уплаты госпошлины.

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований Администрации Ветлужского муниципального района Нижегородской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) отказать в полном объёме. 

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если оно не будет отменено или изменено таким постановлением.

Исполнительные листы выдать после вступления настоящего решения в законную силу. Исполнительный лист до истечения срока на обжалование настоящего решения в апелляционном порядке выдается по заявлению взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья     Р.Ю. Олисов