Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-106195/2017

18 апреля 2018 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Сергеева О.Н.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

Истец: Общество с ограниченной ответственностью "АрКон Проект" (адрес:  Россия 188300, Гатчина, Ленинградская область, ул.Соборная д.11А, ОГРН: 

<

***>);

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "РИК ПЛЮС" (адрес:  Россия 188301, г ГАТЧИНА, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ГАТЧИНСКИЙ р-н, ул 120 ГАТЧИНСКОЙ ДИВИЗИИ 1/ЛИТЕРА А/ПОМЕЩЕНИЕ №425; ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 212 400 руб. 00 коп.

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

установил:

ООО "АрКон Проект" предъявило иск о взыскании с ООО "РИК ПЛЮС" 212 400 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ на основании договора № 12-Е-2015 от 14.09.2015. 

Ответчик отзыв не представил. 

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании ст.ст.226-229 АПК РФ. 

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор № 12-Е-2015 от 14.09.2015 на выполнение работ по разработке рабочего проекта на строительство объекта по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Новосветское сельское поселение. 

Стоимость работ составляет 472 000 руб. 00 коп. 

Оплата производится в 3 этапа: 

- первый – авансовый – в размере 30% от общей стоимости в течение трех банковских дней с даты подписания договора;

- второй – в размере 50 % от общей стоимости в течение трех банковских дней после утверждения градплана, согласования с заказчиком раздела «АР» и генерального плана;

- третий – окончательный, в размере 20% от общей стоимости – в течение трех дней после получения заказчиком разрешения на строительство. 

Ответчик-заказчик 01.10.2015 перечислил на расчетный счет истца-исполнителя 141 600 руб. 00 коп., что составляет 30% от общей стоимости договора. 

08.10.2015 истец направил ответчику вариант генерального плана проектируемой складской зоны. 

31.08.2016 ответчик перечислил истцу 118 000 руб. 00 коп. – 25% общей суммы договора. 

20.10.2016 ответчик получил разрешение на строительство № 47/506306/49/2016. 

Срок оплаты третьего этапа наступил 24.10.2016, однако денежные средства в размере 212 400 руб. 00 коп. до настоящего времени ответчиком не перечислены. 

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика. 

Руководствуясь статьями 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РИК ПЛЮС" в пользу общества с ограниченной ответственностью "АрКон Проект" 212 400 руб. 00 коп. задолженности по договору № 12-Е-2015 от 14.09.2015, а также 7 248 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Сергеева О.Н.