Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А40-172587/23-107-1329

23 января 2024 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 16 января 2024 года.

Решение в полном объеме изготовлено 23 января 2024 года.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при ведении протокола помощником судьи В.А. Пациным, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-172587/23-107-1329 по иску ООО "МАСТЕР ТЕКСТИЛЬ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) к ответчику ООО СК "КАПИТАЛСТРОЙ" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) о взыскании суммы неустойки по договору № 389/2019/01-01 от 15.04.2020 за период с 30.07.2020 по 26.07.2023 в размере 2 229 832,48 р., при участии представителя истца: не явился, извещен, представителей ответчика: ФИО1, доверенность от 18.07.2023, удостоверение адвоката, 

УСТАНОВИЛ:

ООО "МАСТЕР ТЕКСТИЛЬ"  (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО СК "КАПИТАЛСТРОЙ" (далее – ответчик) о взыскании суммы неустойки по договору № 389/2019/01-01 от 15.04.2020 за период с 30.07.2020 по 26.07.2023 в размере 2 229 832,48 р.

Истца в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, суд на основании статьи 156 АПК РФ рассмотрел дело в его отсутствие.

Ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам отзыва.   

Выслушав лиц участвующих в деле, исследовав и оценив, имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу о том, что требования не подлежат удовлетворению ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда города Москвы от 03.03.2022 г. (резолютивная часть объявлена 03.03.2022) по делу № А40-68949/2021-185-176 истец признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Между ООО «Мастер Текстиль» и ООО СК «Капиталстрой» был заключен договор № 389/2019/0101 от 15.04.2020 г. (далее - Договор) на выполнение по текущему ремонту зданий и сооружений военных городков Министерства обороны Российской Федерации.

Пунктом 5 Договора срок исполнения Договора - не позднее 15.06.2020 г.; 08 июля 2020 года стороны Дополнительным соглашением № 1 утвердили дату окончания работ - не позднее 29 июля 2020 года.

Работы выполнены с нарушением сроков, за что в соответствии с п.14.3, п.14.4 договора предусмотрена неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, за каждый день просрочки, но не более чем 10% от стоимости договора.

В соответствии с пунктом 3 указанного договора, согласно локальной смете, стоимость работ составляет 11 149 162, 44 руб.

Таким образом, конкурсным управляющим было выявлено, что ООО СК «КАПИТАЛСТРОЙ» (далее - Ответчик) не была уплачена неустойка за период просрочки исполнения подрядчиком своих обязательств с 30.07.2020 г., по настоящее время всего в размере 2 229 832,48 руб.

Согласно п. 11.6. Договора Подрядчик в течение 2 рабочих дней с момента поступления Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от Генподрядчика, формирует в экземплярах Сводный акт сдачи-приемки выполненных работ, подписывает его, скрепляет печатью и представляет все экземпляры Сводного акта сдачи-приемки выполненных работ Генподрядчику. Генподрядчик в течение 10 рабочих дней с момента поступления от Подрядчика Сводного акта сдачи-приемки в 2 экземплярах, проверяет Сводный акт сдачи-приемки, подписывает, скрепляет печатью (либо дает в этот же срок письменный мотивированный отказ) и направляет (передает) 1 экземпляр Подрядчику.

12 мая 2020 года Генподрядчиком приняты работы за период с 16.04.2020 по 12.05.2020 на общую сумму 3 800 000 руб., что подтверждается подписанным обеими сторонами Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 -2 от 12.05.2020 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 12.05.2020. 30 июля 2020 года Подрядчиком сданы работы (исх. № 52-07/2020) на общую сумму 3 209 817 руб. 92 коп., что подтверждается переданными в адрес 4 уполномоченного лица Генподрядчика Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 29.07.2020 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 29.07.2020.

Подрядчиком сданы работы (исх. № 52-08/2020) на общую сумму 1 825 667 руб. 23 коп., что подтверждается переданными в адрес уполномоченного лица Генподрядчика Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 3 от 04.08.2020 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 04.08.2020.

Истцом были направленны исходящими письмами № 172 от 03.08.2020, № 210 от 25.08.2020, № 220 от 02.09.2020 в адрес Ответчика сводные акты, акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат в связи с тем, что Ответчиком работы в полном объеме не завершены, не представлено доказательств выполнения Ответчиком работ, а также нарушен порядок сдачи работ. 12 мая 2020 года Генподрядчиком приняты работы за период с 16.04.2020 по 12.05.2020 на общую сумму 3 800 000 руб., что подтверждается подписанным обеими сторонами Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 -2 от 12.05.2020 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 12.05.2020. 30 июля 2020 года Подрядчиком сданы работы (исх. № 52-07/2020) на общую сумму 3 209 817 руб. 92 коп., что подтверждается переданными в адрес уполномоченного лица Генподрядчика Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2 от 29.07.2020 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 29.07.2020.

ООО «Мастер Текстиль» выполненные Подрядчиком работы оплатил частично, в размере 5 300 000 руб. 00 коп. (в редакции дополнительного соглашения №1 к Договору).

Вступившим в силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.08.2021 г. №А40-34984/21 установлена стоимость выполненных работ в размере 8 835 485,15, а задолженность ООО «Мастер Текстиль» перед ООО СК «КАПИТАЛСТРОИ» по Договору № 389/2019/01-01 на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений военных городков Министерства обороны Российской Федерации от 15.04.2020 составляет 3 535 485 руб. 15 коп.

Определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-68949/2021 от 23.05.2022 г. ООО СК «КАПИТАЛСТРОЙ» включен в реестр требований кредиторов ООО «МАСТЕР ТЕКСТИЛЬ». Сумма требований согласно определению составляет 3 535 485,15 руб., пени в размере 78 635,08 руб. Из чего следует, что за выполненные работы Ответчик в законном порядке распорядился своим правом.

Однако, сумма Договора составляет 11 149 162 руб. 44 коп. и Ответчик не сдал работы в сроки, предусмотренные договором, а именно 29.07.2020 (в редакции дополнительного соглашения №1 к Договору).

Договор сторонами не расторгнут досрочно по соглашению сторон или в одностороннем порядке.

За нарушения сроков выполнения сдачи и приемки работ договора предусмотрена санкция в виде неустойки: согласно п.14.3 в случае просрочки исполнения подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик требует оплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, за каждый день просрочки, но не более чем 10% от стоимости договора.

Исходя из вышеизложенного, стоимость выполненных работ в размере 8 835 485,15. Тогда как сумма Договора составляет 11 149 162 руб. 44 коп. и Ответчик не сдал работы в сроки, предусмотренные договором, а именно 15.06.2020, а потому 08 июля 2020 года стороны Дополнительным соглашением № 1 утвердили дату окончания работ - не позднее 29 июля 2020 года. Таким образом, просрочка в выполнении работ наступила с 30.07.2020.

Кроме того, в соответствии п.14.4 Договора в случае нарушения сроков окончания выполнения Работ, предусмотренных Договором, генподрядчик требует уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком данного обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, но не более чем 10% от стоимости Договора. В случае нарушения подрядчиком промежуточных сроков выполнения работ (этапов работ), указанных в разделе 5 Договора, Подрядчик обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, но не более чем 10% от стоимости Договора.

Исходя из вышеизложенного, стоимость выполненных работ в размере 8 835 485,15. Тогда как сумма Договора составляет 11 149 162 руб. 44 коп. и Ответчик не сдал работы в срок до 29.07.2020, в полном объеме. Таким образом, просрочка в выполнении работ наступила с 30.07.2020.

Таким образом, сумма неуплаченной неустойки за просрочку исполнения обязательств, а так же сумма неуплаченной неустойки за нарушением сроков окончания работ по Договору, ООО СК «КАПИТАЛСТРОЙ» в соответствии с п.14.3 и п.14.4 Договора составляет 2 229 832,48 руб. 

  В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходит из следующего. 

В соответствии с п.4 ст.709 ГК РФ цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

В силу п.2.3 заключенного между истцом и ответчиком Договора Цена договора является предельной и подлежит корректировке в следующих случаях, если по результатам подписанных сторонами исполнительных смет, актов выполненных работ стоимость работ будет меньше или больше, чем цена, установленная п.3.1 Договора, в этом случае Цена договора должна быть изменена в сторону уменьшения или увеличения. Таким образом, цена договора не являлась твердой и не может быть критерием оценки надлежащего или не ненадлежащего выполнения подрядчиком своих обязательств по Договору.

Предметом договора (раздел 2 Договора), а также локальными сметами к нему не идентифицировались конкретные здания (помещения), где Подрядчику необходимо было осуществить текущий ремонт. Конкретное техническое задание к Договору отсутствовало, а согласованные сторонами локальные сметы лишь устанавливали сметную стоимость ремонтных работ без привязки к зданиям (помещениям). В п. 1.1.14, 19.2 Договора объект определен лишь в общих чертах как 

<

...> ФГКВОУ ВПО «Военная академия ГШ ВС РФ». Учебные корпуса. Административным корпус, территория военного городка 655. 

Таким образом, Подрядчик выполнял текущий ремонт на объектах, расположенных на территории военной академии, определяемых Генподрядчиком самостоятельно и только в указанных им помещениях.

12.05.2020 между сторонами был подписан акт выполненных работ №1-2 зона 8А, 11 этаж на сумму 3 800 000 рублей.

08.07.2020 между сторонами подписано дополнительное соглашение №1 к Договору, которым перенесен срок окончания работ с 15.06.2020 на 29.07.2020, а также согласованы объекты, на территории военного городка, на которых необходимо было произвести текущий ремонт к указанной дате: Зона 6А (11 этаж) - не позднее 29 июля 2020; КПП - не позднее 29 июля 2020.

Текущий ремонт зоны 6А (11 этаж) был завершен ответчиком в установленные договором (в редакции дополнительного соглашения №1 сроки) - акт выполненных работ №2 от 29.07.2020 на сумму 3 209 817,92 рублей.

Текущий ремонт КПП завершен ответчиком к 04.08.2020 - акт выполненных работ №3 на сумму 1 824 667,23 рублей.

Принимаемый во внимание согласованный в процессе выполнения договора сторонами объекты для текущего ремонта (с учетом акта выполненных работ от 12.05.2020 и дополнительного соглашения №1 от 08.07.2020), общая стоимость выполненных работ по их ремонту составила 8 834 485, 15 рублей. Учитывая положения п.2.3. Договора цена договора подлежит уменьшению до 8 834 485 15 рублей.

Истец уклонился от приемки выполненных ответчиком в период с 13.05.2020 по 04.08.2020 работ по Договору, а также от их оплаты.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.08.2021 по делу №А40-34984/21 обязательства ответчика по Договору были признаны выполненными надлежащим образом, работы по актам №2 от 29.07.2020 (зона 6А, 11 этаж) и №3 от 04.08.2020 (КПП) были признаны принятыми в одностороннем порядке, в пользу ООО «СК «КАПИТАЛСТРОЙ» с ООО «Мастер Текстиль» взыскана задолженность по Договору в размере 3 535 485,15 рублей.

Окончательный объем работ был определен сторонами в дополнительном соглашении №1  от 08.07.2020, которое было подписано сторонами на завершающем этапе исполнения Договора. Этим же дополнительным соглашением был снижен размер аванса с 8 000 000 рублей до 5 300 000 рублей, что также свидетельствует об уменьшении общей стоимости выполняемых по Договору работ.

Кроме того, договор субподряда между истцом и ответчиком был заключен в рамках исполнения государственного контракта от 07.06.2019, о чем имеется соответствующая ссылка в п.2.6 Договора. 

Согласно ответу от 01.03.2021 Министерства обороны РФ на адвокатский запрос, сделанный в рамках рассмотрения арбитражного дела №А40-34984/21, работы, выполненные на территории военной академии ООО «Мастер Текстиль» были приняты и оплачены Министерством обороны в полном объеме.

Истцом не представлено доказательств, что им выполнялись какие-либо работы, подлежащие к выполнению ООО «СК «КАПИТАЛСТРОЙ» в рамках Договора силами третьих лиц для сдачи их Министерству обороны Российской Федерации, начиная с 15.04.2020.

В соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. 

Лицо признается невиновным, если при той заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обстоятельства и условиям оборота,  оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Учитывая, что истцом не доказано нарушение обязательств ответчиком в части объема выполненных по договору работ, оснований для взыскания неустойки с ответчика не имеется, в связи с чем, исковые требования удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Отказать ООО "МАСТЕР ТЕКСТИЛЬ" в удовлетворении требований к ООО СК "КАПИТАЛСТРОЙ" о взыскании суммы неустойки по договору № 389/2019/01-01 от 15.04.2020 за период с 30.07.2020 по 26.07.2023 в размере 2 229 832,48 р.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.    

СУДЬЯ

М.В. Ларин