10/2022-183310(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-11074/2022

г. Тюмень

07 декабря 2022 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе председательствующего судьи Я.В. Авдеевой,  

рассмотрев единолично в открытом судебном заседании, дело по иску ГАУК ТО «ДНК «Строитель» к ООО «СМАРТ» о понуждении к исполнению обязательств в натуре, о взыскании денежных средств, 

Руководствуясь статьями 16, 101, 110, 106, 167-170, 176, 177, 180, 181 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации суд  Р Е Ш И Л: Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО «СМАРТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в течение 30 календарных  

дней со дня вступления в законную силу решения суда безвозмездно устранить следующие  

выявленные в течение гарантийного срока недостатки результата выполненных работ по договорам  

подряда № 112/08/2020 от 28.08.2020г., № 157 от 13.10.2020г., а именно:  

 № 

Обнаруженные дефекты  

Необходимые работы для 

устранения дефектов 

Объем дефектов, м2 

1 

Фрагментарные 

повреждения, отслоение  верхнего слоя и  примыканий (над  костюмерной)  

Наклейка изолирующего слоя и 

восстановление примыканий  

64,8 

2 

Фрагментарные 

повреждения, отслоение  верхнего слоя и  примыканий (над  хореографическими залами  

п 310, 315) 

Наклейка изолирующего слоя и 

восстановление примыканий  

291,6 

3 

Фрагментарные 

повреждения, отслоение  верхнего слоя и  примыканий к стене и  ендовы Клубного зала  (над светоцехом)  

Наклейка изолирующего слоя и  восетановление примыканий,  замена ендовы  

24 

4 

Фрагментарные 

повреждения, отслоение  верхнего слоя и  примыканий (над  

Наклейка изолирующего слоя и 

восстановление примыканий  

101,7 

 

концертным залом)  

 

5 

Фрагментарные  

повреждения, отслоение  верхнего слоя и  

примыканий (над  

коридором и к. 335, 336,  337)  

Наклейка изолирующего слоя и восстановление примыканий  

 180,5 без примыканий 

 

6 

Фрагментарные 

повреждения, отслоение  верхнего слоя и  примыканий (над  Коридором и к. 339)  

Наклейка изолирующего слоя и восстановление примыканий и ендовы  

 25,2 

 

7 

Фрагментарные 

повреждения, отслоение  верхнего слоя и  

Наклейка изолирующего слоя и восстановление примыканий и ендовы  

 73,2 

 

примыканий (над 

бухгалтерией) 

 

8 

Отслоение  

штукатурного слоя и  разрушения кладки на  

глубину до 8м., обрыв  примыканий, повреждения  

изолирующего слоя  (колосниковый подъем)  

Наклейка изолирующего слоя и  восстановление примыканий и  штукатурные работы  

52 

 

9 

Фрагментарные  

повреждения, отслоение  верхнего слоя и  

примыканий к стене и  ендовы (стена  

Танцевального зала и  малого зала)  

Наклейка изолирующего слоя и  восстановление примыканий и  ендовы  

37 

 

Взыскать с ООО «СМАРТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу ГАУК ТО  «ДНК «Строитель» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) 150 000 рублей 00 копеек штрафа, а  также 6 000 рублей 00 копеек расходов на оплату государственной пошлины.  

Взыскать с ООО «СМАРТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета 5 500 рублей 00 копеек государственной пошлины.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Восьмой  арбитражный апелляционный суд.  

 Судья Авдеева Я.В.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 21.12.2021 6:41:23

 Кому выдана Авдеева Яна Викторовна