АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А84-3560/17

31 мая 2018 года

город Севастополь

 

Резолютивная часть решения оглашена 24.05.2018.

Полный текст решения составлен 31.05.2018.

 

Судья Арбитражного суда города Севастополя Погребняк А.С., при ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрев материалы дела А84-3560/17

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Карбон» (299038, 

<

...>, ОГРН 

<

***>)

к Государственному бюджетному учреждению «Дирекция капитального строительства» (299011, 

<

...>; 299011, 

<

...>)

при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, на стороне ответчика:

Департамента капитального строительства города Севастополя (299011, 

<

...>, 

<

...>),

Правительства Севастополя (299011, 

<

...>),

Общества с ограниченной ответственностью «Теплостройсервис» (115054, 

<

...>, помещение V, 299011, 

<

...>, офис V-13, V- 14)

Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя (299011, 

<

...>)

о взыскании 37 803 466,47 рублей,

 

при участии в судебном заседании:

от истца (ООО "Карбон") – ФИО2 по доверенности от 11.01.2018, ФИО3 по доверенности от 28.12.2017;

от ответчика (ГБУ "Дирекция капитального строительства"): ФИО4, по доверенности от 24.01.2018;

от третьего лица (Департамент капитального строительства города Севастополя): не явился;

от третьего лица (Правительство Севастополя): ФИО5 по доверенности от 19.09.2017;

от третьего лица (ДИЗО): не явился;

от третьего лица (ООО "Теплостройсервис"): не явился.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Карбон» обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с иском к Государственному казенному предприятию «Капитальное строительство» о взыскании стоимости выполненных подрядных работ по договору строительного подряда № 210 от 18.12.2012 на объекте «Школа в бухте Казачья».

Исковые требования обоснованы выполнением истцом строительно-монтажных работ в рамках договора подряда № 210 в период с 01.09.2015 по 31.12.2015 на сумму 38 262 485 рублей, согласно сметной документации, актам выполненных работ по форме КС-2, справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в отсутствие их надлежащей приемки и оплаты со стороны ответчика.

Истец указал, что факт выполнения им работ в период с 01.09.2015 по 31.12.2015, согласно актам выполненных работ по форме КС-2, справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 подтверждается, в том числе, разрешением на ввод в эксплуатацию объекта «Школа в бухте Казачья». Цена выполненных работ согласована сторонами путем утверждения ответчиком сметных расчетов истца, а также соответствует п. 3.2 Договора подряда №210

Определением суда от 15.09.2017 иск был принят судом, назначено предварительное судебное заседание.

Ответчик представил отзыв на иск, указав на отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований, поскольку срок исполнения работ по договору подряда был установлен до 31.08.2015, с сентября 2015 года по октябрь 2016 г. дополнительные соглашения к договору не заключались, работы не принимались, график производства работ, объемы работ не утверждались сторонами.

Срок действия Соглашения от 06.11.2014 о передаче прав и обязанностей по договору подряда №210 от 18.12.2012, с учетом всех дополнительных соглашений, прекращен 31.08.2016. Распоряжением Правительства Севастополя от 22.09.2016 №531РП единственным поставщиком (подрядчиком) на выполнение работ по объекту «Школа в бухте Казачья» определено ООО «Эксперт Технология». Таким образом, ГКУ «Капитальное строительство» и ООО «Карбон» с 01.09.2015 не связаны договорными отношениями, не согласованы существенные условия проведения работ после 31.08.2015, работы не принимались. Акты о приемке выполненных работ на сумму 35 710 547 рублей за период 2015-2016 г.г. не согласованы государственным заказчиком. Актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2015 данные о наличии выполненных работ после 31.08.2015, претензии со стороны подрядчика – не зафиксированы.

Ответчик также указал, что ООО «Карбон» при проведении работы были допущены грубые нарушения строительных норм и правил, отклонения от проектных решений, дефекты по объекту не были устранены, что стало основанием для одностороннего отказа от исполнения договора со стороны ГКУ «Капитальное строительство». Исходя из указанного, ответчик указывает на безосновательность обращения истца в суд с требованиями настоящего иска.

Третье лицо (ООО «Теплостройсервис») представило суду письменные пояснения по сути спора, указав, что 25.11.2016 договор подряда №210 от 18.12.2012, заключенный с ООО «Карбон», был расторгнут в одностороннем порядке в связи с грубыми нарушениями строительных норм и правил и значительными неоднократными отклонениями от проектных решений. При этом, 30.11.2016 между ООО «Теплостройсервис» и ГКУ «Капитальное строительство» был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Школа в бухте Казачья» №08-16/СМР. ООО «Теплостройсервис» устранило все дефекты и отклонения, допущенные ООО «Карбон». В 2017 году объект был достроен и сдан в эксплуатацию.

При этом, третье лицо просило суд рассмотреть спор в отсутствие представителей ООО «Теплостройсервис».

Третье лицо (Правительство Севастополя) представило отзыв на иск, указав на несогласие с требованиями искового заявления, поскольку действия заказчика по прекращению договорных отношений с ООО «Карбон» были обусловлены ненадлежащим качеством выполненных работ; график производства работ и объемы работ за период с сентября 2015 года по октябрь 2016 года сторонами не утверждались, выполнение строительных работ происходило без заключения государственного контракта, что не порождает у истца прав требовать оплаты.

04.12.2018 по делу назначена судебная строительно-техническая экспертиза, производство по делу приостановлено до окончания проведения экспертизы и поступления в Арбитражный суд города Севастополя письменного заключения эксперта.

Определением от 15.03.2018 производство по данному делу было возобновлено в связи с поступлением заключения судебной строительно-технической экспертизы от 12.03.2018 №1491/1-3 в суд.

Ответчик представил дополнительные документы по делу, а также отзыв на иск, просил в удовлетворении иска отказать полностью.

28.03.2018 Правительство Севастополя представило возражения на заключение судебной экспертизы по делу, указав на критичное отношение к выводам эксперта, а также на то, что выводы эксперта не могут являться надлежащим доказательством по делу.

В ходе рассмотрения дела ответчиком было заявлено ходатайство о недопущении использования заключения эксперта от 12.03.2018 №1491/1-3 в качестве доказательства, обоснованное не соответствием требованиям АПК РФ, а именно: относимости и допустимости доказательств.

03.05.2018 эксперты Федерального бюджетного учреждения «Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, проводившие экспертизу (заключение 12.03.2018 №1491/1-3) - ФИО6, ФИО7 представили суду письменные пояснения по вопросам, возникшим у участников производства по делу, относительно экспертного заключения по делу; ответили на устные вопросы, заданные представителями участников производства по делу, а также на вопросы, заданные судом.

03.05.2018 истец (ООО «Карбон») представил уточнение исковых требований, указав на то, что 25.04.2018 между ООО «Карбон» и ООО «Теплостройсервис» заключено соглашение об урегулировании сопоставимых видов и объемов работ, выполненных на объекте «Школа в бухте Казачья».

Истец, согласно представленного заявления об уточнении исковых требований, просил взыскать с ответчика стоимость выполненных работ по договору строительного подряда №210 от 18.12.2012 в сумме 37 803 466,47 рублей, а также госпошлину за рассмотрение данного спора в размере 200 000 рублей.

На основании положений ст. 49 АПК РФ заявление об уменьшении исковых требований было принято судом к рассмотрению.

03.05.2018 суд завершил предварительное судебное заседание и перешел на стадию судебного разбирательства.

Третье лицо (ДИЗО) 03.05.2018 представило письменные пояснения по сути спора, просило рассмотреть дело в отсутствие третьего лица, просило в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

В судебном заседании 24.05.2018 представители сторон, третьего лица поддержали ранее изложенные доводы.

Изучив материалы дела, судом установлено следующее.

18.12.2012 между Управлением капитального строительства Севастопольской городской государственной администрацией (заказчик) и ЧП «Карбон» (подрядчик) был заключен договор подряда №210 о проведении строительно-монтажных работ по объекту «Школа в бухте Казачья».

В соответствии с п. 1.1 Договора в результате проведения процедуры открытых торгов заказчик поручает, а подрядчик исполняет собственными и привлеченными силами все строительно-монтажные работы по объекту «Школа в бухте Казачья» (объект) и сдает в обусловленные сроки объект заказчику. Состав и объемы работ, поручаемых к исполнению подрядчику определены проектной документацией, утвержденной заказчиком и переданной подрядчиком, являющейся неотъемлемой частью Договора.

Договорная цена строительно-монтажных работ составляет 85300006,80 грн (п. 3.1 Договора).

Договорная цена определена на основании проекта и объемов работ, исходя из проектной документации, рассчитана на основе нормативной потребности в трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для осуществления проектных решений по объекту и текущих цен на них, рассчитывается согласно Правил определения стоимости строительства, раздел 3.2 ДБН Д 1. 1-1-2000 с дополнениями и изменениями (п. 3.2 Договора).

Уточнение приблизительной договорной цены осуществляется по фактичным расходам подрядчика (п. 3.4 Договора).

Срок исполнения работ в соответствии с проектом организации строительства составляет 12 месяцев. Срок исполнения работ, поручаемых подрядчику в 2012 – 2013 гг, составляет 4 месяца с момента перечисления заказчиком аванса на счет подрядчика. Исполнение работ осуществляется согласно календарному графику, утвержденному заказчиком и подрядчиком, которые являются неотъемлемой частью Договора и указывается в Приложении №4 Договора.

Согласно п. 6.4 Договора обстоятельствами, препятствующими выполнению работ на объекте в установленные сроки, которые не зависят от подрядчика и дают ему право на пересмотр этих сроков, являются обстоятельства: непреодолимой силы; за которые отвечает заказчик (отсутствие финансирования, дополнительные работы); действия третьих лиц, препятствующих надлежащему исполнению договора, за исключением случаев, когда это обусловлено обстоятельствами, зависящими от подрядчика; прекращение работ не по вине подрядчика.

Сроки исполнения работ на объекте переносятся на время действия обстоятельств, не зависящих от деятельности подрядчика (п. 6.6 Договора).

Подрядчик выполняет работы согласно проектной документации, в соответствии со строительными нормами и правилами, графиками исполнения работ (п. 12.1).

Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за соответствием качества, объемов выполненных работ, проекта, строительным нормам и правилам, а материалов, конструкций, изделий – государственным стандартам и техническим условиям. При выявлении расхождений заказчик дает подрядчику распоряжения об их устранении, а при серьезных нарушениях – принимает решения о прекращении работ.

Согласно раздела 17 Договора заказчик обязался, в том числе, оплатить стоимость выполненных работ по данному соглашению в порядке и на условиях, предусмотренных разделами 4, 5 Договора; принимать выполненные работы (отдельные этапы работ), согласно с актами приема выполненных работ №КБ-2В и справки о стоимости выполненных строительных работ по форме КБ-3.

Подрядчик обязался, в том числе, выполнить своими силами и средствами, качественно, в установленные сроки предусмотренные Договором работы, согласно утвержденной проектно-сметной документации и сдать объект в эксплуатацию.

В соответствии с п. 20.3 Договора по требованиям заказчика договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке при существенных нарушениях подрядчиком своих обязанностей, создающих предусловия для несвоевременного завершения строительства объекта (отставание от графиков строительства, многочисленные – более двух раз, грубые нарушения строительных норм и правил, уклонение от проектных решений). При таких условиях заказчик может запретить подрядчику дальнейшее исполнение работ и расторгнуть Договор, в установленные сроки принять от него строительную площадку, включая материальные ценности, необходимые для исполнения работ и поручить завершение работ иному исполнителю.

Сторона, решившая прекратить работы или расторгнуть договор, уведомляет об этом письменно вторую сторону не менее чем за 10 календарных дней до принятия данного решения и если на протяжении данного срока обстоятельства, которыми обусловлено данное решение, существенно не изменились.

Согласно п. 21.1 Договор вступает в силу с дня его подписания и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

04.04.2013 сторонами договора подписан и согласован Акт о передаче площадки под строительство школы в б. Казачья (приложение к договору подряда на строительство школы в б. Казачья).

04.04.2013 Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины выдано разрешение на выполнение строительных работ заказчику – Управлению капитального строительства СГГА, ген.подрядчику ЧП «Карбон», объект «Школа в бухте Казачья», проектная документация разработана ЧАО «Севастопольский Стройпроект».

Дополнительными соглашениями №1, 2, 3, 4 от 08.04.2013, 20.06.2013, 26.12.2013, 29.09.2014 к Договору подряда №210 от 18.12.2012 сторонами внесены изменения в указание размера договорной цены работ, выполненных в 2013, 2014 г.г. и порядка оплаты.

Согласно дополнительному соглашению №3 от 26.12.2013 к Договору подряда, для объемов работ, запланированных для выполнения в 2013 году, договорная цена составляет 14826222,67 грн (без НДС), 17791467,20 грн (с НДС).

06.11.2014 между Управлением капитального строительства Севастопольской городской государственной администрации (заказчик), ГКУ «Капитальное строительство» (новый заказчик) и ООО «Карбон» (подрядчик) было заключено соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору подряда №210 от 08.12.2012, согласно п. 1 которого, в соответствии с решением Законодательного Собрания города Севастополя №31 (7192) от 09.04.2014, распоряжением Губернатора Севастополя №521 от 28.08.2014, Постановлением Правительства Севастополя №344 от 01.10.2014, распоряжением Правительства Севастополя №390 от 05.11.2014, заказчик передает, а новый заказчик принимает все права и обязанности по договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Школа в бухте Казачья» №210 от 18.12.2012.

На момент заключения соглашения заказчик передал новому заказчику по акту приема-передачи оригинал Договора подряда №210 от 18.12.2012 со всеми приложениями, дополнительными соглашениями и другими документами, являющимися неотъемлемой частью.

Согласно Дополнительного соглашения № 5 от 12.11.2014 по Договору подряда сторонами согласовано, что на объемы работ, запланированных для исполнения в 2014 г. договорная цена составляет 65 851 700 рублей. Размер финансирования, указанный в п. 1 соглашения определен на основании сметной стоимости строительства, ФКЗ №6-ФКЗ «О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым  и города федерального значения Севастополя» и решения 14 сессии Законодательного собрания города Севастополя от 09.04.2014 №31 «Об особенностях осуществления закупок за бюджетные средства в переходный период», постановления Правительства города Севастополя №328 от 26.09.2014.

В соответствии с Дополнительным соглашением № 6 от 24.12.2014 по Договору подряда сторонами согласовано, что на объемы работ, запланированных для исполнения в 2014 -2015 г.г. договорная цена составляет 101 729 315,96 рублей.

Согласно Дополнительного соглашения №7 от 29.12.2014 по Договору подряда сторонами согласовано, что на объемы работ, запланированных для исполнения в 2014 -2015 г.г. договорная цена составляет 101729315,96 рублей. Генподрядчик принимает на себя обязательство выполнить объемы работ на указанную сумму финансирования и сдать работы Государственному заказчику не позднее 01.04.2015.

Дополнительным соглашением №8 от 30.12.2014 по Договору подряда сторонами согласовано, что на объемы работ, запланированных для исполнения в 2014 г. договорная цена составляет 101 729 315,96 рублей. Дополнительным соглашением №9 от 31.12.2014 по Договору подряда сторонами также согласовано, что срок исполнения объемов работ, запланированных для исполнения в 2014 году, устанавливается до 01.04.2015.

В соответствии с Дополнительным соглашением №10 от 23.04.2015 по Договору подряда сторонами внесены изменения в п.3.1.1, а именно: на объемы работ, запланированные для исполнения в 2014-2015 г.г. договорная цена составляет 101 729 315,96 рублей, в том числе: - на объемы работ, запланированных в 2014 г. договорная цена составляет 65 851 700 рублей, на объемы работ, запланированных в 2015 г. договорная цена составляет 35 877 615,96 рублей.

Согласно п. 3.2 Дополнительного соглашения №10 договорная цена на 2014-2015 г.г. определена на основании проекта и объемов работ, определенных проектной документацией. Договорная цена на 2015 г. Составлена базисно-индексным методом с применением Территориальных единичных расценок, предусмотренных для применения на территории г. Севастополь, согласно приказа Минстроя России от 06.10.2014 №597/пр, Постановления Правительства Севастополя от 05.11.2014 №450 с использованием индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 4 квартал 2014 года в соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.11.2014 №25374-ЮР/08».

Внесены изменения в п.6.7 Договора, а именно, срок исполнения работ, поручаемых Подрядчику в 2014-2015 гг, устанавливается до 31.08.2015.

Приказом №92 ГКУ «Капитальное строительство» от 24.06.2016 утверждена проектно-сметная документация по объекту капитального строительства «Школа в бухте Казачья», согласно которому: стоимость строительства по сводке затрат 508988,028 тыс руб., в том числе: стоимость выполненных работ на 01.05.2016 196322,244 тыс руб, стоимость не выполненных работ 312665,784 тыс руб., в том числе: строительно-монтажные работы 213968,424 тыс руб, оборудование 86422,442 тыс руб, прочие затраты 12274,918 тыс руб, НДС – 46899,868 тыс руб.

22.07.2015 между Государственным казенным учреждением «Капитальное строительство» (заказчик), АО «Севастопольский Стройпроект» (подрядчик) и ООО «Карбон» (плательщик) был заключен договор подряда на выполнение работ по корректировке сметной документации по объекту капитального строительства «Школа в бухте Казачья», согласно которого подрядчик обязался по заданию заказчика выполнить корректировку сметной документации по объекту «Школа в бухте Казачья» (работы), заказчик принять, Плательщик оплатить выполненные работы на условиях, установленных договором. Результатом работ является откорректированная сметная документация по объекту «Школа в бухте Казачья».

В соответствии с техническим заданием на корректировку сметной документации по объекту (приложение 1 к Договору) необходимо в сметную стоимость 1 очереди строительства включить стоимость следующих зданий и инженерных сетей 2 очереди:

- котельной (01210/08014-11);

- тепловых сетей (1010/08014-ТС, 1010/08014-ТС-АС), исключив участки от камеры УТ2 до учебного корпуса 1а;

- внутриплощадочные сети 0,4/0,23 кВ (01210/08014-11-ЭС);

- ТП. Электроснабжение. Электрическое освещение (10210/08014-12-ЭС, ЭО);

- Электрохимическая защита от коррозии (10210/08014-ЭХЗ).

Согласно акта №31 от 31.08.2016 АО «Севастопольский Стройпроект» и ООО «Карбон» согласовали выполненные работы по корректировке сметной документации по объекту «Школа в бухте Казачья» на сумму 415220 руб.

В материалы дела представлены Акты о приемке выполненных работ на сумму 744713,3 руб, 182405,58 руб, 1138684,7 руб, 1157374,7 руб, 433049,38 руб, 751521,94 руб, 1394599,52 руб, 1394941 руб, 850741,1 руб, 417060,4 руб, 664694 руб, 280248,8 руб, 98531,18 руб, 1731710,18 руб, 463619,64 руб, 2532772 руб, 69549,2 руб, 575818,2 руб, 215859,76 руб, 626205,9 руб, 198833,5 руб, 902847,5 руб, 2427653 руб, 373651,72 руб, 245532 руб, 13827757 руб, 201735,2 руб, 1187998 руб, 1349771 руб, 91357,96 руб, 181553,6 руб., 404997,2 руб, 471861,9 руб, 228874 руб, 73849,12 руб, 157475,7 руб, 212639,5 руб. Указанные акты были подписаны со стороны ООО  «Карбон».

19.08.2016, 27.09.2016 ООО «Карбон» направило в адрес ГКУ «Капитальное строительство» на проверку и согласование акты выполненных работ (КС-2) по объекту: «Школа в бухте Казачья», согласно договора №210 от 18.10.2012 за период сентябрь 2015 – январь 2016 г. на сумму 35 707 252 рублей, 35 710 547 рублей, в соответствии с реестрами представленных актов.

22.07.2016 между Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя (ссудодатель) и ГКУ «Капитальное строительство» (ссудополучатель) был заключен договор №101-БСП безвозмездного срочного пользования земельным участком по адресу: 

<

...> с разрешенным видом использования «образование и просвещение», для строительства школы в бухте Казачья, площадью 43007 кв.м., на основании распоряжения ДИЗО от 11.07.2016 №2168-РД.

Кадастровый номер земельного участка 91:02:004004:148.

22.09.2016 Правительством Севастополя издано распоряжение №531-РП о заключении государственного контракта на выполнение работ по техническому обследованию объекта «Школа в бухте Казачья» с единственным поставщиком, согласно которому единственным поставщиком (подрядчиком) на выполнение технического обследования объекта «Школа в бухте Казачья» было определено ООО «Эксперт Технология».

В соответствии с техническим обследованием ООО «Эксперт Технология» строительных конструкций «Школа в бухте Казачьей» по заказу ГКУ «Капитальное строительство» от 14.10.2016 строительная готовность на дату составления заключения по техническому обследованию с учетом обнаруженных дефектов и повреждений, подлежащих устранению – 54%.

17.10.2016 ООО «Карбон» направило в адрес ГКУ «Капитальное строительство» письмо №297 «О приемке и оплате выполненных работ по договору подряда», указав ,что ГКУ «Капитальное строительство» не приступило к проверке и приемке указанных в актах работ, не представило отказа от их приемки с перечнем недостатков, согласно действующему законодательству. Истец просил произвести приемку выполненных работ, указанных в актах, предоставленных в ГКУ «Капитальное строительство» вх. №3292 от 27.09.2016 в трехдневный срок с момента получения письма и оплатить их в соответствии с условиями договора подряда.

18.10.2016 Департаментом капитального строительства города Севастополя был издан приказ №159/1-01/2016 «О создании комиссии по проверке выполненных ООО «Карбон» работ по объекту строительства «Школа в бухте Казачья» с целью проведения в период с 19.10.2016 по 28.10.2016 проверки фактически выполненных работ ООО «Карбон» по объекту «Школа в бухте Казачья» за период с сентября 2015 г. по январь 2016 г., согласно договора от 18.12.2012 №210 (с учетом предоставленных актов выполненных работ (КС-2).

Согласно положения о комиссии по проверке выполненных ООО «Карбон» работ по объекту строительства «Школа в бухте Казачья», комиссия полномочна принимать решения об установлении фактически выполненных работ ООО «Карбон» по объекту «Школа в бухте Казачья» за период с сентября 2015 г по январь 2016 г, согласно договора от 18.12.2012 №210; объемов работ, выполненных ненадлежащим образом (с нарушением требованием законодательства и условий договора от 18.02.2012 №210); объема работ и недостатков выявленных в ходе проверки и подлежащих устранению ООО «Карбон» за счет собственных средств; объема работ, необходимого для завершения строительством объекта «Школа в бухте Казачья».

24.10.2016 ГКУ «КС» направило в адрес ООО «Карбон» письмо №3845 с отказом в подписании форм КС-2 за период с 09.2015 года по 01.2016 года, указав на необходимость предоставления совместно с формами КС-2 исполнительной документации на выполнение работ.

28.10.2016 ГКУ «Капитальное строительство» направило в адрес истца возражения на претензионное письмо «О приемке и оплате выполненных работ по договору подряда», указав, что требования ООО «Карбон» являются злоупотреблением правом в целях неосновательного обогащения за счет бюджета.

01.11.2016, 03.11.2016 ООО «Карбон» направило в адрес ГКУ «Капитальное строительство» письма с просьбой проведения приемки выполненных работ, указанных в актах, указав, что несвоевременная проверка и принятие работ по договору, а также отсутствие финансирования (оплаты) уже выполненных работ по строительству школы, делают невозможным продолжение дальнейших работ по строительству школы, делают невозможным продолжение дальнейших работ на указанном социально значимом объекте строительства.

В качестве приложений к указанным письмам представлен реестр актов выполненных работ (КС-2) на сумму 25674652,40 руб., акты выполненных работ; справка о стоимости работ и затрат (КС-3) за 4 квартал 2015 года на сумму 25674652,40 руб, накладные по котельной с приложением технической документации; реестр актов выполненных работ (КС-2) на сумму 302723 руб., акты выполненных работ на указанную сумму; справка о стоимости работ и затрат (КС-3) на сумму 302723 руб, техническая документация.

В соответствии с Актом от 14.11.2016 об установлении факта выявленного нарушения комиссией по проверке устранения замечаний, отраженных в заключении о техническом обследовании строительных конструкций (шифр 20-ОТС-2016) в рамках исполнения подрядной организацией ООО «Карбон» условий договора подряда №210 от 18.12.2015 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Школа в бухте Казачья» - по состоянию на 14.11.2016 работы по устранению допущенных нарушений, отраженных в заключении о техническом обследовании строительных конструкций (шифр 20-ОТС-2016) на объекте не произведены.

07.11.2016, 16.11.2016 ГКУ «КС» направило в адрес ООО «Карбон» письма (исх № 4068, 4132) с указанием допущенных нарушений на объекте.

В ответ на указанные письма ГКУ «Капитальное строительство» указало (письмо от 17.11.2016), что по состоянию на 14.11.2016 подписать акты выполненных работ невозможно по причине отсутствия необходимой отчетно-исполнительной документации.

23.11.2016, 06.12.2016, 09.12.2016, 14.12.2016 ООО «Карбон» представило ГКУ «Капитальное строительство» недостающую документацию по объекту «Школа в бухте Казачья».

09.11.2016 ГКУ «Капитальное строительство» направило в адрес ООО «Карбон» уведомление о прекращении охраны объекта «Школа в бухте Казачья» в связи с заключением ГКУ «Капитальное строительство» государственного контракта на охрану объекта.

11.11.2016 ООО «Карбон» представило в адрес ГКУ «Капитальное строительство» и Правительства Севастополя письмо №324 указав на несогласие относительно смены охраны объекта, а также на то, что обязательства сторон по договору в полном объеме не исполнены, объект строительством не завершен, заказчику не передан, не введен в эксплуатацию, работа подрядчика не оплачена, отношения сторон по договору не прекращены. Исходя из изложенного, ООО «Карбон» указал на необходимость оплаты выполненных работ подрядчику.

15.11.2016 ГКУ «Капитальное строительство» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения Договора подряда, обоснованное тем, что с сентября 2015 г. по октябрь 2016 г. выполненные работы не принимались, график производства работ, а также объемы работ не утверждались сторонами.

18.11.2016 ГКУ «Капитальное строительство» уведомил ООО «Карбон» об одностороннем отказе от исполнения Договора подряда №210 от 18.12.2012 на основании части 2 ст. 310 ГК РФ, части 2 ст. 450-1 ГК РФ, 715 – 717 ГК РФ, п. 17.2, 20.3, 20.4, 20.6 Договора подряда.

Распоряжением Правительства Севастополя от 23.11.2016 №653-РП ООО «Теплостройсервис» было определено единственным поставщиком (подрядчиком) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Школа в бухте Казачья».

30.11.2016 был заключен Государственный контракт №08-16/СМР на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Школа в бухте Казачья» между ГКУ «Капитальное строительство» и ООО «Теплостройствервис», предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ (работы) по объекту капитального строительства «Школа в бухте Казачья» в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к Контракту), на условиях, предусмотренных контрактом. Цена контракта составляет 283457524 руб

23.11.2016 ООО «Карбон» направило возражения на решение об одностороннем отказе от исполнения договора подряда, обоснованное его незаконностью, поскольку обязательства сторон по договору в полном объеме не исполнены, строительство объекта не завершено, объект не введен в эксплуатацию, заказчику не сдан, выполненные подрядчиком работы не приняты и не оплачены, обязательства сторон по договору не прекращены. Также подрядчик указал, что выявленные нарушения легко устранимы и не являются грубыми. При этом, ГКУ «КС» нарушает законные права и интересы подрядчика, что выражается в препятствии в реализации права на приемку и оплату выполненной работы.

09.12.2016 ООО «Карбон» обратилось в адрес ГКУ «Капитальное строительство» с письмом №371 (вх. 4490 от 12.12.2016) «О приемке и оплате выполненных работ по договору подряда», указав на выполнение с сентября 2015 года по декабрь 2015 года перечня выполненных строительно-монтажных работ по объекту «Школа в бухте Казачья» (учебный корпус) с предоставлением актом о приемке выполненных работ (согласно указанного перечня) на сумму 9192459,60 руб с приложением исполнительной документации, актов скрытых работ, технической документации на оборудование. Стоимость работ рассчитана с учетом положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительно-монтажных работ, изменения стоимости прочих работ и затрат, изменения сметной стоимости оборудования на 4-й квартал 2015 года, установленных письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015.

09.12.2016 ООО «Карбон» направило в адрес ГКУ «Капитальное строительство» и в адрес Департамента капитального строительства города Севастополя проект акта приема-передачи объекта незавершенного строительства «Школа в бухте Казачья» от 09.12.2016, реестр с актами приемки-передачи по выполнению работ, с указанием о выполнение им работ на сумму 204498552 руб. по договору подряда №210 от 18.12.2012 по строительству объекта «Школа в бухте Казачья».

09.12.2016, 14.12.2016 ООО «Карбон» направило в адрес ГКУ «Капитальное строительство» недостающую документацию в ответ на выявленные замечания (№4141 от 17.11.2016).

25.11.2016 ООО «Карбон» направило в адрес Прокуратуры Гагаринского района города Севастополя документацию по исполнению договора подряда №210 от 18.12.2012 с просьбой провести проверку законности действий должностных лиц ГКУ «Капитальное строительство».

22.12.2016 Прокуратурой Гагаринского района города Севастополя направлен ответ о том, что отношения между сторонами носят гражданско-правовой характер, в связи с чем, подлежат судебной защите.

26.12.2016 ГКУ «Капитальное строительство» направило в адрес ООО «Карбон» письмо №4873 об отказе в приемке и оплате представленных актов выполненных работ по форме КС-2 на суммы 25969202 руб и 9192459 руб в связи с невозможностью проверить указанные в предоставленных документах виды работ на предмет качества их выполнения, соответствия требованиям, примененных в процессе строительства материалов, соответствия построенного требованиям технических регламентов, строительным нормам и правилам, а также иным нормам.

20.02.2017 комиссией в составе представителей заказчика (ГКУ «КС»), генподрядной организации (ООО «Теплостройсервис»), монтажных организаций (ООО «Карбон», ООО «КомфортСервисКрым», ООО «ПФК «Интер-Феникс», пусконаладочной организации «Мегават Сибирь» произвели осмотр оборудования (системы узла) и проверку монтажных работ, выполненных монтажной организацией ООО «Карбон», ООО «Комфорт-Сервис», был составлен Акт готовности оборудования к производству наладочных работ, в соответствии с которым оборудование (системы, узлы): здание котельной, башня дымовых труб, тепломеханическое оборудование, газопроводы и газоиспользующее оборудование, оборудование ХВО, электромеханическое оборудование, оборудование безопасности и регулирования каскадного управления, автоматического и непрерывного контроля загазованности и сейсмической активности, учет потребляемых ресурсов на законченном строительством объекте котельная «Школа в бухте Казачья» - допущены к производству пусконаладочных работ с 20.02.2017. Оборудование считается принятым заказчиком и он несет ответственность за его сохранность.

06.03.2017 ГКУ «КС» направило в адрес ООО «Карбон» письмо №746 с просьбой представить документы по выполненным работам ООО «Карбон» в соответствии с п. 6.7 приказа №212 от 07.04.2008 «Об утверждении порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию эрегоустановок (с изменениями на 20.08.2008), а именно: паспорт зданий (сооружение) и энергоустановок (котельная, ТП), технический отчет о проведении испытаний (измерений), акт комплексного опробования тепловых энергоустановок (котлы), с целью получения разрешения на проведение пуско-наладочных работ по котельной и тепловой сети, а также последующей сдачи в эксплуатацию объекта.

02.06.2017 ГКУ «Капитальное строительство» направило в адрес ООО «Карбон» письмо №2199 о необходимости проведения строительно-технической экспертизы в ФБУ «Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ» с целью приемки работ, выполненных ООО «Карбон» на объекте «Школа в бухте Казачья» за период с сентября 2015 года по январь 2016 года.

08.06.2017 ООО «Карбон» в ответ на письмо (исх. 2199 от 02.06.2017) сообщило о назначении строительно-технической экспертизы ФБУ «Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ».

03.07.2017 ГКУ «Капитальное строительство» сообщило ООО «Карбон» в письме №2334 о том, что работы, выполненные ООО «Карбон» по договору №210 от 18.12.2012 являются неотъемлемой частью строительства объекта «Школа в бухте Казачья».

31.07.2017 между ООО «Теплостройсервис» (подрядчик) и ГКУ «Капитальное строительство» (заказчик) был составлен Акт приемки объекта капитального строительства «Школа в бухте Казачья», согласно которому подрядчик представил к приемке объект капитального строительства, проектную документацию на строительство.

11.08.2017 Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – объект «Школа в бухте Казачья, кадастровый номер 91:02:004004:148, строительный адрес: 

<

...>, в отношении объекта Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины было выдано разрешение на выполнение строительных работ №115130980228 от 04.04.2013

11.08.2017 Управлением государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя (Севгосстройнадзор) было выдано заключение ГКУ «Капитальное строительство» о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства по адресу: 

<

...> бухта Казачья, требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, в том числе, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. Основание для выдачи заключения – акт проверки от 10.08.2017 №92-07-0082-030401-0203-0190, начало строительства – 04.04.2013, окончание строительства – 01.07.2017.

Актом приема-передачи государственного имущества города Севастополя подтверждается передача ГКУ «Капитальное строительство» городу федерального значения Севастополю, во исполнение распоряжения ДИЗО от 14.08.2017 №10666-РДЗ «О включении в Реестр собственности города Севастополя государственного недвижимого имущества «Школа в бухте Казачья», расположенного по адресу 

<

...> и закреплении на праве оперативного управления за ГБОУ города Севастополя «Общеобразовательный комплекс «Бухта Казачья» нежилых зданий: учебного корпуса, котельной, трансформаторной подстанции.

В соответствии с распоряжением ДИЗО от 20.10.2017 №14222-РДИ о внесении изменений в распоряжения ДИЗО от 14.08.2017 №10666-РДЗ «О включении в Реестр собственности города Севастополя государственного недвижимого имущества «Школа в бухте Казачья», расположенного по адресу 

<

...> и закреплении на праве оперативного управления за ГБОУ города Севастополя «Общеобразовательный комплекс «Бухта Казачья» общая стоимость строительства составляет 480940238 руб

Решением Арбитражного суда города Севастополя от 28.04.2017, вступившим в законную силу 07.07.2017, в удовлетворении требований ООО «Карбон» о понуждении Государственного казенного предприятия «Капитальное строительство» осуществить приемку строительной площадки и объекта незавершенного строительного подряда по договору от 18.12.2012 № 210 путем подписания передаточного акта, было отказано.

В качестве основания отказа в удовлетворении исковых требований судами первой и апелляционной инстанции указано на ненадлежащий способ защиты предполагаемого  нарушенного права, который не обладает конституционным признаком исполнимости судебных актов, исходя из того, что решение об удовлетворении иска о понуждении осуществить приемку строительной площадки и объекта незавершенного строительного подряда по договору № 210 путем подписания передаточного акта не будет обладать признаком исполнимости судебного акта, что противоречит статье 16 АПК РФ, кроме того, истцом не был конкретизирован объект, в отношении которого заявлены исковые требования (описание объектов на строительной площадке, их идентифицирующие признаки, иные характеристики объекта).

В соответствии с положениями ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В ходе судебного разбирательства ООО «Карбон» представило суду справку №101 о выполнении им работ по договору подряда №210 от 18.12.2012 по объекту «Школа в бухте Казачья» на сумму 204 498 552 рублей, из которых приняты и оплачены работы на сумму 169 336 890,56 рублей. Акты выполненных работ на сумму 35161661 рублей предъявлены к оплате, но не приняты и не оплачены заказчиком.

В соответствии с заключением судебной экспертизы ФБУ «Севастопольская лаборатория судебной экспертизы» от 12.03.2018 №1491/1-3 в рамках настоящего дела, Обществом с ограниченной ответственностью «Карбон» выполнены строительно-монтажные работы на объекте «Школа в бухте Казачья», отраженные в вставленных ООО «Карбон» актах выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за период сентябрь-декабрь 2015, что подтверждается документально. Работы выполнялись на основании договора подряда №210 от 18.12.2012.

Согласно акту готовности оборудования к производству наладочных работ от 20.02.2017 работы по котельной и теплосети выполнены ООО «Карбон».

Поскольку объект исследования завершен строительством и эксплуатируется, претензий о несоответствии выполненных работ строительным нормам со стороны Заказчика не предъявлялось, фактически выполненные Обществом с ограниченной ответственностью «Карбон» строительные работы на объекте «Школа в бухте Казачья», отраженные в представленных ООО «Карбон» актах выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполнение а. работ по форме КС-3, соответствуют строительным нормам и правилам, действующим на момент выполнения строительных работ.

Стоимость фактически выполненных Обществом с ограниченной ответственностью «Карбон» работ на объекте «Школа в бухте Казачья», отражённых в представленных ООО «Карбон» актах выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ по форме КС-3, соответствующих строительным нормам и правилам, действовавшим на момент выполнения строительных работ по данным эксперта составляет 38 262 485,38 рублей.

Исходя из пояснений экспертов, данных в ходе рассмотрения дела, стоимость работ, указанная в актах о приемке выполненных работ на сумму 38 262 485,38 рублей определена на основании сметной документации, прошедшей экспертизу и имеющей положительное заключение.

При этом, экспертами сделан вывод о том, что заказчиком были допущены отступления от действующих правил приемки работ и условий договора.

В заключении эксперта в таблице №2 (листы 16-17 заключения) приведены виды и объемы работ, указанные в актах, выполненных ООО «Карбон» и ООО «Теплостройсервис», которые не были разграничены экспертом, как выполненные каждым из обществ.

Истцом представлены письменные пояснения по каждому виду и объему работ с обоснованием выполнения их ООО «Карбон», а также представления бухгалтерской и иной документации, подтверждающей факт выполнения истцом перечня работ.

Исходя из представленных доказательств и пояснений истца сумма совпадающих объемов и видов работ, указанных в актах ООО «Карбон» и ООО «Теплостройсервис», отраженных в таблице №2 заключения эксперта №1491/1-3 от 12.03.2018 составила 1 879 736,46 рублей. При этом, представленные истцом в материалы дела содержат первичные доказательства, подтверждающие факт приобретения материалов, несения затрат, а также выполнения работ ООО «Карбон».

Третье лицо (ООО «Теплостройсервис») предоставило письменные пояснения относительно размера и суммы совпадающих объемов и стоимости работ, указав на заключение с истцом (ООО «Карбон») соглашения об урегулировании сопоставимых видов и объемов выполненных работ на объекте «Школа в бухте Казачья».

В соответствии с указанным соглашением от 25.04.2018, копия которого представлена в материалы дела, ООО «Теплостройсервис» и ООО «Карбон» не имеют разногласий относительно объема и вида выполненных ООО «Карбон» строительно-монтажных работ, отраженных в представленных ООО «Карбон» актах выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за период сентябрь - декабрь 2015 года на основании договора подряда № 210 о выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Школа в бухте Казачья» от 18.12.2012, за исключением работ, отраженных в таблице 2 Заключения (далее - «Спорные работы»).

Стороны соглашаются что, при сопоставлении видов и объемов работ, указанных в актах выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ по форме КС-3 ООО «Карбон» и ООО «Теплостройсервис», работы, отраженные в вышеуказанных актах ООО «Карбон», с учетом Заключения, не отражены в актах «Теплостройсервис», представленных эксперту, и не дублируются с работами, выполненными «Теплостройсервис» за исключением работ, указанных в таблице № 2 Заключения. С учетом изложенного, ООО «Карбон» и ООО «Теплостройсервис» согласовывают, что расхождения в вышеуказанных актах (КС-2) соответствуют видам и объемам работ, указанным в таблице № 2 Заключения, и составляют сумму в размере 459 018,53 рублей, что подтверждается Локальным сметным расчетом (приложение №)1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Стороны оставляют рассмотрение вопроса о взыскании стоимости сопоставимых видов и объемов работ по договору подряда № 210 о проведении строительно-монтажных работ по объекту «Школа в бухте Казачья» на сумму 459 018,53 руб. на урегулирование в досудебном порядке вне рамок судебного дела № А84-3560/2017.

Согласно п. 5 Соглашения, ООО «Карбон» обязалось уточнить исковые требования по делу № А84-3560/2017 в части пересмотра стоимости взыскания выполненных работ по договору подряда № 210 о проведении строительно-монтажных работ по объекту «Школа в бухте Казачья», с учетом «Спорных работ» в сторону уменьшения на сумму 459 018,53 руб.

Во исполнение соглашения об урегулировании сопоставимых видов и объемов выполненных работ на объекте «Школа в бухте Казачья», истец представил суду заявление об уточнении исковых требований, согласно которого просил взыскать с ответчика стоимость выполненных работ по договору строительного подряда №210 от 18.12.2012 в размере 37 803 466,47 рублей.

Исходя из того, что строительно-монтажные работы на сумму 37803466,47 руб были выполнены ООО «Карбон» в период действия договора подряда, в соответствии с утвержденной заказчиком проектно-сметной документацией, выполненные работы имеют для заказчика потребительскую ценность, истец просил суд удовлетворить исковые требования в полном объеме, с учетом заявления об уточнении исковых требований.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон и третьих лиц, суд пришел к выводам о наличии оснований для удовлетворения исковых требований исходя из следующего.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьей 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с пунктом 3 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468, строительный контроль проводится: лицом, осуществляющим строительство; застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации).

Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов.

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком (п. 6 ст. 753 ГК РФ).

В материалы дела представлены доказательства, свидетельствующие об отказе ответчика (заказчика) от приемки работ, отклонении предоставленных истцом актов и требований об оплате выполненных работ.

Ответчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Договора подряда № 210 от 18.12.2012, которое было направлено истцу 18.11.2016.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В материалы дела представлены акты выполненных истцом работ за период с сентября по декабрь 2015 года, которые не были согласованы ответчиком, работы по которым не были приняты надлежащим образом.

Истцом не оспаривается факт прекращения договорных отношений между сторонами, при этом, заявлено требование об оплате фактически выполненных работ, имеющих для заказчика потребительскую ценность (выполнены подготовительные работы, частично выполнены строительно-монтажные работы) При этом, заказчик на продолжение строительства, 30.11.2016 заключил контракт с иной подрядной организацией).

Заказчик (ответчик) в отзывах возражал относительно требований истца об оплате стоимости выполненных работ в полном объеме, ссылаясь, в том числе, на односторонний отказ заказчика от исполнения договора в связи с существенным нарушением ООО «Карбон» его условий, в связи с недостатками выполненных работ.

Представленными в материалы дела доказательства, в том числе заключением судебной экспертизы по делу подтверждается выполнение истцом строительных работ на сумму 38 262 485,38 руб.

При этом, судом установлено, что объект капитального строительства завершен строительством и эксплуатируется, претензии о несоответствии выполненных работ строительным нормам со стороны Заказчика не были предъявлены, недостатки, допущенные при строительстве объекта устранялись подрядчиком, что подтверждается имеющими доказательствами по делу, фактически выполненные Обществом с ограниченной ответственностью «Карбон» строительные работы на объекте «Школа в бухте Казачья», отраженные в представленных актах выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполнение а. работ по форме КС-3, соответствуют строительным нормам и правилам, действующим на момент выполнения строительных работ, что подтверждается экспертным заключением по делу.

С учетом соглашения истца с новым подрядчиком (ООО «Теплостройсервис») об урегулировании сопоставимых видов и объемов выполненных работ на объекте «Школа в бухте Казачья», стоимость работ, выполненных истцом, составляет 37 803 466,47 рублей.

Материалы дела содержат доказательства - первичную бухгалтерскую и иную документацию, подтверждающую факт выполнения истцом работ в рамках договора подряда.

Соответственно, не оплаченной заказчиком подрядчику за принятые работы остается сумма 37803466,47 руб.

В случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора до сдачи ему результата работы, независимо от оснований (в силу статьи 715 либо статьи 717 ГК РФ), заказчик обязан оплатить подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Обратное означало бы получение заказчиком материального результата выполненных подрядчиком работ без предоставления встречного эквивалентного исполнения, что недопустимо между организациями в силу общих начал и принципов гражданского законодательства.

Разъяснения пункта 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 г. N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении" закрепляют общий принцип, согласно которому при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

В информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" разъяснено, что при досрочном прекращении договорных отношений по основаниям иным, чем исполнение договорных обязательств в полном объеме, фактически выполненные исполнителем до расторжения договора работы подлежат оплате, но только в том случае, если они имеют потребительскую ценность для заказчика.

Материалами дела подтверждается факт выполнения истцом работ по договору, а также потребительская ценность выполненных работ и использование в дальнейшем результатов работ ответчиком.

Факт выполнения заявленного объема работ ООО "Карбон" подтвержден документально.

Из представленных в материалы судебного дела документов следует, что ответчик неоднократно уведомлялся истцом о готовности строительных работ к приемке.

Переписка Сторон не содержит указаний Заказчика на необходимость принципиальных корректировок работ, выполненных истцом на объекте строительства, существенного несоответствия выполненных работ проектной документации, приведены указания на текущие устранимые недостатки, которые исправлялись истцом.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы

Учитывая, что ответчик не представил доказательств оплаты истцу денежных средств за выполненные им работы по договору, а также доказательств, опровергающих выполнение истцом работ на указанную сумму, суд считает, что требования истца о взыскании денежных средств в размере 37 803 466,47 руб. предъявлены правомерно и подлежат удовлетворению.

Судебные расходы по делу в виде оплаты проведенной судебной экспертизы в сумме 60 061,56 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в сумме 200 000 рублей подлет отнесению на ответчика, исходя из положений ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск удовлетворить.

Взыскать с Государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального строительства» (299011, 

<

...>; 299011, 

<

...>; ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Карбон» (299038, 

<

...>; ОГРН 

<

***>) стоимость выполненных работ в сумме 37 803 466,47 рублей, расходы по оплате экспертизы в сумме 60 061,56 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в сумме 200 000 рублей.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд города Севастополя.

 

Судья                                                                                                          А.С. Погребняк