АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (дополнительное)

Дело № А47-1308/2022

г. Оренбург

28 июля 2024 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи  Никулиной М.В., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания Погосян Л.Г., рассмотрел в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Жилищно-технический сервис 1»  (462429, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области, к Управлению  жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Администрации г.Орска  

об обязании управление жилищно-коммунального, дорожного  хозяйства и транспорта администрации г. Орска в течении месяца с  даты вступления в законную силу решения суда, с учетом погодных  условий для данного вида работ, устранить недостатки, возникшие в  результате некачественного выполнения работ по капитальному  ремонту кровли многоквартирного дома № 58 по ул. ФИО1 в г.  Орске, а именно:  

-демонтаж стяжки из асфальтобетона на площади 557 кв.м.  согласно план схемы дефектов заключения эксперта № 092-19-2-0303  от 19.12.2023;  

 -устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 ГОСТ  31377-2008, с армированием сеткой ГОСТ 23279-85g 40 мм по первому  проекту кровли МУП «Орскстройремзаказчик» на площади 557 кв.м.  согласно план схемы дефектов заключения эксперта № 092-19-2-0303  от 19.12.2023;  

-монтаж нижнего слоя ковра - флексоизол ТПП-3, 1 слой по  проектной документации на площади 577 кв.м согласно план схемы  дефектов заключения эксперта 092-19-2-0303 от 19.12.2023;  

 -монтаж верхнего слоя ковра - флексоизол ТПП-4, 1 слой по  проектной документации на площади 557 кв.м. согласно план схемы  дефектов заключения эксперта № 092-19-2-0303 от 19.12.2023;  

- устройство уклонообразующего слоя из керамзитобетона р=800  кг/м3 от 0 до 130 мм по проектной документации на площади 557 кв.м.  согласно план схемы дефектов заключения эксперта № 092-19-2-0303  от 19.12.2023;  

- отгрунтовать праймером битумным ТехноНИКОЛЬ № 01 по  проектной документации на площади 557 кв. м согласно план схемы  дефектов заключения эксперта № 092-19-2-0303 от 19.12.2023;  

разработать проект производства работ для выполнения работ по  ремонту кровли многоквартирного дома № 58 по ул.ФИО1 в. г.Орске;  

а также о взыскании госпошлины в размере 6 000 рублей (с  учетом уточнений от 19.06.2024),  

при участии в деле третьих лиц - общество с ограниченной  ответственностью «ПКФ Тандем» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, Оренбургская область, г.Орск), МУП  «Орскстройремзаказчик»( ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>;  Оренбургская область, г.Орск).  

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились,  надлежащим образом извещены о времени и месте судебного  заседания, в том числе публично, путем размещения информации о  времени и месте рассмотрения дела на сайте арбитражного суда. На  основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассматривается в  отсутствие лиц, участвующих в деле.  

Общество с ограниченной ответственностью  «Жилищнотехнический сервис 1» (далее - истец, ООО "ЖТС-1")  обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области к  Некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области (далее - ответчик 1,  Фонд), к Управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства  и транспорта Администрации г.Орска (далее - ответчик 2, УЖКХ  администрации г.Орска) об обязании управление жилищно- коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации г.  Орска в течении месяца с даты вступления в законную силу решения  суда, с учетом погодных условий для данного вида работ, устранить  недостатки, возникшие в результате некачественного выполнения работ  по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома № 58 по ул.  

ФИО1 в г. Орске, а именно: -демонтаж стяжки из асфальтобетона на  площади 557 кв.м. согласно план схемы дефектов заключения эксперта   № 092-19-2-0303 от 19.12.2023; -устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150 ГОСТ 31377-2008, с армированием сеткой  ГОСТ 23279-85g 40 мм по первому проекту кровли МУП  «Орскстройремзаказчик» на площади 557 кв.м. согласно план схемы  дефектов заключения эксперта № 092-19-2-0303 от 19.12.2023; -монтаж  нижнего слоя ковра - флексоизол ТПП-3, 1 слой по проектной  документации на площади 577 кв.м согласно план схемы дефектов  заключения эксперта 092-19-2-0303 от 19.12.2023; -монтаж верхнего  слоя ковра - флексоизол ТПП-4, 1 слой по проектной документации на  площади 557 кв.м. согласно план схемы дефектов заключения эксперта   № 092-19-2-0303 от 19.12.2023; - устройство уклонообразующего слоя  из керамзитобетона р=800 кг/м3 от 0 до 130 мм по проектной  документации на площади 557 кв.м. согласно план схемы дефектов  заключения эксперта № 092-19-2-0303 от 19.12.2023; - отгрунтовать  праймером битумным ТехноНИКОЛЬ № 01 по проектной документации  на площади 557 кв. м согласно план схемы дефектов заключения  эксперта № 092-19-2-0303 от 19.12.2023; разработать проект  производства работ для выполнения работ по ремонту кровли  многоквартирного дома № 58 по ул.ФИО1 в. г.Орске; а также о  взыскании госпошлины в размере 6 000 рублей (с учетом уточнений от  19.06.2024), при участии в деле третьих лиц - общество с ограниченной  ответственностью «ПКФ Тандем», МУП «Орскстройремзаказчик».  

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от  05.07.2024 исковые требования общества с ограниченной  ответственностью «Жилищно-технический сервис 1», удовлетворены.  Суд обязал управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства  и транспорта администрации г. Орска в течении трех месяцев с даты  вступления в законную силу решения суда, с учетом погодных условий  для данного вида работ, устранить недостатки, возникшие в результате  некачественного выполнения работ по капитальному ремонту кровли  многоквартирного дома № 58 по ул. ФИО1 в г.Орске, а именно: - демонтаж стяжки из асфальтобетона на площади 557 кв.м. согласно  план схемы дефектов заключения эксперта № 092-19-2-0303 от  19.12.2023; -устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М150  ГОСТ 31377-2008, с армированием сеткой ГОСТ 23279-85g 40 мм по  первому проекту кровли МУП «Орскстройремзаказчик» на площади  557 кв.м. согласно план схемы дефектов заключения эксперта № 09219-2-0303 от 19.12.2023; -монтаж нижнего слоя ковра - флексоизол  ТПП-3, 1 слой по проектной документации на площади 577 кв.м  согласно план схемы дефектов заключения эксперта 092-19-2-0303 от  19.12.2023; -монтаж верхнего слоя ковра - флексоизол ТПП-4, 1 слой по  

проектной документации на площади 557 кв.м. согласно план схемы  дефектов заключения эксперта № 092-19-2-0303 от 19.12.2023; -  устройство уклонообразующего слоя из керамзитобетона р=800 кг/м3  от 0 до 130 мм по проектной документации на площади 557 кв.м.  согласно план схемы дефектов заключения эксперта № 092-19-2-0303  от 19.12.2023; - отгрунтовать праймером битумным ТехноНИКОЛЬ   № 01 по проектной документации на площади 557 кв. м согласно план  схемы дефектов заключения эксперта № 092-19-2-0303 от 19.12.2023;  разработать проект производства работ для выполнения работ по  ремонту кровли многоквартирного дома № 58 по ул.ФИО1 в. г.Орске.  Суд взыскал с Управления жилищно-коммунального, дорожного  хозяйства и транспорта Администрации г.Орска в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Жилищно-технический сервис 1»  судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000  руб. 00 коп.  

Между тем судом установлено, что при вынесении решения от  05.07.2024 не был разрешен вопрос о судебных расходах за проведение  судебной экспертизы.  

Согласно пункту 3 части 1 статьи 178 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  вправе принять 

дополнительное решение

 в случае, если при вынесении  решения им не был разрешен вопрос о судебных расходах.  

 Частью 2 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации установлено, что вопрос о принятии  арбитражным судом дополнительного решения (постановления)  разрешается в судебном заседании.  

Учитывая изложенное, судом по своей инициативе  рассматривается вопрос о принятии дополнительного решения о  распределении судебных расходов в размере 72 000 руб., понесенных  истцом, в связи с внесением их на депозит суда для оплаты судебной  экспертизы по делу.  

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к  следующим выводам.  

В соответствии со ст. 101 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из  государственной пошлины и судебных издержек, связанных с  рассмотрением дела арбитражным судом.  

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицом,  участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт,  взыскиваются со стороны.  

Решение суда принято в пользу истца, следовательно, понесенные  истцом судебные расходы в размере 72 000 руб. 00 коп., в связи с  внесением их на депозит суда для оплаты судебной экспертизы по делу,  подлежат взысканию с Управления жилищно-коммунального,  дорожного хозяйства и транспорта Администрации г.Орска в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-технический  сервис 1».  

Руководствуясь статьями 101, 106, 110, 112, 167-170, 178, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд   

РЕШИЛ:

Расходы за проведение судебной экспертизы в сумме 72 000 руб.  отнести на Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства  и транспорта Администрации г.Орска.  

Дополнительное решение может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через  Арбитражный суд Оренбургской области.  

 Судья М.В.Никулина