ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

дело № А40-286038/22

 

Резолютивная часть постановления объявлена 19 декабря 2023 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 19 декабря 2023 года

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Семёновой А.Б., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  Ответчика 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.10.2023г. (резолютивная часть от 02.10.2023г.) по делу № А40-286038/22 

по        иску    ООО   "КУБАНЬГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" (ОГРН:1022301429424) к ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ГАЗРЕГИОН" (ОГРН:1107746473284) о взыскании, 

 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 01.03.2021,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 13.12.2022 

 

У С Т А Н О В И Л:

ООО      "КУБАНЬГАЗЭНЕРГОСЕРВИС" (подрядчик) предъявило  ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" ГАЗРЕГИОН" (заказчик) иск о взыскании основного долга по договорам №3-СГМ-2018/СС-2.8  от  27.04.2018  г.,  №4-СГМ-2018/СС-2.7  от  27.04.2018г.,  №8-СГМ-2015/ЮП-3 от 01.10.2015г. в размере 138 655 759,90 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.12.2019 по 04.08.2023 в размере 18 929 795,23 руб., и далее с 05.08.2023 по день фактического исполнения обязательств по оплате (с учетом утонений в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 02.10.2023г., изготовленным в полном объеме 09.10.2023г. исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Ответчик требования и доводы своей жалобы поддержал, Истец по ним возражал.

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, полагает его подлежащим оставлению без изменения.

Установлено, что между ООО «КУБАНЬГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» и ООО «ССК «Газрегион» были заключены договоры подряда №3-СГМ-2018/СС-2.8 от 27.04.2018 г., №4-СГМ-2018/СС-2.7 от 27.04.2018г., №8-СГМ-2015/ЮП-3 от 01.10.2015г.

В соответствии с п. 2.1. Договора № 3-СГМ-2018/СС -2,8 от 27.04.2018 г. Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить полный комплекс работ по КИТСО, перечень которых согласован Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, на объектах Подрядчика:

-  «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 2.8. Участок «КС-7 «Сивакинская» - Белогорск» км 1817,9 - км 1970,45 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0011);

-  «РРЛ связи магистрального газопровода «Сила Сибири». Этап 2.8. Участок «КС-7 1 «Сивакинская» - Белогорск» км 1817,9 - км 1970,45 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0044), в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки -1 033-2000973) (далее все объекты именуются - Объект), т.е. выполнить Работы, в соответствии с Приложением № 1, Проектной и рабочей документацией, разработанной ПАО «ВНИПИгаздобыча» № 4570, а также любые иные Работы, необходимые для строительства Объекта и его последующей эксплуатации в соответствии с назначением (далее - Работы), а Подрядчик обязуется оплатить эти Работы в предусмотренном Договором порядке и принять завершенный строительством Объект. Подрядчик передает Субподрядчику проектную и рабочую документацию, полученную от Генподрядчика. Перечень Проектной и рабочей документации определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

Субподрядчик обязуется выполнить все Работы своими силами и/или силами привлеченных субсубподрядных организаций. При привлечении субсубподрядных организаций Субподрядчик организует выполнение Работ, координирует деятельность субсубподрядных организаций, а также осуществляет контроль за ходом Работ, выполняемых Субсубподрядчиками, несет ответственность перед Подрядчиком за последствия неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору привлеченными Субсубподрядчиками.

В соответствии с п. 3.1. Договора № 3-СГМ-2018/СС -2,8 от 27.04.2018 г. Цена Работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору определяется в Приложении № 1.

Договорная цена ориентировочная и подлежит корректировке в связи с уточнением состава, объемов и сметной стоимости работ, после выхода полного комплекта утвержденной проектно-сметной документации, переданной в «Производство работ» и в соответствии с фактически выполненными объемами работ, с последующим заключением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Цена договора определена в соответствии с расчетом договорной цены 134 922 544,82 руб., срок выполнения работ в соответствии с графиком производства работ до 31.05.2020 в редакции ДС № 5 от 09.06.2020, срок оплаты работ 80 рабочих дней с момента представления КС-2, КС-3, ответственность за нарушение обязательств п. 14.1. договора, право на мотивированный отказ п. 5.33. (три дня).

Во исполнение условий договора № 3-СГМ-2018/СС-2.8 от 27.04.2018 истец выполнил работы и сдал их результат, а ответчик принял работы на общую сумму в размере 134 922 544,82 руб., что подтверждается: двусторонними актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 (л.д. 15-65): № 1 от 31.05.2020 - 6 076 736,49 руб., № 2 от 31.05.2020 - 6 532 983,60 руб., № 3 от 31.05.2020 - 6 784 353,66 руб., № 4 от 31.05.2020 - 6 363 986,36 руб., № 5 от 31.05.2020 - 6 829 454,87 руб., № 6 от 31.05.2020 - 279 518,41 руб., № 7 от 31.05.2020 - 26 318 150,75 руб., № 8 от 31.05.2020 - 8 617 214,89 руб., № 9 от 31.05.2020 - 143 790,96 руб., № 10 от 31.05.2020 - 144 204,35 руб., № 11 от 31.05.2020 - 143 234,86 руб., № 12 от 31.05.2020 -383 852,73 руб., № 13 от 31.05.2020 - 1 401 679,04 руб., № 15 от 31.05.2020 - 143 709,68 руб., № 1 от 31.05.2020 - 2 828 533,00 руб., № 2 от 31.05.2020 - 4 746 566, 92 руб., № 3 от 31.05.2020 - 4 338 695,20 руб., № 4 от 31.05.2020 - 3 062 302,01 руб., № 5 от 31.05.2020 - 2 990 086,13 руб., № 6 от 31.05.2020 -2 653 327,81 руб., № 7 от 31.05.2020 - 3 674 222,63 руб., № 8 от 31.05.2020 - 3 553 883,74 руб., № 9 от 31.05.2020 - 3 551 847,16 руб., № 10 от 31.05.2020 - 3 635 711,16 руб., № 11 от 31.05.2020 - 3 714 859,18 руб., № 12 от 31.05.2020 - 3 514 203,82 руб., № 13 от 31.05.2020 – 1 172,89 руб., № 14 от 31.05.2020 -5 378,77 руб., № 15 от 31.05.2020 - 1 792,95 руб.; справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (л.д. 14) № 1 от 31.05.2020 -134 922 544,82 руб., а оплатил работы частично на сумму в размере 76 036 621,60 руб., что подтверждается платежными поручениями (л.д. 80-83): № 6746 от 05.06.2018 - 32 200 000,00 руб., № 12538 от 01.10.2018 - 32 200 000,00 руб., № 13460 от 16.10.2018 - 11 104 085,60 руб., № 3755 от 26.03.2020 - 532 536,00 руб.

Задолженность по оплате работ по договору № 3-СГМ-2018/СС-2.8 от 27.04.2018 составляет 58 885 923,22 руб. согласно арифметическому расчету: 134 922 544,82 руб. - 76 036 621,60 руб.

В соответствии с п. 2.1. Договора № 8-СГМ-2015/ЮП-3 от 01.10.2015 г. Субподрядчик обязуется выполнить своими и/или привлеченными силами по заданию Подрядчика, в установленный настоящим Договором срок и в соответствии с технической и сметной документацией, Работы на Объекте по согласованной сторонами договорной стоимости Работ, а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения Работ на Объекте, принять результаты Работ и оплатить их.

В соответствии с п. 3.1. 3.2 Договора № 8-СГМ-2015/ЮП-3 от 01.10.2015 г. Договорная стоимость Работ, выполняемых Субподрядчиком, определена в приложении № 1 «Расчёт Договорной стоимости» и Приложении № 2 «Протокол согласования Договорной стоимости»

В договорную стоимость Работ, выполняемых Субподрядчиком, входит: -стоимость субподрядных работ, указанных в проектно-сметной документации, и любых иных работ, необходимых для выполнения Работ, а также учитывает все возможные расходы Субподрядчика, включая, затраты, указанные в пункте 3.2.1. Договора, а также сумма НДС.

Во исполнение условий договора № 8-СГМ-2015/ЮП-3 от 01.10.2015 истец выполнил работы и сдал их результат, а ответчик принял работы сумму в размере 92 554 984,80 руб., что подтверждается:

-  двусторонними актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 (л.д. 69, 70, 72-79): № 1 от 19.12.2019 - 5 834 593,00 руб., № 1 от 19.12.2019 - 29 349 074,00 руб., № 2 от 19.12.2019 - 7 182 125,00 руб., № 3 от 19.12.2019 - 34 763 362,00 руб.;

-  справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (л.д. 68, 71): № 3 от 19.12.2019 -7 001 511,60 руб., № 4 от 19.12.2019 - 85 553 473,20 руб., а ответчик оплатил работы частично на сумму в размере 55 317 649,05 руб., что подтверждается платежными поручениями (л.д. 89, 101): № 7974 от 05.07.2017 - 4 800 000,00 руб., № 5736 от 21.05.2020 - 50 000 000,00 руб. и актами (л.д. 90, 100): № 26 от 30.04.2020 – 455 053,37 руб., № 27 от 30.04.2020 - 62 595,68 руб.

Задолженность по оплате работ по договору № 8-СГМ-2015/ЮП-3 от 01.10.2015 составляет 37 237 335,75 руб. согласно арифметическому расчету: 92 554 984,80 руб. - 55 317 649,05 руб.

В соответствии с п. 2.1., 2.2 Договора №4-СГМ-2018/СС-2.7 от 27.04.2018г. Субподрядчик, обязуется в установленный Договором срок выполнить комплекс Работ по КИТСО, перечень которых согласован Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, на Объектах Подрядчика:

«Магистральный газопровод            «Сила Сибири». Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородннская» - КС-7          «Сивакинская» км. 1636 – км 1817,9 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0010);

«РРЛ связи магистрального газопровода «Сила Сибири», Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородннская»            -           КС-7   «Сивакинская»         км       1636    - км 1817,9 в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код объекта 033-2000973.0041), в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки - 033-2000973) за исключением подготовки и расчистки полосы отвода, (далее все объекты именуются -Объект), т.е. выполнить Работы, предусмотренные Приложением № 1, проектной и рабочей документацией, разработанной ПАО «ВНИ11J41 аз добыча», а также любые иные Работы, необходимые для строительства Объекта и его последующей эксплуатации в соответствии с назначением (далее - Работы), а Подрядчик обязуется принять и оплатить эти Работы в предусмотренном Договором порядке. Подрядчик передает Субподрядчику всю необходимую для выполнения работ проектную и рабочую документацию, полученную от Заказчика. Перечень проектной и рабочей документации определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

Субподрядчик обязуется выполнить все Работы своими силами и/или силами привлеченных субсубнодрядных организаций. При привлечении субсубподрядных организаций Субподрядчик организует выполнение Работ, координирует деятельность субсубнодрядных организаций, а также осуществляет контроль за ходом Работ, выполняемых Субсубподрядчиками, несет ответственность перед Подрядчиком за последствия неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору привлеченными Субсубподрядчиками.

В соответствии с п. 3.1 Договора №4-СГМ-2018/СС-2.7 от 27.04.2018г. Цена Работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору определяется в Приложении № 1. Договорная цена ориентировочная и подлежит корректировке в связи с уточнением состава, объемов и сметной стоимости работ, после выхода полного комплекта утвержденной проектно-сметной документации, переданной в «Производство работ» и в соответствии с фактически выполненными объемами работ, с последующим заключением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Цена договора определена в соответствии с расчетом договорной цены 143 558 827,93 руб., срок выполнения работ определяется актами сдачи-приемки работ в редакции ДС № 2 от 30.08.2018, срок оплаты работ 80 рабочих дней с момента представления КС-2, КС-3, ответственность за нарушение обязательств п. 14.1. договора, право на мотивированный отказ п. 5.33. (три дня).

Во исполнение условий договора № 4-СГМ-2018/СС-2.7 от 27.04.2018 истец выполнил работы и сдал их результат, а ответчик принял работы на общую сумму в размере 143 558 827,93 руб., что подтверждается:

-  двусторонним актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.04.2022 - 119 632 356,61 руб. (л.д. 67);

-  справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 30.04.2022 - 143 558 827,93 руб. (л.д. 66),  а оплатил работы частично на сумму в размере 101 026 327,00 руб., что подтверждается платежными поручениями (л.д. 84-88): № 6743 от 05.06.2018 - 27 800 000,00 руб., № 6836 от 06.06.2018 - 12 000 000,00 руб., № 12365 от 27.09.2018 - 50 000 000,00 руб., № 12537 от 01.10.2018 - 10 000 000,00 руб., № 3752 от 26.03.2020 - 1 226 327,00 руб.

Задолженность по оплате работ по договору № 4-СГМ-2018/СС-2.7 от 27.04.2018 составляет 42 532 500,93 руб. согласно арифметическому расчету: 143 558 827,93 руб. - 101 026 327,00 руб.

Доказательств погашения задолженности в добровольном порядке ответчик не представил, доводы истца о нарушении сроков оплаты за выполненные истцом работы документально не опроверг. 

Поскольку требование истца об уплате основного долга, ответчиком добровольно не удовлетворено, задолженность в размере 138 655 759,90 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26.12.2019 по 04.08.2023 в размере 18 929 795,23 руб., а также с 05.08.2023 по день фактического исполнения обязательств по оплате, подлежат присуждению ко взысканию с него на основании ст.ст. 309, 310, 395, 702, 711 ГК РФ в судебном порядке.

В жалобе ответчик ссылается на то, что в подтверждение наличия задолженности истец представил в материалы дела Акт сверки взаимных расчетов и Акты КС-2, КС-3, которые подписаны лицами, не имеющими соответствующих полномочий, т.е. неуполномоченными лицами. 

Данный довод ответчика подлежит отклонению судом апелляционной инстанции, поскольку заявление о фальсификации доказательств в порядке статьи 161 АПК РФ ответчик в суде первой инстанции не сделал, оснований полагать, что Акт сверки взаимных расчетов и Акты КС-2, КС-3 подписаны неуполномоченным лицом со стороны ответчика, у суда апелляционной инстанции не имеется. 

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09.10.2023г. (резолютивная часть от 02.10.2023г.) по делу № А40-286038/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

Председательствующий судья                                                                Е.Е. Кузнецова

 

Судьи                                                                                                         В.И. Тетюк 

 

                                                                                                                             А.Б. Семёнова                                                                                                  

 

 

 

 

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.