Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград  Дело № А12-18696/2018  « 02 » августа 2018г.  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Зотовой Н. П., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шаповаловым Д. В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Специальные сварные металлоконструкции» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к федеральному бюджетному учреждению «Администрация Волго-Донского бассейна  внутренних водных путей» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о внесении изменений в договор при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, по доверенности; от ответчика – ФИО2, по доверенности; 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 167 - 170, 110 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

Внести изменения в договор № 531-к на выполнение работ от23.03.2018г., изложив  

пункт 9. 2. договора и Календарный план выполнения работ по договору (Приложение  № 3) к договору в следующей редакции: 

Пункт 9. 2.: «Срок окончания выполнения работ – 12.09.2018г.».  

Календарный план выполнения работ по договору (Приложение № 3) к договору в  

графу «Окончания выполнения работ – 12.09.2018г.». 

Взыскать с федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго- 

Донского бассейна внутренних водных путей» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специальные сварные  

металлоконструкции» (ИНН 3442086730, ОГРН 1063459054834) расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления полного  текста в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд  Волгоградской области.  

Судья Н. П. Зотова