АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(с перерывом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации) (резолютивная часть)

Дело № А66-17718/2023

г.Тверь

23 мая 2024 года

 

 Руководствуясь статьями 49, 110, 156, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Принять отказ истца от исковых требований в части внесения  изменений в контракт в отношении сроков выполнения 8 и 9 этапов работ.  

 Производство по делу в указанной части прекратить. 

 Внести в контракт от 01.08.2022 № 1/44-ФЗ/2022 и приложение № 2 к  контракту следующие изменения:  

 пункт 3.4 контракта, изложить в следующей редакции: «Срок  завершения работ по контракту – не позднее 30.06.2024. Конкретные сроки  выполнения отдельных этапов работ по контракту определяются графиком  выполнения работ по Объекту (Приложение № 2 к контракту);  

 внести изменения в Приложение № 2 к контракту ГРАФИК  выполнения работ по объекту «Реконструкция и техническое  перевооружение сборочно-монтажного производства акционерного  общества «Центральное конструкторское бюро транспортного  машиностроения», изменив срок исполнения (окончание) 7 этапа работ на  30 апреля 2024 года, срок исполнения (окончание) 3 этапа работ на 31 мая  2024 года, срок исполнения (окончание) 1, 5, 6 этапов работ на 30 июня  2024 года.  

 В удовлетворении оставшейся части требований отказать.  

 Расходы по уплате государственной пошлины отнести на истца по  делу.  

 Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке статьи 319 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый  арбитражный апелляционный суд, г.Вологда, в месячный срок со дня его  принятия.  

Судья И.В.Калита