ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-15645/2020

Дело № А40-313692/19

г. Москва

24 июля 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 22 июля 2020 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 24 июля 2020 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семикиной О.Н.,

судей: Бодровой Е.В., Титовой И.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙТРЕСТСИТИ", 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.02.2020 по делу № А40-313692/19, 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "АЛЮМИКС32" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 241020, 

<

...>) 

к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙТРЕСТСИТИ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 140185, 

<

...>) 

о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Алюмикс32» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «СтройТрестСити» о взыскании суммы гарантийного удержания в размере 2 425 986,90 руб., пени в размере 637 695,71 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.02.2020 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы 10.02.2020, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, находит решение Арбитражного суда города Москвы от 10.02.2020 не подлежащим изменению или отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «Алюмикс32» (подрядчик) и ООО «СтройТрестСити» (заказчик) были заключены договоры:

-подряда № 18 от 06.06.2017 г., предметом которого в соответствии с п. 1.1 является выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу алюминиевых конструкций (дом № 2) в объеме, предусмотренном локальной сметой (приложение № 1 к договору) на объекте ЖК «Город» многофункционального комплекса переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного пользования назначения и подземной автостоянкой по адресу: 

<

...>.

По условиям договора подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы (п. 1.2 договора), а заказчик в свою очередь, принять их и оплатить.

Окончательная оплата выполненных работ, за исключением выплаченного заказчиком аванса, промежуточных выплат по договору (при наличии) должна осуществляться на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2, справок КС-3 в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ (п. 4.1.1-4.1.2 договора), предоставления исполнительной документации (п. 2.6, 4.1.7 договора).

Дополнительным соглашением № 2 от 01.11.2017 г. были внесены изменения в п. 2.8 договора, согласно которому заказчик удерживает 5% от суммы акта приемки выполненных работ в качестве гарантии исполнения обязательств подрядчиком, с выплатой резервируемых суммы в течение 60 банковских дней после подписания сторонами акта об исполнении обязательств по договору подряда.

Дополнительным соглашением № 5 от 24.08.2018 г. сторонами были внесены изменения в п. 2.1, 3.1.2, Приложения № 1, 2, 3 к договору, цена работ составила 19 921 207,83 руб.

Дополнительным соглашением № 6 от 25.10.2018 г. сторонами было согласовано изменение срока выполнения работ до 30.11.2018 г. включительно.

В рамках выполнения договора между сторонами были подписаны акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, обязательства заказчика по оплате выполненных работ исполнены в полном объеме, за исключением возврата гарантийного удержания, сумма которого составляет 1 004 200,93 руб.

Акт об исполнении обязательств по договору был направлен в адрес заказчика для его подписания, однако не был подписан и возвращен обратно.

Согласно п. 9.3.1 договора, в случае несвоевременной оплаты выполненных работ подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены по договору.

Согласно расчету истца размер пени за период с 05.03.2019 г. по 21.10.2019 г. составляет 231 970,41 руб.

-подряда № АК/050717 от 05.07.2017 г., предметом которого в соответствии с п. 1.1 является выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу конструкций из теплого алюминия (дом № 3) в объеме, предусмотренном локальной сметой (приложение № 1 к договору) на объекте ЖК «Город» многофункционального комплекса переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного пользования назначения и подземной автостоянкой по адресу: 

<

...>.

По условиям договора подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы (п. 1.2 договора), а заказчик в свою очередь, принять их и оплатить.

Окончательная оплата выполненных работ, за исключением выплаченного заказчиком аванса, промежуточных выплат по договору (при наличии) должна осуществляться на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2, справок КС-3 в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ (п. 4.1.1-4.1.2 договора), предоставления исполнительной документации (п. 2.6, 4.1.7 договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 01.11.2017 г. были внесены изменения в п. 2.8 договора, согласно которому заказчик удерживает 5% от суммы акта приемки выполненных работ в качестве гарантии исполнения обязательств подрядчиком, с выплатой резервируемых суммы в течение 60 банковских дней после подписания сторонами акта об исполнении обязательств по договору подряда.

Дополнительным соглашением № 4 от 01.08.2018 г. сторонами были внесены изменения в п. 2.1, 3.1.2, Приложения № 1, 2, 3 к договору, цена работ составила 19 941 458 руб.

Дополнительным соглашением № 5 от 01.10.2018 г. сторонами было согласовано изменение срока выполнения работ до 30.11.2018 г. включительно.

Дополнительным соглашением № 6 от 30.11.2018 г. сторонами было согласовано изменение цены договора, которая составила 19 504 074,21 руб.

В рамках выполнения договора между сторонами были подписаны акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, обязательства заказчика по оплате выполненных работ исполнены в полном объеме, за исключением возврата гарантийного удержания, сумма которого составляет 816 125,22 руб.

Акт об исполнении обязательств по договору был направлен в адрес заказчика для его подписания, однако не был подписан и возвращен обратно.

Согласно п. 9.3.1 договора, в случае несвоевременной оплаты выполненных работ подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены по договору.

Согласно расчету истца размер пени за период с 05.03.2019 г. по 21.10.2019 г. составляет 188 524,93 руб.

- подряда № 23 от 11.07.2017 г., предметом которого в соответствии с п. 1.1 является выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу конструкций из холодного алюминия (дом № 1) в объеме, предусмотренном локальной сметой (приложение № 1 к договору) на объекте ЖК «Город» многофункционального комплекса переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного пользования назначения и подземной автостоянкой по адресу: 

<

...>.

По условиям договора подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы (п. 1.2 договора), а заказчик в свою очередь, принять их и оплатить.

Окончательная оплата выполненных работ, за исключением выплаченного заказчиком аванса, промежуточных выплат по договору (при наличии) должна осуществляться на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2, справок КС-3 в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ (п. 4.1.1-4.1.2 договора), предоставления исполнительной документации (п. 2.6, 4.1.7 договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 24.11.2017 г. были внесены изменения в п. 2.8 договора, согласно которому заказчик удерживает 5% от суммы акта приемки выполненных работ в качестве гарантии исполнения обязательств подрядчиком, с выплатой резервируемых суммы в течение 60 банковских дней после подписания сторонами акта об исполнении обязательств по договору подряда.

Дополнительным соглашением № 3 от 30.07.2018 г. сторонами были внесены изменения в п. 2.1, 3.1.2, Приложения № 1, 2, 3 к договору, цена работ составила 9 174 183 руб., срок выполнения работ был продлен до 31.07.2018 г. включительно.

В рамках выполнения договора между сторонами были подписаны акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, обязательства заказчика по оплате выполненных работ исполнены в полном объеме, за исключением возврата гарантийного удержания, сумма которого составляет 458 559,15 руб.

Акт об исполнении обязательств по договору был направлен в адрес заказчика для его подписания, однако не был подписан и возвращен обратно.

Согласно п. 9.3.1 договора, в случае несвоевременной оплаты выполненных работ подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены по договору.

Согласно расчету истца размер пени за период с 12.10.2018 г. по 21.10.2019 г. составляет 171 959,68 руб.

-подряда № 08-06-ВН-ВИТ от 08.06.2018 г., предметом которого в соответствии с п. 1.1 является выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу конструкций из холодного алюминия внутренних витражей (дома № 1, № 2, № 3) в объеме, предусмотренном локальной сметой (приложение № 1 к договору) на объекте ЖК «Город» многофункционального комплекса переменной этажности со встроенно- пристроенными помещениями общественного пользования назначения и подземной автостоянкой по адресу: 

<

...>.

По условиям договора подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы (п. 1.2 договора), а заказчик в свою очередь, принять их и оплатить.

Окончательная оплата выполненных работ, за исключением выплаченного заказчиком аванса, промежуточных выплат по договору (при наличии) должна осуществляться на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2, справок КС-3 в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ (п. 4.1.1-4.1.2 договора), предоставления исполнительной документации (п. 2.6, 4.1.7 договора). 

Дополнительным соглашением № 1 от 08.07.2018 г. сторонами были внесены изменения в п. 3.1.2 договора, а именно, увеличение срока выполнения работ до 30.09.2018 г.

Дополнительным соглашением № 2 от 30.09.2018 г. сторонами были внесены изменения в п. 2.1, 3.1.2, Приложения № 1, 2, 3 к договору, цена работ составила 2 244 332 руб.

В рамках выполнения договора между сторонами были подписаны акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, обязательства заказчика по оплате выполненных работ исполнены в полном объеме, за исключением возврата гарантийного удержания, сумма которого составляет 121 116,60 руб.

Акт об исполнении обязательств по договору был направлен в адрес заказчика для его подписания, однако не был подписан и возвращен обратно.

Согласно п. 9.3.1 договора, в случае несвоевременной оплаты выполненных работ подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены по договору.

Согласно расчету истца размер пени за период с 13.12.2018 г. по 21.10.2019 г. составляет 37 909,50 руб.

-подряда № 7-08-ЖАЛ-РЕШЕТК от 07.08.2018 г., предметом которого в соответствии с п. 1.1 является выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу жалюзийных решеток (дома № 1, № 2, № 3) в объеме, предусмотренном локальной сметой (приложение № 1 к договору) на объекте ЖК «Город» многофункционального комплекса переменной этажности со встроенно- пристроенными помещениями общественного пользования назначения и подземной автостоянкой по адресу: 

<

...>.

По условиям договора подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы (п. 1.2 договора), а заказчик в свою очередь, принять их и оплатить.

Окончательная оплата выполненных работ, за исключением выплаченного заказчиком аванса, промежуточных выплат по договору (при наличии) должна осуществляться на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2, справок КС-3 в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ (п. 4.1.1-4.1.2 договора), предоставления исполнительной документации (п. 2.6, 4.1.7 договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 25.09.2018 г. сторонами были внесены изменения в п. 3.1.2 договора, а именно, увеличение срока выполнения работ до 30.11.2018 г.

В рамках выполнения договора между сторонами были подписаны акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, обязательства заказчика по оплате выполненных работ исполнены в полном объеме, за исключением возврата гарантийного удержания, сумма которого составляет 10 360 руб.

Акт об исполнении обязательств по договору был направлен в адрес заказчика для его подписания, однако не был подписан и возвращен обратно.

Согласно п. 9.3.1 договора, в случае несвоевременной оплаты выполненных работ подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены по договору.

Согласно расчету истца размер пени за период с 13.12.2018 г. по 21.10.2019 г. составляет 3 242,68 руб.

-подряда № 25-10-АЛ-ВИТР от 25.10.2018 г., предметом которого в соответствии с п. 1.1 является выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу конструкций из алюминия в объеме, предусмотренном локальной сметой (приложение № 1 к договору) на объекте ЖК «Город» многофункционального комплекса переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного пользования назначения и подземной автостоянкой по адресу: 

<

...>.

По условиям договора подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы (п. 1.2 договора), а заказчик в свою очередь, принять их и оплатить.

Окончательная оплата выполненных работ, за исключением выплаченного заказчиком аванса, промежуточных выплат по договору (при наличии) должна осуществляться на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2, справок КС-3 в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ (п. 4.1.1-4.1.2 договора), предоставления исполнительной документации (п. 2.6, 4.1.7 договора).

Срок выполнения работ до 30.11.2018 г. включительно.

В рамках выполнения договора между сторонами были подписаны акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, обязательства заказчика по оплате выполненных работ исполнены в полном объеме, за исключением возврата гарантийного удержания, сумма которого составляет 8 755 руб.

Акт об исполнении обязательств по договору был направлен в адрес заказчика для его подписания, однако не был подписан и возвращен обратно.

Согласно п. 9.3.1 договора, в случае несвоевременной оплаты выполненных работ подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены по договору.

Согласно расчету истца размер пени за период с 02.02.2019 г. по 21.10.2019 г. составляет 2 293,81 руб.

-подряда № 04-09-ЖАЛ-РЕШ-ДОО от 04.09.2018 г., предметом которого в соответствии с п. 1.1 является выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу жалюзийных решеток (дома № 2, № 3) в объеме, предусмотренном локальной сметой (приложение № 1 к договору) на объекте ЖК «Город» многофункционального комплекса переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного пользования назначения и подземной автостоянкой по адресу: 

<

...>.

По условиям договора подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы (п. 1.2 договора), а заказчик в свою очередь, принять их и оплатить.

Окончательная оплата выполненных работ, за исключением выплаченного заказчиком аванса, промежуточных выплат по договору (при наличии) должна осуществляться на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2, справок КС-3 в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ (п. 4.1.1-4.1.2 договора), предоставления исполнительной документации (п. 2.6, 4.1.7 договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 01.19.2018 г. сторонами были внесены изменения в п. 2.1 и п. 3.1.2 договора, а именно, увеличение срока выполнения работ до 31.10.2018 г., стоимость работ составила 137 000 руб.

В рамках выполнения договора между сторонами были подписаны акты приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, обязательства заказчика по оплате выполненных работ исполнены в полном объеме, за исключением возврата гарантийного удержания, сумма которого составляет 6 850 руб.

Акт об исполнении обязательств по договору был направлен в адрес заказчика для его подписания, однако не был подписан и возвращен обратно.

Согласно п. 9.3.1 договора, в случае несвоевременной оплаты выполненных работ подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,1% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены по договору.

Согласно расчету истца размер пени за период с 02.02.2019 г. по 21.10.2019 г. составляет 1 794,70 руб.

Досудебный порядок разрешения спора сторонами соблюден.

Гарантийное удержание, установленное условиями договоров, является обеспечительной мерой, гарантирующей надлежащее качество выполненных работ, покрытия возможных расходов Заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных, по договорам.

Правоотношения сторон основаны на обязательствах строительного подряда и регулируются нормами параграфов 1 и 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общими положениями гражданского законодательства об исполнении обязательств.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ).

По смыслу указанных норм права основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате надлежащим образом выполненных работ является сдача подрядчиком результата этих работ.

Истец порученные ему работы выполнил в полном объеме, работы приняты ответчиком без замечаний.

В свою истец 16 апреля 2019 г. направлял в адрес ответчика все акты об исполнении обязательств в целях их подписания и выплаты гарантийного удержания, что подтверждается копией описи вложения, копией квитанции об отправлении документов курьерской службой от 16.04.2019 г. На сайте отслеживания отправлений значится отчет, согласно которому 17.04.2019 г. документы получены в 09 час. 03 мин. Рештук, ООО «СтройТрестСити». Однако ответа со стороны ответчика в части выполнения обязанности по погашению суммы долга не последовало.

Таким образом, подписание актов об исполнении обязательств не зависят от воли и действий истца.

Обстоятельств, свидетельствующих о не качественности выполненных истцом работ, их несоответствия условиям договоров либо обязательным строительным нормам и правилам, судом в ходе судебного разбирательства не установлено. Доказательств того, что за период эксплуатации результата выполненных истцом работ были выявлены какие-либо недостатки (дефекты), ответчик в материалы дела не представил.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности требования подрядчика о взыскании суммы гарантийного удержания в размере 2 425 986,90 руб.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Поскольку судом установлено ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по оплате выполненных работ в установленный договорами срок, то исковые требования о взыскании неустойки в связи с неисполнением обязательств в размере 637 695,71 руб. также подлежали удовлетворению. При этом, расчет проверен судом и признан арифметически верным и соответствующим условиям договоров и фактическим обстоятельствам дела.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции и отклоняет доводы апелляционной жалобы. По сути, ответчик выражает несогласие с изложенной оценкой фактических обстоятельств дела, которая дана судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования доказательств.

Кроме того апелляционная жалоба идентична отзыву на исковое заявление, доводы которого были полностью рассмотрены и оценены судом первой инстанции.

При таких обстоятельствах, апелляционная инстанция приходит к выводу, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права. В свою очередь, доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения решения суда от 10.02.2020 г.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10.02.2020 по делу №А40-313692/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судьяО.Н. Семикина

СудьиЕ.В. Бодрова

И.А. Титова