Арбитражный суд Амурской области 

675023, 

<

...> 

тел. 

<

***>, факс 

<

***> http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

резолютивная часть

Дело № А04-4137/2025

г. Благовещенск

25 августа 2025 года

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение изготовлено 25.08.2025. Резолютивная часть решения объявлена 25.08.2025.  

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Н.С.Заноза, при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания Е.И. Небытовой  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление муниципального 

учреждения "Городское управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Рост жилищного сервиса" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) о взыскании 14 444 993,85 руб. и возложении обязанности предоставить обеспечение контракта, 

при участии в заседании (до и после перерыва): от истца: ФИО1 – дов. от 12.12.2023 сроком на 2 года, паспорт, диплом  

В заседание не явились: ответчик: увед. ст.ст. 121-123 АПК РФ установил: 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Рост жилищного сервиса" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу муниципального учреждения "Городское управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) по муниципальному контракту от 14.05.2021 № 0110/2021 пени за просрочку исполнения обязательств за периоды с 01.11.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 17.04.2025 в размере 13 396 484,37 руб.; штраф в связи с расторжением муниципального контракта от 14.05.2021 № 0110/2021 в размере 580 114, 08 руб.; штраф за неисполнение п.11.14 контракта от 14.05.2021 № 0110/2021 в размере 10 000 руб. (всего 13 986 598,45 руб.)  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Рост жилищного сервиса" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в течение десяти дней с даты вступления в законную силу решения суда предоставить муниципальному учреждению "Городское управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) предусмотренное п.11.14 муниципального контракта от 14.05.2021 № 0110/2021 обеспечение исполнения гарантийных обязательств в размере 3 248 000 руб. в виде независимой гарантии либо внесением денежных средств на счет заказчика.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Рост жилищного сервиса" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 414 866 руб.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство взыскателя не требуется.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.  

Судья Н.С.Заноза