Арбитражный суд Московской области

  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-79577/18

09 января 2019 года

г.Москва

Резолютивная часть объявлена 20 декабря 2018

Полный текст решения изготовлен 09 января 2019

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрел в судебном заседании  дело по заявлению 

ООО ФИРМА "ПУТЬСТРОЙ-СЕРВИС-Д" (ИНН 7707018630, ОГРН 1037739061656)

к ОАО "ТЕХНОПАРК "ЛОБНЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 6715623,99 руб.

при участии в заседании: согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью ФИРМА "ПУТЬСТРОЙ-СЕРВИС-Д" обратилось в Арбитражный суд Московской области  с иском к Открытому акционерному обществу "ТЕХНОПАРК "ЛОБНЯ" о взыскании задолженности по оплате  четвертого и пятого  этапов работ, выполненных в 2015 году о договору строительного подряда № 506 от 05 сентября 2014 года в размере 6 715 623,99 руб., ссылаясь на ненадлежащее исполнение обязательств ответчиком по оплате выполненных истом работ в рамках указанного договора.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме,  просил заявленные требования удовлетворить.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещался судом надлежащим образом, возражений и отзыв на иск не представил.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы искового заявления ООО ФИРМА "ПУТЬСТРОЙ-СЕРВИС-Д", исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителя истца, суд полагает, что заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме, в связи со следующим.

Из материалов дела следует, что в соответствии с Договором строительного подряда № 506 от 05 сентября 2014 года (далее - Договор) ООО Фирма «ПУТЬСТРОЙ-СЕРВИС-Д» (подрядчик) выполнило для ОАО «Технопарк «Лобня» (заказчик) работы по строительству железнодорожных путей, расположенных по адресу: Московская область, г. Лобня в районе ул. Гагарина, ул. Краснополянская, Рогачевское шоссе, ул. Индустриальная, на общую сумму 13 766 034,97 (Тринадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч тридцать четыре рубля 97 коп.) рублей, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работ (Приложение №1).

Стоимость работ определена на основании согласованной сторонами Локальной сметы № 506 (Приложение №2), являющейся приложением № 2 к Договору и в соответствии с п. 5.1 Договора на момент его заключения составляет 12 397 134,83 (Двенадцать миллионов триста девяносто семь тысяч сто тридцать четыре рубля 83 коп.) рублей.

Дополнительным соглашением №1 от 22.09.2014 г. (Приложение №3) стоимость работ по Договору увеличена на 2 142 082,31 руб., в связи с чем общая стоимость работ составила 14 539217,14 (Четырнадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч двести семнадцать рублей 14 коп.) рублей.

Дополнительным соглашением №2 от 22.10.2014 г. (Приложение №4) стоимость работ   увеличена еще на 1 200 054,32 руб., в связи с чем общая стоимость работ по Договору составила 15 739 271,46 (Пятнадцать миллионов семьсот тридцать девять тысяч двести семьдесят один рубль 46 коп.) рублей.

Согласно п. 6.4. Договора, сдача результатов работ подрядчиком и их приемка заказчиком оформляются Актами о приемке выполненных работ. Акт о приемке выполненных работ на утверждение заказчику предоставляет подрядчик.

Факт выполнения подрядчиком работ подтверждается актами выполненных работ и справками об их стоимости, подписанных со стороны заказчика без замечаний по объему, качеству и стоимости работ:

Акт по форме КС-2, справка по форме КС-3 №1 от 30.09.2014 г. на общую сумму 3 692 927,71 руб. (Приложение № 5),

Акт по форме КС-2, справка по форме КС-3 №2 от 01.10.2014 г. на общую сумму 1 200 054,32 руб. (Приложение № 6),

Акт по форме КС-2, справка по форме КС-3 №3 от 30.10.2014 г. на общую сумму 2 157 428,95 руб. (Приложение № 7),

Акт по форме КС-2, справка по форме КС-3 №4 от 01.06.2015 г. на общую сумму 4 724 354,86 руб. (Приложение № 8),

Акт по форме КС-2, справка по форме КС-3 №5 от 30.09.2015 г. на общую сумму 1 991 269,13 руб. (Приложение № 9).

Итого общая стоимость выполненных и принятых заказчиком работ,оформленных в установленном порядке Актами по форме КС-2 и Справкамипо форме КС-3 об их стоимости, составила 13 766 034,97 рублей:

Этап

Дата выполнения работ

Стоимость (руб.)

Оплата работ

1

30.09.2014 г.

3 692 927,71

10.06.2015 г. (частично)

2

01.10.2014 г.

1 200 054,32

Нет

3

30.10.2014 г.

2 157 428,95

Нет

4

01.06.2015 г.

4 724 354,86

Нет

5

30.09.2015 г.

1 991 269,13

Нет

В соответствии с п.4.1.2 Договора, заказчик обязан принять выполненную работу и оплатить подрядчику установленную настоящим Договором цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Согласно п. 5.2. Договора, оплата работ производится ежемесячно, в течение 60-ти дней после подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ.

Пунктом 3 Дополнительного соглашения №2 предусмотрено, что заказчик перечисляет подрядчику аванс в размере 100% от договорной цены Дополнительного соглашения №2 от 22.10.2014 г. с последующим удержанием полной суммы с окончательным расчетом за выполненные работы.

В связи с нарушением ответчиком сроков оплаты выполненных работ, подрядчиком (истцом) было принято решение о необходимости приостановки выполнения работ по Договору на основании ч. 1 ст. 719 ГК РФ.

После информирования ответчика о приостановки производства работ по Договору, им, в связи с необходимостью возобновления выполнения работ, платежным поручением №20 от 10.06.2015 г. (Приложение №10) истцу была перечислена денежная сумма в размере 2 000 000 руб. в счет частичной оплаты выполненных работ по Договору за сентябрь 2014 г. на основании Акта № 1 по форме КС-2 и Справки №1 по форме КС-3 от 30.09.2014 г. на общую сумму 3 692 927,71 руб.

Истец, получив указанный платеж в размере 2 000 000 руб. и уверения заказчика о неукоснительном соблюдении обязательств по оплате выполненных работ, возобновил производство работ по Договору и за период июнь - сентябрь 2015 г. были выполнены работы на сумму 6 715 623,99 рублей.

Таким образом, по состоянию на 01,10.2015 г. истцом были выполнены для ответчика работы по Договору на общую сумму 13 766 034,97 (7 050 410,98 + 6 715 623,99) рублей из которых заказчиком (ответчиком) оплачено 2 000 000 руб. в результате чего у ответчика сформировалась задолженность перед истцом по Договору в размере 11 766 034,97 (Одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч тридцать четыре рубля 97 коп.) рублей, что подтверждается подписанным сторонами актом сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2015 г. (Приложение № 11).

Несмотря на неоднократные обращения истца в адрес ответчика о необходимости выполнения обязательств по оплате выполненных работ и направления в его адрес соответствующих счетов, принятые ответчиком работы до настоящего времени не оплачены.

В связи с отсутствием стороны ответчика оплаты выполненных работ по Договору, в адрес ОАО «Технопарк «Лобня» 05.12.2016 г. была повторно направлена заказным письмом Претензия (Приложение №12), возвращенная обратно отправителю (истцу) в связи с истечением срока хранения корреспонденции (Приложение № 13).

Учитывая данные обстоятельства, истец обратился с исковым заявлением о взыскании с ответчика задолженности в размере 5 050 410,98 руб. (7 050 410,98-2 000 000) по оплате первых трех этапов работ по Договору, выполненных в 2014 году.

Решением Арбитражного суда Московской области от 12.01.2018 г. по делу №А41-92316/17 исковые требования удовлетворены в полном объеме (Приложение №14), однако, ответчиком до настоящего времени не предпринято никаких мер по добровольному исполнению судебного акта и по состоянию на 20.10.2018 года по данным бухгалтерского учета истца за ОАО «Технопарк «Лобня» числится задолженность по Договору на общую сумму 11 766 034,97 рублей (Приложение №15).

Работы приняты ответчиком в полном объеме и без недостатков, что подтверждается подписанными сторонами актами формы КС-2 и КС-3.

Таким образом, ответчиком, в нарушение требований п. 1 ст. 746 ГК РФ до настоящего времени не произведена оплата выполненных истцом работ по договору строительного подряда.

В связи с принятым по делу №А41-92316/17 Решением Арбитражного суда Московской области от 12.01.2018 г., ООО Фирма «ПУТЬСТРОЙ-СЕРВИС-Д» истец посчитал необходимым предъявить требование о взыскании с ОАО «Технопарк «Лобня» оставшейся суммы задолженности по Договору в размере 6 715 623,99 руб. (11 766 034,97 - 5 050 410,98) по оплате четвертого и пятого этапов работ, выполненных для ответчика в 2015 году.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. 

Из статьи 310 ГК РФ следует, что односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим.

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда (п.1 ст. 746 ГК РФ).

В силу ст.717 ГК РФ, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований или возражений. 

Согласно п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Учитывая изложенные обстоятельства, принимая во внимание, что ответчик не представил доказательств оплаты выполненных истцом работ в полном объеме, предусмотренных договором, суд считает требования истца о взыскании долга, документально подтверждёнными и подлежащими удовлетворению.

Кроме того, ответчик долг не оспорил, его признал, что подтверждается подписанным сторонами актом сверки взаимных расчетов (л.д. 41).

Расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Открытого акционерного общества "ТЕХНОПАРК "ЛОБНЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью ФИРМА "ПУТЬСТРОЙ-СЕРВИС-Д" ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) долг в размере 6 715 623 руб. 99 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 56 578 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья                                                         Е.А. Морозова