10458_9722136  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-12350/22

20 сентября 2022 г.

г. Ростов-на-Дону

 Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Новожиловой М.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пугиной Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью Управляющая компания «Наследие» (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Доломановское» (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***>) об обязании,  

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «ДомСтрой» (ИНН 

<

***>),  индивидуальный предприниматель ФИО1 (ИНН  

<

***>), индивидуальный предприниматель ФИО2 (ИНН  

<

***>)  

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

обязать «Доломановское» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) устранить  следующие недостатки работ на объекте (многоквартирный дом) по адресу: г. Ростов-на- Дону, пер. Доломановский, 17:  

- недостатки работ в виде затекания воды на отметку минус 1-ый первый этаж  (парковка) со стороны входной группы в подъезды №№ 1, 2, 3 (жилая часть «подиум»),  расположенной во дворе дома путем выполнения следующих работ в срок до 20.06.2023:  демонтаж 4 ряда плитки от дома; демонтаж стяжки до фундамента плиты перекрытия;  устройство гидроизоляции плиты гидрошпонкой в месте деформационного шва (стыка) с  защитой наличником; гидроизоляция кирпичной кладки на высоту 300 мм вертикали стен  дома со стороны входных групп; устройство разуклона стяжки поверх  гидроизолированного шва; укладка плитки с уклоном от здания в сторону двора,  устройство деформационного шва в плитке и стяжке,  

- недостатки работ в виде залития помещения офиса, намокания фасада (стен,  кирпичной кладки) со стороны входной группы в офис № 2 (расположенного на 1-ом  этаже на углу дома ул. Согласия/пер Доломановский) в месте уклона (спуска) пер.  Доломановский путем выполнения следующих работ в срок до 20.06.2023: в месте  понижения подпорной стены уложить бордюр 30 размер; выполнить разуклонку отмостки  от офиса № 2; выполнить устройство гидроизоляции кирпичной кладки вертикали стен  офиса,  

- недостатки работ в виде протечек кровли (секция «Б») на нижний этаж путем  выполнения следующих работ в срок до 30.10.2022: герметизацию в месте примыкания  одного флюгорка к вентиляционной шахте; герметизацию мест примыкания отливов к  стене.  

В случае неисполнения судебного акта в сроки, определённые судом, взыскать с  общества с общества с ограниченной ответственностью «Доломановское» (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Управляющая компания «Наследие» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) 1000  рублей судебной неустойки за каждый день неисполнения судебного акта начиная:  

с 21.06.2023 - по требованиям об устранении недостатков работ в виде затекания  воды на отметку минус 1-ый первый этаж (парковка) со стороны входной группы в  подъезды №№ 1, 2, 3 (жилая часть «подиум»), расположенной во дворе дома  

с 21.06.2023 - по требованиям об устранения недостатков работ в виде залития  помещений офиса, намокания фасада (стен, кирпичной кладки) со стороны входной  группы в офис № 2 (расположенного на 1-ом этаже на углу дома ул. Согласия/пер  Доломановский) в месте уклона (спуска) пер. Доломановский  

с 31.10.2022 - по требования о предотвращении протечек кровли (секция «Б») на  нижний этаж.  

В остальной части требований отказать. 

Взыскать с общества с общества с ограниченной ответственностью  «Доломановское» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью Управляющая компания «Наследие» (ИНН 

<

***>  ОГРН 

<

***>) 6000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа по правилам гл. 35 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

 Судья Новожилова М. А. 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 23.12.2021 4:25:04

Кому выдана Новожилова Марина Александровна