АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А45-17142/2017

г. Новосибирск

25 октября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 октября 2017 года.

Решение изготовлено в полном объёме 25 октября 2017 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи          Исаковой С.А., при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Гласс Фэктори» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,  к открытому акционерному обществу «Строительное управление №9» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, о взыскании            2 044 928 руб. 17 коп.,

по встречному иску: о взыскании неустойки в размере 120 591 руб.  48 коп.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО2, доверенность от 06.07.2017, паспорт,

от ответчика: не явился, извещён,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Гласс Фэктори» (далее по тексту – ООО «Гласс Фэктори», истец) обратилось с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Строительное управление №9» (далее по тексту – ОАО «Строительное управление №9», ответчик) о взыскании задолженности по договору подряда №32/15 от 05.06.2015 в размере     179 351 руб. 95 коп., пени в размере 18 329 руб. 77 коп., задолженности по договору подряда №61/15 от 23.03.2015 в размере 586 395 руб. 50 коп., пени в размере 75 527 руб. 74 коп., задолженности по договору подряда №100/15 от 22.07.2015 в размере 559 132 руб. 23 коп., пени в размере 67 878 руб.      65 коп., процентов по денежному обязательству в размере 93 823 руб.         36 коп., задолженности по договору подряда №101/15 от 24.07.2015 в размере 388 724 руб. 87 коп., пени в размере 31 698 руб. 38 коп., процентов по денежному обязательству в размере 44 065 руб. 72 коп.

Истец неоднократно уточнял исковые требования в порядке статьи        49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ), в окончательной редакции в судебном заседании 19.10.2017 истец уточнил исковые требования и просит взыскать с ОАО «Строительное управление №9» задолженность по договору подряда №32/15 от 05.06.2015 в размере 179 351 руб. 95 коп., пени в размере           17 954 руб. 96 коп., задолженность по договору подряда №61/15 от 23.03.2015 в размере 586 395 руб. 50 коп., пени в размере 58 967 руб.          74 коп., задолженность по договору подряда №100/15 от 22.07.2015 в размере 559 132 руб. 23 коп., пени в размере 67 089 руб. 59 коп., проценты по денежному обязательству в размере 37 692 руб. 87 коп., задолженность по договору подряда №101/15 от 24.07.2015 в размере 388 724 руб. 87 коп., пени в размере 41 814 руб. 44 коп., проценты по денежному обязательству в размере 21 240 руб. 91 коп.

 Заявление об уточнении исковых требований, как соответствующее требованиям статьи 49 АПК РФ, судом удовлетворено.

По существу судом рассматривается требование о взыскании с ОАО «Строительное управление №9» задолженности  по договорам подряда в размере 1 713 604 руб. 55 коп., пени в размере 185 826 руб. 73 коп., процентов по денежному обязательству в размере 58 933 руб. 78 коп.

Определением от 06.10.2017 для совместного рассмотрения с первоначальным иском принято встречное исковое заявление ОАО «Строительное управление №9» (далее по тексту – истец по встречному иску) к ООО «Гласс Фэктори» о взыскании неустойки в размере 120 591 руб. 48 коп. (т.1 л.д. 149-150).

Ответчик мотивированный отзыв, документальное обоснование возражений на первоначальный иск, не представил, в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещён надлежащим образом.

Истец по первоначальному иску мотивированный отзыв на встречный иск не представил. 

В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объёме.

В соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика по имеющимся материалам дела.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения истца, суд пришёл к следующему. 

В соответствии со статьёй 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

По основному иску.

Как следует из материалов дела, 05.03.2015 между ОАО «Строительное управление №9»  (заказчик) и ООО «Гласс Фэктори» (подрядчик) заключен договор №32/15 на выполнение подрядных работ (далее по тексту – договор) (т.1 л.д.16-19), в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы (комплекс работ по монтажу стоечного ограждения из шлифованной нержавеющей стальной трубы с заполнением просвета стальными тросами лестниц Л 11, Л 14 и Л 17 вдоль витражей в Учебном корпусе НГУ) и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях, предусмотренных разделом 5 договора (пункты 2.1., 1.1.2. договора).

Стоимость строительно-монтажных работ определена согласно приложениям №1, 2, 3 и составляет 1 145 377 руб. 52 коп., в т.ч. НДС 18% - 174 718 руб. 60 коп. (пункт 3.1 договора).

Срок выполнения работ: начало – в течение 3 рабочих дней с момента перечисления аванса, окончание работ – лестница Л 11 – до 15.05.2015, лестница Л 14 – до 15.05.2015. Срок окончания работ по Л 17 будут согласованы сторонами дополнительным соглашением (пункт 4.1 договора).

В соответствии с пунктами 5.1.1.,5.1.2.,5.1.3. договора заказчик после подписания договора производит оплату аванса на приобретение материалов в сумме 400 000 руб. в срок до 09.03.2015. 

95% стоимости выполненных работ по формам КС-2 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами актов приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Подлежащая оплате по форме КС-3 сумма при каждом платеже уменьшается на сумму возврата аванса пропорционально выполненному объёму работ.

5% стоимости выполненных работ по формам КС-3 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней после сдачи заказчику всей исполнительной документации по актам приёма-передачи документации, а также актов приёмки систем, устранения всех замечаний.

Материалами дела установлено, что во исполнение условий договора истцом выполнены и переданы, а ответчиком приняты работы на сумму      1 029 351 руб. 95 коп., что подтверждается представленными в материалы дела актом о приёмке выполненных работ №00100099 от 29.09.2015, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №49 от 29.09.2015 (т.1 л.д.20-21).

Претензий по качеству и объёмам выполнения работ от ответчика не поступило, справка и акт со стороны ответчика подписаны и скреплены печатью.

Оплата выполненных работ ответчиком произведена на сумму       850 000 руб., что подтверждается платёжными поручениями №192 от 09.09.2015 на сумму 200 000 руб., №268 от 29.04.2015 на сумму 250 000 руб., №213 от 10.03.2015 на сумму 400 000 руб. (т.1 л.д. 22-24).

Таким образом, за ответчиком числится задолженность по договору №32/15 от 05.03.2015 в размере 179 351 руб. 95 коп., которая до настоящего времени не оплачена.

23.03.2015 между ОАО «Строительное управление №9»  (заказчик) и ООО «Гласс Фэктори» (подрядчик) заключен договор №61/15 на выполнение подрядных работ (далее по тексту - договор) (т.1 л.д.25-28), в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы (комплекс работ по устройству цельностеклянного ограждения атриумов ректората НГУ) и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях, предусмотренных разделом 5 договора (пункты 2.1., 1.1.2. договора).

Стоимость строительно-монтажных работ определена согласно приложениям №1, 2, 3 и составляет 3 707 059 руб. 52 коп., в т.ч. НДС 18% - 565 483 руб. 66 коп. (пункт 3.1 договора).

Срок выполнения работ: начало – 01.06.2015, окончание – 15.07.2015 (пункт 4.1 договора).

В соответствии с пунктами 5.1.1.,5.1.2.,5.1.3. договора заказчик после подписания договора производит оплату аванса на приобретение материалов в размере 50% стоимости договора в сумме 1 853 500 руб. (пункт 5.1.1 договора).

95% стоимости выполненных работ по формам КС-2 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами актов приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Подлежащая оплате по форме КС-3 сумма при каждом платеже уменьшается на сумму возврата аванса пропорционально выполненному объёму работ.

5% стоимости выполненных работ по формам КС-3 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней после сдачи заказчику всей исполнительной документации по актам приёма-передачи документации, а также актов приёмки систем, устранения всех замечаний (пункт 5.1.3 договора).

Во исполнение условий договора истцом выполнены и переданы, а ответчиком приняты работы на сумму 3 339 895 руб. 50 коп., что подтверждается представленными в материалы дела актом о приёмке выполненных работ №00100098 от 28.09.2015, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №52 от 28.09.2015 (т.1 л.д.30-31).

Претензий по качеству и объёмам выполнения работ от ответчика не поступило, справка и акт со стороны ответчика подписаны и скреплены печатью.

Оплата выполненных работ ответчиком произведена на общую сумму 2 753 500 руб., что подтверждается платёжными поручениями №323 от 20.08.2015 на сумму 200 000 руб., №273 от 18.08.2015 на сумму 300 000 руб., №962 от 03.08.2015 на сумму 400 000 руб., №876 от 08.04.2015 на сумму 1 853 500 руб. (т.1 л.д.32-35).

Таким образом, за ответчиком числится задолженность по договору №61/15 от 23.03.2015 в размере 586 395 руб. 50 коп., которая до настоящего времени не оплачена.

22.07.2015 между ОАО «Строительное управление №9» (заказчик) и ООО «Гласс Фэктори» (подрядчик) заключен договор №100/15 на выполнение подрядных работ (далее по тексту – договор) (т.1 л.д.36-39), в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы (комплекс работ по изготовлению и монтажу козырьков светопрозрачных конструкций из закалённого стекла в Учебном корпусе НГУ, блоки №1, 2, 3) и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях, предусмотренных разделом 5 договора (пункты 2.1., 1.1.2 договора).

Стоимость строительно-монтажных работ определена согласно приложению №1 и составляет 1 114 858 руб. 01 коп., в т.ч. НДС 18% -         170 063 руб. 09 коп. (пункт 3.1 договора).

Срок выполнения работ: начало – 27.07.2015, окончание – 10.08.2015 (пункт 4.1 договора).

В соответствии с пунктами 5.1.1.,5.1.2.,5.1.3. договора заказчик после подписания договора производит оплату аванса на приобретение материалов в размере 50% от стоимости договора в сумме 557 000 руб.

95% стоимости выполненных работ по формам КС-2 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами актов приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Подлежащая оплате по форме КС-3 сумма при каждом платеже уменьшается на сумму возврата аванса пропорционально выполненному объёму работ.

5% стоимости выполненных работ по формам КС-3 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней после сдачи заказчику всей исполнительной документации по актам приёма-передачи документации, а также актов приёмки систем, устранения всех замечаний.

Во исполнение условий договора истцом выполнены и переданы, а ответчиком приняты работы на сумму 1 109 132 руб. 23 коп., что подтверждается представленными в материалы дела актом о приёмке выполненных работ №00100136 от 03.11.2015, справкой о стоимости выполненных работ и затрат №81 от 03.11.2015 (т.1 л.д.41-42).

Претензий по качеству и объёмам выполнения работ от ответчика не поступило, справка и акт со стороны ответчика подписаны и скреплены печатью.

Оплата выполненных работ ответчиком произведена на сумму              550 000 руб., что подтверждается платёжным поручением №878 от 31.07.2015 (т.1 л.д. 43).

Таким образом, за ответчиком числится задолженность по договору №100/15 от 22.07.2015 в размере 559 132 руб. 23 коп., которая до настоящего времени не оплачена.

24.07.2015 между ОАО «Строительное управление №9» (заказчик) и ООО «Гласс Фэктори» (подрядчик) заключен договор №101/15 на выполнение подрядных работ (далее по тексту – договор) (т.1 лд.д.44-48), в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить на объекте работы (комплекс работ по изготовлению и монтажу козырьков светопрозрачных конструкций из закалённого стекла в корпусе Ректората) и сдать результаты работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях, предусмотренных разделом 5 договора (пункты 2.1., 1.1.2. договора).

Стоимость строительно-монтажных работ определена согласно приложению №1 и составляет 338 365 руб. 25 коп., в т.ч. НДС 18% -         51 615 руб. 04 коп. (пункт 3.1 договора).

Стоимость дополнительных работ, выполняемых подрядчиком определена сторонами на основании приложения №1 к дополнительному соглашению №1 от 11.08.2015 к договору №101/15 от 24.07.2015 и составляет 301 636 руб. 01 коп. (л.д. 49).

Стоимость дополнительных работ, выполняемых подрядчиком определена сторонами на основании приложения №1 к дополнительному соглашению №2 от 26.10.2015 к договору №101/15 от 24.07.2015 и составляет 306 744 руб. 99 коп., с учетом НДС 18% (л.д.51).

Таким образом, стоимость строительно-монтажных работ определена сторонами согласно приложению №1, приложения №1 к дополнительному соглашению №1 от 11.08.2015, приложения №1 к дополнительному соглашению №2 от 26.10.2015 и составила 946 746 руб. 25 коп., в т.ч. НДС 18% - 144 418 руб. 92 коп. (пункт 3.1 договора в редакции дополнительного соглашения №2 от 26.10.2015).

В соответствии с пунктами 5.1.1.,5.1.2.,5.1.3. договора заказчик после подписания договора производит оплату аванса на приобретение материалов в размере 50% от стоимости договора в сумме 169 000 руб.

95% стоимости выполненных работ по формам КС-2 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами актов приёмки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Подлежащая оплате по форме КС-3 сумма при каждом платеже уменьшается на сумму возврата аванса пропорционально выполненному объёму работ.

5% стоимости выполненных работ по формам КС-3 оплачивается заказчиком подрядчику в течение 5 банковских дней после сдачи заказчику всей исполнительной документации по актам приёма-передачи документации, а также актов приёмки систем, устранения всех замечаний.

Согласно дополнительному соглашению №1 от 11.08.2015 заказчик оплачивает аванс на дополнительные объёмы работ в размере 50% от стоимости дополнительного соглашения в сумме 150 000 руб. 

Согласно дополнительному соглашению №2 от 26.10.2015 заказчик оплачивает аванс на дополнительные объёмы работ в размере 50% от стоимости дополнительного соглашения в сумме 153 300 руб. 

Согласно договору сроки выполнения работ: начало – 27.07.2015, окончание – 10.08.2015 (пункт 4.1. договора)

Согласно дополнительному соглашению №1 от 11.08.2015 сроки выполнения работ по дополнительному соглашению:  начало – 17.08.2015, окончание – 25.08.2015 (пункт 5 дополнительного соглашения №1)

Согласно дополнительному соглашению №2 от 26.10.2015 сроки выполнения работ по дополнительному соглашению:  начало – 27.10.2015, окончание – 06.11.2015 (пункт 5 дополнительного соглашения №2)

Во исполнение условий договора, дополнительных соглашений №№ 1,2 истцом выполнены и переданы, а ответчиком приняты работы на сумму 861 824 руб. 87 коп., что подтверждается представленными в материалы дела актами о приёмке выполненных работ №00100153 от 23.11.2015 на сумму 208 002 руб. 94 коп., №00100161 от 08.12.2015 на сумму 347 115 руб. 75 коп., №00100008 от 01.02.2016 на сумму 306 706 руб. 18 коп., справками о стоимости выполненных работ и затрат №82 от 23.11.2015 на сумму     208 002 руб. 94 коп., №90 от 08.12.2015 на сумму 347 115 руб. 75 коп., №6 от 01.02.2016 на сумму 306 706 руб. 18 коп. (л.д.53-58).

Претензий по качеству и объёмам выполнения работ от ответчика не поступило, справки и акты со стороны ответчика подписаны и скреплены печатью.

Оплата выполненных работ ответчиком произведена на сумму             473 100 руб., что подтверждается платёжными поручениями №788 от 30.07.2015 на сумму 169 000 руб., №5082 от 29.10.2015 на сумму           153 300 руб., №146 от 11.08.2015 на сумму 150 800 руб. (л.д. 59-61).

Таким образом, за ответчиком числится задолженность по договору №101/15 от 24.07.2015 в размере 388 724 руб. 87 коп., которая до настоящего времени не оплачена.

В соответствии со статьёй 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьёй 711 ГК РФ, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий, за исключением случаев, установленных законом или предусмотренных договором, не допускается. 

10.05.2016 (согласно почтовой квитанции) истцом в адрес ответчика направлена претензия от 06.05.2016 с требованием погасить задолженность (т.1 л.д.62-63). Претензия ответчиком оставлена без удовлетворения.

В материалы дела представлена почтовая опись о направлении 03.08.2017 в адрес ответчика исполнительной документации по договорам №№32/15, 61/15, 100/15, 101/15 (т.1 л.д.90-91).

Пунктом 3.1 статьи 70 АПК РФ предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Материалами дела подтверждается, что обязательства по договорам подряда ответчиком не исполнены, доказательства оплаты задолженности не представлены, в связи с чем, суд находит требование истца о взыскании задолженности по договорам подряда №№32/15, 61/15, 100/15, 101/15 в размере 1 713 604 руб. 55 коп. подлежащим удовлетворению.

 В соответствии с частью 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

 Согласно части 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктами 9.1 договоров в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств, подрядчик уплачивает заказчику пеню в размере 0,02% от цены договора за каждый день просрочки.

Поскольку в нарушение условий договора задолженность по оплате за выполненные работы ответчиком не уплачена, истцом в соответствии с пунктом 9.1 договоров произведено начисление пени по состоянию на 07.09.2017 в размере 185 826 руб. 73 коп.:

- по договору подряда №35/15 от 05.30.2015 в размере 17 954 руб.         96 коп.;

- по договору подряда №61/15 от 23.03.2015 в размере 58 967 руб.         74 коп.;

- по договору подряда №100/15 от 22.07.2015 в размере 67 089 руб.        59 коп.;

- по договору подряда №101/15 от 24.07.2015 в размере 41 814 руб.        44 коп.

Расчёт пени ответчиком не оспорен, судом проверен и признан правильным. 

Ответчиком не заявлено и судом из материалов дела не усматривается оснований для уменьшения размера взыскиваемой пени в соответствии со статьёй 333 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 317.1 ГК РФ, в случаях, когда законом или договором предусмотрено, что на сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты, размер процентов определяется действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставкой Банка России (законные проценты), если иной размер процентов не установлен законом или договором. Указанная норма введена федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» и действует с 01.06.2015. 

Согласно расчёту истца размер процентов по договору подряда №100/15 от 22.07.2015 за период с 12.11.2015 по 31.07.2016 составил 37 692 руб.        87 коп., по договору подряда №101/15 от 24.07.2015 за период с 16.12.2015 по 31.07.2016 составил 21 240 руб. 91 коп.

Расчёт процентов ответчиком не оспорен, судом проверен и признан правильным. 

Встречный иск.

Основанием для подачи встречного искового заявления послужило нарушение подрядчиком (истцом по первоначальному иску) сроков выполнения работ по договорам подряда.

Согласно разделу 6 договоров работы должны быть выполнены не позднее:

- по договору №32/15 от 05.03.2015 – 15.05.2015;

- по договору подряда №61/15 от 23.03.2015 – 15.07.2015;

- по договору №100/15 от 22.07.2015 – 10.08.2015;

- по договору №101/15 от 24.07.2015 – 10.08.2015;

- по дополнительному соглашению №1 от 11.08.2015 к договору подряда №101/15 от 24.07.2015 – 25.08.2015;

- по дополнительному соглашению №2 от 26.10.2015 к договору подряда №101/15 от 24.07.2015 – 06.11.2015.

Между тем, фактически работы выполнены подрядчиком:

- по договору №32/15 от 05.03.2015 – 29.09.2015;

- по договору подряда №61/15 от 23.03.2015 – 28.09.2015;

- по договору №100/15 от 22.07.2015 – 03.11.2015;

- по договору №101/15 от 24.07.2015 – 08.12.2015;

- по дополнительному соглашению №1 от 11.08.2015 к договору подряда №101/15 от 24.07.2015 – 23.11.2015;

- по дополнительному соглашению №2 от 26.10.2015 к договору подряда №101/15 от 24.07.2015 – 01.02.2016.

В силу части 2 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несёт ответственность как за нарушение начального и конечного срока выполнения работ, так и за нарушение промежуточных сроков выполнения работ.

Пунктами 9.1 договоров предусмотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств, подрядчик уплачивает заказчику пеню в размере 0,02% от цены договора за каждый день просрочки исполнения.

Согласно расчёту истца по встречному иску  размер неустойки составил 120 591 руб. 48 коп., в том числе:

- по договору №32/15 от 05.03.2015 за период с 16.05.2015 по 29.09.2015 составил 28 204 руб. 24 коп.;

- по договору подряда №61/15 от 23.03.2015 за период с 16.07.2015 по 28.09.2015 составил 50 098 руб. 43 коп.;

- по договору №100/15 от 22.07.2015 за период с 11.08.2015 по 03.11.2015 составил 18 855 руб. 25 коп.;

- по договору №101/15 от 24.07.2015 за период с 11.08.2015 по 08.12.2015 составил 8 330 руб. 78 коп.;

- по дополнительному соглашению №1 от 11.08.2015 к договору подряда №101/15 от 24.07.2015 (105 дней) составил 4 368 руб. 06 коп.;

- по дополнительному соглашению №2 от 26.10.2015 к договору подряда №101/15 от 24.07.2015 (175 дней) составил 10 734 руб. 72 коп.

Расчёт судом проверен и признан неверным в части определения количества дней просрочки с учётом дополнительных соглашений к договору №101/15 от 24.07.2015, так по соглашению №1 от 11.08.2015 количество дней просрочки составит 90 дней (3 744 руб. 05 коп.), по соглашению №2 от 26.10.2015 составит 87 дней (5 336 руб. 69 коп.).

Таким образом, общий размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договорам подряда №№32/15, 61/15, 100/15, 101/15 составляет 114 569 руб. 44 коп.

Истец по первоначальному иску расчёт неустойки по встречному иску не оспорил.

Распределение судебных расходов производится по правилам статьи 110 АПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

по первоначальному иску: 

взыскать с открытого акционерного общества «Строительное управление №9» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гласс Фэктори» (ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 1 713 604 руб. 55 коп., пени  в размере 185 826 руб. 73 коп., проценты по денежному обязательству в размере 58 933 руб. 78 коп.

Взыскать с открытого акционерного общества «Строительное управление №9» (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 32 584 руб. 

По встречному иску: 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гласс Фэктори» (ОГРН 

<

***>) в пользу открытого акционерного общества «Строительное управление №9» (ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 114 569 руб. 44 коп.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гласс Фэктори» (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 4 387 руб.

Взыскать с открытого акционерного общества «Строительное управление №9» (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 231 руб.

В результате зачёта взысканных денежных сумм по первоначальному иску и по встречному иску, взыскать с открытого акционерного общества «Строительное управление №9» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гласс Фэктори» (ОГРН 

<

***>) 1 843 795 руб. 62 коп.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение месяца после принятия.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья                                                                                        С.А. Исакова