АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-18220/2024

г. Нижний Новгород                                                                                     14 января 2025 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 21.10.2024.

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Селезневой Марины Романовны (шифр дела в отделе судьи 42-333),

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Давыдовой Ю.О., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению иску общества с ограниченной ответственностью "Теплоклиматлюкс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 603074, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью "Стройальянс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 603000, 

<

...>) о взыскании задолженности по договору подряда в размере 1 558 016, 40 руб., пени и расходы по оплате государственной пошлины,

 

при участии в судебном заседании представителей:

лица, участвующие в деле, не явились, 

 

установил:

в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось общество с ограниченной ответственностью "Теплоклиматлюкс" к обществу с ограниченной ответственностью "Стройальянс" о взыскании задолженности по договору подряда в размере 1 558 016, 40 руб., пени и расходы по оплате государственной пошлины.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 20.06.2024 указанное заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 09.09.2024 на 09 часов 00 минут, к судебному разбирательству на 09.09.2024 на 09 часов 05 минут.

В ходе предварительного судебного заседания представитель истца поддержал заявленные требования.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 09.09.2024 завершено предварительное судебное заседание, дело назначено к судебному разбирательству на 21.10.2024, ответчику повторно предложено представить отзыв.

Ответчик какой-либо позиции в материалы дела не представил, явку уполномоченного представителя в судебное заседание не обеспечил, в материалах дела имеются доказательства, подтверждающие надлежащее извещение сторон о рассмотрении дела.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в дело доказательства в их совокупности и взаимосвязи суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, между ООО "Теплоклиматлюкс" (субподрядчик) и ООО "Стройальянс" (подрядчик) заключен договор субподряда №23-01/23 от 27.01.2023,  согласно условиям которого Субподрядчик обязуется своими силами, по заданию Подрядчика, с использованием материалов Подрядчика, обязуется выполнить работы по монтажу трубопроводов системы отопления №2 и трубопроводов системы теплоснабжения П1-ПВ11 на объекте: Здание организации начального общего и среднего (полного) общего образования (№36 по генплану) место выполнения работ – г. Н.Новгород, Советский р-он, строящийся микрорайон «Новая Кузнечиха», согласно Смете №1 (Приложение №1) и Графику выполнения работ (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Согласно пункту 2.1 договора субподряда №23-01/23 от 27.01.2023 стоимость (цена) работ по настоящему договору является твердой и согласовывается сторонами на основании смет и составляет 598 752 руб. 00 коп.

Также между ООО "Теплоклиматлюкс" (субподрядчик) и ООО "Стройальянс" (подрядчик) заключен договор субподряда №24-01/23 от 27.01.2023,  согласно условиям которого Субподрядчик обязуется своими силами, по заданию Подрядчика, с использованием материалов Подрядчика, обязуется выполнить работы по монтажу нагревательных приборов и арматуры системы отопления №2 на объекте: Здание организации начального общего и среднего (полного) общего образования (№36 по генплану) место выполнения работ – г. Н.Новгород, Советский р-он, строящийся микрорайон «Новая Кузнечиха», согласно Смете №1 (Приложение №1) и Графику выполнения работ (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Согласно пункту 2.1 договора субподряда №24-01/23 от 27.01.2023 стоимость (цена) работ по настоящему договору является твердой и согласовывается сторонами на основании смет и составляет 593 136 руб. 00 коп.

Вместе с тем между ООО "Теплоклиматлюкс" (субподрядчик) и ООО "Стройальянс" (подрядчик) заключен договор субподряда №94-08/22 от 10.08.2022,  согласно условиям которого Субподрядчик обязуется своими силами, по заданию Подрядчика выполнить работы по устройству наружных сетей ТЕПЛОТРАССЫ от точки врезки до ИТП, с проведением последующих испытаний новых инженерных сетей согласно СП, СНиП и иных нормативных актов на объекте: Здание организации начального общего и среднего (полного) общего образования (№36 по генплану) место выполнения работ – г. Н.Новгород, Советский р-он, строящийся микрорайон «Новая Кузнечиха», согласно Смете №1 (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

Согласно пункту 2.1 договора субподряда №94-08/22 от 10.08.2022 стоимость (цена) работ по настоящему договору является твердой и согласовывается сторонами на основании смет и составляет 716293 руб. 50 коп.

Кроме того между ООО "Теплоклиматлюкс" (субподрядчик) и ООО "Стройальянс" (подрядчик) заключен договор субподряда №93-06/22, согласно условиям которого Субподрядчик обязуется своими силами, по заданию Подрядчика выполнить работы по устройству наружных сетей канализации К1, К2, Др с проведением последующих испытаний новых инженерных сетей согласно СП, СНиП и иных нормативных актов на объекте: Здание организации начального общего и среднего (полного) общего образования (№36 по генплану) место выполнения работ – г. Н.Новгород, Советский р-он, строящийся микрорайон «Новая Кузнечиха», согласно Смете №1 (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Согласно пункту 2.1 договора субподряда №93-06/22 стоимость (цена) работ по настоящему договору является твердой и согласовывается сторонами на основании смет и составляет 2 602119 руб. 00 коп.

В соответствии с согласованными сторонами условиями окончательный расчет выполненных и принятых работ осуществляется после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение двадцати дней с даты их подписания.

Во исполнение обязательств по данным договорам ООО "Теплоклиматлюкс" выполнены работы, что подтверждается   справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 к указанным договорам.

Стоимость выполненных работ по  перечисленным выше договорам подряда  согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат составляет 1 588 016 руб. 40 коп. 

Ответчиком  обязательства по оплате выполненных работ на сумму 1 588 016 руб. 40 коп. не исполнены.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате истцом начислены пени применительно к статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые по состоянию на 14.05.2024 составляют 184 198 руб. 79 коп.

Претензия истца оставлена ООО "Стройальянс" без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с данным исковым заявлением.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В статьях 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно статье  431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

В силу пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

С учетом статей 1, 9 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей, в своем интересе и по своему усмотрению. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Подписав договоры на данных условиях, стороны действовали в соответствии с принципом осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе и как следствие согласились с условиями договоров. 

Факт ненадлежащего исполнения обязательств ответчиком подтвержден материалами дела.  

В нарушение стать 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каких-либо опровергающих доводы истца доказательств, ответчиком в материалы дела не представлено.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Неустойка является одни из способов обеспечения обязательств в соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Представленные в материалы дела расчеты и период проверены судом и признаны обоснованными, ходатайств о снижении неустойки применительно к статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявлено. 

Принимая во внимание изложенное, заявленные требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Расходы по государственной пошлине согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройальянс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 603000, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Теплоклиматлюкс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 603074, 

<

...>) задолженность по договорам подряда №313-07/22 от 18.07.2022, №419-10/22 от 03.10.2022, №94-08/22 от 10.08.2022, №23-01/23 от 27.01.2023, №24-01/23 от 27.01.2023 в размере 1 588 016 руб. 40 коп., пени по состоянию на 14.05.2024 применительно к статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в сумме 184 198 руб. 79 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 28880 руб. 00 коп.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия. 

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке кассационного производства, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                         М.Р. Селезнева