АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-24688/2024

г. Нижний Новгород                                                                                 06 декабря 2024 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 14.10.2024.

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Селезневой Марины Романовны (шифр дела в отделе судьи 42-488),

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Давыдовой Ю.О., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью СК предприятие "Прогресс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Нижний Новгород)  к обществу с ограниченной ответственностью «НижегородАвтоДор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Нижний Новгород) 

о взыскании 2 498 076, 00 рублей и судебных расходов по оплате госпошлины,

 

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - ФИО1 (доверенность от 23.07.2024),

после перерыва в судебном заседании в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

 

установил:

в Арбитражный суд Нижегородской области поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью СК предприятие "Прогресс" к ответчику  обществу с ограниченной ответственностью "НижегородАвтоДор" о взыскании 2 498 076 руб.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 12.08.2024 указанное заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 08.10.2024, ответчику предложено представить отзыв.

В ходе предварительного судебного заседания представитель истца поддержал заявленные требования.

В материалы дела от ответчика поступила письменная позиция, согласно которой с наличием задолженности в сумме 1748076 рублей перед истцом  ООО"НижегородАвтоДор" согласно.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 08.10.2024 объявлен перерыв до 14.10.2024, предварительное судебное заседание завершено, дело назначено к судебному разбирательству, ответчику повторно предложено представить отзыв.

От истца поступили уточнения заявленных требований, согласно которым последний просит взыскать с ООО"НижегородАвтоДор" задолженность по договору №435 от 04.07.2022 в сумме 1 748 076 рублей, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины. В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные уточнения приняты к рассмотрению судом.

Исследовав в полном объеме представленные в материалы дела доказательства, установлены следующие фактические обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между  ООО СК Предприятие "Прогресс" (далее - исполнитель) и ООО "НижегородАвтоДор" (далее - заказчик) заключен договор №435 от 04.07.2022, согласно условиям которого исполнитель обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ (далее - "Работы") на объекте: М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань», 4 этап км 224 - км 347, Владимирская, Нижегородская области (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 "Муром - М-7 "Волга" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" (далее - Объект).

В силу подпунктов 1.1, 1.3 договора №435 от 04.07.2022 начало работ - 01 августа 2022 года. Срок окончания выполнения Работ по Договору — «30» сентября 2022 года. Исполнитель выполняет работы из материалов, предоставляемых Заказчиком.

Сдача и приемка выполненных работ согласована сторонами в пункте 3 договора №435 от 04.07.2022, согласно которому в течение 5 рабочих дней после окончания работ исполнитель предоставляет заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (п.п. 3.1.)

Согласно подпункту 3.2 договора №435 от 04.07.2022 заказчик обязан рассмотреть представленные документы, указанные в п.п. 3.1 договора, оформить их и подписать акт о приемке выполненных работ в течение 5 рабочих дней, либо в этот же срок направить исполнителю мотивированный отказ от их подписания. В случае направления заказчиком мотивированного отказа от приемки работ, сторонами в течение 2 рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроков их исправления.

В соответствии с подпунктом 4.1 договора №435 от 04.07.2022 общая стоимость работ является договорной и определяется на основании согласованных сторонами единичных расценок (Приложение №1). Стоимость работ по настоящему договору составляет ориентировочно 10 000 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. Окончательная общая стоимость работ по настоящему договору будет определена в соответствии с фактически выполненными объемами работ.

Оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется Заказчиком на основании Актов приемки выполненных работ (по форме КС-2) и Справок о Стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), подписанных Исполнителем и Заказчиком, а также оформленных на их основании счетов, представляемых Заказчиком Исполнителю (п.п. 4.2 договора).

Также подпунктом 4.4 договора №435 от 04.07.2022  предусмотрено, что оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания актов приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Согласно представленным в материалы дела документам, ООО СК предприятие "Прогресс" выполнило следующие работы:

- в период с 04.07.2022 по 31.08.2022: устройство подбетонки;  засыпка грунта в котлованах с послойным уплотнением; укладка щебня вручную; бетонирование монолитных лежней и переходных плит.  Факт выполнения работ подтверждается актом о приемке выполненных работ №1 от 31.08.2022 на сумму 1 017 045 руб. 00 коп.;

 -  в период с 01.09.2022 по 10.10.2022: по ПК-2619  гидроизоляция обмазочная в 2 слоя; шкафные стенки; бетонирование монолитных лежней и переходных плит; укладка щебня вручную; устройство гидроизоляции наплавляемой; по ПК-2854 гидроизоляция обмазочная в 2 слоя; бетонирование монолитных лежней и переходных плит. Факт выполнения работ подтверждается актом о приемке выполненных работ №2 от 10.10.2022 на сумму 3 498 076  руб. 00 коп.

С учетом изложенного ООО СК предприятие "Прогресс" по договору выполнены работы на сумму 4 515 121  руб. 00 коп., доказательств обратного не представлено.

Материалами дела и ответчиком подтвержден факт частичной оплаты выполненных работ, с учетом принятых судом уточнений сумма задолженности по договору №435 от 04.07.2022  перед ООО СК предприятие "Прогресс" составляет 1 748 076 руб. 00 коп.

Претензии истца от 27.06.2023 об оплате задолженности оставлена ООО "НижегородАвтоДор" без удовлетворения.

Согласно представленной письменной позиции задолженность по договору признана ответчиком, отражена в представленном ответчиком акте сверки расчетов от 13.09.2024.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В статьях 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно статье  431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

В силу пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

С учетом статей 1, 9 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей, в своем интересе и по своему усмотрению. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Подписав контракт на данных условиях, стороны действовали в соответствии с принципом осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе и как следствие согласились с условиями договоров. 

Факт ненадлежащего исполнения обязательств ответчиком подтвержден материалами дела.  

В нарушение стать 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каких-либо опровергающих доводы истца доказательств, ответчиком в материалы дела не представлено.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Представленные в материалы дела расчеты и период проверены судом и признаны обоснованными. 

Принимая во внимание изложенное, заявленные требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

С учетом признания иска расходы по государственной пошлине согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика в размере 30%  от уплаченной суммы и подлежат взысканию в пользу истца, в остальной части денежные средства подлежат возврату истцу из бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

ходатайство общества с ограниченной ответственностью СК Предприятие "Прогресс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Нижний Новгород) об уточнении исковых требований в порядке пункта 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принять. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НижегородАвтоДор" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Нижний Новгород) в пользу общества с ограниченной ответственностью СК Предприятие "Прогресс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Нижний Новгород) задолженность по договору №435 от 04.07.2022 в размере 1 748 076 руб. 00 коп., а также 10 647 руб. 00 коп.

Возвратить на основании настоящего судебного акта обществу с ограниченной ответственностью СК Предприятие "Прогресс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Нижний Новгород) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 35 490 руб., уплаченную по платежному поручению № 235 от 24.07.2024.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия. 

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке кассационного производства, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                           М.Р. Селезнева