Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-9291/2022

24 января 2023 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Николаевой Г. Л. рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению акционерного общества  "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304143535900426) о взыскании 36 980 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда № 2021/Ю 185 от 14.04.2021 за период с 16.09.2021 по 11.12.2021, а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.,

без вызова сторон.

Суд, проанализировав условие пункта 6.3 договора, приходит к выводу о том, что оно предусматривает начисление неустойки:

- в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ в целом по договору и/или соответствующего объекта по договору (п.п. 6.3.1);

- в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ в целом по договору и/или соответствующего объекта по договору (п.п. 6.3.1).

Таким образом, стороны не согласовали ответственность подрядчика в случае нарушения подрядчиком срока выполненных работ.

Исходя из того, что обществом заявлено о взыскании неустойки в связи с нарушением предпринимателем срока выполнения работ, а условиями договора ответственность подрядчика за нарушение такого срока не предусмотрена, суд отказывает обществу в удовлетворении иска.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

в иске отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, могут получить информацию о движении дела в общедоступной базе данных Картотека арбитражных дел по адресу www.kad.arbitr.ru.

Судья

Г.Л. Николаева