Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«04» декабря 2020 г.

Дело № А12-13760/20

Резолютивная часть решения оглашена 27 ноября 2020 года

Полный текс решения изготовлен 04 декабря 2020 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Кремс Л.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Терентьева Е.Е., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску  унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) о взыскании суммы,

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1, доверенность от 10.01.2020;

от ответчика – ФИО2,  доверенность от 03.02.2020;

УСТАНОВИЛ:

Унитарная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – истец, УНО «Региональный фонд капремонта») обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «Линт» (далее – ответчик, ООО «Линт») о взыскании штрафов и неустойки в размере 269 029 руб. 82 коп., а  судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 7 431 руб. 

В судебном заседании истец на удовлетворении исковых требований настаивал. 

Представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в отзыве на исковое заявлении, просила в удовлетворении иска отказать. 

Судом из материалов дела установлено следующее.

11 октября 2019 года между унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ранее ООО «Промстройреставрация») (далее - Исполнитель) заключен договор № 1283711-В-СК-2019 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Волгограда, в том числе многоквартирном доме по адресу: 

<

...> ВЛКСМ, д. 13 (капитальный ремонт фундамента).

Согласно п 5.3 Договора в течении 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме № КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с п. 6.2 договора.

Работы по капитальному ремонту фундамента выполнялись ООО «СтройСтандартПлюс» (капитальный ремонт фундамента) на основании договора № 1282087-В-СМР-2018-2019 от 08.10.2019 года.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту было завершено 13.11.2019 года.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю должен был быть представлен региональному оператору по мнению истца не позднее 23.11.2019 года.

Однако акт оказания услуг поступил в адрес Заказчика только 23.12.2019 года.

В соответствии с п. 10.2.9, за несоблюдением требований и сроков, указанных в п. 5.3. настоящего договора Исполнитель уплачивает штраф Заказчику в размере 50 000 рублей за каждый выявленный случай.

В связи с нарушением исполнителем сроков предоставления акта оказания услуг, заказчиком начислен штраф в размере 50000 руб.

11 октября 2019 года между унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ранее ООО «Промстройреставрация») (далее - Исполнитель) заключен договор № 1283711-В- СК-2019 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Волгограда, в том числе многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, пр-т. Канатчиков, д. 14 (капитальный ремонт фундамента).

Работы по капитальному ремонту фундамента выполнялись ООО «СтройСтандартПлюс» (капитальный ремонт фундамента) на основании договора № 1282087-В-СМР-2018-2019 от 08.10.2019 года.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту было завершено 13.11.2019 года.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю должен был быть представлен региональному оператору по мнению истца не позднее 23.11.2019 года.

Однако акт оказания услуг поступил в адрес Заказчика только 23.12.2019 года.

В связи с нарушением исполнителем сроков предоставления акта оказания услуг, заказчиком начислен штраф в размере 50000 руб.

11 октября 2019 года между унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ранее ООО «Промстройреставрация») (далее - Исполнитель) заключен договор № 1283711-В- СК-2019 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Волгограда, в том числе многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, пр-т. Канатчиков, д. 11 (капитальный ремонт фундамента).

Работы по капитальному ремонту фундамента выполнялись ООО «СтройСтандартПлюс» (капитальный ремонт фундамента) на основании договора № 1282087-В-СМР-2018-2019 от 08.10.2019 года.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту было завершено 13.11.2019 года.

Таким образом, акт оказания услуг но строительному контролю должен был быть представлен региональному оператору по мнению истца не позднее 23.11.2019 года.

Однако акт оказания услуг поступил в адрес Заказчика только 23.12.2019 года.

В связи с нарушением исполнителем сроков предоставления акта оказания услуг, заказчиком начислен штраф в размере 50000 руб.

11 октября 2019 года между унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ранее ООО «Промстройреставрация») (далее - Исполнитель) заключен договор № 1283711-В-СК-2019 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Волгограда, в том числе многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт фундамента).

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту было завершено 12.12.2019 года.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю должен был быть представлен региональному оператору по мнению истца не позднее 21.12.2019 года.

Однако акт оказания услуг поступил в адрес Заказчика только 16.03.2019 года.

В связи с нарушением исполнителем сроков предоставления акта оказания услуг, заказчиком начислен штраф в размере 50000 руб.

11 октября 2019 года между унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ранее ООО «Промстройреставрация») (далее - Исполнитель) заключен договор № 1283711-В-СК-2019 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Волгограда, в том числе многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, ул. Зерно граде кая, д. 12 (капитальный ремонт фундамента).

Работы по капитальному ремонту фундамента выполнялись ООО "ПрофСтрой" (капитальный ремонт фундамента) на основании договора № 1282821 -В-СМР-2018-2019 от 09.10.2019 года.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту было завершено 20.12.2019года.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю должен был быть представлен региональному оператору по мнению истца не позднее 29.12.2019 года.

Однако акт оказания услуг поступил в адрес Заказчика только 16.03.2019 года.

В связи с нарушением исполнителем сроков предоставления акта оказания услуг, заказчиком начислен штраф в размере 50000 руб.

11 октября 2019 года между унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ранее ООО «Промстройреставрация») (далее - Исполнитель) заключен договор № 1283711-В-СК-2019 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Волгограда, в том числе многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт фундамента).

Работы по капитальному ремонту фундамента выполнялись ООО "ПрофСтрой" (капитальный ремонт фундамента) на основании договора № 1282821 -В-СМР-2018-2019 от 09.10.2019 года.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту было завершено 24.12.2019 года.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю должен был быть представлен региональному оператору по мнению истца не позднее 13.01.2020 года.

Однако акт оказания услуг поступил в адрес Заказчика только 08.05.2020 года.

В соответствии с п. 10.2.6. Договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по строительному контролю, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ

В связи с нарушением исполнителем сроков предоставления акта оказания услуг, заказчиком исчислена неустойка в размере 562, 69 руб.

11 октября 2019 года между унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ранее ООО «Промстройреставрация») (далее - Исполнитель) заключен договор № 1283711-В- СК-2019 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Волгограда, в том числе многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт фундамента).

В соответствии с п. 10.2.6. Договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по строительному контролю, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ

В связи с нарушением исполнителем сроков предоставления акта оказания услуг, заказчиком начислена неустойка 1 272,60 руб.

11 июня 2019 года между унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ранее ООО «Промстройреставрация») (далее - Исполнитель) заключен договор № 1213233-В- ВО-СК-2017-2018-2019 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Волгограда, в том числе многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт фасада, подвала).

Согласно п 5.3 Договора в течении 30 (десяти) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме № КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с п. 6.2 договора.

Работы по капитальному ремонту фасада, подвала выполнялись ООО «Империя» на основании договора № 1023377-В-СМР-2018 от 14.08.2018 года.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту было завершено 29.08.2019 года.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю должен был быть представлен региональному оператору по мнению истца не позднее 28.09.2019 года.

Однако акт оказания услуг поступил в адрес Заказчика только 30.12.2019 года.

В соответствии с п. 10.2.9, за несоблюдением требований и сроков, указанных в п. 5.3. настоящего договора Исполнитель уплачивает штраф Заказчику в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по договору производится Исполнителем на основании претензии (уведомления, письма) Заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на счет Заказчика (п. 10.6).

В связи с нарушением исполнителем сроков предоставления акта оказания услуг, заказчиком начислен штраф в размере 10000 руб.

18 октября 2019 года между унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ранее ООО «Промстройреставрация») (далее - Исполнитель) заключен договор № 1287039-В- СК-2019(ГР) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Волгограда, в том числе многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт фундамента).

Работы по капитальному ремонту фундамента выполнялись ООО «ПАСФ Высота» на основании договора № 1283893-В-СМР-2018-2019 от 09.10.2019 года.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту было завершено 03.12.2019 года.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю должен был быть представлен региональному оператору по мнению истца не позднее 13.12.2019 года.

Однако акт оказания услуг поступил в адрес Заказчика только 30.12.2019 года.

В соответствии с п. 10.2.6. Договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по строительному контролю, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ

В связи с нарушением исполнителем сроков предоставления акта оказания услуг, заказчиком начислена неустойка в размере 34,28 руб.

18 октября 2019 года между унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ранее ООО «Промстройреставрация») (далее - Исполнитель) заключен договор № 1287039-В- СК-2019(ГР) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Волгограда, в том числе многоквартирном доме по адресу: 

<

...> капитальный ремонт фундамента).

Работы по капитальному ремонту фундамента выполнялись ООО «СтройСтандартПлюс» на основании договора № 1302171 -В-СМР-2015(ГР)- 2016(ГР)-2019 от 21.11.2019 года и договора № 1284173-В-СМР-2018-2019 от 08.10.2019,

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту было завершено 24.12.2019 года и 30.12.2019.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю должен был быть представлен региональному оператору по мнению истца е позднее 13.01.2020 года и 17.01.2020 соответственно.

Однако акты оказания услуг поступили в адрес Заказчика только 05.03.2020 на сумму 16 780, 32 руб. и от 10.03.2020 на сумму 13964,62 руб. 30.04.2020.

В соответствии с п. 10.2.6. Договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по строительному контролю, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ

В связи с нарушением исполнителем сроков предоставления акта оказания услуг, заказчиком начислена неустойка (

<

...>) в размере 285,27 руб., (

<

...>) в размере 470,23 руб.

17 июня 2019 года между унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ранее ООО «Промстройреставрация») (далее - Исполнитель) заключен договор № 1220857-В- СК-2019 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Волгограда, в том числе многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений).

Работы по капитальному ремонту фундамента выполнялись ООО «Управление Фасад Волгогражданстрой» на основании договора № 1214291-В-СМР-2019 от 11.06.2019 года.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту было завершено 04.10.2019 года.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю должен был быть представлен региональному оператору по мнению истца не позднее 03.11.2019 года.

Однако акт оказания услуг поступил в адрес Заказчика только 06.02.2020 года.

В соответствии с п. 10.2.7. Договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по строительному контролю, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ

В связи с нарушением исполнителем сроков предоставления акта оказания услуг, заказчиком начислена неустойка в размере 1 918,61 руб.

06 июня 2019 года между унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ранее ООО «Промстройреставрация») (далее - Исполнитель) заключен договор № 1209421-В-СК-2019 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Волгограда, в том числе многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, пр-т. В.И. Ленина, д. 32 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений).

Работы по капитальному ремонту фундамента выполнялись ООО «Высотафасадремонт» на основании договора № 1149745-В-СМР-2019 от 05.02.2019года.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту было завершено 30.12.2019 года.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю должен был быть представлен региональному оператору по мнению истца не позднее 30.01.2020 года.

Однако акт оказания услуг поступил в адрес Заказчика только 19.03.2020 года.

В соответствии с п. 10.2.6. Договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по строительному контролю, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ

В связи с нарушением исполнителем сроков предоставления акта оказания услуг, заказчиком начислена неустойка в размере 1 367,90 руб. 

06 июня 2019 года между унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ЛИНТ» (ранее ООО «Промстройреставрация») (далее - Исполнитель) заключен договор № 1209421-В- СК-2019 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Волгограда, в том числе многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, пр-т. В.И. Ленина, д. 36 (капитальный ремонт фундамента, подвальных помещений).

Работы по капитальному ремонту фундамента выполнялись ООО «Высотафасадремонт» на основании договора №1149745-В-СМР-2019 от 05.02.2019года.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту было завершено 30.12.2019 года.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю должен был быть представлен региональному оператору по мнению истца не позднее 30.01.2020 года.

Однако акт оказания услуг поступил в адрес Заказчика только 29.04.2020 года.

В соответствии с п. 10.2.6. Договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по строительному контролю, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ

В связи с нарушением исполнителем сроков предоставления акта оказания услуг, заказчиком начислена неустойка в размере 3 098,16 руб.

Отказ ответчика исполнить требование Заказчика об оплате штрафа и неустойки  в добровольном порядке послужил основанием для обращения истца в суд. 

Изучив доводы апелляционной лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства, в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований.

 Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

 В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В силу положений статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

В силу пункта 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

На основании пункта 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Согласно пункту 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. 

Исходя из содержания указанных норм, привлечение к гражданско-правовой ответственности возможно за неисполнение или неисполнение конкретной, четко определенной обязанности, предусмотренной договором, поскольку только в таком случае возможно сделать вывод о нарушении должником его условий. 

Возражая против удовлетворения иска, представитель ответчика указывает, что услуги оказаны ООО «Линт» в установленные договорами сроки. 

По договору № 1283711-В-СК-2019 от 11.10.2019 г. ответчик выполнил свои обязательства в соответствии с п. 7.3 договора своевременно и в полном объеме.

Ответчик осуществлял посещение объекта и подготовку промежуточных отчетов на протяжении всего времени исполнения договора, что подтверждается подписанными сторонами актами оказанных услуг.

Акт сдачи приемки услуг по объекту 

<

...>  получен представителем заказчика 06.03.2020 г. (исх. № 30 от 06.03.2020 г.).

Мотивированный отказ от подписания акта не направлялся подписанный акт, и оплата так же не поступили, и исполнитель вынужден был направить документы повторно исх. № 123 от 08.05.2020г.

По объекту, расположенному по адресу: 

<

...> сдачи приемки услуг получен представителем заказчика 20.12.2019 г. (исх. № 19от 19.12.2019г.), Мотивированный отказ от подписания акта не направлялся подписанный акт, и оплата так же не поступили, и исполнитель вынужден был направить документы повторно исх. № б/н от 27.04.2020г.

По договору № 1213233-В-ВО-СК-2017-2018-2019 от 11.06.2019 г. по объекту многоквартирный дом по ул. Баррикадная д. 22 акт получен заказчиком 01.10.2019 г. (исх. № 103 от 30.09.2019г.) Мотивированный отказ от подписания акта исполнителю не направлялся. Повторно акт направлен 17.12.2019 г. исх. № 9, на указанный акт поступил мотивированный отказ № 10809 от 24.12.2019 и акт был направлен 30.12.2019г.

По договору 1287039-В-СК-2019(ГР) по объекту многоквартирный дом по ул. Ангарская д. 4 по объектам многоквартирные дома по ул. Краснополянская д. 60 и ул. Михаила Паникахи д. 18, уведомление о подписании актов КС-2 и справок КС-3 не направлялось, акты были получены заказчиком 06.03.2020 г. (исх. № 29 от 06.03.2020 г)  Мотивированный отказ не поступал в адрес исполнителя, а  акт подписан заказчиком 07.05.2020 г.

По договору № 1220857-В-СК-2019 по объекту многоквартирный дом по ул. Пражская д. 10 акт сдачи-приемки оказанных услуг получен заказчиком 23.12.2019г.( исх. № 18 от 20.12.2019 г.)  

По договору 1209421-В-СК-2019 по объектам многоквартирные дома по адресу пр-т Ленина 

<

...> сдачи-приемки оказанных услуг получены заказчиком 30.12.20г. (исх. № б/н от 30.12.2019 г.), мотивированный отказ не поступил.

Доказательств возвращения заказчиком в адрес исполнителя актов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения выявленных нарушений, истцом в материалы дела не представлено.

Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме № КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора. 

Согласно условиям заключенных договоров обязанность Исполнителя по предоставлению актов оказания услуг поставлена в зависимость от действий третьих лиц (подписания Заказчиком и Подрядчиком всех актов выполненных работ по форме № КС2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3). 

Условиями договоров не предусмотрена обязанность Заказчика информировать Исполнителя о дате подписания актов с Подрядчиком. Однако Исполнитель стороной по договорам на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов не является, а, следовательно, сведениями о дате подписания актов выполненных работ не располагает.

Истцом в адрес ответчика сообщения о подписании актом КС-2 и справок КС-3 в отношении объектов строительства не направлялись.

Кроме того, суд считает, что истцом не представлены доказательства подписания актов по форме КС-2 и КС-3 между заказчиком и подрядчиком именно в указанные в иске и претензиях даты, в связи, с чем не доказано нарушение договорных отношений со стороны ответчика. 

При подобных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что  оснований для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной условиями договоров, не имеется, в связи с чем, требования истца не подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный  суд 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия через арбитражный суд Волгоградской области.

 

Судья                                                                                             Л.А. Кремс