АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru,

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-1879/2022

г. Курган

07 июня 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 02 июня 2022 года.

В полном объеме решение изготовлено 07 июня 2022 года.    

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Тюриной И.Г., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Игумновой С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «МАРТ» (ОГРН 

<

***>)

к  Департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о внесении изменений в договор

по встречному иску Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «МАРТ» (ОГРН 

<

***>)

о внесении изменений в договор

третье лицо: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области 

при участии в судебном заседании:

от истца (ответчика по встречному иску): ФИО1, доверенность  от 19.01.2022, паспорт, диплом, свидетельство о перемени имени; Тодоров А.А., доверенность от 01.04.2022, паспорт;

от ответчика (истца по встречному иску): ФИО2, доверенность от 26.08.2021, паспорт, диплом;

от третьего лица: явки нет, извещено;

установил:

общество с ограниченной ответственностью «МАРТ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к Департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области (далее – ответчик) о внесении изменений в договор аренды лесного участка от 03.07.2012 № 48-ДР:

Приложение № 3 к договору аренды лесного участка №48-ДР от 03.07.2012 с 2022 изложить в следующей редакции:

Объем использования лесов для заготовки древесины на лесном участке

Арендатор - ООО «Март»

(куб. м.)

Объем заготовки древесины

Хозяйство

При рубке спелых и перестойных лесных насаждений

При рубке

лесных насаждений при уходе за лесами

При рубке поврежден

ных и погибших

лесных насаждений

При рубке

лесных

насаждений

на лесных

участках,

предназначенных для строительства,

реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабаты-вающей инфраструктуры

Всего

Хвойное

1100

2400

15100

0

18600

Мягколиственное

55400

700

0

400

56500

Итого

56500

3100

15100

400

75100

 

Приложение № 6 с 2022 изложить в следующей редакции: 

Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке с 2022 года

Арендатор - ООО «Март»

ГКУ «Далматовское лесничество»

Вид использования лесов:      заготовка древесины

№

Вид мероприятий

Ед.

изм.

Годовой объем

Срок исполнения

п.п.

 

1

2

3

4

1. Лесохозяйственные работы, мероприятия

1.1.

Отвод лесосек всего, в т.ч.

Га

836,2

 

836,2

1.1.1.

Отвод лесосек под рубки спелых и перестойных лесных насаждений

Га

695

 

695

1.1.2.

Отвод    лесосек    под    рубки погибших     и     поврежденных лесных насаждений

Га

78,2

 

78,2

1.1.3.

Отвод лесосек под рубки ухода за лесами

Га

63

 

63

1.2

Рубки ухода за лесами, всего

Га

63

 

63

 

кбм

3736

 

3736

 

в том числе ликвид

кбм

3100

 

3100

1.2.1.

В том числе

- Уход за молодняками

Га

5

5

 

кбм

36

 

36

1.2.2.

- Прореживание

Га

38

 

38

 

кбм

2600

 

2600

 

в том числе ликвид

кбм

2200

 

2200

1.2.3.

- Проходные рубки

Га

20

 

20

 

кбм

1100

 

1100

 

в том числе ликвид

кбм

900

 

900

1.3.

Санитарно-оздоровительные мероприятия

Га

78,2

 

78,2

 

кбм

17300

 

17300

 

в том числе ликвид

кбм

15100

 

15100

1.3.1.

Сплошные санитарные рубки

Га

20

 

20

 

кбм

17300

 

17300

 

в том числе ликвид

кбм

15100

 

15100

1.3.2.

Выборочные санитарные рубки

Га

0

0

 

кбм

0

0

 

в том числе ликвид

кбм

0

0

1.3.3

Уборка неликвидной древесины

Га

0

0

 

кбм

0

0

 

в том числе ликвид

кбм

0

0

1.4.

Прочие рубки

Га

8

8

 

кбм

400

 

400

 

в том числе ликвид

кбм

400

 

400

Определением от 09.02.2022 исковое заявление принято к производству.

Определением суда от 09.03.2021 принято к производству встречное исковое заявление Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области к обществу с ограниченной ответственностью «МАРТ» о внесении изменений в договор: - Раздел 2 договора аренды лесного участка № 48-ДР от 03.07.2012 «Арендная плата» изложить в следующей редакции:

« 2. Арендная плата

6. Арендная плата по настоящему Договору составляет 4 271 547 рублей 48 копеек в год.

Арендная плата определяется в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации на основе минимального размера арендной платы.

8. Размер арендной платы подлежит изменению в соответствии с коэффициентами к ставкам платы, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 N 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" для соответствующего года.

9. Арендатор вносит арендную плату в сроки, предусмотренные приложением N 4 к настоящему Договору.

Обязательство по оплате арендной платы, установленной пунктом 6 настоящего Договора, возникает у Арендатора с даты государственной регистрации настоящего Договора и прекращается с даты возврата Арендатором лесного участка, оформленного соответствующим актом приема-передачи, в соответствии с п.п. 15.27 настоящего Договора.

В первый и последний год действия настоящего Договора арендная плата рассчитывается исходя из фактического количества дней аренды, годового размера арендной платы и количества дней в году.

До наступления очередного срока платежа Арендатор имеет право внести сумму, превышающую платеж, установленный приложением N 4 к настоящему Договору. В случае отсутствия задолженности разница между указанными платежами зачисляется Арендодателем в счет будущих платежей Арендатора»;

- Приложение № 4 к договору аренды лесного участка № 48-ДР от 03.07.2012, платежные реквизиты для перечисления арендной платы в части минимального размера (федеральный бюджет):

Получатель: УФК но Курганской области (Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области л/с 

<

***>) КБК 05311204012016000120 ИНН 

<

***> КПП 450101001

Банк получателя: Отделение Курган, г. Курган, НИК 013735150. р/с 

<

***>. ОКТМО 37701000

- Приложение № 6 к договору аренды лесного участка № 48-ДР от 03.07.2012 г. с 2022 г. в редакции изложенной во встречном исковом заявлении.

Суд перешел к рассмотрению требований о внесении изменений в Приложение № 6 к договору аренды лесного участка № 48-ДР от 03.07.2012 г. с 2022 г. в редакции указанной в уточненном встречном исковом заявлении.

Определением от 07.04.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области, принято уточнение встречных исковых требований, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение исковых требований.

Суд перешел к рассмотрению требований с учетом уточнений, заявленных сторонами.

Определением от 04.05.2022 судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации принято уточнение встречных исковых требований.

Ответчиком (истцом по встречному иску) заявлено о внесении изменений в договор аренды лесного участка № 48-ДР от 03.07.2012 в отдельное производство, а именно:

1. Пункт 6 Раздел 2 договора аренды лесного участка № 48-ДР от 03.07.2012  изложить в следующей редакции:

«6. Арендная плата по настоящему Договору составляет 4 271 547 рублей 48 копеек в год».

2.  Приложение № 4 к договору аренды лесного участка № 48-ДР от 03.07.2012 изложить в следующей редакции:

Приложение N 4 к договору аренды лесного участка №48-Др от 03.07.2012

СРОКИ 

внесения арендной платы за  2022 год 

 Арендатор - ООО "Март"

(тыс.рублей)

Календарный план

Арендная плата.

установленная по договору аренды лесного участка. - всего

В том числе

 

в местный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации

в федеральный бюджет

25.01.2022

0.00

 

0.00

25.02.2022

314,90

1

314,90

25.03.2022

314,90

 

314,90

25.04.2022

314,90

 

314,90

25.05.2022

314,90

 

314,90

25.06.2022

314,90

 

314,90

25.07.2022

449,51

 

449,51

25.08.2022

449,51

 

449,51

25.09.2022

449,51

 

449,51

25.10.2022

449,51

 

449,51

25.11.2022

449,51

 

449,51

25.12.2022

449,51

 

449,51

Итого

4271,55

0.00

4271,55

 

Приложение № 6 к договору аренды лесного участка № 48-ДР от 03.07.2012 с 2022 г. изложить в следующей редакции:

Приложение № 6 к договору аренды лесного участка

№48-Др от 03.07.2012 

Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке

Арендатор - ООО "Март"

с 2022 года

ТО "Далматовское лесничество"

Вид использования лесов: заготовка древесины

№ п.п.

Виды мероприятий

Ед. изм.

Годово й объем

Срок исполнения

 

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1 . Лесохозяйственные работы, мероприятия

1.1.

Отвод лесосек-свего. в т.ч.

га

836,2

 

778

1.1.1.

Отвод лесосек под рубки спелых и перестойных лесных насаждений

Га

695

 

695

1.1.2.

Отвод лесосек под рубки погибших и поврежденных лесных насаждений

Га

78,2

 

78,2

1.1.3.

Отвод лесосек под рубки ухода за лесами

Га

63

 

63

 

Рубки ухода за лесами, всего

Га

63

 

63

1.2.

кбм

3736

 

3736

 

в том числе ликвид

кбм

3100

 

3100

1.2.1.

в том числе

-Уход за молодняками

Га

5

5

 

кбм

36

 

36

1.2.2.

- Прореживание

Га

38

 

38

 

кбм

2600

 

2600

 

в том числе ликвид

кбм

2200

 

2200

1.2.3.

-Проходные рубки

Га

20

 

20

 

кбм

1100

 

1100

 

в том числе ликвид

кбм

900

 

900

1.3.

Санитарно - оздоровительные мероприятия

Га

78,2

 

78,2

 

кбм

17300

 

17300

 

в том числе ликвид

кбм

15100

 

15100

1.3.1.

Сплошные санитарные рубки

Га

78,2

 

78,2

 

кбм

17300

 

17300

 

в том числе ликвид

кбм

15100

 

15100

1.3.2.

Выборочные санитарные рубки

Га

0

0

 

кбм

0

0

 

в том числе ликвид

кбм

0

0

1.3.3.

Уборка неликвидной древесины

га

0

0

 

кбм

0

0

 

в том числе ликвид

кбм

0

0

1.4.

Прочие рубки

га

8

8

 

кбм

400

 

400

 

в том числе: ликвид

кбм

400

 

400

2. Лесовосстановительные мероприятия

2.1.

Посадка леса

га

40

40

 

2.2.

Дополнение лесных культур

га

85

45

40

 

2.3.

Уход за лесными культурами (в переводе на однократный) всего

га

150

30

100

20

2.4.

Подготовка почвы под лесные культуры будущего года

га

40

40

 

2.5.

Содействие естественному возобновлению

га

94

40

54

 

3. Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах

3.1.

Устройство противопожарных минерализованных полос

км

36

20

16

 

3.2.

Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос

км

13

10

3

3.3.

Прочистка и обновление противопожарных разрывов

км

0,3

 

0,3

3.4.

Создание и содержание противопожарных заслонов (противопожарные опушки)

км

0,18

 

0,18

 

3.5.

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

113,7

70

43,7

 

3.6.

Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

0,3

 

0,3

 

3.7.

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

га

63

63

 

3.8.

Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения

шт.

3

в течение п/о сезона

3.9.

Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

шт.

1

1

 

3.10.

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах

шт.

2

1

1

3.11.

Установка и размещение аншлагов

шт.

7

7

 

3.12

Эксплуатация пожарных наблюдательных вышек

шт.

0

в течение п/о сезона

3.13.

Эксплуатация пожарных наблюдательных высотных пунктов

шт.

1

в течение п/о сезона

3.14.

Эксплуатация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ)

шт.

1

в течение п/о сезона

3.15.

Установка и размещение стендов

шт.

1

1

 

Примечание: работы (мероприятия), указанные в разделе I, 2. 3 - могут быть выполнены ранее установленного срока.

В судебном заседании представитель истца (ответчика по встречному иску) на иске настаивал, против встречных исковых требований не возражал.

Представитель ответчика (истца по встречному иску) в судебном заседании против исковых требований не возражал, на встречных исковых требованиях настаивал, заявил ходатайство о выделении части требований о внесении изменений в договор аренды лесного участка № 48-ДР от 03.07.2012 в отдельное производство, а именно:

1. Пункт 6 Раздел 2 договора аренды лесного участка № 48-ДР от 03.07.2012  изложить в следующей редакции:

«6. Арендная плата по настоящему Договору составляет 4 271 547 рублей 48 копеек в год».

2.  Приложение № 4 к договору аренды лесного участка № 48-ДР от 03.07.2012 изложить в следующей редакции:

Приложение N 4 к договору аренды лесного участка №48-Др от 03.07.2012

СРОКИ 

внесения арендной платы за  2022 год 

 Арендатор - ООО "Март"

(тыс.рублей)

Календарный план

Арендная плата.

установленная по договору аренды лесного участка. - всего

В том числе

 

в местный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации

в федеральный бюджет

25.01.2022

0.00

 

0.00

25.02.2022

314,90

1

314,90

25.03.2022

314,90

 

314,90

25.04.2022

314,90

 

314,90

25.05.2022

314,90

 

314,90

25.06.2022

314,90

 

314,90

25.07.2022

449,51

 

449,51

25.08.2022

449,51

 

449,51

25.09.2022

449,51

 

449,51

25.10.2022

449,51

 

449,51

25.11.2022

449,51

 

449,51

25.12.2022

449,51

 

449,51

Итого

4271,55

0.00

4271,55

 

Определением суда от 02.06.2022 в соответствии с частью 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выделено в отдельное производство из дела № А34-1879/2022 встречные исковые требования о внесении изменений в раздел 2 и приложение № 4 договора аренды лесного участка № 48-Др от 03.07.2012.

Суд, рассмотрев доводы иска, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав имеющиеся в деле письменные доказательства, приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 03.07.2012 по результатам аукциона между Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (арендодателем) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (арендатором) заключен договор аренды лесного участка № 48-Др, по условиям которого арендодатель обязался предоставить, а арендатор обязался принять во временное пользование в целях заготовки древесины лесные участки, находящиеся в государственной собственности и указанные в пункте 2 договора.

Пунктом 25 договора установлен срок его действия с 01.01.2013 по 31.12.2052.

В соответствии с пунктом 6 договора арендная плата по договору составляет 1 472 000 руб.

Схема расположения лесных участков и их характеристики приведены в приложениях № 1 и № 2 к договору.

Пунктом 4 договора предусмотрено, что ежегодный объём изъятия лесных ресурсов на арендуемых лесных участках, объемы работ по охране, защите и воспроизводству лесов предварительно определены настоящим договором (приложения № 3 и № 6), окончательно устанавливаются проектом освоения лесов, получившим положительное заключение государственной экспертизы.

В приложении № 4 к договору стороны  согласовали сроки внесения арендной платы.

По акту приема-передачи от 03.07.2012 лесной участок передан арендатору (приложение № 5).

В связи с утверждением Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области № 56 от 29.01.2021 нового «Лесохозяйственного регламента Далматовского лесничества», в котором определен ежегодный объем заготовки древесины ООО «Март» при всех видах рубок расчетная лесосека составляет 65,9 тыс. куб. м, в том числе при рубке спелых и перестойных лесных насаждений – 56,5 тыс. куб.м, при уходе за лесами – 3,1 тыс. куб.м (хвойное 2,4 тыс. куб.м, мягколиственное – 0,7 тыс. куб.м), при рубке погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарные рубки) 5,9 тыс. куб.м (хвойное – 5,9 тыс. куб.м), а также изменились лесохозяйственные, лесовосстановительные мероприятия и нормы обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах, решением Арбитражного суда Курганской области от 01.12.2021 по делу А34-16752/2021 в договор аренды лесного участка № 48-Др от 03.07.2012 в приложение № 3 и приложение № 6 к договору аренды лесного участка № 48-Др от 03.07.2012 внесены изменения с 2021 года.

Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 31.12.2021  № 43 в Лесохозяйственный регламент Далматовского лесничества, внесены изменения на 2022 г., а именно существенно изменен ежегодный объем заготовки древесины ООО «Март» при рубке погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарные рубки) с 5 900 куб. м до 15 100 куб. м, при этом при всех видах рубок расчетная лесосека соответственно изменилась с 65 900 куб.м до 75 100 куб.м. Кроме того, изменились объемы лесохозяйственных мероприятий.

В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

Согласно п. 1, 2, 3 ст. 74.1 Лесного кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим Кодексом. Изменение условий договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключенного по результатам торгов, не допускается, за исключением случаев изменения целевого назначения или разрешенного использования лесов, существенного изменения параметров использования лесов (возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов) или существенного изменения обстоятельств, из которых стороны договора аренды лесного участка исходили при его заключении, если такое изменение обстоятельств возникло вследствие природных явлений (лесных пожаров, ветровалов, наводнений и других стихийных бедствий) и стало основанием для внесения изменений в государственный лесной реестр (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 455-ФЗ). Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключенный по результатам торгов, может быть изменен по решению суда в случае существенного изменения количественных и качественных характеристик такого лесного участка.

Нормами Лесного кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на момент заключения договора, также предусматривался общий запрет на изменение условий аукциона в отношении договоров аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключенных по результатам аукциона, из которого должны были исходить стороны при заключении договора.

Заявленные истцом требования обусловлены изменением количественных и качественных характеристик лесных участков, в этой связи, возникший спор подлежит урегулированию судом.

В соответствии с п. 28 Приказа Минсельхоза РФ от 08.02.2010 N 32 "Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки", действовавшего на момент составления проекта освоения лесов, проект освоения лесов разрабатывается на период 10 лет для заготовки древесины и до 10 лет - для остальных видов использования лесов, но не превышающий срок действия соответствующего лесохозяйственного регламента лесничества (лесопарка).

С 01.01.2022 проект освоения лесов не применяется в связи с утверждением нового лесохозяйственного регламента Далматовского лесничества, то есть не действовал на момент обращения истца в суд – 07.02.2022.

Суд признает возможным удовлетворить заявленные требования, принимая во внимание представленные в материалы дела документы, подтверждающие доводы истца о существенном изменении количественных и качественных характеристик арендованного лесного участка по сравнению с теми характеристиками, из которых исходили стороны на момент заключения договора, что подтверждается представленным в материалы дела лесохозяйственным регламентом и не оспаривается департаментом. В связи с чем, договор аренды подлежит изменению на основании ст. 74.1 Лесного кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение арбитражного суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства. 

В соответствии с частью 4 статьи 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос об обращении решения к немедленному исполнению рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания.

 Поскольку требование об обращении решения суда к немедленному исполнению заявлено истцом в судебном заседании, суд признал возможным рассмотреть вопрос об обращении решения суда к немедленному исполнению одновременно с принятием решения суда по делу. 

В силу части 3 статьи 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по заявлению истца вправе обратить решение к немедленному исполнению, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или сделать исполнение невозможным. 

Представитель департамента по ходатайству истца об обращении судебного акта к немедленному исполнению не возражает.

Изучив изложенные доводы, а также учитывая, что у ООО «МАРТ» имеются основания для внесения изменений в договор аренды, суд полагает возможным обратить решение к немедленному исполнению, поскольку истец обосновал возможность причинения значительного ущерба в случае не принятия мер к немедленному исполнению настоящего судебного акта.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

исковые требования удовлетворить.

Внести изменения в договор аренды лесного участка № 48-Др от 03.07.2012.

Изложить приложение № 3 к договору аренды лесного участка № 48-Др от 03.07.2012 с 2022 г. в следующей редакции:

Объем использования лесов для заготовки древесины на лесном участке

Арендатор - ООО «Март»

(куб. м.)

Объем заготовки древесины

Хозяйство

При рубке спелых и перестойных лесных насаждений

При рубке

лесных насаждений при уходе за лесами

При рубке поврежденных и погибших

лесных насаждений

При рубке

лесных

насаждений

на лесных

участках,

предназначенных для строительства,

реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры

Всего

Хвойное

1100

2400

15100

0

18600

Мягколиственное

55400

700

0

400

56500

Итого

56500

3100

15100

400

75100

 

Изложить приложение № 6 к договору аренды лесного участка № 48-ДР от 03.07.2012 с 2022 г. в следующей редакции:

Объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке с 2022 года

Арендатор - ООО "Март"

ГКУ "Далматовское лесничество"

Вид использования лесов: заготовка древесины

№ п.п.

Виды мероприятий

Ед. изм.

Годовой объем

Срок исполнения

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 . Лесохозяйственные работы, мероприятия

1.1.

Отвод лесосек- всего. в т.ч.

га

836,2

 

836,2

1.1.1.

Отвод лесосек под рубки спелых и перестойных лесных насаждений

Га

695

 

695

1.1.2.

Отвод лесосек под рубки погибших и поврежденных лесных насаждений

Га

78,2

 

78,2

1.1.3.

Отвод лесосек под рубки ухода за лесами

Га

63

 

63

 

Рубки ухода за лесами, всего

Га

63

 

63

1.2.

кбм

3736

 

3736

 

в том числе ликвид

кбм

3100

 

3100

1.2.1.

в том числе

-Уход за молодняками

Га

5

5

 

кбм

36

 

36

1.2.2.

- Прореживание

Га

38

 

38

 

кбм

2600

 

2600

 

в том числе ликвид

кбм

2200

 

2200

1.2.3.

-Проходные рубки

Га

20

 

20

 

кбм

1100

 

1100

 

в том числе ликвид

кбм

900

 

900

1.3.

Санитарно - оздоровительные мероприятия

Га

78,2

 

78,2

 

кбм

17300

 

17300

 

в том числе ликвид

кбм

15100

 

15100

1.3.1.

Сплошные санитарные рубки

Га

78,2

 

78,2

 

кбм

17300

 

17300

 

в том числе ликвид

кбм

15100

 

15100

1.3.2.

Выборочные санитарные рубки

Га

0

0

 

кбм

0

0

 

в том числе ликвид

кбм

0

0

1.3.3.

Уборка неликвидной древесины

га

0

0

 

кбм

0

0

 

в том числе ликвид

кбм

0

0

1.4.

Прочие рубки

га

8

8

 

кбм

400

 

400

 

в том числе: ликвид

кбм

400

 

400

2. Лесовосстановительные мероприятия

2.1.

Посадка леса

га

40

40

 

2.2.

Дополнение лесных культур

га

85

45

40

 

2.3.

Уход за лесными культурами (в переводе на однократный) всего

га

150

30

100

20

2.4.

Подготовка почвы под лесные культуры будущего года

га

40

40

 

2.5.

Содействие естественному возобновлению

га

94

40

54

 

3. Обеспечение пожарной и санитарной безопасности в лесах

3.1.

Устройство противопожарных минерализованных полос

км

36

20

16

 

3.2.

Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос

км

13

10

3

3.3.

Прочистка и обновление противопожарных разрывов

км

0,3

 

0,3

3.4.

Создание и содержание противопожарных заслонов (противопожарные опушки)

км

0,18

 

0,18

 

3.5.

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

113,7

70

43,7

 

3.6.

Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

0,3

 

0,3

 

3.7.

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

га

63

63

 

3.8.

Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения

шт.

3

в течение п/о сезона

3.9.

Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

шт.

1

1

 

3.10.

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах

шт.

2

1

1

3.11.

Установка и размещение аншлагов

шт.

7

7

 

3.12

Эксплуатация пожарных наблюдательных вышек

шт.

0

в течение п/о сезона

3.13.

Эксплуатация пожарных наблюдательных высотных пунктов

шт.

1

в течение п/о сезона

3.14.

Эксплуатация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ)

шт.

1

в течение п/о сезона

3.15.

Установка и размещение стендов

шт.

1

1

 

Примечание: работы (мероприятия), указанные в разделе I, 2. 3 - могут быть выполнены ранее установленного срока.

Обратить решение к немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Курганской области.

Судья

И.Г. Тюрина