АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru https://tatarstan.arbitr.ru https://my.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-20765/2023

г. Казань

05 марта 2025 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи Назаровой Ю.Ю.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "СтройКапитал", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Зольт Групп", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по своевременному выполнению объема работ по договору по договору генерального подряда № СК-14/2022 от 27 мая 2022 года в размере 64 031 426,01 руб., причиненные убытки вследствие ненадлежащего исполнения обязательств ответчиком по договору генерального подряда № СК-14/2022 от 27 мая 2022 года в размере 13 759 256,47 руб., сумму штрафных санкций за нарушение п. 6 Соглашения о расторжении договора генерального подряда № СК-14/2022 от 27 мая 2022 года, предусмотренные п. 7.2.6 договора генерального подряда № СК-14/2022 в размере 13 350 000 руб., судебные расходы в размере 200 000 рублей за оплату государственной пошлины (в редакции уточнения исковых требований, принятого 06.03.2024 г.)  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Зольт Групп", г. Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "СтройКапитал", г. Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности за выполненные работы по Договору генерального подряда № СК- 14/2022 от 27.05.2022 г. в размере: 48 434 646,13 руб., сумму неустойки за просрочку оплаты фактически выполненных работ по Договору генерального подряда № СК-14/2022 от 27.05.2022 г. за период с 01.10.2022 г. по 06.02.2024 г. в размере: 17 436 139,75 руб., неустойку  

за просрочку оплаты фактически выполненных работ по Договору генерального подряда № СК-14/2022 от 27.05.2022 г. из расчета 0,1% от суммы задолженности в размере 48 434 646,13 руб. за каждый день просрочки, начиная с 07.02.2024 г. по день фактической оплаты задолженности, сумму в размере 200 000 руб. в счет судебных расходов по оплате государственной пошлины (в редакции уточнения исковых требований, принятого 06.02.2024 г.).  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью «МОНАТ ГРУПП» (ИНН 

<

***>),  

при участии: 

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 30.01.2025 г. (срок действия 1 год), удостоверение адвоката № 2917, рег. номер 16/2485; ФИО2, представитель по доверенности от 30.01.2025 г. (срок действия 1 год), удостоверение адвоката № 3050, рег. номер 16/2596;  

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 12.01.2024г. (срок действия 3 года), диплом 107704 0132368, ФИО4, представитель по доверенности от 11.01.2023 г. (срок действия 3 года), диплом ДВС 1087823  

от третьего лица – не явился, извещен, эксперта ФИО5, по паспорту, 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан  

РЕШИЛ:

Уточнение ( увеличение) исковых требований в части взыскания штрафных санкций за нарушение п. 7.26 договора, п. 6 соглашения в размере 32 150 000 руб. принять.  

В принятии увеличения исковых требований в части взыскания стоимости некачественно выполненных работ в размере 13 462 014,17 руб. отказать.  

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Зольт Групп", юридический адрес: 

<

...>, пом. 1А (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 09.06.2014г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СтройКапитал", юридический адрес: 

<

...> зд.62, пом. 30, фис 430 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 22.09.2015г.) 3 027 979,73 руб. неустойки за нарушение обязательств по своевременному выполнению объема работ, возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 55 084 руб..  

В удовлетворении остальной части исковых требований оказать. 

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СтройКапитал", юридический адрес: 

<

...> зд.62, пом. 30, фис 430 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 22.09.2015г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Зольт Групп", юридический адрес: 

<

...>, пом. 1А (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 09.06.2014г.) 46 617 566,08 руб. долга, неустойку в размере 35 380 707,65 руб. за период с 01.10.2022 по 05.03.2025, неустойку начисленную на сумму долга, начиная с 06.03.2025 из расчета 0,1% за каждый день просрочки по день фактического погашения суммы долга, возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 193 341 руб..  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СтройКапитал", юридический адрес: 

<

...> зд.62, пом. 30, фис 430 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 22.09.2015г.) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6 659 руб..  

Произвести зачет взаимных требований, в результате произведенного зачета взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СтройКапитал", юридический адрес: 

<

...> зд.62, пом. 30, фис 430 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 22.09.2015г.) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Зольт Групп", юридический адрес: 

<

...>, пом. 1А (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 09.06.2014г.) 79 108 551 руб. долга.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СтройКапитал", юридический адрес: 

<

...> зд.62, пом. 30, фис 430 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации 22.09.2015г.) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6 659 руб..  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок.  

 Судья А.Э.Шарипова