ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-5592/20-67-43

г. Москва

17 июля 2020 г.

Резолютивная часть решения оглашена 10 июля 2020 г.

Полный тест решения изготовлен 17 июля 2020 г.                                                                

Арбитражный суд в составе:                                                                                                                                                    

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола помощником судьи Н.С. Будько, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ТСА" (109428, Москва город, улица Стахановская, дом 22, строение 17, эт 2 кабинет 3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.08.2011, ИНН: 

<

***>)

к Акционерному обществу  "Главное управление обустройства войск" (119021, Москва город, проспект Комсомольский, дом 18, строение 3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.07.2009, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 4 352 333,38 руб. 

при участии: 

от истца: ФИО1 по дов-ти от 04.10.2019.

от АО "ГУОВ": ФИО2 по дов-ти от 07.11.2019.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ТСА" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Акционерному обществу  "Главное управление обустройства войск" (далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 207 558 руб. 93 коп. по договору строительного подряда № 1818187375272554164000000/АЧ-09/04-258 от 09 апреля 2018 года, в размере 1 923 887 руб. 13 коп. по договору строительного подряда № 18181873752725541 64000000/АЧ-09/04-260 от 09 апреля 2018 года, в размере 1 921 077 руб. 03 коп. по договору строительного подряда № 1818187375272554164000000/АЧ-09/04-264 от 09.04.2018 года, в размере 299 810 руб. 29 коп. по договору подряда № 1818187375272554164000000/АЧ-03/09-270 от 03 сентября 2018 года, а всего 4 352 333 руб. 38 коп.

Заявленные требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований  по доводам, изложенным в отзыве.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, на основании следующего.

Как усматривается из материалов дела, между АО «Оборонстройпроект» (далее по тексту - «Генподрядчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК» (далее по тексту - «Подрядчик») был заключен договор строительного подряда № 1818187375272554164000000/АЧ-09/04-258 от 09 апреля 2018 года (далее по тексту - «Договор»), в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по монтажу центрального теплового узла на объекте: «Пункт прилета-вылета пассажиров на аэродроме «Чкаловский» в/г № 84/1, в/ч 42829 по адресу: Московская область, Щелковский район, а Заказчик соответственно обязуется произвести оплату данных работ в соответствии с условиями договора.

В соответствии с п.2.1. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 10.11.2018г.) цена договора составила 969 181 руб. 20 коп., в т.ч. НДС 18% - 147 841 руб. 20 коп.

Исх. письмом № 50 от 15 марта 2019 года ООО «ТЕХНОСТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК» направило в адрес АО «Оборонстройпроект» комплект исполнительной документации, акт о приемке выполненных работ № 1 от 04.02.2019г. на 821 340 руб. 57 коп. без НДС, справку о стоимости выполненных работ № 1 от 04.02.2019г. на 985 608 руб. 68 коп. ( в т.ч. НДС 20% - 164 268 руб. 11 коп.), счета-фактуру № 204/01 от 04.02.2019г. на 985 608 руб. 68 коп., итоговый акт о приемке работ по договору № 1818187375272554164000000/АЧ-09/04-258 от 09 апреля 2018 года на сумму 985 608 руб. 68 коп., счет на оплату № 315/01 от 15 марта 2019 года на 207 558 руб. 93 коп. (получено АО «Оборонстройпроект» 25 апреля 2019 года).

В соответствии с п.п. 4.3, 4.4. договора Подрядчик направляет Заказчику документы по форме КС № 2,3, исполнительную документацию, счет-фактуру, счет на оплату, которые Заказчик в течении 10 рабочих дней проверяет, подписывает, скрепляет печатью и возвращает в адрес Подрядчика акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ.

В соответствии с п. 2.6 договора оплата выполненных работ производится ежемесячно на основании КС по ф.2.3, подписанных Заказчиком. Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства в течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подтверждающих выполнение Подрядчиком работ в отчетном месяце.

В соответствии с п. 2.8. Договора, окончательный расчет по Договору производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Итогового акта приемки выполненных работ, составленного по форме, указанной в Приложениии № 6 к настоящему договору.

2. Между АО «Оборонстройпроект» (далее по тексту - «Генподрядчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК» (далее по тексту - «Подрядчик») был заключен договор строительного подряда № 1818187375272554164000000/АЧ-09/04-260 от 09 апреля 2018 года (далее по тексту - «Договор»), в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по монтажу внутренних инженерных сетей в пассажирском терминале на объекте: «Пункт прилета-вылета пассажиров на аэрод роме «Чкаловский» по адресу: Московская область, Щелковский район, (шифр Т-41/15-2), а Заказчик соответственно обязуется произвести оплату данных работ в соответствии с условиями договора.

В соответствии с п.2.1. цена договора составила 30 823 098 руб. 42 коп. ( в т.ч. НДС 18% ).

Исх. письмом № 65 от 14 апреля 2019 года ООО ТЕХНОСТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК» направило в адрес АО «Оборонстройпроект» акт о приемке выполненных работ № 3 от 16.04.2019г. на 1 761 801 руб. 40 коп. без НДС, справку о стоимости выполненных работ № 3 от 16.04.2019г. на 2 114 161 руб. 68 коп. ( в т.ч. НДС - 20%), счета-фактуру № 416/01 от 16.04.2019г., счет на оплату № 416/01 от 16 апреля 2019 года на 1 712 470 руб. 96 коп., (получено АО «Оборонстройпроект» 29 апреля 2019 года).

Исполнительная документация по данному договору передана 20.08.2018г. (кондиционирование, холодоснабжение, теплоснабжение) и 01.09.2018. (вентиляция и противодымная защита).

В соответствии с п.п. 4.3, 4.4. договора Подрядчик направляет Заказчику документы по форме КС № 2,3, исполнительную документацию, счет-фактуру, счет на оплату, которые Заказчик в течении 10 рабочих дней проверяет, подписывает, скрепляет печатью и возвращает в адрес Подрядчика акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ.

В соответствии с п. 2.6 договора оплата выполненных работ производится ежемесячно на основании КС по ф.2.3, подписанных Заказчиком. Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства в течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подтверждающих выполнение Подрядчиком работ в отчетном месяце.

В соответствии с п. 2.8. Договора, окончательный расчет по Договору производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Итогового акта приемки выполненных работ, составленного по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему договору.

3. Между АО «Оборонстройпроект» (далее по тексту - «Генподрядчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК» (далее по тексту - «Подрядчик») был заключен договор строительного подряда № 1818187375272554164000000/АЧ-09/04-264 от 09 апреля 2018 года (далее по тексту - «Договор»), в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по реконструкции теплосети на участках ТК58-ТК64, ТК61-63 на объекте: «Пункт прилета-лета пассажиров на аэродроме «Чкаловский» в/г № 84/1, в/ч 42829 по адресу: Московская область, Щелковский район, а Заказчик соответственно обязуется произвести оплату данных работ в соответствии с условиями договора.

В соответствии с п.2.1. цена договора составила 15 742 879 руб. 56 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 401 456 руб. 20 коп.

Исх. письмом № 17 от 11 февраля 2019 года ООО ТЕХНОСТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК» направило в адрес АО «Оборонстройпроект» комплект исполнительной документации, акт о приемке выполненных работ № 388 от 07.02.2019г. на 10 646 536 руб. 63 коп без НДС, справку о стоимости выполненных работ № 2 от 07.02.2019г. на 12 775 843 руб. 96 коп ( в т.ч. НДС 20% ), счета-фактуру № Ц207/02 от 07 февраля 2019г. на 12 775 843 руб. 96 коп., итоговый акт приемке выполненных работ на сумму 15 950 967 руб. 78 коп. ( в т.ч. НДС 20%), счет на оплату № 211/01 от 11.02.2019г. на 1 921 077 руб. 03 коп. (получено АО «Оборонстройпроект» 22 февраля 2019 года).

В соответствии с п.п. 4.3, 4.4. договора Подрядчик направляет Заказчику документы по форме КС № 2,3, исполнительную документацию, счет-фактуру, счет на оплату, которые Заказчик в течении 10 рабочих дней проверяет, подписывает, скрепляет печатью и возвращает в адрес Подрядчика акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ.

В соответствии с п. 2.6 договора оплата выполненных работ производится ежемесячно на основании КС по ф.2.3, подписанных Заказчиком. Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства в течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подтверждающих выполнение Подрядчиком работ в отчетном месяце

В соответствии с п. 2.8. Договора, окончательный расчет по Договору производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Итогового акта приемки выполненных работ, составленного по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему договору.

4. Между АО «Оборонстройпроект» (далее по тексту - «Генподрядчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК» (далее по тексту - «Подрядчик») был заключен договор строительного подряда № 1818187375272554164000000/АЧ-03/09-270 от 03 сентября 2018 года (далее по тексту - «Договор»), в соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по устройству наружных сетей ливневой канализации пассажирского и таможенного терминалов на объекте: «Пункт прилета- вылета пассажиров на аэродроме «Чкаловский»(шифр объекта Т-41/15-2) по адресу: Московская область, Щелковский район, а Заказчик соответственно обязуется произвести оплату данных работ в соответствии с условиями договора.

В соответствии с п.п. 4.3, 4.4. договора Подрядчик направляет Заказчику документы по форме КС № 2, 3, исполнительную документацию, счет-фактуру, счет на оплату, которые Заказчик в течении 10 рабочих дней проверяет, подписывает, скрепляет печатью и возвращает в адрес Подрядчика акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ.

Между сторонами были подписаны и скреплены печатью акт № 1 от 06.11.2018г. о приемке выполненных работ на 766 478 руб. 66 коп. (без НДС), акт № 2 от 06.11.2018г. о приемке выполненных работ на 79 371 руб. 27 коп. (без НДС), справка № 1 от 06.11.2018г. о стоимости выполненных работ на сумму 998 102 руб. 92 коп. ( в т.ч. НДС).

В соответствии с п. 2.6. Договора, оплата выполненных работ производится ежемесячно в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

В соответствии с п. 2.8. Договора, окончательный расчет по Договору производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Итогового акта приемки выполненных работ, составленного по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему договору.

С 17 июля 2019 года ООО «ТЕХНОСТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК» переименовано в ООО «ТСА» со сменой юридического адреса: 109428, 

<

...>, эт 2, кабинет 3.

25 декабря 2019 года Подрядчик - ООО «ТСА» направил в адрес Акционерного общества «Оборонстройпроект» досудебную претензию с предложением оплатить имеющуюся задолженность в размере 207 558 руб. 93 коп. ( в т.ч. НДС) по договору строительного подряда № 1818187375272554164000000/АЧ-09/04-258 от 09 апреля 2018 года, в размере 1 923 887 руб. 13 коп. ( в т.ч. НДС) по договору строительного подряда № 18181873752725541 64000000/АЧ-09/04-260 от 09 апреля 2018 года, в размере 1 921 077 руб.ОЗ коп. ( в т.ч. НДС) по договору строительного подряда № 1818187375272554164000000/АЧ-09/04-264 от 09.04.2018 года , в размере 299 810 руб. 29 коп. ( в т.ч. НДС) по договору подряда№ 1818187375272554164000000/АЧ-03/09-270 от 03 сентября 2018 года, а всего 4 352 333 руб. 38 коп. Однако, до настоящего времени ответа на претензию не поступило, задолженность не была погашена, что и послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Вышеназванные договоры, по правовым признакам, являются договорами подряда и регулируются нормами материального права, содержащимися в параграфе 1 главы 37 ГК РФ (ст. ст. 702 - 729).

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов.

В силу статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ, доказательством передачи результата работ является акт приема-передачи или иной приравненный к нему документ.

В своих письменных пояснениях на исковое заявление АО «ГУОВ» ссылается на то, что им был дан мотивированный отказ в приемке выполненных ООО «ТСА» в связи с тем, что в части предъявленных к оплате работ - по Договорам № 2 и № 3 - завышен их объем ( письмо ответчика № 16 от 11.01.2020г.),а по части - отсутствует необходимая документация, предусмотренная договорами. Данные доводы ответчика отклоняются судом как необоснованные и не соответствующие фактическим обстоятельствам дела:

1)По договору № 181818737375272554164000000/АЧ-09/04-258 от 09.04.2018г. на выполнение работ по монтажу центрального теплового пункта на объекте: Пункт прилета-вылета пассажиров на аэродроме «Чкаловский» (шифр Т-41/15-2), отсутствует вообще какая-либо мотивированная ссылка на отказ в приемке работ.

На указанное в иске исх. письмо ООО «ТСА» № 50 от 15 марта 2019 года о направлении документации по данному договору, полученное 25 апреля 2019 года АО «Оборонстройпроект, правопреемником которого является АО «ГУОВ», до настоящего времени мотивированного отказа в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства, в т.ч. и в письменных пояснениях, не представило.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что ООО «ТСА» в полном объеме направило в адрес ответчика всю документацию для приемки и оплаты выполненных по договору подряда № 181818737375272554164000000/АЧ-09/04-258 от 09.04.2018г. работ, однако АО «ГУОВ» необоснованно уклоняется от их приемки и оплаты.

2)По договору № 1818187375272554164000000/АЧ-09/04-260 от 09.04.2018г. на выполнение работ по монтажу внутренних систем в пассажирском терминале на объекте: Пункт прилета-вылета пассажиров на аэродроме «Чкаловский» (шифр Т-41/15-2):

На указанное в иске исх. письмо ООО «ТСА» № 65 от 14 апреля 2019 года о направлении документации по данному договору, полученное 29 апреля 2019 года АО «Оборонстройпроект», правопреемником которого является АО «ГУОВ», до настоящего времени мотивированного отказа в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства, в т.ч. и в письменных пояснениях не представило.

Исполнительная документация по данному договору передана 20.08.2018г. (кондиционирование, холодоснабжение, теплоснабжение) и 01.09.2018г. (вентиляция и противодымная защита).

Ответчик ссылается на письмо исх. № 16 от 11.01.2019г. о направлении мотивированного отказа в приемке выполненных работ, а также отсутствие части исполнительной документации.

В материалы дела не представлена информация о получении данного письма ООО «ТСА», о его наличии стало известно только в судебном заседании 20.02.2020г.

При этом, документы по форме КС-2,3 были направлены позднее данного письма -14 апреля 2019 года и получены 29 апреля 2019 года, в связи с чем у стороны ответчика к ним нет претензий.

3)По договору № подряда № 1818187375272554164000000/АЧ-09/04-264 от 09апреля 2018 года на выполнение работ по реконструкции теплосети на участках ТК58-ТК64, ТК61-63 на объекте: «Пункт прилета-вылета пассажиров на аэродроме «Чкаловский» (шифр Т-41/15-2), также отсутствует какая-либо мотивированная ссылка на отказ в приемке работ

На указанное в иске исх. письмо ООО «ТСА» № 17 от 11 февраля 2019 года о направлении документации по данному договору, полученное 22 февраля 2019 года АО «Оборонстройпроект», правопреемником которого является АО «ГУОВ», до настоящего времени мотивированного отказа в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства, в т.ч. и в письменных пояснениях не представило.

Исполнительная документация по данному договору передана в составе письма № 17 от 11.02.2019г., до настоящего времени претензий к высланным ответчику документам не предъявлено.

Ответчик в письменных пояснениях ссылается на письмо исх. № 16 от 11.01.2019г. о направлении мотивированного отказа в приемке выполненных работ, а также отсутствие части исполнительной документации.

В материалы дела не представлена информация о получении данного письма ООО «ТСА», о его наличии стало известно только в судебном заседании 20.02.2020г.

При этом, документы по исполнению договора ( в т.ч. исполнительная документация, КС по ф. 2,3, счета) были направлены позднее данного письма - 11 февраля 2019 года и получены 22 февраля 2019 года, в связи с чем у стороны ответчика к ним нет претензий.

4)  По договору     №  1818187375272554164000000/АЧ-03/09-270  от  03.09.2018г.  на выполнение работ по устройству наружных сетей ливневой канализации пассажирского и таможенного терминалов на объекте: пункт прилета-вылета пассажиров на аэродроме «Чкаловский» (шифр Т-41/15-2), помимо подписания между сторонами КС по форме №№ 2,3 - акт № 1 от 06.11.2018г. о приемке выполненных работ на 766 478 руб. 66 коп. (без НДС), акт № 2 от 06.11.2018г. о приемке выполненных работ на 79 371 руб. 27 коп. (без НДС), справка № 1 от 06.11.2018г. о стоимости выполненных работ на сумму   998 102 руб. 92 коп. ( в т.ч. НДС), как указано в иске (п.4) с досудебной претензией от 24.12.2019г. был направлен итоговый акт и счет на оплату (получены ответчиком 10 января 2020 года), до настоящего времени мотивированного отказа в приемке выполненных работ в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства, в т.ч. и в письменных пояснениях, не представило.

Исполнительная документация, КС по форме №№ 2,3, счета и счета-фактуры в соответствии с условиями договора были получены ответчиком  по Договору-1 - 25 апреля 2019 года, по Договору-2 - 14 апреля 2019г. КС и счет-фактура, исполнительная документация 20.08.2018г. и 01.09.2018г., с досудебной претензией от 24.12.2019г. итоговый акт и счет-фактура, по Договору-3 - КС-2,3 и счета получены 22 февраля 2019 года, итоговый акт со счет-фактурой получены с досудебной претензией 24.12.2019г., по Договору-4 - с досудебной претензией от 24.12.2019г. итоговый акт и счет-фактура, т.к. КС подписаны, однако до настоящего времени мотивированного отказа в приемке выполненных работ в соответствии с условиями договоров и требованиями законодательства, не последовало.

В соответствии с п. 2.8. всех договоров окончательный расчет за выполненные работы по договору осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания итогового акта приемки выполненных работ, составленного по форме, указанной в приложении № 6 к договору.

По Договору-1 итоговый акт получен 25 апреля 2019 года,

По Договору-2 итоговый акт получен 10 января 2020 года,

По Договору-3 итоговый акт получен 22 февраля 2019 года,

По Договору-4 итоговый акт получен 10 января 2020 года т.е. сроки, предусмотренные договором, истекли.

С учетом изложенного, истец доказал факт наличия у ответчика задолженности представленными в материалы дела доказательствами, требование о взыскании задолженности в размере 207 558 руб. 93 коп. по договору строительного подряда № 1818187375272554164000000/АЧ-09/04-258 от 09 апреля 2018 года, в размере 1 923 887 руб. 13 коп. по договору строительного подряда № 18181873752725541 64000000/АЧ-09/04-260 от 09 апреля 2018 года, в размере 1 921 077 руб. 03 коп. по договору строительного подряда № 1818187375272554164000000/АЧ-09/04-264 от 09.04.2018 года, в размере 299 810 руб. 29 коп. по договору подряда № 1818187375272554164000000/АЧ-03/09-270 от 03 сентября 2018 года, а всего 4 352 333 руб. 38 коп. признается судом обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Согласно п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с Акционерного общества  "Главное управление обустройства войск" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ТСА" задолженность в размере 4 352 333 (четыре миллиона триста пятьдесят две тысячи триста тридцать три) руб. 38 коп., а так же расходы по уплате госпошлину в размере 44 762 (сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят два) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:                                                                                                              В.Г. Джиоев