ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А41-105608/19

город Москва

22 июля 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 22 июля 2020 года

Полный текст постановления изготовлен 22 июля 2020 года

Арбитражный суд Московского округа

в составе: 

председательствующего судьи Стрельникова А.И.,

судей Дзюбы Д.И., Колмаковой Н.Н.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, доверенность от 20.11.2019г. №5-19/Ю, ФИО2, решение №1 от 26.02.2016г., 

от ответчика: ФИО3, доверенность от 17.06.2020г. №14,

рассмотрев 15-22 июля 2020 года в судебном заседании кассационную жалобу

ООО «Агентство территориального планирования»

на решение  Арбитражного суда Московской области  от 29 января 2020 года,

на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда  от 19 марта 2020 года,

по иску ООО «Агентство территориального планирования» 

к АО «Корпорация развития Московской области» 

о внесении изменений в договор,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Агентство территориального планирования» обратилось с исковым заявлением к АО «Корпорация развития Московской области» о внесении изменений в договор № 351954 от 02.08.2019, заключенный между ООО «Агентство территориального планирования» и АО «Корпорация развития Московской области» в части изменения сроков выполнения работ.

 Решением Арбитражного суда Московской области от 29 января 2020 года в удовлетворении исковых требований было отказано (т.1, л.д. 152-154).

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 19 марта 2020 года данное решение было оставлено без изменения (т.2, л.д. 33-37).

Не согласившись с судебными актами,  ООО «Агентство территориального планирования» обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просило отменить вышеназванные  решение и постановление.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 15июля по 22июля 2020г., после чего рассмотрение жалобы было продолжено.

До начала рассмотрения кассационной жалобы истец и ответчик заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу, в соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с частью 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса.

Суд кассационной инстанции принимает во внимание, что, в соответствии со статьей 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, при условии, что оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Проверив соответствие представленного текста мирового соглашения нормам права, кассационная инстанция полагает, что оно соответствует законодательству, подписано полномочными лицами, что подтверждается их подписью и печатью организаций,  и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем подлежит утверждению судом в порядке статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а обжалуемые  решение и постановление суда по настоящему делу подлежат отмене в связи с достижением сторонами мирового соглашения.

Руководствуясь статьями 138 - 141, 150, 176, 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить мировое соглашение по делу № А41-105608/19 в следующей редакции:

1. Настоящее соглашение заключается сторонами в соответствии со статьями 138, 139, 140, 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), для прекращения спора, возникшего в связи с предъявлением Истцом в Арбитражный суд Московской области иска к Ответчику о внесении изменений в Договор в части изменения сроков выполнения работ по этапам III «Разработка проекта планировки территории» и IV «Согласование проекта планировки территории».

2.Стороны пришли к соглашению, определить следующие сроки начала и окончания выполнения работ по этапам III «Разработка проекта планировки территории» и IV «Согласование проекта планировки территории» без изменения количества календарных дней по указанным этапам, предусмотренного пунктом 9 раздела 2 Технического задания(приложение № 1 к договору):

дата начала выполнения работ по III этапу - 17.08.2020г.;

дата окончания выполнения работ по III этапу - 05.10.2020г.; 

дата начала выполнения работ по IV этапу - 06.10.2020г.; 

дата окончания выполнения работ по IV этапу - 04.12.2020г.

3.Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 АПК РФ, соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением.

4.Настоящее соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Московского округа и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются положениями договора.

6.Стороны просят на основании ст. ст. 138, 139, 140, 141 АПК РФ утвердить мировое соглашение и прекратить производство по делу № А41-105608/2019.

7.Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны.

8.Настоящее соглашение составлено в трех подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон и Арбитражного суда Московского округа

Решение Арбитражного суда Московской области от 29 января 2020 года, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19 марта 2020 года по делу № А41-105608/19 -  отменить.

Производство по настоящему делу – прекратить.

Председательствующий судья            А.И. Стрельников

Судьи:                                  Д.И. Дзюба 

                                                                                          Н.Н. Колмакова