Арбитражный суд Липецкой области пл. Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019 

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А36-9388/2018

г.Липецк

19 ноября 2018 года

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Коровина А.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Прибытковой  Т.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

комитета градостроительной и дорожной деятельности администрации Липецкого  муниципального района (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место  нахождения): 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Жилдорстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения): 

<

...>)  

об обязании выполнить гарантийный ремонт, 

при участии в заседании: 

от истца – ФИО1, доверенность от 06.08.2018 (до перерыва),  от ответчика – представитель не явился,  

Руководствуясь статьями 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Жилдорстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения): 

<

...>) в течение пятнадцати дней с момента вступления решения в  законную силу безвозмездно устранить следующие дефекты дорожной одежды,  возникшие в результате выполнения работ по муниципальному контракту № 25-ОБ  от 22.08.2017, по ул.Сельская: ПК 496-507 м. (разрушение кромки слева), ПК 574 - 575 м. (разрушение кромки слева), ПК 785-815 м. (разрушение кромки слева) и по  

ул.Медовая: ПК 222-254 м. (сетка трещин на левой стороне кромки), ПК 326-342 м.  (сетка трещин на левой стороне кромки), ПК 389-392 м. (сетка трещин на левой  стороне кромки), ПК 435-456 м. (сетка трещин на правой стороне кромки),  

ПК 450-456 м. (сетка трещин на левой стороне кромки), ПК 490-492 м. (сетка  трещин на правой стороне кромки), ПК 570-576 м. (сетка трещин на левой стороне  кромки), ПК 582-594 м. (сетка трещин на левой стороне кромки), ПК 658-670 м.  (сетка трещин на левой стороне кромки), ПК 680-700 м. (сетка трещин на левой  стороне кромки), ПК 726-767 м. (разрушение и сетка трещин на правой стороне  кромки), ПК 780-784 м. (сетка трещин на левой стороне кромки), ПК 795-807 м.  (сетка трещин на левой и на правой стороне кромки). Площадь ремонта составляет:  255 м².  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Жилдорстрой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения): 

<

...>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 руб.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Воронеж)  через Арбитражный суд Липецкой области.  

Судья А.А.Коровин