351/2017-29021(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-10972/2016

23 марта 2017 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Арцыбашевой Т.Ю., при ведении  аудиозаписи и протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании заявление  

Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть  Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской области»  

к обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроСтройЛюкс» 

об обязании устранить выявленные в период гарантийного срока дефекты и о  взыскании 69650,00 руб. штрафа.  

В судебном заседании присутствовали: 

от истца: ФИО2 - по доверенности № 18/1552 от 04.10.2016 (после перерыва  не явилась), ФИО3 - по доверенности № 18/1313 от 09.09.2016, удостоверение от  08.02.2016 КРС 014384.  

от ответчика: не явился, уведомлен надлежащим образом. 

Руководствуясь статьями 16, 17, 28, 102, 110, 156, 167-171, 174, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Федерального казенного учреждения здравоохранения  «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по  Курской области» удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтройЛюкс» в течение  сорока пяти календарных дней со дня вступления данного решения суда в законную силу  устранить выявленные на первом и втором этаже второго лечебного корпуса отделения  реабилитации госпиталя МСЧ МВД России по Курской области недостатки работ,  выполненных в рамках государственного контракта от 17.11.2014 № 115, за свой счет,  путем:  

- разборки облицовки стен: из керамических глазурованных плиток в объеме 130 м2;  

- покрытия поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен в  объеме 130 м2, с использованием грунтовки «Бетоноконтакт»;  

- гладкой облицовки стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и  угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по  кирпичу и бетону в объеме 130 м2, с использованием клея плиточного «Unis» Россия  (сухая смесь) (морозостойкость - 35 циклов, прочность сцепления 5 кг/см3, удерживаемый  вес 300 г/100 см2), плитки стеновой «Керабуд» Россия (размер 600x300 мм, толщиной 7  

мм, водопоглащение - 16,3%, предел прочности на изгиб - 20 МПА).  

В соответствии с ч. 3 ст. 174 АПК РФ в случае неисполнения обществом с  ограниченной ответственностью «ЕвроСтройЛюкс» настоящего решения в указанный  судом срок Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная  часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской области» вправе  осуществить соответствующие действия за счет общества с ограниченной  ответственностью «ЕвроСтройЛюкс» со взысканием с него необходимых расходов.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЕвроСтройЛюкс» в пользу  Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть  Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской области» 69650,00 руб.  штрафа.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЕвроСтройЛюкс» в пользу  федерального бюджета 8786,00 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в  течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд  Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного  суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Арцыбашева Т.Ю.