ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело № А45-18772/2018

г. Новосибирск

24 июля  2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 июля 2018 года.

Решение в полном объёме изготовлено 24 июля  2018 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Цыбиной А.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Спецпроект» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,

к акционерному обществу «Новосибирский приборостроительный завод» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,

о взыскании 1 246 751 рубля 30 копеек, 

при участии представителей

истца: ФИО2, доверенность  от  12.03.2018, паспорт, 

ответчика: не явился, извещен,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Спецпроект»     (далее – истец) обратилось к акционерному обществу «Новосибирский приборостроительный завод» (далее - ответчик) с иском о взыскании 1 246 751 рубля 30 копеек, в том числе 1 164 546 рублей  00  копеек  долга по оплате  выполненных  работ  по договору на  выполнение  землеустроительных и проектно-изыскательских  работ  от  13.06.2017 № 64/2170-17 и 82 205 рублей  30 копеек неустойки.

Ответчик   отзыв на исковое заявление не представил, надлежащим образом извещённый о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явился. Дело рассмотрено согласно статьям 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещённого о месте и времени судебного разбирательства. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы истца, суд пришёл к следующим выводам.

13.06.2017 истец   (исполнитель) и АО «Швабе-Оборона и  Защита» (заказчик) заключили договор на выполнение  землеустроительных  и  проектно-изыскательских  работ    № 64/2170-17 (далее – договор), по условиям которого исполнитель обязался выполнить  комплекс землеустроительных и  проектно-изыскательских  работ  объекта: Газопровод высокого  и  низкого  давления», а  заказчик   обязался  принять  и  оплатить  выполненные  работы. 

Дополнительным  соглашением  к договору от  26.10.2017 в  связи  с  переименованием  АО «Швабе-Оборона и  Защита» в  текст  договора  внесены   изменения  в  части  наименование  заказчика на  акционерное  общество  «Новосибирский  приборостроительный  завод»,  а  также  установлен  срок  выполнения  работ  -  не  позднее  01.11.2017.

Общая  стоимость   работ по договору определена  в  п.  2.1  договора в  размере   1 164 546 рублей 00 копеек. 

Истец выполнил для ответчика работы на  сумму  1 164 546 рублей  00 копеек, что  подтверждается подписанным  в   двустороннем  порядке   актом  выполненных  работ  от  01.11.2017. 

Пунктом 2.3 договора  заказчик  оплачивает  исполнителю  выполненные  работ  в  следующем  порядке:

- 15 % от  цены  договора   -  в  качестве  авансового платежа в  течение  10-ти  рабочих  дней с  даты  подписания  настоящего  договора; 

- 85 % от  цены  договора  -  в течение  10-ти  рабочих  дней с  даты  принятия  заказчиком  выполненных  работ и  получения  положительного  заключения   Государственной вневедомственной  экспертизы НСО.

До  настоящего  времени    ответчик  оплату  выполненных  истцом  работ  не  произвел. 

Долг  ответчика  перед  истцом  составляет 1 164 546 рублей  00 копеек.

Претензия истца  об оплате долга   оставлена ответчиком без удовлетворения.

На основании изложенного, долг в размере 1 164 546 рублей 00 копеек подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании статей 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Стороны в п. 7.4. договора установили, что при нарушении сроков  оплаты заказчиком  исполнитель   вправе  требовать   уплату  неустойки в    размере 0,03 % в день от неуплаченной  суммы. 

Истец производит расчёт неустойки за период с 28.06.2017 по 18.06.2018. По расчёту истца с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере 82 205 рублей  30 копеек. Расчёт неустойки выполнен истцом верно, ответчиком не оспорен. О применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации ответчиком не заявлено.

Неустойка в размере 82 205  рублей 30 копеек, начисленная за период с 28.06.2017 по 18.06.2018, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в порядке статей 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску в соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесены судом на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л:

взыскать с акционерного общества «Новосибирский приборостроительный завод» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Спецпроект» (ОГРН 

<

***>) 1 164 546 рублей 00 копеек долга, 82 205 рублей 30 копеек неустойки и 25 468 рублей 00 копеек судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску, а всего 1 272 219 рублей 30 копеек.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья                                                                                                                       А.В. Цыбина