АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск

17.11.2020Дело № А62-1723/2020

Резолютивная часть решения оглашена 10.11.2020

Мотивированный текст решения изготовлен 17.11.2020

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Печориной В. А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Винайак Эдюкешнал Сервисез»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

 к обществу с ограниченной ответственностью «Авангард» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

об обязании передать исполнительную документацию к договору подряда № 27/06/2019 от 27.06.2019 согласно выполненным объемам работ

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

 при участии:

от истца: ФИО2, представитель;

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом;

от третьего лица: ФИО3, представитель;

У С Т А Н О В И Л :

общество с ограниченной ответственностью «Винайак Эдюкешнал Сервисез» обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Авангард» об обязании в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда передать исполнительную документацию по договору подряда № 27/06/2019 от 27.06.2019, согласно объемам фактически выполненных работ (с учетом принятого в судебном заседании 10.11.2020 уточненного искового заявления в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, определением суда от 11.03.2020 привлечено Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, 27.06.2019 между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации и обществом с ограниченной ответственностью «Винайак Эдюкешнал Сервисез» заключен договор целевого пожертвования, предметом которого является пожертвование в форме безвозмездного выполнения ремонтных работ общей стоимостью 3589936,45 рубля на основании договора подряда № 27/06/2019 от 27.06.2019.

Общество с ограниченной ответственностью «Винайак Эдюкешнал Сервисез» (благотворитель) посредством привлечения третьих лиц, выполняет ремонтные работы на первом этаже общежития № 2 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (благополучатель), находящегося по адресу: 

<

...>.

27.06.2019 между обществом с ограниченной ответственностью «Винайак Эдюкешнал Сервисез» (истец, заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Авангард» (ответчик, подрядчик) заключен договор подряда № 27/06/2019, в соответствии с условиями которого, подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить ремонтные работы, а заказчик обязуется, принять их результат и уплатить обусловленную цену договора.

Виды и объемы подлежащих выполнению работ согласованы сторонами в локальных сметных расчетах 01-04 (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.2 договора).

Пунктом 1.3 сторонами предусмотрен срок выполнения работ: работы должны быть выполнены и их результат передан заказчику до 31 августа 2019 года.

Работы производятся подрядчиком на первом этаже в общежитии № 2 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по адресу: 

<

...> (пункт 1.4 договора).

Согласно пункту 4.13 договора подрядчик обязан в процессе производства работ вести документацию в соответствии с действующими нормами и правилами, представлять заказчику акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты качества, технические паспорта, а также иные документы, подтверждающие качество выполняемой работы, применяемых материалов, оборудования, изделий и конструкций.

Стоимость работ составляет 3589936,45 рубля (пункт 5.1 договора).

Порядок оплаты работ по договору производится в следующем порядке:

- задаток в размере 1160000 рублей заказчик оплачивает подрядчику на основании счета подрядчика в течение 5 банковских дней с момента подписания договора (пункт 5.3.1 договора);

- сумму в размере 1158797 рублей заказчик оплачивает подрядчику не позднее 01 августа 2019 года (пункт 5.3.2 договора);

- окончательный расчет производится заказчиком после подписания актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3 и получения от подрядчика документов согласно пункту 7.1.2 и 7.1.3 настоящего договора, в течение 5 банковских дней.

Разделом 7 стороны согласовали порядок сдачи и приемки работ.

Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ на основании соответствующего письменного уведомления подрядчика, при условии приложения к нему:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанных подрядчиком со своей стороны в 3 экземплярах (пункт 7.1.1 договора);

- полного комплекта исполнительной документации на выполненные работы, оформленной на русском языке в соответствии с положениями договора, нормативными требованиями. Исполнительная документация передается в 1 экземпляре в электронном виде и 2 экземплярах в бумажном, при этом, чертежи должны быть оформлены в формате dwg и pdf, текстовые документы doc, pdf, excel (пункт 7.1.2 договора).

Заказчик, в течение 10 рабочих дней после получения от подрядчика письменного уведомления и полного комплекта надлежащим образом оформленных прилагаемых документов, обязан с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) либо, при обнаружении недостатков или отступлений от смет, положений договора и указаний заказчика, немедленно заявить об этом подрядчику и дать подрядчику мотивированный отказ от приемки. При этом составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения (пункт 7.4 договора).

В соответствии с пунктом 7.8 договора акт о завершении обязательств по договору подписывается заказчиком и направляется на подписание подрядчику после сдачи-приемки всех работ, полной оплаты и произведения всех иных расчетов по договору, вывоза мусора и освобождения объекта, передачи заказчику полного комплекта надлежаще оформленной документации (исполнительной документации, протоколов, сертификатов качеств и т.п.) по всем видам выполненных подрядчиком работ, а также, после надлежащего выполнения подрядчиком всех иных своих обязательств по договору, за исключением гарантийных по качеству работ.

В соответствии с пунктом 9.3.5. договора, при одностороннем отказе от исполнения договора он считается расторгнутым по истечении 5 (Пяти) дней с даты получения другой стороной соответствующего уведомления.

В соответствии с пунктом 9.3.6. договора при любом досрочном прекращении действия договора в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты прекращения действия договора:

- все незавершенные работы передаются заказчику в порядке приемки работ, предусмотренном договором;

- производится возврат неосвоенного аванса подрядчиком;

- вся подготовленная исполнителем в процессе производства работ документация подлежит передаче заказчику;

- объект передается заказчику по соответствующему акту.

Во исполнение принятых на себя обязательств по договору № 27/06/2019 истец произвел оплату ответчику в размере 1 160 000 (Один миллион сто шестьдесят тысяч) рублей, что подтверждается платежным поручением № 47 от 01.07.2019,

В соответствии с пунктом 5.3.2 договора истец произвел оплату ответчику в размере 1158 797 (Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто семь) рублей, что подтверждается платежным поручением № 54 от 08.07.2019, платежным поручением № 56 от 19.07.2019, платежным поручением № 62 от 30.07.2019.

 07.10.2019 генеральным директором ответчика нарочно получено письмо от истца, в котором просит ответчика предоставить сведения об объемах выполненных работ на объекте.

Однако ответ на письмо от 07.10.2019 ответчик не дал, запрашиваемые сведения не предоставил.

26.11.2019  генеральным директором ответчика получено нарочно уведомление от истца о расторжении договора, в котором истец просил ответчика письменно уведомить его о дате приема-передачи результата выполненных работ на объекте по договору, а так же просил предоставить справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), полный комплект исполнительной документации на выполненные работы, оформленную на русском языке в соответствии с положениями договора, нормативными требованиями, паспорта, сертификаты качества и т.п. на материалы и оборудование.

Ответчик не отреагировал на уведомление о расторжении договора от 26.11.2019 № 03, не уведомлял истца о дате приема-передачи результата выполненных работ на объекте по договору.

20.01.2020 истец направил ответчику требование, в котором в соответствии с пунктом 3.1.2 и пунктом 7.1 договора просил ответчика в течение одного дня после получения требования предоставить нарочно истцу исполнительную документацию на выполненные работы на объекте согласно приложению к требованию.

Ответчик в нарушение обязательств по договору оставил требование от 20.01.2020 без ответа.

Не передача ответчиком исполнительной документации послужила основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Ответчиком отзыв на исковое заявление не представлен, в судебное заседание представитель не явился, неоднократно уведомлялся о дате, времени и месте судебного заседания.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации позволяют суду считать ответчика извещенным о рассмотрении дела надлежащим образом и, руководствуясь частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотреть  дело в его отсутствие.

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской  Федерации все имеющиеся в   материалах дела документы, суд приходит к следующему.

Из положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что судебной защите подлежит нарушенное право.

Поэтому предъявление любого иска должно иметь своей целью восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в суд лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Исходя из правовой природы отношений, вытекающих из выполнения ответчиком ремонтных работ, в рамках договора  № 27/06/2019 от 27.06.2019 к возникшему спору подлежат применению нормы Главы 37 Гражданского кодекса РФ о договорах подряда (строительного подряда). 

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (статья 740 Гражданского кодекса РФ). 

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает одним из способов защиты гражданских прав право требования исполнение обязательства в натуре.

В соответствии со статьей 726 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательства исполнения ответчиком обязательства по передаче исполнительной документации истцу в материалах дела отсутствуют.

При этом обязанность подрядчика передать исполнительную документацию заказчику до начала приемки законченного строительством объекта предусмотрена условиями договора (пункт 7.1.2 договора).

Согласно представленным в материалы дела локально-сметным расчетам № 01 - № 04, утвержденных истцом и согласованных ответчиком, на объекте по адресу Смоленская область, 

<

...> были предусмотрены следующие виды работ на сумму:

- локально-сметный расчет № 01. Блоки. Медакадемия. Общежитие. 1-й этаж, на сумму 2832688 рублей;

- локально-сметный расчет № 02. Коридор 1-й этаж. Медакадемия. Общежитие. 1-й этаж, на сумму 323860, 21 рубля;

- локально-сметный расчет № 03. Кухня 1-й этаж. Медакадемия. Общежитие. 1-й этаж, на сумму 274371,07 рубля;

- локально-сметный расчет № 04. Прачечная 1-й этаж. Медакадемия. Общежитие. 1-й этаж, на сумму 159016,28 рубля.

Общая стоимость всех работ, указанных в локально-сметных расчетах составляет 3589936,34 рубля.

В соответствии с пунктом 3.1.7 договора подрядчик обязан сдать заказчику надлежащим образом, выполненный результат работ в срок, установленный договором.

По смыслу пункта 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Пунктом 3 вышеуказанной статьи установлено, что, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Таким образом, вышеуказанные нормы предусматривают возможность одностороннего отказа от договора.

Ответчик в нарушение обязательств по договору к 31.08.2019 результат работ истцу не передал, не предоставил сведения о выполненных объемах работ, не предоставил исполнительную документацию.

26.11.2019 генеральным директором ответчика ФИО4 было получено нарочно уведомление о расторжении договора.

В соответствии с пунктом 9.3.5 договора, при одностороннем отказе от исполнения договора он считается расторгнутым по истечении 5 (Пяти) дней с даты получения другой стороной соответствующего уведомления, т.е.- с 02.12.2019.

В соответствии с пунктом 9.3.6 договора при любом досрочном прекращении действия договора в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты прекращения действия договора ответчик обязан передать исполнительную документацию и результат работ истцу, т.е. не позднее 06.12.2019.

При рассмотрении дела по ходатайству истца определением Арбитражного суда Смоленской области от 08.06.2020 назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту Союза «Смоленская торгово-промышленная палата»  ФИО5.

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы: 

1. Каков фактический объем выполненных ремонтных работ по договору подряда № 27/06/2019 от 27.06.2019?

2. Какой перечень исполнительной документации обязан передать подрядчик заказчику согласно объемам фактически выполненных работ по договору подряда № 27/06/2019 от 27.06.2019?

3. На какую сумму фактически выполнены работы по договору подряда № 27/06/2019 от 27.06.2019?

После проведенной экспертизы в суд поступило заключение эксперта № 528/М/20 от 10.08.2020.

В указанном заключении экспертом сделаны следующие выводы.

На основании проведенного натурного обследования объекта, и представленных локальных смет определено, что стоимость фактически выполненных работ по договору № 27/06/2019 от 27.06.2019, согласно прилагаемых актов выполненных работ, составляет:

- № 01. Блоки. Медакадемия. Общежитие. 1-й этаж, на сумму 1077700,42 рубля;

- № 02. Коридор 1-й этаж. Медакадемия. Общежитие. 1-й этаж, на сумму 146470,25 рубля;

- № 03. Кухня 1-й этаж. Медакадемия. Общежитие. 1-й этаж, на сумму 162570,59 рубля;

- № 04. Прачечная 1-й этаж. Медакадемия. Общежитие. 1-й этаж, на сумму 55775,12 рубля.

Перечень исполнительной документации, который обязан передать подрядчик заказчику, согласно объемам фактически выполненных работ, по договору № 27/06/2019 от 27.06.2019.

Отделочные работы.

1. Общий журнал работ и специальные журналы работ:

- общий журнал работ;

- журнал входного контроля качества;

2. Акты освидетельствования выполнения работ:

- бетонирование монолитных бетонных и железобетонных перекрытий, покрытий;

- крепление облицовки поверхностей искусственными материалами;

- установка оконных и дверных блоков;

- крепления, конопатки и изоляции оконных и дверных блоков;

- устройство оснований под полы.

3. Акты освидетельствования скрытых работ:

- акт скрытых работ на грунтовку поверхностей стен, потолков, полов;

- акт скрытых работ на шпатлевку потолков, заделка рустов;

- акт скрытых работ на покраску потолков водно-дисперсионной краской;

- акт скрытых работ на штукатурку стен, шпатлевку;

- акт скрытых работ на сплошное выравнивание стен;

- акт скрытых работ на перетирку штукатурки;

- акт скрытых работ на разборку покрытий плов;

- акт скрытых работ на облицовку стен керамической плиткой;

- акт скрытых работ на демонтажные работы;

- акт скрытых работ на демонтаж плинтусов;

- акт скрытых работ на демонтаж дверного блока;

Устройство полов (в зависимости от типа пола)

- акт скрытых работ на устройство выравнивающей стяжки из ц/п раствора;

- акт скрытых работ на грунтовку стяжки;

- акт скрытых работ на устройство бетонного пола;

- акт скрытых работ на грунтовку поверхности бетонного пола для укладки линолеума;

- акт скрытых работ на укладку линолеума на клей;

- акт скрытых работ на облицовку полов керамической плиткой;

4. Акт приёма передачи объекта в работу.

5.Акты допуска к демонтажу.

6. Приказ "О назначении ответственных за производство работ, охрану труда и обеспечении пожарной безопасности".

    7. Акт о приёме в эксплуатацию после ремонта.

8. Реестр исполнительной документации.

9. Сертификаты соответствия и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности на отделочные материалы на путях эвакуации.

Таким образом, поскольку подрядчик не представил исполнительную документацию заказчику либо документальных подтверждений, свидетельствующих о неправомерном уклонении заказчика от приемки работ в полном объеме в сроки, согласованные сторонами, а также учитывая, что истец в силу статьи 717 Гражданского кодекса Российской Федерации оплатил подрядчику часть установленной договором подряда цены, суд приходит к выводу о нарушении ответчиком условий договора и действующего законодательства.

Учитывая изложенное, требование истца является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

За проведение судебной экспертизы в рамках настоящего дела истцом перечислены на депозитный счет суда 40000 рублей, в связи с удовлетворением предъявленных требований с ответчика в пользу истца помимо судебных расходов в виде уплаченной государственной пошлины подлежат взысканию также судебные расходы на проведение судебной экспертизы в указанном размере.

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) передать Обществу с ограниченной ответственностью "Винайак Эдюкешнал Сервисез" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда исполнительную документацию по Договору подряда № 27/06/2019 от 27.06.2019:

3. Общий журнал работ и специальные журналы работ:

- общий журнал работ;

- журнал входного контроля качества;

4. Акты освидетельствования выполнения работ:

- бетонирование монолитных бетонных и железобетонных перекрытий, покрытий;

- крепление облицовки поверхностей искусственными материалами;

- установка оконных и дверных блоков;

- крепления, конопатки и изоляции оконных и дверных блоков;

- устройство оснований под полы.

3. Акты освидетельствования скрытых работ:

- акт скрытых работ на грунтовку поверхностей стен, потолков, полов;

- акт скрытых работ на шпатлевку потолков, заделка рустов;

- акт скрытых работ на покраску потолков водно-дисперсионной краской;

- акт скрытых работ на штукатурку стен, шпатлевку;

- акт скрытых работ на сплошное выравнивание стен;

- акт скрытых работ на перетирку штукатурки;

- акт скрытых работ на разборку покрытий плов;

- акт скрытых работ на облицовку стен керамической плиткой;

- акт скрытых работ на демонтажные работы;

- акт скрытых работ на демонтаж плинтусов;

- акт скрытых работ на демонтаж дверного блока;

Устройство полов (в зависимости от типа пола)

- акт скрытых работ на устройство выравнивающей стяжки из ц/п раствора;

- акт скрытых работ на грунтовку стяжки;

- акт скрытых работ на устройство бетонного пола;

- акт скрытых работ на грунтовку поверхности бетонного пола для укладки линолеума;

- акт скрытых работ на укладку линолеума на клей;

- акт скрытых работ на облицовку полов керамической плиткой;

4. Акт приёма передачи объекта в работу.

5.Акты допуска к демонтажу.

6. Приказ "О назначении ответственных за производство работ, охрану труда и обеспечении пожарной безопасности".

    7. Акт о приёме в эксплуатацию после ремонта.

8. Реестр исполнительной документации.

9. Сертификаты соответствия и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности на отделочные материалы на путях эвакуации.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Авангард" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Винайак Эдюкешнал Сервисез" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) судебные расходы в виде уплаченной по делу государственной пошлины в размере 6 000 рублей, в возмещение расходов по оплате судебной экспертизы в размере 40 000 рублей.

В соответствии с частью 3 статьи  319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья        В.А. Печорина