28/2023-273169(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-28399/2022

г. Новосибирск

26 сентября 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Бойковой И.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Администрации рабочего поселка Ордынское Ордынского района  Новосибирской области (ОГРН 

<

***>), р.п. Ордынское,  Новосибирская область,  

к обществу с ограниченной ответственностью "МИРА" (ОГРН  

<

***>), г. Барнаул, Алтайский край,  

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, ООО «Проект Мастер» (ОГРН 

<

***>),  

об обязании устранить недостатки работ по контракту   № 01513000219200000120001 от 20.11.2020,  

при участии: 

от истца: ФИО1, доверенность № 158 от 14.02.2023, диплом,  паспорт;  

от ответчика: ФИО2, доверенность от 24.08.2022, диплом, паспорт;  от третьего лица: не явился, извещен,  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "МИРА" (ОГРН  

<

***>) в срок с 01.05.2024 до 01.08.2024 устранить следующие  

недостатки работ по муниципальному контракту от 20.11.2020, а именно: 

1) На всей площади чаши фонтана: - демонтаж стяжки фонтана; 

- устройство бетонной стяжки фонтана, класс бетона не менее В 25  

W12F300 (том Проекта АР-лист № 3, том Проекта КЖ1-лист № 14); -устройство гидроизоляции «Кальматрон»; - окраска составом «Гидростоун». 2) в Техническом помещении под фонтаном: 

- отбивка штукатурки со стен и потока технического помещения фонтана;  - раскопка пазухов по периметру фонтана до пола технического  

помещения; 

- устройство обмазочной гидроизоляции внешних стен технического  

помещения фонтана гидроизоляцией «Кальматрон» либо «Гидротэкс-У»; 

- обратная засыпка грунта с трамбовкой; 

- восстановление отделочного покрытия технического помещения  

фонтана. 

3) По внешнему периметру чаши фонтана, где выявлены следы  

замачивания: - демонтаж внешнего облицовочного камня; 

- раскопка пазухов по периметру фонтана, обратная засыпка грунта с  

трамбовкой; 

- устройство обмазочной гидроизоляции внешних стен гидроизоляцией  

«Кальматрон»; - монтаж внешнего облицовочного камня; 

4) На всей площади чаши декоративного элемента фонтана из  

художественного бетона, где выявлены трещины: 

- демонтаж декоративного элемента фонтана из художественного бетона;  

- устройство нового декоративного элемента фонтана из художественного  бетона.  

5) По окончании устранения недостатков работ произвести пусконаладочные работы фонтана.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МИРА" (ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 6000 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова