АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

 

      Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань                                                                                                Дело №А65-39976/2017 

 

Дата принятия решения – 12 февраля 2018 года 

Дата объявления резолютивной части – 06 февраля 2018 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе  судьи Камалиева Р.А., при ведении  аудиозаписи и составления  протокола    секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Шешмаойл", г.Альметьевск, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к акционерному обществу "Акционерная компания ОЗНА", Республика Башкортостан, г.Октябрьский, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки в размере 228 980,00 руб., убытков в размере 318 440, 00 руб., с привлечением в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельного требования ООО «Профинжлидер»,

с  участием:

     от истца  - ФИО2, по доверенности №18-18 от 01.01.2018.,

     от ответчика  - ФИО3, по доверенности №164 от 21.07.2017

     от третьего лица - не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Истец - акционерное общество "Шешмаойл", г.Альметьевск  обратился  в Арбитражный  суд  Республики  Татарстан  с  исковым  заявлением  к  ответчику – акционерное общество "Акционерная компания ОЗНА", Республика Башкортостан, г.Октябрьский) о взыскании неустойки в размере 228 980,00 руб., убытков в размере 318 440, 00 руб.

Определением  АС  РТ от 12.12.2017  г. суд  привлек  к участию  в  деле   в  качестве  третьего  лица,  не  заявляющего  самостоятельных  требований  относительно  предмета  спора, ООО «ПрофИнжЛидер» ИНН7723839383, поскольку  настоящий  спор  может  повлиять  на  права  и  обязанности  указанного  третьего  лица.

Третье  лицо,  надлежащим  образом,  извещенное  о  времени  и  месте  судебного  заседания,  явку  своего  представителя  в  суд  не  обеспечило.

Суд  определил  рассмотреть  дело  в  отсутствие  третьего  лица,  надлежащим  образом  извещенного  о  времени  и  месте  судебного  заседания.

 Истец  иск  поддерживает,  в удовлетворении  ходатайства  ответчика  о  применении  положений  статьи  333  ГК  РФ  просит  отказать.

Ответчик  с  иском  не  согласен,  в  удовлетворении  иска  просит  отказать. Возражения  на  иск  основывает  на  том, что договором установлена  зачетная  неустойка, полагает ,что  в  силу  ст. 394 ГК  РФ требование о  взыскании  неустойки  в  размере  228 980  руб. является  необоснованным. противоправность  действий  ответчика не  доказана.  Полагает что  истец  неверно  определил  начальный  период  просрочки,  поскольку  сроком  поставки  является  дата  19.07.2017  г. (  23.01.2017 + 120  рабочих  дней),  так как договор , лист  согласования были направлены  истцу 23.01.2017  г.  Следовательно, с 19.07.2017 г.    следует  считать    нарушение  срока  поставки  товара. В  случае  удовлетворения  требований о  взыскании  неустойки  просит  применить  положения  ст. 333 ГК  РФ

Выслушав  стороны,  исследовав  материалы  дела, суд установил  следующее.

Как  следует  из  материалов  дела  и установлено  судом  между истцом (  покупатель)  и  ответчиком (поставщик) заключен  договор  поставки  № ШО/ОЗН/16-12-19/ЗН от 19.12.2016  г.,  в  соответствии  с которым  поставщик  обязуется  изготовить  согласно Приложений № 1-4  и  поставить ( доставить до  пункта  назначения) покупателю  по  его  заказу товар. Одновременно с  передачей  товара  поставщик  обязуется  передать  покупателю  всю  необходимую  разрешительную  документацию  на  товар на русском   языке( паспорт, декларацию  о  соответствии, сертификат  на  применение, инструкции, руководство  по  эксплуатации)

Поставщик гарантирует, что  поставляемая  продукция  является  новой изготовленной, не  заложена и  свободна  от прав  третьих  лиц.

Общая  сумма  договора  составляет  4  579 599  руб.  84  коп., в  том  числе  НДС( 18 %) 698583  руб. 03  коп.

Срок  изготовления  и  поставки   составляет  120  рабочих  дней с даты заключения  договора. ( п.1.6)

Поставщик  обязуется  перед  началом  поставки  по нанесению антикоррозийного    покрытия на камеры вызвать  представителя  покупателя за  10  рабочих дней и  предоставить сертификаты  соответствия на  использованные  материалы, результаты лабораторных контрольно-сварных соединений, в  результате  осмотра  составляется  акт  о готовности  к нанесению антикоррозийного  покрытия, подписанный  со  стороны  покупателя  и  поставщика.

Передача товара  покупателю  оформляется  подписанием  подтверждающих  документов( накладной, акта  приема-передачи- п.2.5)

Поставляемый  товар  по качеству  и  комплектности  должен  соответствовать  прилагаемым к договору  опросным  листам( Приложение № 1,2,3, 4)

Гарантийный  срок  на  поставляемый  товар  составляет  12  месяцев  со  дня  ввода  в  эксплуатацию,  но  не  более  36  месяцев  со  дня  поставки. ( 3.5)

В  случае  поставки  товара  ненадлежащего  качества ,недопоставки  товара, некомплектности,  отсутствия  поставки(  отказа  поставщика   от  исполнения  договора  поставки)  покупатель  вправе  по  своему  усмотрению  потребовать  от  поставщика, а  поставщик  обязан  в  срок  не  более  20 календарных  дней возвратить  денежные  средства взамен  поставки  некачественного  товара, не  поставленного, недопоставленного  товара), восполнить  количество  недопоставленного  товара, заменить  некачественный  товар, при  этом замена  товара ненадлежащего  качества  осуществляется в срок  не  превышающий  первоначального  срока поставки, срок замены  120  рабочих  дней.

Покупатель  производит  перечисление  100 %  оплаты  в течении  15 рабочих дней после  фактического  получения  товара  и  выставления  оригинала  соответствующей  счет -фактуры.

 Поставка  некачественного   некомплектного товара  приравнивается  к  просрочке  поставки  товара ( п.6.6).

За  нарушение  поставщиком  своих  обязательств  по  поставки  покупатель вправе  начислить обязательную к  оплате поставщиком  неустойку  в  размере 0,1 %  от  стоимости не  поставленного в  срок  товара ( п.6.1).

Как   следует  из  искового  заявления 27.06.2017  г.  и 29.06.2017  г. отдельными  партиями  были  доставлены  4 камеры записка  средств  очистки.

 Истцом совместно   ГВК  ООО УК  «Шешмайол»ООО «ППН  «Сервис» был  составлен  акт  приемки  оборудования   от 24.06.2017 г. , с участием  представителей  ГВК  ООО УК  «Шешмойл» АО  «Шешмаойл»,  ООО «Азна» составлен  акт  от 30.06.2017  г.

Из акта  приемки  оборудования  от 24.06.2017  г. ( камеры запуска  средств очистки, опросной лист № 1 12438-зТХ ОЛ1  в  количестве1 шт.  – п. диагностики) усматривается  наличие в  поставленном   оборудование  недостатков: деформирована  ручка  поддона, отсутствует  шплинт корончатой  гайки  затвора  камеры, по  телу  оборудования  выявлена механическая  выработка глубинной  до 3 мм., нарушения   лакокрасочного  покрытия  по  телу  оборудования, отсутствует грунтовое  покрытие лебедки, деформирован предохранительный  узел( погнут шток), нарушена  геометрия механизма  крепления.

По результатам  осмотра  составлено  заключение: до устранения  замечаний  оборудования  не  принято.

Из акта  приемки  оборудования  от  30.06.2017 г.( камера  запуска  средств  очистки(  п. диагностики) следует .что   выявлены  следующие  недостатки : на  теле  изделия  имеются  раковины, механический дефект, внутри  парубка нарушена технология  сварного  шва, толщина  стенки  трубы не  соответствует  паспортным  данным( визуальный  осмотр)

По  результатам  осмотра  составлено  заключение комиссии:  провести  неразрушающий  контроль  толщины  стенки  изделия  сварных швов, места  деформированного  участка, решение  о  приемке  оборудования  принять  после  заключения  лаборатории.

В  соответствии с заключением № 17-21 от  3.07.2017 г.  по ультразвуковому  контролю качества  сварных  соединений, контроль качества  сварных  швов ( камера запуска  СОД,  заводской номер 154 УКПН»Шешма»)  оборудование  признано  негодным.

Согласно  заключению  № 17-27/2  от 3 июля  2017 г. по ультразвуковому  контролю качества  сварных  соединений, контроль качества  сварных  швов ( камера запуска  СОД,  заводской номер 153 УКПН»Шешма»)  оборудование признанно  негодным.

После того,  как  истцом  с участием представителя  ответчика ( акт от  30.07.2017 г.  были  выявлены  недостатки  в  поставленном   оборудовании, истец  направил  ответчику   письмо № 1058/01-08  от 14.06.2017 г.,  в  котором  сообщил, что  сварные соединения  патрубка  с корпусом  признаны  негодными,  оборудование не   принято  и  подлежит возврату  поставщику  в  полном  объеме( 4 шт.  согласно  договору).

 В  письме № 8608 17-957  от 19.07.2017 г. ответчик уведомил  истца, что  для устранения  замечаний  АО «АК  «Озна»  направляет   в   ОООО  УК «Шешмайол»  специалистов  ФИО4,  ФИО5,  ФИО6,  ФИО7, ФИО8 , просил  обеспечить  доступ указанных  сотрудников  на  объекты  для  устранения  замечаний.

В  письме № 420/02-08  от 24.07.2017  г.  истец  сообщил   ответчику  что  в назначенную дату 25.07.2017 г. представителям  ответчика  будет  обеспечен  доступ по  адресу  и  месту    доставки  товара.

25.07.2017 г.  совместно  с  прибывшими  специалистами  АО «АК Озна»  было  повторно  осмотрено  изделие  № 1 12438-3-ТХ-ОЛ1, а  также  двух  ранее  не  исследованных и  не  осмотренных изделий с номерами  4 12438-2  ТХ.ОЛ4  и № 5 12438-2-ТХ.ОЛ5.

При осмотрен  изделий № 4 12438-2-ТХ ОЛ4 и №  5 12438-2-ТХ.ОЛ5  дополнительно  произведен  неразрушающий  контроль  сварных швов рентгенографическим  методом  с  привлечением  специализированной   организации ООО «Векторстрой».

  Результатами контроля были выявлены  следующие  дефекты:

 По факту  № ВК-17-27/5  от  25.07.2017 г. : участок  «А»  следы  механической  уборки  основного  металла  аппарата  размерами  200х  50  мм глубиной  до  50  мм, участок «В» подрез  сварного шва  глубиной  до  1  мм,  длинной  до  50  мм.,  участок «С» подрез сварного шва  до 1 мм., длинной  до 100  мм, недостаточное  заполнение  шва, участок «Д»  следы  механической  выборки  основного  металла   аппарата  размерами 50х15 мм, глубиной  до 1  см.,  по  акту № ВК-17-27/16  от 25.07.2017  г., участок  «А»  не полностью выполнена разделка кромок,  участок «В» усадочная  раковина.

  Помимо  выявленных  ООО «Векторстрой» дефектов, комиссией установлены и зафиксированы  следующие  недостатки: в изделие  № 4 12438-2-ТХ.ОЛ4,  отсутствует  шплинт корончатой  гайки  затвора  камеры, нарушение  лакокрасочного  покрытия,  раковины  длинной  до 5  мм,  механическая  выработка  на  площади  длинной  до 150 мм, глубиной  2,8  мм, лебедка  не укомплектована (в  разобранном  виде), в изделие  № 5 12438-2-ТХ.ОЛ5, отсутствует  шплинт  корончатой  гайки  камеры, нарушение  лакокрасочного  покрытия, раковины  длинной  до 5  мм, по  телу  изделия  на внутренней  части обнаружены  следы  коррозии  металла в виде  раковин  на участке  длинной до 300 мм,  лебедка  не укомплектована( в  разобранном  виде).

 Заключение   комиссии: выявленные нарушения  по  месту  осмотра  устранить  не  представляется  возможным, оборудование  привести  в  соответствии  с нормативными  требованиями.

В  письме №  8608  от  27.07.2017  г. адресованном  ООО  «УК «Шешмайол» ответчик просил согласовать устранение  несоответствий  по  месту нахождения  изделий,  приведение  в  соответствии  поверхностных  дефектов методом заварки( наплавки)  с выборкой  дефектного участка,  с  последующим  проведением  неразрушающего  контроля. Для  устранения  несоответствий  в угловых  сварных  соединений,  будут  направлены  аттестованный  сварщик  и аттестованный дефектоскопист  по неразрушающему  контролю, с  оборудованием  для  сварочных  работ  и  контролю.

  Истец  направил  в  адрес  ответчика  письмо  № 464/01-08  от 2.08.2017 г., в котором указал на  то, что поставленное  оборудование   не  может  быть  принято, так как  поставляемое  оборудование  предназначено  для  надземной  установки  на  магистральном  нефтепроводе  и  служит  для  периодического  приема  внутритрубных  снарядов, дефектоскопов, очистных  скребков, Данное  оборудование должно  соответствовать  требованиям  приказа  Ростехнадзора»  от 25.03.2014 г.  № 116 ,Об утверждении  Федеральных норм  и  правил  в  области  безопасности  «Правила  промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов,  на которых используется  оборудование,  работающее  под  избыточным  давлением», постановления Госгортехнадзора РФ  от  10.06.2003  г. №  81  «Об утверждении   Правил  проектирования,  изготовления  и  приемки   сосудов  и аппаратов  стальных   сварных» ( ПБ 03-584-03), ГОСТа  Р  52630-2012  «Сосуды  и аппараты стальные  сварные»При  наличии множественности  дефектов  сварных  швов и прочих недостатков  оборудования, допущенных  еще на  стадии  изготовления  в заводских  условиях ,следует   вывод  о невозможности  их устранения  в полевых условиях. С учетом указанных  обстоятельств истец заявил  об отказе  от  исполнения  договора,  просил  принять  меры  по вывозу  оборудования  в  течении  3-х дней  с даты  получения  уведомления.

 В  письме № 8608 17-994  от 18.08.2017 г.  ответчик  сообщил  истцу  о готовности вывоза  не принятой- поставленной  продукции, в срок 21.08-22.08.2017  г.Ответчик  приносит  свои  извинения  за  предоставленные неудобства и выражает надежду  на  понимание  в  сложившейся  ситуации

 Истец  направил в  адрес  ответчика  претензию  от 11.10.2017  г., в которой  предложил  в  добровольном  порядке произвести  оплату  причиненного  вреда.

 Оставление  претензии  без удовлетворения  послужило  основанием  для  обращения  истца  в  суд  с настоящим  иском.

  Истец предъявил  требование  о взыскании  договорной  неустойки  в  сумме 228  980  руб.  за  период  с  29.06.2017 г. (   дата фактической  поставки) по 10.08.2017  г.

 В  1.6 договора  стороны установили, что срок  изготовления  и поставки  товара  составит 120   рабочих дней с  даты  заключения  договора.

 Согласно  п. 6.6 договора  поставка  некачественного, некомплектного  товара  приравнивается  к просрочке  товара.

 В  соответствии с п. 6.1 договора  за нарушение  поставщиком  своих обязательств по  поставке  покупатель  вправе  начислить обязательную  к  уплате  неустойку  в  размере 0,1 %  от стоимости не поставленного в срок  товара.

  Пунктом 1 статьи 329 ГК РФ установлено, что исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой.

  Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

  В соответствии  с  контррасчетом  ответчика периодом  просрочки  является  19.07.2017  г. по 10.08.2017 г.

 Исследовав   расчет  истца  и контррасчет неустойки  суд установил  следующее.

 В  соответствии  с  п.  9.1  договора   настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания и действует   по 31.12.2017 г.,  а в  части  расчетов  до  полного  его  исполнения.

  Между  тем в листе  согласования, на  который  ссылается ответчик,  имеется  указание  на договор от 17.01.2017 г. № 0217-053с,  тогда как  предметом  иска  является  договор  поставки  № ШО/03н/16-12-19/ЗН  от  9.12.2016  г.

  В  этой  связи  суд  не  принимает  довод  ответчика  о неверном  расчета  истца  начального  периода  просрочки.

В соответствии с требованиями статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу положений ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

  В силу общих положений о купле-продаже, определенных в п. 1 ст. 469 Гражданского кодекса Российской Федерации, продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.

На основании п. 1 ст. 513 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

В ст. 518 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено право покупателя (получателя), которому поставлены товары ненадлежащего качества, предъявить поставщику требования, указанные в статье 475 данного Кодекса.

 Согласно абзацу четвертому п. 1 ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе потребовать от продавца возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

  На основании п. 2 ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору, либо отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Согласно п. 2 ст. 470 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 469 названного Кодекса, в течение определенного времени, установленного договором (гарантийного срока).

  В соответствии с пунктом 3 статьи 477 ГК РФ, если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

 Требование о ненадлежащем качестве изделий заявлено истцом в пределах гарантийного срока.

 При обнаружении недостатков товара в пределах срока гарантии п. 2 ст. 476 Гражданского кодекса Российской Федерации на продавца возложено бремя доказывания того, что недостатки товара возникли после передачи товара покупателю вследствие нарушения последним правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В п. 3.2 договора  стороны установили ,что гарантийный  срок на  поставляемый  товар составляет  12  месяцев  со  дня ввода в эксплуатацию, но не  более 36  месяцев  со  дня  поставки.

Истец  принял  меры  к уведомлению  ответчика  о выявленных  недостатках в  поставленном  товаре.

С участием   специалистов  ответчика  были    проведены  осмотры  поставленного  оборудования  и выявлены  недостатки, которые  зафиксированы  в  актах, представленных  в  материалы  дела.

Представленные  истцом  доказательства подтверждают ,что   поставленный  ответчиком  по вышеуказанному договору  товар  не  соответствовал  требованиям  по качеству, имел  существенные  недостатки.

   Из материалов дела не усматривается совершение истцом действий по препятствованию ответчику в исполнении обязательства по своевременному устранению недостатков поставленного некачественного товара.

  Ответчик  заявил на недоказанность  факта  поставки  товара  ненадлежащего  качества и на недоказанность наличие  существенных  недостатков  в  товаре.

 Ссылаясь на недоказанность факта поставки товара ненадлежащего качества, ответчик в обоснование своих доводов не заявил в письменном или устном виде о необходимости решения вопроса о назначении судебной экспертизы по вопросу наличия у поставленного товара существенных неустранимых недостатков.

  На  предложение  суда  согласия  на  назначение  по  делу  судебной  экспертизы   ответчик  не  дал.

  При этом, как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пунктах 5 и 6 своего Постановления от 20.12.2006 N 66 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", если экспертиза в силу Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могла быть назначена по ходатайству участвующих в деле лиц, однако такое ходатайство не поступило, оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания - риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Кодекса).

В нарушение статьи 476 ГК РФ, статья 65, 67, 68, 75 АПК РФ ответчик не представил достоверных и допустимых доказательств, свидетельствующих о том, что недостатки товара образовались после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товара (изделия) или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Согласно разъяснениям, изложенными в пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (часть 2 статьи 401 ГК РФ).

Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство.

Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное.

Между тем, вопреки требованиям, установленным в статье 65 АПК РФ, доказательств отсутствия вины в допущенном нарушении либо возмещения истцу расходов ответчиком в материалы дела не предоставлено.

Суд  установил, что  расчет   истца в  части неустойки  является  верным. Соответствует  условиям  договора.

Ответчик  заявил  о  применении  положений ст. 333 ГК  РФ.

Истец  в удовлетворении  ходатайства ответчика  о  применении  положений  статьи 333  ГК  РФ  просит  отказать.

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации). Соответствующие положения разъяснены в пункте 71 постановления № 7.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон.

В соответствии с пунктами 69, 73-78, 81 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.

Истец не представил доказательств причинения ему ущерба в размере, соразмерном с размером заявленной к взысканию неустойки.

Размер ответственности за просрочку выплаты страхового возмещения, установленный законом, явно несоразмерен размеру ответственности, установленной действующим законодательством за аналогичное правонарушение, сумма неустойки явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Учитывая изложенные обстоятельства и установленные фактические обстоятельства настоящего дела, арбитражный суд при явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства и представления ответчиком заявления о снижении размера неустойки, учитывая период просрочки, считает необходимым снизить размер неустойки до 100  000  руб. 

В остальной части  иска  о взыскании  неустойки арбитражный суд отказывает в  удовлетворении  требований.

Истец  заявил  требование  о  взыскании  убытков  сумме  318 440  руб.

Истец  заявленное  требование  мотивирует  тем, что  31.08.2017 г.  истец  взамен  расторгнутого  договора было вынуждено  заключить  договор  на  приобретение  аналогичного  оборудования  с  иным  поставщиком, поскольку  в настоящее  время  реализуется  один  из основных  этапов  строительства  объекта «Напорный  нефтепровод  от УКПН «Шешма»  до  ПСМ  «Шешма-Калейкино»  АО»Шешмайол».

Согласно  вновь заключенного  договора  поставки  с  ООО «ПрофИнжЛидер»  № ШО/ПЛ/17-08-ЗН  от 31.08.2017  г.  стоимость  поставляемого  оборудования  составила  4989040 руб., что  на 318 440  руб.  16 коп.  выше  чем  в  ранее  заключенном  договоре  поставки  № ШО/ОЗН/16-12-19/ЗН от 19.12.2016  г.  

Согласно п.п. 1, 2 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.

Пунктом 2 статьи 15 ГК РФ предусмотрено, что под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное.

Если лицо несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности (например, пункт 3 статьи 401, пункт 1 статьи 1079 ГК РФ).

Факт поставки ответчиком товара ненадлежащего качества подтвержден материалами дела и документально не опровергнут.

Согласно пункту 1 статьи 393.1 ГК РФ в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение должником договора повлекло его досрочное прекращение и кредитор заключил взамен его аналогичный договор, кредитор вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора.

Пунктом 3 указанной статьи предусмотрено, что удовлетворение требований, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не освобождает сторону, не исполнившую обязательства или ненадлежаще их исполнившую, от возмещения иных убытков, причиненных другой стороне.

Указанная выше норма корреспондирует положениями статьи 520 ГК РФ, согласно которым если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение (пункт 1).

Как следует из разъяснений, данных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" если кредитор заключил замещающую сделку взамен прекращенного договора, он вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям замещающей сделки (п.1 ст. 393.1 ГК РФ). Кредитором могут быть заключены несколько сделок, которые замещают расторгнутый договор, либо приобретены аналогичные товары или их заменители в той же или в иной местности и т.п.

  Учитывая отсутствие в материалах дела доказательств того, что, определяя цену товара в заменяющих сделках, истец действовал недобросовестно или неразумно, суд пришел к выводу о том, что требование о возмещении убытков, составляющих разницу между ценой, установленной в договоре поставки N ШО/ПЛ/17-08-ЗН  от 31.08.2017  г и ценой, установленной в замещающей сделки, в размере  318 440  руб.. является обоснованным.

Следует признать доказанной причинно-следственную связь между неправомерным поведением ответчика, выразившемся в нарушении обязательства по поставке товара, и наступившими у истца неблагоприятными последствиями, связанными с необходимостью заключения договоров поставки с иным поставщиком по более высоким ценам.

Доводы  ответчика о том, что убытки подлежат возмещению в части не покрытой неустойкой, судом  не приняты.

 Как установлено судом основанием взыскания неустойки является нарушение ответчиком сроков  поставки товара   по  договору, ответственность за которое предусмотрена пунктом 6.1  договора, то есть нарушение ответчиком обязанности по  поставке в установленный договором срок.

Вместе с тем основанием для удовлетворения требований  о  взыскании  убытков является нарушение ответчиком обязанности по поставке товара  соответствующего требованиям качества,( поставка  товара с существенными  недостатками)  что послужило основанием для  отказа  от  исполнения  договора  и заключения  замещающей  сделки  с  третьим  лицом.

 Исходя из смысла норм статьи 393 и 394 Гражданского кодекса Российской Федерации зачетный характер неустойки предполагается в отношении убытков, причиненных неисполнением того же обязательства (обязанности, установленной договором), за нарушение которого взыскана неустойка.

 При таких обстоятельствах, учитывая, что поставка  товара в предусмотренный договором срок и  поставка  товара надлежащего качества являются различными обязанностями  по  поставке, с разным видом ответственности, то оснований для применения статьи 394 Гражданского кодекса Российской Федерации у судов не имеется.

  Аналогичная  позиция  содержится  и в  постановление  Арбитражного суда  Восточно-Сибирского  округа  от 5 июля  2017 г.  № Ф02-2886/17  по  делу  А58-3341/2016, постановление  Семнадцатого  арбитражного  апелляционного  суда  от  19.09.2016 г.  № 17АП-8917/16.

  На  основании  изложенного, требование  о взыскании убытков  является  правомерным  и  подлежащим  удовлетворению.

  В соответствии  со  ст.  110 АПК  РФ  суд относит  госпошлину  по  иску на  ответчика.

 На основании изложенного, руководствуясь статьями  110,148,, 167 -170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан    

 

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с акционерному обществу "Акционерная компания ОЗНА", Республика Башкортостан, г.Октябрьский, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в пользу  акционерного общества "Шешмаойл", г.Альметьевск, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 100000 руб., убытки в размере 318440 руб., госпошлину по иску в сумме 13948 руб.

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд г. Самара в месячный срок.

 

Судья                                                                                                             Р.А. Камалиев