АРБИТРАЖНЫЙ СУД  

 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 26 февраля 2019 г. Дело № А49-14277/2018  

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи М.Н.Холькиной,  руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования муниципального казенного учреждения  «Управление капительного строительства г.Пензы» удовлетворить полностью,  расходы по оплате государственной пошлины отнести на ответчика.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Сурский квартал»,  в двухмесячный срок с момента вступления в законную силу настоящего  решения суда, устранить недостатки в выполненных работах в рамках  гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 2015.30410 на  строительство восьми многоквартирных домов («под ключ») от 28.01.2015 по  устранению недостатков по ремонту кровли:  

I. По жилому дому № 115 ул. Новоселов в объеме локального  сметного расчета № 02-01-01:  

1) Разборка покрытий из рулонных материалов в объеме 15.6508 м:;  2) Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1.0 м в объеме 4,7 мест;  

3) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из  унифлекса в объеме 15,6508 м/п;  

4) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам  венгшахт и выходов на кровлю высотой до 600 мм в объеме 6,7265 м/п;  

5) Разборка примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам  парапетов высотой более 600 мм в объеме 6,7265 м/п;  

6) Перевозка строительного мусора в объеме 24.506 тонн. 

II. По жилому лому № 111 ул. Новоселов в объеме локального  сметного расчета № 02-01-01:  

1) Разборка пароизоляции в объеме 6,508 м; 

2) Разборка утепления покрытий из пенополистерола в объеме 6,508 м2:  3) Разборка утеплений покрытий из легкого бетона в объеме 65.08 ч\  

4) Разборка стяжки в объеме 6.508 мг; 5) Разборка кровли в объеме 6,508 м"; 

6) Разборка примыканий кровель к парапетам в объеме 2.3116 м2;  

7) Устройство пароизоляции в объеме 6,508 м2; 8) Утепление кровли в объеме 6,508 м2; 9) Утепление покрытий легким без ином в объеме 65,08 M3; 10) Устройство стяжки в объеме 6,508 мг; 11) Армирование стяжки в объеме 1.302 тн.; 12) Огрунтовка основания в объеме 6.508 м2; 

13) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов в два слоя в  объеме 6.508 м2;  

14) Устройство примыканий кровель к парапетам в объеме 2.3116 м. 

III. По жилому лому № 112 ул. Новоселов в объеме локального  сметного расчета № 02-01-01:  

1) Разборка пароизоляции в объеме 17.7396 м2; 2) Разборка утепления покрытий из пенополистерола в объеме 17.7396 м; 

3) Разборка утеплений покрытий в объеме 244.92 м3;  4) Разборка кровли в объеме 17.7396 м2;  

5) Разборка примыканий кровель в объеме 6.9265 м.;  6) Устройство пароизоляции в объеме 1 7.7396 м2;  

7) Утепление покрытий в объеме 17,7396 м2; 8) Утепление покрытий легким бетоном 244.92 м3; 9) Огрунтовка основания в объеме 17.7396 м2; 10) Устройство кровель из наплавляемых материалов в объеме 17.7396 м2; 

11) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам  парапетов в объеме 6,9265 м/п.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сурский  квартал» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  6000 руб. 00 коп.  

Решение Арбитражного суда Пензенской области может быть  обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Одиннадцатый  арбитражный апелляционный суд путём подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Пензенской области.  

 Судья М.Н. Холькина