СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

город Томск                                                                                            Дело № А03-13345/2022

 

Резолютивная часть постановления объявлена 29 августа 2023 года

Постановление в полном объеме изготовлено 05 сентября 2023 года

 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего   Чикашовой О.Н.,

судей                                   Аюшева Д.Н.,

                                             ФИО1,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2 (до перерыва), помощником судьи Атрощенко Д.А. (после перерыва), рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу (№ 07АП-6134/2023) общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» на решение от 14.06.2023 Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-13345/2022 (судья Ли Э.Г.) по иску общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (194044, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский пр-кт, д. 60, литера а, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  к обществу с ограниченной ответственностью «ИФК «Русьэнерго» (656056, Россия, Алтайский край, город Барнаул г.о., Барнаул г., Барнаул г., Ленина пр-кт, д. 2а, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об урегулировании разногласий при заключении договора

 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО3 (паспорт, доверенность от 18.07.2022) (участие путем присоединения к веб-конференции) (до перерыва),

от ответчика –  ФИО4 (паспорт, доверенность № 5 от 09.01.2023) (участие путем присоединения к веб-конференции) (до перерыва) 

 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (далее - истец, ООО «Газпром газификация») обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ИФК «Русьэнерго» (далее - ответчик, ООО «ИФК «Русьэнерго») об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора купли-продажи будущей вещи от 13.07.2022 № 26/ДКП-05-182/2022. 

Исковое заявление мотивировано статьями 426, 445 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и обосновано несогласием с условиями договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации. 

Решением от 14.06.2023 Арбитражного суда Алтайского края в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что суд, отказывая во включении в договор банковской гарантии, не оценил соразмерность меры обеспечения обязательства с защищаемым интересом; суд неверно осуществил распределение судебных расходов на оплату государственной пошлины, поскольку требования истца были удовлетворены частично, путем определения иной, отличной от предлагаемой сторонами редакции условия.

В дополнениях к апелляционной жалобе истец указал, что суд первой инстанции вышел за пределы предмета спора, определив редакцию приложений к договору, спор по содержанию которых у сторон отсутствовал.

В отзыве ответчик отметил, что между ООО «Газпром газификация» и ООО «ИФК «Русьэнерго» заключен договор купли-продажи будущей вещи с оплатой по этапам, результатом которого является недвижимое имущество. Фактически такой договор уже имеет обеспечение в виде не оплаченной части, а также в виде результата такого договора – недвижимое имущество.

В возражениях на отзыв истец указал, что принцип свободы договора не применим в спорном случае; отсутствие количества передаваемых объектов, цены этих объектов опосредует исключение существенных условий в спорном договоре.

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы апелляционной жалобы и отзыва, соответственно.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в судебном заседании объявлялся перерыв до 11 час. 35 мин. 29.08.2023.

После перерыва судебное заседание продолжено без  участия представителей сторон.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и дополнений к ней, отзыва, письменных возражений, заслушав представителей сторон, проверив в порядке статьи 268 АПК РФ законность и обоснованность решения суда первой инстанции, апелляционный суд исходит из следующего.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 15.12.2021 № 3603-р ООО «Газпром газификация» определено единым оператором газификации (далее - ЕОГ).

ООО «ИФК «Русьэнерго» письмом от 27.01.2022 исх. № 67 направило в адрес ООО «Газпром газификация» договор купли-продажи будущей вещи № 26/ДКП-05-182/2022 от 13.07.2022 (далее - договор) с целью финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации.

Письмом от 15.07.2022 исх. № A3-08-09-04/8763 истцом в адрес ответчика направлен подписанный договор с протоколом разногласий от 13.07.2022 (далее - протокол разногласий).

27.07.2022 ответчиком направлен в адрес истца протокол урегулирования разногласий от 19.07.2022 года (далее - протокол урегулирования разногласий).

Стороны при заключении договора не смогли урегулировать возникшие разногласия.

Истец обратился с заявлением в арбитражный суд о внесении в договор следующих изменений:

1. предусмотреть способ обеспечения исполнения обязательств ответчика в виде банковской гарантии и изменить момент предоставления финансирования в виде предварительной оплаты (аванса) (пункты 2.4., 3.1.11., раздел 5 протокола разногласий);

2. установить договорную подсудность рассмотрения дел при возникновении разногласий между сторонами (пункт 9.4. протокола разногласий);

3. добавить к договору приложение, содержащее примерную форму банковской гарантии (пункт 10.1. ПР);

4. внести изменения в договор в связи с изменением порядка приложений и наличием технических опечаток;

5. установить нумерацию статей договора в соответствии с нумерацией статей протокола разногласий.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что такой вид обеспечения исполнения обязательства, как предоставление банковской гарантии, не может быть включен в условиях заключаемого между сторонами договора; правоотношения сторон не относятся к исключительной подсудности, в связи с чем стороны могли установить подсудность, предложенную ответчиком в договоре.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, находит основания для изменения судебного акта, при этом исходит из следующего.

В соответствии со статьей 412 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 446 ГК РФ в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 настоящего Кодекса (заключение договора в обязательном порядке) либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.

Как разъяснено в пункте 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» (далее - Постановление № 49), на рассмотрение суда могут быть переданы разногласия, возникшие в ходе заключения договора, при наличии обязанности заключить договор или соглашения сторон о передаче разногласий на рассмотрение суда. Такой спор подлежит рассмотрению в том же порядке, что и спор о понуждении к заключению договора (пункт 1 статьи 446 ГК РФ).

Поэтому, когда заинтересованная сторона передала разногласия на рассмотрение суда, а другая сторона не возразила против этого, а также в случаях, когда для одной из сторон спора его заключение является обязательным, суд в целях достижения задач судопроизводства в арбитражных судах, установленных статьей 2 АПК РФ, защиты обратившегося лица, внесения определенности в правоотношения сторон и установления условий, не урегулированных сторонами в досудебном порядке, рассматривает такое исковое заявление по существу.

Задача суда при разрешении преддоговорного спора заключается в создании между сторонами договорной связи, когда часть условий, о редакции которых стороны не могут договориться путем свободного согласования своих автономных воль, определяется властью суда на основании судебного понимания должного баланса интересов сторон через призму императивных и диспозитивных норм права, регулирующих спорные отношения.

Разрешение судом спора сторон при возникновении разногласий по конкретным условиям договора имеет своей целью внесение определенности в правоотношения сторон и установление условий договора в соответствии с требованиями действующего законодательства (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.01.2012 № 11657/11).

В силу пункта 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» (далее - Постановление № 16) в тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения пункта 2 статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента.

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом или иными правовыми актами (императивным нормам), действующими в момент его заключения (статьи 422 ГК РФ).

В соответствии с правовыми позициями, изложенными в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2015 № 305-ЭС15-513, от 21.12.2015 № 305-ЭС15-11564, от 03.10.2016 № 308-ЭС16-7310, от 26.12.2016 № 308-ЭС16-7314, при отсутствии соглашения сторон по содержанию условия договора и наличии диспозитивной нормы, регулирующей спорное отношение, таковое условие должно определяться судом в соответствии с общим правилом диспозитивной нормы, содержащим наиболее оптимальный баланс интересов сторон договора.

В пункте 40 Постановления № 49 разъяснено, что при наличии возражений стороны относительно определения условия договора диспозитивной нормой, выразившихся, например, в представлении иной редакции условия, суд может утвердить условие в редакции, отличной от диспозитивной нормы, указав мотивы принятия такого решения, в частности особые обстоятельства рассматриваемого спора (абзац второй пункта 4 статьи 421 ГК РФ).

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (далее - Правила № 1550) определен порядок взаимодействия ЕОГ и ГРО при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Так, согласно пунктам 10 и 11 Правил № 1550 финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, реализуемых ГРО, осуществляется ЕОГ или региональным оператором газификации путем заключения следующих видов договоров по выбору ГРО: договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по форме согласно приложению № 1 к названным Правилам; инвестиционного договора по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по форме согласно приложению № 2 к Правилам; иного гражданско-правового договора по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации.

ООО «ИФК «Русьэнерго» направило в адрес ООО «Газпром газификация» договор купли-продажи будущей вещи с целью финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации.

ЕОГ или региональный оператор газификации направляет подписанный со своей стороны договор в адрес газораспределительной организации не позднее 10 дней с даты получения договора.

При несогласии с условиями договора ЕОГ или региональный оператор газификации направляет в адрес ГРО протокол разногласий. ГРО направляет подписанный ею протокол разногласий ЕОГ или региональному оператору газификации не позднее 5 рабочих дней со дня получения протокола разногласий. В случае несогласия ГРО с протоколом разногласий ГРО, или ЕОГ, или региональный оператор газификации вправе обратиться в суд для урегулирования разногласий. При этом до принятия решения суда договор считается заключенным на условиях, выбранных ГРО.

В силу пункта 23 Правил № 1550 ЕОГ или региональный оператор газификации, профинансировавший по договору мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации, на условиях и в порядке, установленных гражданским законодательством, по согласованию с соответствующей ГРО вправе получить от ГРО: в собственность имущество, в том числе созданное с использованием финансовых средств единого оператора газификации или регионального оператора газификации; в собственность ценные бумаги, акции, паи, доли в уставном капитале ГРО; предоставленные финансовые средства в денежной форме, в том числе получив от газораспределительной организации средства от применения ею специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Указанные положения содержат диспозитивный перечень механизмов, обеспечивающих возмещение имущественной сферы ЕОГ, предоставившего финансирование, наряду с вытекающим из существа рассматриваемого способа механизмом возврата предоставленного финансирования.

Главой 23 ГК РФ установлены порядок и способы обеспечения исполнения обязательств, одним из которых является банковская гарантия.

Выдача банковской гарантии является абстрактной сделкой, не зависящей от основания (каузы), для которой не характерно присущее абсолютному большинству способов обеспечения обязательств свойство, именуемое акцессорностью объема.

Это значит, что кредитор в обеспечительном правоотношении (бенефициар) может истребовать исполнение у гаранта в объеме большем, чем мог бы получить от должника в основном (магистральном) правоотношении. При этом гарант не вправе выдвигать против бенефициара возражения относительно состоявшегося частичного или полного исполнения обязательства принципалом. Сказанное следует из смысла норм, содержащихся в пункте 1 статьи 368, пункте 1 статьи 370 ГК РФ.

Применение подобного обеспечения также возлагает на должника необходимость несения дополнительных расходов, связанных с получением банковской гарантии.

Предоставление банковской гарантии не предусмотрено положениями Правил № 1550, в связи с чем согласование такого условия сторонами настоящего спора подчинено общим правилам гражданского законодательства о заключении договора (статьи 1, 421, 422 ГК РФ).

Исследовав и оценив представленные в материалы судебного дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ в их совокупности и взаимосвязи, исходя из специфики сложившихся между сторонами правоотношений, обусловленных реализацией государственной программы догазификации с целью подключения к газоснабжению домовладений физических лиц, проверив представленные сторонами редакции спорных условий, учтя, что способы обеспечения исполнения обязательств в рамках догазификации, ограничены положениями Правил № 1550, приняв во внимание особенности спорного правоотношения, суд первой обосновано не усмотрел оснований для включения в договор условий о способе обеспечения исполнения обязательств ответчика в виде банковской гарантии.

Истец, не ссылаясь на наличие определенного стандарта поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, вступающего в спорные правоотношения, императивное закрепление спорного условия, по сути, просит о включении в договор условия об обеспечении исполнения договора ответчиком путем предоставления банковской гарантии, не учитывая его волеизъявление об обеспечении баланса интересов, в том числе иными способами: контролем за использованием предоставленных ЕОГ денежных средств с применением специального счета для целей расчетов по договору, а также предложения о передаче в собственность имущества, созданного с использованием финансовых средств ЕОГ.

Указанный правовой подход согласуется с выводами суда округа, изложенными в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.05.2023 по делу № А45-19695/2022.

Доводы заявителя в указанной части отклоняются как основанные на ошибочном понимании норм материального права, не учитывающем специфику сложившихся между сторонами правоотношений.

Относительно требования истца об установлении договорной подсудности рассмотрения дел при возникновении разногласий между сторонами.

Право на судебную защиту относится к основным, неотчуждаемым правам и свободам человека, в Российской Федерации оно признается и гарантируется согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, являющимся составной частью правовой системы Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации (часть 4 статьи 15 и части 1 и 2 статьи 17 Конституции РФ).

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 16.03.1998 № 9-П, право каждого на судебную защиту посредством независимого и беспристрастного суда, компетенция которого установлена законом, означает, в частности, что рассмотрение дел должно осуществляться законно установленным, а не произвольно выбранным составом суда. Соответственно, часть 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации гарантирует, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Согласно положениям главы 4 АПК РФ подсудность дел арбитражным судам подразделяется на родовую (статья 34 АПК РФ), территориальную общую (статья 35 АПК РФ), альтернативную (статья 36 АПК РФ), договорную (статья 37 АПК РФ) и исключительную (статья 38 АПК РФ).

По общему правилу, установленному статьей 35 АПК РФ, иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика.

Согласно статье 37 АПК РФ подсудность, установленная статьями 35, 36 настоящего Кодекса, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству.

Помимо альтернативной подсудности, то есть подачи искового заявления в арбитражный суд по выбору истца, для определенной категории дел статьей 38 АПК РФ установлена исключительная подсудность рассмотрения споров, при которой исключается возможность применять иные правила подсудности, чем те, которые установлены указанной статьей.

Рассматриваемые правоотношения сторон не относятся к исключительной подсудности, в связи с чем на основании вышеуказанных норм арбитражного процессуального законодательства стороны могли установить подсудность, предложенную ответчиком в договоре.

Учитывая указанные законоположения, суд первой инстанции верно указал, что, определяя договорную подсудность, истец фактически ограничивает право стороны на выбор суда при обращении с иском, в частности, иск по общему правилу может быть предъявлен в суд и по месту нахождения ответчика, что опосредовало обоснованное изменение формулировки пункта 8.4 спорного договора.

Довод истца о неверном распределении расходов по государственной пошлине подлежит отклонению.

В данном случае государственная пошлина правомерно была отнесена судом на истца по правилам статьи 110 АПК РФ, поскольку истец просил суд первой инстанции изложить пункт 8.4 договора в редакции изначально предложенной ООО «Газпром газификация» в самом договоре, без каких либо изменений. Однако данное условие судом первой инстанции было изложено в иной редакции.

Доводы истца о выходе суда за пределы требований при урегулировании разногласий, судом апелляционной инстанции отклоняются, поскольку согласно восьмому и последнему требованию ООО «Газпром газификация», указанному в исковом заявлении (с учетом опечатки по нумерации требований) истец просит добавить приложения № 1-9 к договору и изложить в предложенной редакции. То есть, исходя из буквально токования требований, истец просит не просто об изменении нумерации, а об изменении всех приложений договора, независимо о наличии спора по ним. 

Вместе с тем, судом первой инстанции не учтено следующее.

По смыслу статей 554, 555 ГК РФ существенными условиями договора купли-продажи недвижимого имущества являются предмет договора, который должен быть надлежащим образом индивидуализирован, содержать данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, а также цена отчуждаемой недвижимости.

Если сторонами заключен договор купли-продажи будущей недвижимой вещи, индивидуализация предмета договора может быть осуществлена путем указания иных сведений, позволяющих установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору (например, местонахождение возводимой недвижимости, ориентировочная площадь будущего здания или помещения, иные характеристики, свойства недвижимости, определенные, в частности, в соответствии с проектной документацией) (абзац 2 пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54).

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 42 Постановления № 49, при принятии решения об обязании заключить договор или об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает условия договора, который считается заключенным на этих условиях с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ); при этом дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется.

Из содержания пункта 4 статьи 445 ГК РФ и приведенных разъяснений следует, что договор считается заключенным между сторонами на условиях, содержащихся в решении суда. При этом в решении должны быть указаны существенные условия договора (условия, которые позволяют считать договор заключенным и о необходимости согласования которых заявит одна из сторон), в остальном содержание прав и обязанностей сторон регулируется императивными нормами законодательства и восполняется диспозитивными нормами законодательства, если правило иное, чем определено в диспозитивной норме, прямо не указано в решении суда (пункт 4 статьи 421, пункт 1 статьи 422 ГК РФ).

Данные выводы соответствуют правовой позиции, сформулированной в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 29.08.2019 № 307-ЭС19-3613 и от 25.05.2020 № 309-ЭС19-10274.

Иными словами, задача суда при разрешении преддоговорного спора заключается в создании между сторонами договорной связи, когда часть условий, о редакции которых стороны не могут договориться путем свободного согласования своих автономных воль, определяется властью суда на основании судебного понимания должного баланса интересов сторон через призму императивных и диспозитивных норм права, регулирующих спорные отношения.

Поэтому суд обязан внести полную ясность в правоотношение путем изложения в решении суда условий договора, аргументировав свои выводы о формулировании дискуссионной части условий в определенной судом редакции.

 

Учитывая выше изложенные законоположения и разъяснения высшей судебной инстанции, несмотря на то, что спор между сторонами относительно содержания приложений № 1 и № 2 отсутствует, суд первой инстанции, включив в резолютивную часть указанные приложения без содержания (с пустыми графами), по существу, внес неопределенность между сторонами относительно условий договора.

В рассматриваемом случае резолютивная часть оспариваемого решения суда первой инстанции не содержит условий соглашения, на которых оно должно считаться заключенным по итогам рассмотрения преддоговорного спора, а именно: в приложении № 1 к договору судом не указаны: наименование объекта, код объекта, статус включения в план-график догазификации, срок начала догазификации (месяц год), срок окончания догазификации (месяц год), плановые физические параметры объекта (протяженность), метров, плановый объем затрат  на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации, руб. без НДС, плановая стоимость объекта, руб. с НДС, планируемый объём освоения капитальных вложений, руб., ввод в состав основных фондов, дата передачи объекта в собственность покупателя, эксплуатирующая организация, а также в приложении № 2 к договору судом не указаны: код объекта, наименование объекта (недвижимого имущества), плановая стоимость объекта с НДС руб., срок платежа, сумма предварительной оплаты (аванса, не более 50% от плановой стоимости по каждому объекту), окончательная стоимость объекта с НДС руб., сумма оплаты окончательной цены объекта (аванса, не более 90% от окончательной стоимости по каждому объекту), сумма возврата.

То есть резолютивная часть оспариваемого решения суда первой инстанции не содержит условий соглашения, на которых оно должно считаться заключенным по итогам рассмотрения преддоговорного спора.

Как указано в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2015, решение суда признается законным и обоснованным тогда, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, а имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а также тогда, когда в решении суда содержатся исчерпывающие выводы, вытекающие из установленных судом фактов.

Принцип законности судебного решения, включающий в себя в широком смысле законность, обоснованность, мотивированность, окончательность судебного акта, является основополагающим принципом российского права, поскольку только таким судебным актом устанавливается правовая определенность спорных отношений и определяются взаимные права и обязанности их участников (определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2015 № 305-ЭС14-2110).

Допущенные судом первой инстанции нарушения подлежат устранению судом апелляционной инстанции.

Учитывая вышеизложенное, апелляционный суд при повторном рассмотрении дела усматривает основания для изменения решения суда первой инстанции, предусмотренные подпунктом 4 пункта 1 статьи 270 АПК РФ, как принятого при неправильном применении норм материального права.

В связи с отказом в удовлетворении исковых требованиях расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя (статья 110 АПК РФ).

Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пп. 4 пункта 1  статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции

П О С Т А Н О В И Л:

Решение от 14 июня 2023 года Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-13345/2022 изменить в части внесения изменений в приложения № 1, № 2 к договору купли-продажи будущей вещи № 26 от 25.01.2022, изложив указанные приложения в следующей редакции:

 

Приложение №1к договору купли-продажи будущей вещи №26/ДКП-05-182/2022от 13.07.2022 года

 

Перечень недвижимого имущества (объектов), создаваемого за счет средств оператора газификации

 

№

Наименование субъекта

Населенный пункт

Наименование объекта

Код объекта*

Статус включения в план-график догазификации **

Срок начала догазификации (месяц год)

Срок окончания догазификации      (месяц год)

Плановые физические параметры объекта (протяженность), метров

Плановый объем затрат  на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации, руб. без НДС 

Плановая стоимость объекта, руб.  с НДС

Планируемый объём освоения капитальных вложений, руб.

Ввод в состав основных фондов

Дата передачи объекта в собственность покупателя

Эксплуатирующая организация

 

Плановая стоимость объекта, в т.ч.

Проектно-изыскательские работы

Строительно-монтажные работы

Прочие капитальные затраты

без НДС

1 кв. 2022

2 кв. 2022

3 кв. 2022

4 кв. 2022

…

Итого

. руб. 

НДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Алтайский край

п Центральный

ул. Тополиная, 45

22-2021-289-1

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

2

Алтайский край

п Центральный

пер.Звездный,31

22-2021-289-2

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

3

Алтайский край

г. Барнаул

ул. 8 Марта, д. 13-1

22-2021-289-3

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

4

Алтайский край

с Власиха

ул. Сибирская, 11

22-2021-289-4

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

5

Алтайский край

г. Барнаул

6-Инициативный  пр-д, 11

22-2021-289-5

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

6

Алтайский край

п. Черницк

ул. Школьная, д. 27

22-2021-289-6

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

7

Алтайский край

г. Барнаул

6-Инициативный  пр-д, 5Г

22-2021-289-7

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

8

Алтайский край

п Бельмесево

Валдайская ул.,33

22-2021-289-8

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

9

Алтайский край

г. Барнаул

Павловский Тракт,151В

22-2021-289-9

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

10

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Казакова, д. 33, кв. 1

22-2021-289-10

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

11

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Фурманова, д. 163

22-2021-289-11

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

12

Алтайский край

г. Барнаул

Тюменская ул.,32

22-2021-289-12

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

13

Алтайский край

г. Барнаул

проспект Сибирский, 28

22-2021-289-13

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

14

Алтайский край

п Центральный

Промышленная 

<

...>

22-2021-289-14

ПГД

Апрель 2022

Декабрь 2022

150

605 000,00

30 000,00

516 000,00

59 000,00

605 000,00

0,00

302 500,00

0,00

302 500,00

605 000,00

605 000,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

15

Алтайский край

г. Барнаул

Связной  пр-д,2А

22-2021-289-15

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

16

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Воровского, 155

22-2021-289-16

ПГД

Апрель 2022

Декабрь 2022

50

241 000,00

10 000,00

172 000,00

59 000,00

241 000,00

0,00

120 500,00

0,00

120 500,00

241 000,00

241 000,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

17

Алтайский край

г. Барнаул

пр-д 5-Инициативный,  8

22-2021-289-17

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

18

Алтайский край

п Центральный

ул. Проектная, 99

22-2021-289-18

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

19

Алтайский край

с Власиха

пер.Крылатый,7

22-2021-289-19

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

20

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Короленко, 202

22-2021-289-20

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

21

Алтайский край

г. Барнаул

Черницк п.,Школьная ул.,42

22-2021-289-21

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

22

Алтайский край

г. Барнаул

Красносельская ул.,122

22-2021-289-22

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

23

Алтайский край

п Центральный

ул. Советская, 4б

22-2021-289-23

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

24

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Пограничная, 19г

22-2021-289-24

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

25

Алтайский край

п Бельмесево

ул. Днепровская, 45

22-2021-289-25

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

26

Алтайский край

п Бельмесево

ул. Валдайская, 42

22-2021-289-26

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

5

69 200,00

1 000,00

17 200,00

51 000,00

69 200,00

0,00

34 600,00

0,00

34 600,00

69 200,00

69 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

27

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Аэродромная, 24-2

22-2021-289-27

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

28

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Казакова, 8

22-2021-289-28

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

29

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Никитина, 19

22-2021-289-29

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

30

Алтайский край

с Власиха

ул. Берестовая,2

22-2021-289-30

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

31

Алтайский край

с Власиха

ул. Пролетарская, 19

22-2021-289-31

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

32

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Цаплина, 9

22-2021-289-32

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

33

Алтайский край

г. Барнаул

Кирсараевская ул.,129

22-2021-289-33

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

34

Алтайский край

г. Барнаул

5-Инициативный  пр-д, 7

22-2021-289-34

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

35

Алтайский край

г. Барнаул

6-Инициативный  пр-д, 2Б

22-2021-289-35

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

36

Алтайский край

с Власиха

ул. Сибирская, 43А

22-2021-289-36

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

37

Алтайский край

п Лесной

Лесной п.,9-й пер.,2

22-2021-289-37

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

38

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Лениногорская, 28

22-2021-289-38

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

39

Алтайский край

п Лесной

Лесной п.,Тенистая ул.,174

22-2021-289-39

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

40

Алтайский край

п Бельмесево

ул. Белгородская,61

22-2021-289-40

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

41

Алтайский край

п Бельмесево

Валдайская ул.,11

22-2021-289-41

ПГД

Апрель 2022

Декабрь 2022

280

1 078 200,00

56 000,00

963 200,00

59 000,00

1 078 200,00

0,00

539 100,00

0,00

539 100,00

1 078 200,00

1 078 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

42

Алтайский край

г. Барнаул

Ким ул.,36А

22-2021-289-42

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

43

Алтайский край

г. Барнаул

пр-кт Коммунаров, 155А

22-2021-289-43

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

44

Алтайский край

г. Барнаул

проезд Инициативный 5-й,4А

22-2021-289-44

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

45

Алтайский край

г. Барнаул

проезд Инициативный 5-й,4

22-2021-289-45

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

46

Алтайский край

г. Барнаул

6-Инициативный  пр-д, 5А

22-2021-289-46

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

47

Алтайский край

г. Барнаул

проезд Инициативный 6-й,38

22-2021-289-47

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

48

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Воровского,92

22-2021-289-48

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

49

Алтайский край

г. Барнаул

Черницк п.,Пионерская ул.,6г

22-2021-289-49

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

50

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Никитина, 13а

22-2021-289-50

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

5

69 200,00

1 000,00

17 200,00

51 000,00

69 200,00

0,00

34 600,00

0,00

34 600,00

69 200,00

69 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

51

Алтайский край

г. Барнаул

Кошевого ул.,10

22-2021-289-51

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

52

Алтайский край

г. Барнаул

пер. Короткий, 5-1

22-2021-289-52

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

53

Алтайский край

г. Барнаул

Крупской 

<

...>

22-2021-289-53

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

54

Алтайский край

г. Барнаул

пр-д Магнитный, 78

22-2021-289-54

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

55

Алтайский край

г. Барнаул

Черницк п.Центральная ул.,1

22-2021-289-55

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

56

Алтайский край

с Власиха

ул. Ракитная, 4а

22-2021-289-56

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

57

Алтайский край

г. Барнаул

проспект Сибирский, 26-1

22-2021-289-57

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

58

Алтайский край

п Бельмесево

Валдайская ул.,7

22-2021-289-58

ПГД

Апрель 2022

Декабрь 2022

280

1 078 200,00

56 000,00

963 200,00

59 000,00

1 078 200,00

0,00

539 100,00

0,00

539 100,00

1 078 200,00

1 078 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

59

Алтайский край

п Центральный

ул. Вологодская,24

22-2021-289-59

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

60

Алтайский край

п Центральный

ул. Николаевская, 5

22-2021-289-60

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

61

Алтайский край

п Центральный

ул. Николаевская, 32

22-2021-289-61

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

62

Алтайский край

п Лесной

Лесной п.,7-й пер.,14

22-2021-289-62

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

63

Алтайский край

г. Барнаул

Черницк п.,Школьная ул.,26

22-2021-289-63

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

64

Алтайский край

с Власиха

ул. Сибирская, 43

22-2021-289-64

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

65

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Сизова,, 7

22-2021-289-65

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

66

Алтайский край

г. Барнаул

Амурский 1-й, д. 54

22-2021-289-66

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

67

Алтайский край

г. Барнаул

пр-д Фурманова, 84

22-2021-289-67

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

68

Алтайский край

п Центральный

Сахалинская ул.,14

22-2021-289-68

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

69

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Лениногорская, 58А

22-2021-289-69

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

70

Алтайский край

п Бельмесево

ул. Днепровская, 48

22-2021-289-70

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

71

Алтайский край

п Центральный

ул. Николаевская, 27

22-2021-289-71

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

72

Алтайский край

г. Барнаул

Черницк п.Центральная ул.,1В

22-2021-289-72

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

73

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Рельсовая, 24

22-2021-289-73

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

74

Алтайский край

г. Барнаул

Смольная ул.,11А

22-2021-289-74

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

75

Алтайский край

п Лесной

Лесной п., 10-й пер.,12

22-2021-289-75

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

76

Алтайский край

г. Барнаул

Черницк п.,Набережная ул.,31А

22-2021-289-76

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

77

Алтайский край

п Бельмесево

ул. Кубанская, 31

22-2021-289-77

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

78

Алтайский край

п Центральный

пер.Звездный, 34

22-2021-289-78

ПГД

Апрель 2022

Декабрь 2022

200

787 000,00

40 000,00

688 000,00

59 000,00

787 000,00

0,00

393 500,00

0,00

393 500,00

787 000,00

787 000,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

79

Алтайский край

г. Барнаул

Магнитный  пр-д,46

22-2021-289-79

ПГД

Апрель 2022

Декабрь 2022

300

1 151 000,00

60 000,00

1 032 000,00

59 000,00

1 151 000,00

0,00

575 500,00

0,00

575 500,00

1 151 000,00

1 151 000,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

80

Алтайский край

п Центральный

Промышленная 

<

...>

22-2021-289-80

ПГД

Апрель 2022

Декабрь 2022

150

605 000,00

30 000,00

516 000,00

59 000,00

605 000,00

0,00

302 500,00

0,00

302 500,00

605 000,00

605 000,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

81

Алтайский край

п Центральный

ул. Янтарная, 100

22-2021-289-81

ПГД

Апрель 2022

Декабрь 2022

250

969 000,00

50 000,00

860 000,00

59 000,00

969 000,00

0,00

484 500,00

0,00

484 500,00

969 000,00

969 000,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

82

Алтайский край

п Центральный

Промышленная 

<

...>

22-2021-289-82

ПГД

Апрель 2022

Декабрь 2022

150

605 000,00

30 000,00

516 000,00

59 000,00

605 000,00

0,00

302 500,00

0,00

302 500,00

605 000,00

605 000,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

83

Алтайский край

п Центральный

Промышленная ул.,34

22-2021-289-83

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

84

Алтайский край

п Лесной

Лесной п.,8-й пер.,24

22-2021-289-84

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

85

Алтайский край

п Центральный

ул. Проектная, 74

22-2021-289-85

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

86

Алтайский край

п Центральный

ул. Свердловская, 13

22-2021-289-86

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

87

Алтайский край

п Центральный

ул. Ростовская, 23

22-2021-289-87

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

88

Алтайский край

п Бельмесево

ул. Дунайская, 50

22-2021-289-88

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

89

Алтайский край

п Центральный

ул. Ростовская, 19А

22-2021-289-89

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

90

Алтайский край

п Лесной

Лесной п., 1-й пер.,4

22-2021-289-90

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

91

Алтайский край

п Центральный

ул. Тибетская, 10

22-2021-289-91

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

92

Алтайский край

п Бельмесево

ул. Днепровская, 65

22-2021-289-92

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

93

Алтайский край

г. Барнаул

пр-д Лучевой, д. 15

22-2021-289-93

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

94

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Фурманова, д. 135

22-2021-289-94

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

95

Алтайский край

г. Барнаул

Громовой У. ул.,8

22-2021-289-95

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

96

Алтайский край

п Бельмесево

ул. Житомирская, 54

22-2021-289-96

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

97

Алтайский край

п Лесной

Лесной п.,Магистральная ул.,67

22-2021-289-97

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

98

Алтайский край

г. Барнаул

ул. Воровского, 35

22-2021-289-98

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

99

Алтайский край

г. Барнаул

пр-кт Коммунаров, 111

22-2021-289-99

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

100

Алтайский край

с Власиха

ул. Юбилейная, 60А

22-2021-289-100

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

101

Алтайский край

п Лесной

Лесной п., 1-й пер.,68

22-2021-289-101

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

102

Алтайский край

п Центральный

ул. Ростовская, 21А

22-2021-289-102

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

103

Алтайский край

п Бельмесево

ул. Дунайская, 43

22-2021-289-103

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

104

Алтайский край

п Бельмесево

ул. Морская, 12

22-2021-289-104

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

105

Алтайский край

с Власиха

ул. Мамонтова, 131

22-2021-289-105

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

106

Алтайский край

п Бельмесево

Валдайская ул.,32

22-2021-289-106

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

107

Алтайский край

п Центральный

Звездный пер.,25

22-2021-289-107

ПГД

Апрель 2022

Декабрь 2022

200

787 000,00

40 000,00

688 000,00

59 000,00

787 000,00

0,00

393 500,00

0,00

393 500,00

787 000,00

787 000,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

108

Алтайский край

г. Барнаул

Коммунаров пр-кт,12

22-2021-289-108

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

109

Первомайский р-н

с Бобровка

мкр. Светлый,70

22-2021-289-109

ПГД

Апрель 2022

Декабрь 2022

80

350 200,00

16 000,00

275 200,00

59 000,00

350 200,00

0,00

175 100,00

0,00

175 100,00

350 200,00

350 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

110

Первомайский р-н

с Бобровка

мкр. Светлый,43

22-2021-289-110

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

111

Первомайский р-н

с Бобровка

мкр. Светлый,57

22-2021-289-111

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

112

Первомайский р-н

с Санниково

ул. Дачная, 15

22-2021-289-112

ПГД

Март 2022

Декабрь 2022

30

160 200,00

6 000,00

103 200,00

51 000,00

160 200,00

0,00

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

160 200,00

0,00

Август 2023

ООО «ИФК «РусьЭнерго»

Всего

24 254 800,00

1 014 000,00

17 440 800,00

5 800 000,00

24 254 800,00

0,00

12 127 400,00

0,00

12 127 400,00

24 254 800,00

24 254 800,00

0,00

  

  

Приложение №2к договору купли-продажи будущей вещи 

№26/ДКП-05-182/2022от 13.07.2022 года

График платежей

Код объекта

Наименование объекта (недвижимого имущества)

Плановая стоимость объекта с НДС, руб.

Срок платежа

Сумма предварительной оплаты (аванса, не более 50% от плановой стоимости по каждому объекту)

Окончательная стоимость объекта с НДС, руб.

Сумма оплаты окончательной цены объекта (аванса, не более 90% от окончательной стоимости по каждому объекту)

Сумма возврата**

(в формате дата, месяц, год)

Сумма (без НДС), руб.

Сумма НДС, руб.

Сумма платежа (в т.ч. НДС), руб.*

Сумма (без НДС), руб.

Сумма НДС, руб.

Сумма платежа (в т.ч. НДС), руб.*

22-2021-289-1

ул. Тополиная, 45

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-2

пер.Звездный,31

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-3

ул. 8 Марта, д. 13-1

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-4

ул. Сибирская, 11

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-5

6-Инициативный  пр-д, 11

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-6

ул. Школьная, д. 27 

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-7

6-Инициативный  пр-д, 5Г

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-8

Валдайская ул.,33

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-9

Павловский Тракт,151В

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-10

ул. Казакова, д. 33, кв. 1

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-11

ул. Фурманова, д. 163

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-12

Тюменская ул.,32

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-13

проспект Сибирский, 28

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-14

Промышленная 

<

...>

605 000,00

10.07.22

302 500,00

0,00

302 500,00

605 000,00

242000

0

242000

 

22-2021-289-15

Связной  пр-д,2А

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-16

ул. Воровского, 155

241 000,00

10.07.22

120 500,00

0,00

120 500,00

241 000,00

96400

0

96400

 

22-2021-289-17

пр-д 5-Инициативный,  8

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-18

ул. Проектная, 99

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-19

пер.Крылатый,7

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-20

ул. Короленко, 202

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-21

Черницк п.,Школьная ул.,42

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-22

Красносельская ул.,122

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-23

ул. Советская, 4б

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-24

ул. Пограничная, 19г

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-25

ул. Днепровская, 45

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-26

ул. Валдайская, 42

69 200,00

10.07.22

34 600,00

0,00

34 600,00

69 200,00

27680

0

27680

 

22-2021-289-27

ул. Аэродромная, 24-2

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-28

ул. Казакова, 8

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-29

ул. Никитина, 19

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-30

ул. Берестовая,2

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-31

ул. Пролетарская, 19

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-32

ул. Цаплина, 9

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-33

Кирсараевская ул.,129

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-34

5-Инициативный  пр-д, 7

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-35

6-Инициативный  пр-д, 2Б

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-36

ул. Сибирская, 43А

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-37

Лесной п.,9-й пер.,2

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-38

ул. Лениногорская, 28

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-39

Лесной п.,Тенистая ул.,174

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-40

ул. Белгородская,61

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-41

Валдайская ул.,11

1 078 200,00

10.07.22

539 100,00

0,00

539 100,00

1 078 200,00

431280

0

431280

 

22-2021-289-42

Ким ул.,36А

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-43

пр-кт Коммунаров, 155А

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-44

проезд Инициативный 5-й,4А

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-45

проезд Инициативный 5-й,4

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-46

6-Инициативный  пр-д, 5А

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-47

проезд Инициативный 6-й,38

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-48

 ул. Воровского,92

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-49

Черницк п.,Пионерская ул.,6г

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-50

ул. Никитина, 13а

69 200,00

10.07.22

34 600,00

0,00

34 600,00

69 200,00

27680

0

27680

 

22-2021-289-51

Кошевого ул.,10

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-52

пер. Короткий, 5-1

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-53

Крупской 

<

...>

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-54

пр-д Магнитный, 78

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-55

Черницк п.Центральная ул.,1

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-56

ул. Ракитная, 4а

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-57

проспект Сибирский, 26-1

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-58

Валдайская ул.,7

1 078 200,00

10.07.22

539 100,00

0,00

539 100,00

1 078 200,00

431280

0

431280

 

22-2021-289-59

ул. Вологодская,24

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-60

ул. Николаевская, 5

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-61

ул. Николаевская, 32

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-62

Лесной п.,7-й пер.,14

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-63

Черницк п.,Школьная ул.,26

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-64

ул. Сибирская, 43

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-65

ул. Сизова,, 7

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-66

Амурский 1-й, д. 54

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-67

пр-д Фурманова, 84

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-68

Сахалинская ул.,14

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-69

ул. Лениногорская, 58А

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-70

ул. Днепровская, 48

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-71

ул. Николаевская, 27

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-72

Черницк п.Центральная ул.,1В

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-73

ул. Рельсовая, 24

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-74

Смольная ул.,11А

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-75

Лесной п., 10-й пер.,12

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-76

Черницк п.,Набережная ул.,31А

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-77

ул. Кубанская, 31

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-78

пер.Звездный, 34

787 000,00

10.07.22

393 500,00

0,00

393 500,00

787 000,00

314800

0

314800

 

22-2021-289-79

Магнитный  пр-д,46

1 151 000,00

10.07.22

575 500,00

0,00

575 500,00

1 151 000,00

460400

0

460400

 

22-2021-289-80

Промышленная 

<

...>

605 000,00

10.07.22

302 500,00

0,00

302 500,00

605 000,00

242000

0

242000

 

22-2021-289-81

ул. Янтарная, 100

969 000,00

10.07.22

484 500,00

0,00

484 500,00

969 000,00

387600

0

387600

 

22-2021-289-82

Промышленная 

<

...>

605 000,00

10.07.22

302 500,00

0,00

302 500,00

605 000,00

242000

0

242000

 

22-2021-289-83

Промышленная ул.,34

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-84

Лесной п.,8-й пер.,24

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-85

ул. Проектная, 74

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-86

ул. Свердловская, 13

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-87

ул. Ростовская, 23

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-88

ул. Дунайская, 50

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-89

ул. Ростовская, 19А

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-90

Лесной п., 1-й пер.,4

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-91

ул. Тибетская, 10

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-92

ул. Днепровская, 65

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-93

пр-д Лучевой, д. 15

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-94

ул. Фурманова, д. 135

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-95

Громовой У. ул.,8

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-96

ул. Житомирская, 54

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-97

Лесной п.,Магистральная ул.,67

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-98

ул. Воровского, 35

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-99

пр-кт Коммунаров, 111

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-100

ул. Юбилейная, 60А

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-101

Лесной п., 1-й пер.,68

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-102

ул. Ростовская, 21А

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-103

ул. Дунайская, 43

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-104

ул. Морская, 12

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-105

ул. Мамонтова, 131

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-106

Валдайская ул.,32

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-107

Звездный пер.,25

787 000,00

10.07.22

393 500,00

0,00

393 500,00

787 000,00

314800

0

314800

 

22-2021-289-108

Коммунаров пр-кт,12

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-109

мкр. Светлый,70

350 200,00

10.07.22

175 100,00

0,00

175 100,00

350 200,00

140080

0

140080

 

22-2021-289-110

мкр. Светлый,43

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-111

мкр. Светлый,57

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

22-2021-289-112

ул. Дачная, 15

160 200,00

10.07.22

80 100,00

0,00

80 100,00

160 200,00

64080

0

64080

 

 

Итого

12 127 400,00

 

12 127 400,00

24 254 800,00

9 701 920,00

0,00

9 701 920,00

 

 

 

 

            В остальном решение от 14 июня 2023 года Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-13345/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) – без удовлетворения.

            Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края.

                  

 

                 Председательствующий                                                                        О.Н. Чикашова

 

                 Судьи                                                                                                       Д.Н. Аюшев

 

                                                                                                                                   ФИО1