_________________________________________________________________________  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А32-16581/2022

г. Краснодар

08 сентября 2022 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи И.Н. Бондаренко,  руководствуясь статьями 64-71, 110, 156, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Признать недействительными (ничтожными) заключенные между  Муниципальным казенным учреждением муниципального образования Кореновский  район «Управление капитального строительства» и ООО «Тракт-Строй Юг»  дополнительные соглашения от 30.12.2020 № 3, от 31.03.2021 № 4, от 30.04.2021 № 5 о  продлении срока выполнения работ до 01.07.2021 к муниципальным контрактам от  13.11.2020 № 2020.ЭА-0818500000820005092 и от 11.12.2020 № 2020.ЭА- 0818500000820006097 на выполнение работ, оставшихся невыполненными в связи с  расторжением ранее заключенного контракта по строительству объекта: «Дошкольное  образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне № 10 г. Кореновска».  

 Взыскать с ООО "ТРАКТ-СТРОЙ ЮГ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  госпошлину в размере 3 000 руб. в доход федерального бюджета.  

 Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Пятнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.  

Судья И.Н. Бондаренко