АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-10100/2021

г. Чебоксары

08 июня 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 июня 2022 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бондаревой Д.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "СМК Альянс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 300041, 

<

...>

к обществу с ограниченной ответственностью "Союзстройинвест" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 428003, 

<

...>

о взыскании 694745 руб. 53 коп.

и встречному иску о взыскании 235098 руб. 83 коп.,

в отсутствие представителей сторон,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "СМК Альянс" обратилось в суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ (т.1 л.д. 52), к обществу с ограниченной ответственностью "Союзстройинвест" о взыскании 694745 руб. 53 коп., в том числе 681011 руб. 38 коп. долга, 13734 руб. 15 коп. неустойки за период с 23.08.2021 по 01.11.2021.

Иск мотивирован ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате работ по изготовлению и монтажу алюминиевых конструкций объекта: "Строительство школы на 600 мест в мкр. "Времена года – 2", в т.ч. ПИР" по адресу: Тульская область, г. Тула, в рамках договора подряда №18/06-2021 от 18.06.2021.

Определением суда от 06.05.2022 принято к рассмотрению встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Союзстройинвест" к обществу с ограниченной ответственностью "СМК Альянс" о взыскании 235098 руб. 83 коп. неустойки за период с 10.08.2021 по 04.05.2022 за нарушение сроков передачи исполнительной документации по договору подряда №18/06-2021 от 18.06.2021.

Стороны представителей в заседание не направили.

В отзыве на встречный иск ООО "СМК Альянс" указало, что исполнительная документация в рамках договора подряда №18/06 от 18.06.2021 передавалась по реестру представителям ООО "Союзстройинвест", однако они отказывались от подписания реестра. 

Факт передачи исполнительной документации от ООО "СМК Альянс" к ООО "Союзстройинвест" подтверждается актами освидетельствования скрытых работ, подписанными представителями ООО "Союзстройинвест" и МУ "УКС г. Тулы", а также включением данных документов по п.п. 6994-7006 в реестр, предоставленный ООО "Союзстройинвест".

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №71-RU71326000-43-2021 подписано 10.09.2021. Объект введен в эксплуатацию; замечаний от эксплуатирующей организации не поступало.

В соответствии с п.10.1 "Сдача строительных объектов в эксплуатацию" "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) процесс сдачи объекта в эксплуатацию регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", СП 68.13330 и состоит из следующих ключевых мероприятий, выполнение которых обеспечивает застройщик (технический заказчик):

- организации наладки и опробования оборудования, пробного производства продукции и других мероприятий по подготовке объекта к эксплуатации;

- приемки законченного строительством объекта строительства от лица, осуществляющего строительство, в случае выполнения работ по договору (контракту);

- формирования необходимого пакета документов, требуемых согласно Федеральному закону от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", СП 68.13330, для получения заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и утвержденной проектной документации;

- предъявления законченного строительством объекта органам государственного строительного надзора (в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации");

- формирования необходимого пакета документов, требуемых согласно Федеральному закону от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", СП 68.13330 для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- комплектования, хранения и передачи соответствующим организациям исполнительной документации для последующей технической эксплуатации.

На запрос ООО "СМК Альянс" в МУ "УКС г. Тулы" относительно получения исполнительной документации от ООО "Союзстройинвест" был получен ответ №ЮР-859 от 13.05.2022, из которого следует, что акт приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства был подписан МУ "УКС г. Тулы" и ООО "Союзстройинвест" 08.09.2021. 

На дату подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) в рамках контракта от 26.11.2019 №ЭА-0366200035619007791 на выполнение работ по организации строительства по объекту: "Строительство школы на 600 мест в мкр. "Времена года-2, в т.ч. ПИР" работы по изготовлению и монтажу алюминиевых конструкций дверей, окон из ПВХ, дверей из ПВХ, витражных и оконных противопожарных конструкций по объекту были завершены, исполнительная документация по всем указанным работам за подписью ООО "СМК Альянс" (ОГРН 

<

***>) была передана от ООО "Союзстройинвест" в МУ "УКС г. Тулы" в полном объеме.

Таким образом, факт своевременной передачи исполнительной документации от ООО "СМК Альянс" в ООО "Союзстройинвест" подтверждается наличием указанной документации у ООО "Союзстройинвест", которое в дальнейшем передало эту документацию в МУ "УКС г. Тулы".

Дело рассмотрено в отсутствие сторон в соответствии со статьей 156 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

18.06.2021 ООО "Союзстройинвест" (заказчик) и ООО "СМК Альянс" (подрядчик) заключили договор подряда №18/06-2021, предметом которого  является выполнение подрядчиком собственными и привлеченными силами, с использованием своих материалов и оборудования, в установленный договором срок полного объема работ, предусмотренного данным договором, по изготовлению и монтажу алюминиевых конструкций (далее - работы) объекта: «Строительство школы на 600 мест в мкр. «Времена года-2, в т.ч. ПИР», по адресу: Тульская область. г.Тула, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену. 

Работы на объекте осуществляются в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами (СНиП), рабочей документацией, Спецификацией изделий (приложение №2), Расчетом договорной цены (приложение №1 к настоящему договору) органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями, а также в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 1.2 договора объем, стоимость и сроки выполнения работ определены договором и приложениями, являющимися неотъемлемой его частью.

В дополнительном соглашении №1 от 01.07.2021 к договору стороны предусмотрели дополнительный перечень работ на общую сумму 71535 руб. 26 коп. 

В связи с чем, общая стоимость работ (цена договора) и их объем по настоящему договору составляет 2`557`414 руб. 63 коп. (пункт 2.1 договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.07.2021).

Стоимость договора включает в себя все расходы, которые подрядчик понесет или должен понести в ходе исполнения взятых на себя договорных обязательств по выполнению работ: стоимость выполнения работ и товаров (строительных материалов), используемых при выполнении работ, расходы на скрытые работы, расходы по загрузке, по перевозке, по разгрузке или выгрузке, по монтажу, за исключением предоставления лесов или других подмостей /грузоподъемных механизмов для монтажа витражных конструкций В-30,35,36 (пункт 2.1 договора).

Объем работ по каждой из позиций расчета договорной цены может изменяться по взаимному согласованию сторон согласно фактически выполненных работ, а также в результате проведения дополнительных или невыполнения первоначально оговоренных в договоре видов работ и подтверждаться подписанием дополнительных соглашений к настоящему договору (пункт 2.3 договора). 

Согласно пункту 2.4 договора оплату работ заказчик осуществляет в следующем порядке: аванс в размере 1500000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. для приобретения материалов; 100% оплаты от стоимости работ в течение 14 (четырнадцати) дней после подписания актов по форме КС-2, КС-3.

В соответствии с пунктом 2.5 договора оплата фактически выполненных работ подрядчиком производится по мере приемки работ. После приемки заказчиком части (этапа) работы заказчик осуществляет оплату подрядчику принятой части (этапа) выполненных работ в течение 14 (четырнадцати) дней с даты подписания заказчиком актов выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и получения заказчиком от подрядчика счета на оплату.

Зачет аванса производится пропорционально стоимости принятых работ, исчисляемой как произведение суммы перечисленных авансов на отношение стоимости выполненных работ в отчетном периоде к общей стоимости работ по договору (пункт 2.6 договора).

Согласно пункту 3.1 договора начало производства работ: в течение 3-х дней после перечисления аванса на приобретение материалов и передачи фактических проемов для осуществления замера конструкций.

В соответствии с пунктом 3.2 договора срок изготовления конструкций: 21 рабочий день.

Срок выполнения работ: 10 рабочих дней (пункт 3.3 договора).

Срок окончания работ по дополнительному соглашению №1 от 01.07.2021 – 31.07.2021.

Оплата выполненных работ по дополнительному соглашению №1 от 01.07.2021: в течение 10 рабочих дней после подписания заказчиком актов выполненных работ КС-2, справок о стоимости выполненных работ КС-3 и предоставления счета на оплату.

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены:

- акт о приемке выполненных работ (изготовление и монтаж решеток декоративных Д-28, Д-29, Д-34) №1 от 26.07.2021 на сумму 358800 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 26.07.2021 на сумму 358800 руб.;

- акт о приемке выполненных работ (Устройство обрамления В-9, В-10) №2 от 31.07.2021 на сумму 71535,26 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №2 от 31.07.2021 на сумму 71535,26 руб.,

- акт о приемке выполненных работ (Монтаж витражей) №3 от 09.08.2021 на сумму 2108072,16 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №3 от 09.08.2021 на сумму 2108072,16 руб.;

- акт на аренду строительных лесов №33 от 19.07.2021 на сумму 142750 руб.; 

- акт на услуги автовышки №34 от 19.07.2021 на сумму 45375 руб.

По данным истца, задолженность ответчика на выполненные работы составляет 681011 руб. 38 коп.

Ссылаясь на неисполнение ООО "Союзстройинвест" обязанности по оплате выполненных работ, ООО "СМК Альянс" обратилось в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно статье 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Факт выполнения работ, их стоимость подтверждены материалами дела, доказательства оплаты долга в сумме 681011 руб. 38 коп. ответчиком не представлены.

Возражения ответчика со ссылкой на п. 5.8 договора, согласно которому не предоставление или неполное предоставление исполнительной документации дает заказчику право не оплачивать выполненные работ, судом отклоняется, поскольку объект введен в эксплуатацию, замечаний от МУ "УКС г. Тулы" относительно не предоставления или неполного предоставления исполнительной документации суду не представлено.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании долга в размере 681011 руб. 38 коп. является правомерным и подлежит удовлетворению.

Истец просит взыскать с ответчика 13734 руб. 15 коп. неустойки за период с 23.08.2021 по 01.11.2021.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с договором и действующим законодательством РФ (пункт 7.1 договора).

Пунктом 7.2 договора предусмотрено, что в случае нарушения заказчиком сроков оплаты принятых работ по договору заказчик уплачивает подрядчику неустойку в размере 0,02% от стоимости принятых заказчиком, но не оплаченных работ, указанных в Приложении/Приложениях к договору за каждый день просрочки.

Установив ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных подрядчиком работ, суд удовлетворяет требование истца о взыскании пени в заявленной сумме - 13734 руб. 15 коп. за период с 23.08.2021 по 01.11.2021.

Ответчиком предъявлены встречные исковые требования о взыскании 235098 руб. 83 коп. неустойки за период с 10.08.2021 по 04.05.2022 за нарушение сроков передачи исполнительной документации по договору подряда №18/06-2021 от 18.06.2021.

В силу абзаца 1 статьи 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Оценив в соответствии со статьей 431 ГК РФ условия договора подряда №18/06-2021 от 18.06.2021, суд приходит к выводу, что его условиями взыскание неустойки за несвоевременную передачу исполнительной документации не предусмотрено.

В связи с чем, встречные исковые требования удовлетворению не подлежат.

Расходы по государственной пошлине по первоначальному и встречному искам суд относит на ответчика по правилам статьи 110 АПК РФ. Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета по правилам статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Союзстройинвест" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СМК Альянс" 681 011 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча одиннадцать) руб. 38 коп. долга, 13 734 (Тринадцать тысяч семьсот тридцать четыре) руб. 15 коп. неустойки за период с 24.08.2021 по 01.11.2021, 16 895 (Шестнадцать тысяч восемьсот девяносто пять) руб. расходов по государственной пошлине.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "СМК Альянс" из федерального бюджета 6 000 (Шесть тысяч) руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №549 от 05.11.2021.

Обществу с ограниченной ответственностью "Союзстройинвест" в удовлетворении встречного иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

О.Е. Владимирова