АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-12318/2018

г. Ставрополь

28 января 2019 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Еременко М.В.,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  

 некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов», г. Ставрополь, ОГРН 1132651033140,  

ИНН 2636808125, 

к обществу с ограниченной ответственностью «ТЕМИРЪ», г. Черкесск, Карачаево- Черкесская Республика, ОГРН 1120917002491, ИНН 0917021442,  

об обязании ООО «ТЕМИРЪ» исполнить гарантийные обязательства по договору на  выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме от  23.08.2016 № 676 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вступления решения суда в  законную силу, выполнить следующие работы по устранению дефектов работ по  капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.  Ставрополь, ул.Станичная,д.19: отделать короедом и окрасить фасад 780 кв.м.; окрасить  откосы 20 кв.м.; окрасить фронтон многоквартирного дома; провести штукатурные работы  70 кв.м.; взыскании с ООО «ТЕМИРЪ» в пользу НО СК «Фонд капитального ремонта» пеню  за период с 12.02.2018 по 14.12.2018 за ненадлежащее исполнение гарантийных  обязательств по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества  в многоквартирном доме от 23.08.2016 № 676 в размере 45 420 руб. 61 коп.; взыскании  расходов по уплате государственной пошлины,  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

принять уточненные исковые требования.  Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

  Обязать ООО «ТЕМИРЪ» исполнить гарантийные обязательства по договору на  выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме от  

23.08.2016 № 676 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вступления решения суда в  законную силу, выполнить следующие работы по устранению дефектов работ по  капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.  Ставрополь, ул.Станичная,д.19: отделать короедом и окрасить фасад 780 кв.м.; окрасить  откосы 20 кв.м.; окрасить фронтон многоквартирного дома; провести штукатурные работы  70 кв.м..  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТЕМИРЪ», г. Черкесск,  Карачаево-Черкесская Республика, ОГРН 1120917002491, ИНН 0917021442, в пользу  некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов», г. Ставрополь, ОГРН 1132651033140,  

ИНН 2636808125, пеню за период с 12.02.2018 по 14.12.2018 за ненадлежащее исполнение  гарантийных обязательств по договору на выполнение работ по капитальному ремонту  общего имущества в многоквартирном доме от 23.08.2016 № 676 в размере 45 420 руб. 61  коп.; в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 8 000 руб.  

 Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.  

 Выдать некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального  ремонта общего имущества многоквартирных домов», г. Ставрополь, ОГРН 1132651033140,  

ИНН 2636808125, справку на возврат государственной пошлины в сумме 19 138 руб.  

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина