Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

21 февраля 2020 года                      Дело № А40-285477/19-68-1875

Резолютивная часть решения объявлена 28 января 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 21 февраля 2020 года

Судья   Абрамова Е.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление по делу по иску ООО "СЕРВИС-СТРОЙТОРГ" (394026, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.02.2003, ИНН: 

<

***>) к ответчику АО "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" (107996, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БАКУНИНСКАЯ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 1, , ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.08.2008, ИНН: 

<

***>) о взыскании 4 803 223,20 рублей

Третье лицо АО «Концерн Росэнергоатом» (109057, 

<

...>)

при участии:

от истца: ФИО2 дов. от 02 апреля  2018г.

от ответчика: ФИО3 по дов. от 26 марта 2018г.

от третьего лица: не явился, извещен

                                    УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании задолженности за выполненные работы в сумме 4.803.223 руб. 20 коп.

В судебном заседании представитель истца требование поддержал. 

Представитель ответчика против удовлетворения иска возражал по доводам отзыва.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив представленные ими доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, суд пришёл к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, между АО «Атомэнергопроект», генподрядчик и ООО «Сервис-Стройторг», подрядчик, заключен договор от 15.05.2014 № 505/08108/378 ДС14-36.

На основании п. 2.1. договора подрядчик принял на себя обязательства выполнить строительно-монтажных работ по объекту: «21-22UJY Галерея зоны контролируемого доступа 20UKC-20UJA», и сдать результат работ генподрядчику, а генподрядчик обязался принять качественно выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями договора.

Порядок и условия платежей по договору подряда согласованы сторонами в статье 4 договора.

Согласно п. 4.2. договора подряда генподрядчик принимает на себя обязательства по оплате фактически выполненных работ подрядчиком и принятых генподрядчиком работ согласно договору, после сдачи подрядчиком исполнительной и отчетной документации в соответствии с условиями договора. Датой приемки работ считается дата подписания генподрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

На основании п. 4.9. договора подряда, с учетом изменений внесенных Дополнительным соглашением № 2, генподрядчик осуществляет оплату выполненных работ по договору в течение 30 банковских дней с даты подписания сторонами документов, указанных в п. 4.7. и получения оригиналов счет-фактурв и счета,

Истец выполнил работы на Объекте подсобного и обслуживающего назначения ОСР 3-76A 21UJY Галерея зоны контролируемого доступа 20UKC-20UJA. Геометрия, по устройству огнепреградительных поясов, на общую сумму 4 803 223,20 руб., что подтверждается Актами о приемке выполненных работ формы № КС-2 № 3 и № 4 от 06.06.2019г., Справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 № 2 от 06.06.2019г. на сумму 4 803 223,20 руб.

Кроме того, факт выполнения указанных работ подтверждается исполнительной документацией, Актами освидетельствования скрытых работ, черновиками актов выполненных работ формы КС-2 № 1 и № 2 от 31.01.2019г.

Письмом исх. № 3 от 18.06.2019г. ООО «Сервис-Стройторг» направило АО «Атомэнергопроект» на подпись Справку о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 06.06.2019г. (форма КС-3) и Акты выполненных работ формы КС-2 № 3 и № 4 от 06.06.2019г. 

Ответчик, направленные в его адрес акты выполненных работ не подписал, мотивированный отказ от приемки выполненных Работ в адрес истца не направил.

09.08.2019 истец направил в адрес ответчика претензию исх. № 3 от 08.08.2019г., в которой указал на необоснованность отказа от подписания актов, поскольку все необходимые документы были переданы, и на необходимость оплаты стоимости фактически выполненных работ.

Ответа на претензию от АО «Атомэнергопроект» своевременно получено не было.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу ч. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В соответствии со ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Поскольку работы по устройству огнепреградительных поясов выполнены, акты приемки выполненных работ оформлены и направлены подрядчиком в адрес ответчика, а последний, получив названные акты, от их подписания отказался, каких-либо замечаний по объему, качеству и срокам выполненных работ и представленной документации не направил, что свидетельствует об уклонении от приемки работ, оплата работ не произведена, требование о взыскании задолженности подлежит удовлетворению в заявленном размере как обоснованное и документально подтвержденное. 

Возражая против удовлетворения иска, ответчик в отзыве сослался на то, что спорные работы не соответствуют условиям договора, не являются предметом договора, не согласованы сторонами. Ответчик не поручал истцу выполнение спорных работ. Немотивированный отказ от подписания одностороннего акта может быть расценен как принятие заказчиком услуг только в том случае, когда вид, объем и стоимость предъявленных к приемке услуг согласованы договором. Кроме того, Ответчик не подтверждает факт выполнения спорных работ.

Доводы ответчика суд отклоняет, поскольку фактическое выполнение работ подтверждается подписанным кураторами от заказчика и генподрядчика черновиками Актов о приемке выполненных работ формы № КС-2 от 31.01.2019 и сданной исполнительной документацией. Указанные документы (черновики) прошли процедуру визирования форм первичной учетной документации. Выполненные работы приняты кураторами заказчика и генподрядчика, подписаны акты скрытых работ,  подтверждены объемы выполненных работ подписями кураторов на КС-2, исполнительная документация сдана в полном объеме согласно представленной истцом и подписанной сторонами локальной смете. 

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика. 

Учитывая изложенное и, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 307-310,   711, 753 ГК РФ, ст. ст. 49,  65, 67, 71, 110, 167 - 171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

 

                                                        РЕШИЛ:

Взыскать с АО "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" в пользу ООО "СЕРВИС-СТРОЙТОРГ" задолженность в сумме 4.803.223 руб. 20 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 47.016 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

            Судья                                                                    Е.А. Абрамова