Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(мотивированное)

Дело № А56-74747/2024

26 февраля 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  06 февраля 2025 года.

Полный текст решения изготовлен 26 февраля 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Лобова Д.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Моховой К.И.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "РВ Контур" 

к Федеральному казенному учреждению "Объединенное Стратегическое Командование Ленинградского Военного Округа" 

о взыскании 2 106 744 руб.

при участии:

- от ответчика: представитель ФИО1 по доверенности от 10.07.2024

установил:

Истец - общество с ограниченной ответственностью «РВ Контур» обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ответчику - Федеральному казенному учреждению "Объединенное Стратегическое Командование Ленинградского Военного Округа", в котором просил взыскать задолженность в размере 2 106 744 руб.

Определением суда от 07.08.2024 дело принято к рассмотрению по общим правилам искового производства.

Распоряжением заместителя председателя Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области ФИО2 от 29.10.2024, в связи с прекращением полномочий судьи Яценко О.В. дело передано в производство судьи Лобовой Д.В.

В соответствии с п. 6 ст. 121 АПК РФ, лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления к производству, самостоятельно принимают меры к получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Информация о назначении судебного заседания размещена на официальном сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru, на сервисе Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru.

Истец в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом. 

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал отзыв. 

Исковое заявление содержит ходатайство истца о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО "Строительные ресурсы".

Согласно ч. 1 ст. 51 АПК РФ, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Суд отказывает в удовлетворении ходатайства.

Согласно части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции

Вместе с тем, суд полагает, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело подготовлено к судебному разбирательству.

В отсутствие возражений истца и ответчика суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции в порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации перешел к рассмотрению спора по существу.

            Из искового заявления следует, 12.09.2022 г. между государственным заказчиком - Федеральным казенным учреждением «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа» и генподрядчиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы» (далее - ООО «Строительные ресурсы») был заключен государственный контракт № MO/2023/3BO на выполнение работ по текущему ремонту зданий Московской области для нужд Федерального казённого учреждения «Объединённое стратегическое командование Западного военного округа» в 2023 году от 31.08.2022 г. (далее - Контракт).

15.02.2024 г. Министром обороны Российской Федерации (Приказ № 95 от 15 февраля 2024 года) принято решение о реорганизации Федерального казенного учреждения «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа» в форме разделения и о создании путем реорганизации Федерального казенного учреждение «Объединенное командование Ленинградского военного округа" (ФКУ ОСК ЛенВО, место нахождения: ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛОЩАДЬ ДВОРЦОВАЯ, 10); Федерального казенного учреждения "Объединенное стратегическое командование Московского военного округа" (ФКУ ОСК МВО, место нахождения: 115035, 

<

...>).

05.06.2024 г. в единый государственный реестр юридических лиц внесены записи в отношении Федерального казенного учреждения «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа» - о прекращении юридического лица путем реорганизации в форме разделения (ГРН 2247801193209 от 05.06.2024 г.), в отношении Федерального казенного учреждение «Объединенное командование Ленинградского военного округа» - о создании юридического лица путем реорганизации в форме разделения (ГРН 1247800056415 от 05.06.2024 г.).

Таким образом, Федеральное казенное учреждение «Объединенное командование Ленинградского военного округа» (далее - ответчик, ФКУ «ОСК ЛЕНВО») является правопреемником Федеральное казенное учреждение «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа» по обязательствам, возникшим из Контракта.

В рамках Контракта ООО «Строительные ресурсы» были выполнены, а государственным заказчиком приняты, работы, в том числе по акту о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) № 2.3. от 04.10.2023 г. и справке о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) № 2.3. от 04.10.2023 г. на сумму 2 106 744 рубля.

Оплата выполненных работ в сумме 2 106 744 рубля, принятых по вышеуказанному акту, произведена государственным заказчиком не была.

В соответствии со ст. 385 ГК РФ, на основании заключенного между цедентом - ООО «Строительные ресурсы» и цессионарием - Обществом с ограниченной ответственностью «РВ Контур» (далее - истец, ООО «РВ Контур») договора № 1839/23-СР уступки требования (цессии) от 30 ноября 2023 г., к ООО «РВ Контур» перешли права требования оплаты за выполненные ООО «Строительные ресурсы» работы по Контракту в сумме 2 106 744 рубля по акту о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) № 2.3. от 04.10.2023 г. и справке о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) № 2.3. от 04.10.2023 г.

О состоявшемся переходе вышеуказанного права (требования) к ООО «РВ Контур» Федеральное казенное учреждение «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа» было уведомлено письмом от 18.12.2023 г. № 779/23, направленным письмом с объявленной ценностью с почтовым идентификатором 45400489494766.

В адрес правопредшественника ответчика было направлено письмом от 18.12.2023 г. № 779/23 содержащее уведомление о том, что оплата в сумме 2 106 744 рубля по акту о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) № 2.3. от 04.10.2023 г. и справке о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) № 2.3. от 04.10.2023 г., в силу положений, предусмотренных статьями 312, 382, 384, 385 ГК РФ, подлежит исполнению в адрес ООО «РВ Контур».

Вместе с тем, оплата работ, принятых по акту о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) № 2.3. от 04.10.2023 г. и справке о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) № 2.3. от 04.10.2023 г. до настоящего времени не произведена.

Просил взыскать задолженность в размере 2 106 744 руб.

От ответчика поступил отзыв на иск, согласно которого между ФКУ «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа» (правопреемник - ФКУ «ОСК ЛЕНВО») и ООО «Строительные ресурсы» 31.08.2022 заключен государственный контракт № МО/2023/ЗВО на выполнение работ по текущему ремонту зданий в Московской области.

По акту о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) от 04.10.2023 № 2.3 и справке о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) от 04.10.2023 № 2.3 выполненные ООО «Строительные ресурсы» работы на сумму 2 106 744 руб. Государственным заказчиком были приняты.

Вышеуказанные денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Строительные ресурсы» на основании платежного поручения от 29.11.2023 № 1993 и возвращены ввиду закрытия получателем расчетного счета. Новые реквизиты для оплаты работ по государственному контракту ООО «Строительные ресурсы» не предоставили.

            Изучив материалы дела, позиции сторон, суд приходит к следующему.

  В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно ст. 763 ГК РФ, подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Ст. 708 и 709 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

            В соответствии с п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Между ответчиком (ранее - Федеральное казенное учреждение «Объединенное стратегическое командование Западного военного округа») и ООО «Строительные ресурсы» был заключен государственный контракт № MO/2023/3BO от 31.08.2022 г. на выполнение работ по текущему ремонту зданий Московской области для нужд Федерального казённого учреждения «Объединённое стратегическое командование Западного военного округа» в 2023 году.

Согласно п. 2 Контракта, Государственный заказчик осуществляетфинансирование, обеспечение выполнения и контроль за выполнением Работ, аГенподрядчик выполняет Работы в соответствии с условиями Контракта, в томчисле раздела 19 Контракта. Генподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта на свой риск собственными и (или) привлеченнымисилами и средствами. Государственный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Генподрядчиком Работы, соответствующие требованиям, установленным Контрактом.

В соответствие с п. 3 Контракта, цена по контракту составляет 33 865 176 рублей 88 копеек, в т.ч. НДС - 5 644 196 рублей 15 копеек.

            В п. 4 стороны установили порядок оплаты, а именно: оплата по Контракту осуществляется в рублях за счет средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных ФКУ «ОСК ЗВО» для оплаты Работ по Контракту на 2023 год, авансирование не предусмотрено. Оплата за фактически выполненные Работы осуществляется с лицевого счета Государственного заказчика на расчетный счет Генподрядчика. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика. Оплата выполненных Генподрядчиком Работ осуществляется Государственным заказчиком в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ и представления Генподрядчиком Государственному заказчику в срок и в порядке документов, установленных в пп. 4.1.1 - 4.1.7. Технический заказчик в течение 3-х рабочих дней проверяет представленную Генподрядчиком документацию и подтверждает объемы, качество, расценки и соответствие выполненных работ, либо направляет мотивированный отказ. Окончательный расчет по Контракту производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме, установленной Приложением № 6 к Контракту. По окончании исполнения обязательств по Контракту Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Государственному заказчику Акт сверки взаимных расчетов по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту. Оплата за фактически выполненные работы допускается при сдаче Работ в соответствии с п. 10.2 Контракта. Расчет и обоснование цены Контракта указан в Приложении № 17 к контракту

Срок выполнения работ с 01.01.2023 по 01.09.2023 (п. 5 Контракта). 

Как указывает истец, и не оспаривает ответчик, в рамках Контракта ООО «Строительные ресурсы» были выполнены, а ответчиком приняты работы по акту о приемке выполненных работ № 2.3. от 04.10.2023 г. и справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2.3. от 04.10.2023 г. на сумму 2 106 744 рубля.

30.11.2023 между ООО «Строительные ресурсы» ООО «РВ Контур» заключен договора № 1839/23-СР уступки требования (цессии). 

На основании указанного договора к ООО «РВ Контур» перешли права требования оплаты за выполненные ООО «Строительные ресурсы» работы по Контракту в сумме 2 106 744 руб.

Ответчик указал, что денежные средства в размере 2 106 744 руб. были перечислены на расчетный счет ООО «Строительные ресурсы» на основании платежного поручения от 29.11.2023 № 1993 и возвращены ввиду закрытия получателем расчетного счета. 

Доказательств выплаты денежных средств, наличия правомерного удержания денежных средств, ответчиком в материалы дела не представлено. 

При таких обстоятельствах, суд находит требования истца законными и обоснованными.

28.10.2024 в суд поступило ходатайство от общества с ограниченной ответственностью "Билдинг", согласно которого 14.08.2024 г. между цедентом - ООО «РВ Контур» и цессионарием - Обществом с ограниченной ответственностью «Билдинг» (далее - ООО «Билдинг») был заключен договор № 1901/24 уступки требования (цессии) в соответствии с п. 1.1. которого Цедент уступает Цессионарию, а Цессионарий принимает право требования к Федеральному казенному учреждению «Объединенное Стратегическое Командование Ленинградского Военного Округа» оплаты за выполненные работы по государственному контракту № MO/2023/3BO на выполнение работ по текущему ремонту зданий Московской области для нужд Федерального казённого учреждения «Объединённое стратегическое командование Западного военного округа» в 2023 году от 31.08.2022 г. в сумме 2 106 744 рубля по акту о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) № 2.3. от 04.10.2023 г. и справке о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) № 2.3. от 04.10.2023 г. 

Согласно п. 2.1 вышеуказанного договора права (требования) указанные в п. 1.1. настоящего договора переходят к Цессионарию с момента заключения сторонами настоящего договора – 14 августа 2024 г. 

О состоявшемся переходе права (требования) к ООО «Билдинг» ФКУ «ОСК ЛЕНВО» было уведомлено письмом от 14.08.2024 г., направленным письмом с объявленной ценностью с почтовым идентификатором 45400495581849. 

Просил произвести замену истца по делу № А56-74747/2024 - Общества с ограниченной ответственностью «РВ Контур» на его правопреемника - Общество с ограниченной ответственностью «Билдинг».

В силу п. 1 ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. 

Согласно статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Согласно ч. 1 ст. 48 АПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Суд удовлетворяет требование ООО "Билдинг" о замене истца. 

При таких обстоятельствах с Федерального казенного учреждения «Объединенное Стратегическое Командование Ленинградского Военного Округа» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Билдинг» подлежит взысканию задолженность в размере 2 106 744 руб.

В связи с удовлетворением исковых требований, судебные расходы подлежат взысканию с ответчика в пользу истца на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Произвести замену истца по делу общества с ограниченной ответственностью «РВ Контур» (ИНН 

<

***>) на правопреемника - общество с ограниченной ответственностью «Билдинг» (ИНН 

<

***>)   

Взыскать с Федерального казенного учреждения «Объединенное Стратегическое Командование Ленинградского Военного Округа» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Билдинг» (ИНН 

<

***>) задолженность в размере 2 106 744 руб.

       Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

               Судья                                                              Лобова Д.В.