Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-24234/24

г. Москва

03 июля 2024 г.

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Узденова А.У., при ведении протокола секретарем судебного заседания Кубековым И.Т., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  "СТРОЙТРАНСГАЗ" (Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.12.2002,  ИНН: 

<

***>, 123112, Г.МОСКВА, УЛ. ТЕСТОВСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ. I, ЭТАЖ 10)  

к ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (Московская область, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.04.2015, ИНН: 

<

***>, 143522,  МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИСТРА, ТЕР. НЬЮ РИГА РЕЗОРТ, СТР. 2, ПОМЕЩ. III,  ЧАСТЬ КОМНАТЫ 5)  

о внесении изменений в государственный контракт при участии: согласно протоколу судебного заседания, 

РЕШИЛ:

Внести в государственный контракт от государственный контракт № 1/2019-110 от  23.12.2019 следующие изменения:  

1) Пункт 3.4. Контракта изложить в следующей редакции: «3.4. Окончание  выполнение работ: 60 (Шестьдесят) месяцев с даты начала выполнения работ».  

2) Пункт 18.1 Контракта изложить в следующей редакции: «18.1 Настоящий  Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до 31 января 2025  года. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от  исполнения принятых на себя обязательств».  

3) Приложение № 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» к  Контракту изложить в новой редакции в части продления сроков по следующим  обязательствам:  

а) Раздел 1. График выполнения обязательств по контракту. Пункт 1.1. Обязательства  по выполнению работ. Пункт 1. Выполнение строительных работ. Срок окончания  исполнения обязательства - не позднее 60 мес. От даты исполнения обязательства -  предшественника «Передача проектной документации»;  

б) Раздел 1. График выполнения обязательств по контракту. Пункт 1.2. Иные  Обязательства. Пункт 3. Выставление счета на аванс. Срок окончания исполнения  обязательства - не позднее 31.12.2024 (МСК).  

4) Приложение № 6 «График производства работ» к Контракту изложить в новой  редакции в части продления сроков следующих видов работ: а) Подготовка территории  - 60 календарных месяца; б) 1 этап - 60 календарных месяца.  

Взыскать с ГКУ МО "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" в пользу АО  "СТРОЙТРАНСГАЗ" 6000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

Судья А.У. Узденов