20/2022-102394(3) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-12319/2021

г. Астрахань

19 декабря 2022 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи: Баскаковой И.Ю.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать Некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Астраханской области» безвозмездно устранить недостатки,  допущенные при проведении капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома   № 65 по ул.Космонавта ФИО2 в г.Астрахани, и в срок до 27 сентября 2023 года  провести следующие работы:  

 № 

пп  

Наименование 

Ед. изм. 

Кол. 

Обоснование  

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

Демонтаж кровельного покрытия: из  профилированного листа при высоте  

здания до 25 м  

100 м2 

покрытия  

6,191 

TEP09-04-002- 

01 

2 

Демонтаж кровельного покрытия: из  профилированного листа при высоте  

здания до 25 м  

100 м2 

покрытия  

0,982 

ТЕР09-04-00201  

3 

Демонтаж желобов: подвесных  

100 м желобов  

0,6175  

ТЕР12-01-00902  

4 

Устройство пароизоляции из 

полиэтиленовой пленки в один слой  

насухо 

100 м2 

поверхности  

7,173 

ТЕР11-01-05001  

5 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ 

 (3-х слойная полиэтиленовая с  

армированным слоем из  полиэтиленовых полос)  

м2 

8,78 

ТССЦ-101-4135  

6 

Улучшенная штукатурка фасадов  цементно-известковым раствором по  

камню: стен парапетов  

100 м2 

оштукатуривае 

м ой 

поверхности  

0,2179  

ТЕР15-02-001-01  

7 

Улучшенная штукатурка фасадов  цементно-известковым раствором по  

камню: стен вентиляционных каналов  

100 м2 

оштукатуривае 

м ой 

поверхности  

0,2412  

ТЕР15-02-001-01  

 

8 

Устройство мелких покрытий  (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из  

листовой оцинкованной стали (отлива 

по вентканалам, будкам выхода)  

100 м2 

покрытия  

0,5015  

ТЕР12-01-010-01  

9 

Устройство мелких покрытий  

(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из  

листовой оцинкованной стали  

(примыкания) 

100 м2 

покрытия  

0,5015  

ТЕР12-01-010-01  

10  

Устройство: карнизов (лобовая доска)  

100 м2 стен,  

0,2622  

ТЕР10-01-008-05  

11  

Доски обрезные хвойных пород длиной: 

4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной  

32-40 мм, II сорта 

мЗ 

0,748  

ТССЦ-102-0056  

12  

Устройство желобов: подвесных  

100 м желобов  

0,874  

ТЕР12-01-009-02  

13  

Монтаж кровельного покрытия: из  профилированного листа при высоте  

здания до 25 м  

100 м2 

покрытия  

7,173  

ТЕР09-04-002-01  

14  

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и  

специальной уплотнительной  прокладкой (шайбой) из ЭПДМ  

10 шт.  

430,2  

ТССЦ-101-1751  

15  

Профнастил оцинкованный: НС21-0.7  (25% от площади кровли на примыкания  

к вентиляционным шахтам и столбов  

парапета) 

м2 

179,3  

ТССЦ-101-4532  

16  

Огрунтовка металлических  поверхностей за один раз: грунтовкой  

ГФ-021 (ограждение кровли)  

100 м2  окрашиваемой  

поверхности  

0,437  

ТЕР13-03-002-04  

17  

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 

(ограждение кровли)  

100 м2  окрашиваемой  

поверхности  

0,437  

ТЕР 13-03-004-26  

18  

Погрузочные работы при  автомобильных перевозках: мусора  

строительного с погрузкой вручную  

1 т груза  

20 

ТССЦпг-01-01-01- 

041 

19  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,  

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 20 км I класс груза  

1 т груза  

20 

ТССЦпг-03-21-01- 

020 

В случае неисполнения настоящего решения в срок до 27 сентября 2023 года,  взыскать с Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Астраханской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Товарищества собственников жилья «Домострой» (ОГРН 

<

***>) судебную  неустойку в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день с момента истечения срока,  установленного для добровольного исполнения решения суда, по день фактического его  исполнения.  

Взыскать с Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Астраханской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу Товарищества собственников жилья «Домострой» (ОГРН 

<

***>)  судебные издержки: 44 600 руб. за оплату судебной экспертизы, и 6 000 рублей в  возмещение расходов по оплате госпошлины.  

Отделу финансирования, бухгалтерского учета и материально-технического  обеспечения Арбитражного суда Астраханской области перечислить на счет эксперта  ФИО3 (ИНН 

<

***>) с депозитного счета Арбитражного  суда денежные средства в сумме 44 600 рублей за проведенную экспертизу.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления  арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия,  через Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет –  сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья И.Ю. Баскакова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 04.10.2021 7:20:44

 Кому выдана Баскакова Инна Юрьевна