Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-46302/2017

09 октября 2017 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  28 сентября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  09 октября 2017 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коршуновой А.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Росинжиниринг-Энерго-Строй" (адрес:  Россия 194044, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/ЛИТЕР Д/ПОМЕЩЕНИЕ 17Н, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Капитал" (адрес:  Россия 197046, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 2 520 443 руб. 50 коп.

 

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 14.06.2017

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

ООО "Росинжиниринг-Энерго-Строй" просит взыскать с ООО "Капитал" 2 520 443 руб. 50 коп., из них: 2 170 039 руб. 45 коп. неосновательного обогащения, 310 005 руб. 64 коп. неустойки по состоянию на 04.04.2017 и 40 398 руб. 41 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 15.06.2017. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Дело рассматривается без его участия на основании ст.156 АПК РФ.

Судом установлено: 

Между сторонами был заключен договор № 57/С3497 от 01.06.2016 на выполнение работ по устройству кровли на объекте: «Загородный кампус Высшей школы менеджмента ФГОУ ВПО «СПбГУ» на базе дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача». Комплекс общежитий для бакалавров. Корпусы №№ 7,8. 

Срок окончания работ 13.07.2016.

Истец-заказчик перечислил ответчику-подрядчику авансовый платеж в размере 2 170 039 руб. 45 коп., что подтверждается платежным поручением № 1397. 

Ответчик работы не выполнил. 

15.04.2017 истец направил ответчику претензию исх. № 01-5704-109-17 с уведомлением об отказе от исполнения договора и требованием о возвращении неотработанного аванса и уплате неустойки за просрочку выполнения работ. 

В соответствии с разделом 14 договора ответчику начислена неустойка за просрочку выполнения работ в размере 0,05% от общей цены работ за каждый день просрочки, но не более 5% от общей цены работ. По состоянию на 04.04.2017 с учетом ограничения неустойка составляет 310 005 руб. 64 коп. 

В соответствии со ст.395 ГК РФ ответчику начислены проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 15.06.2017 в размере 40 398 руб. 41 коп. 

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Капитал" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Росинжиниринг-Энерго-Строй" 2 520 443 руб. 50 коп., из них: 2 170 039 руб. 45 коп. неосновательного обогащения, 310 005 руб. 64 коп. неустойки и 40 398 руб. 41 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 35 602 руб. 22 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.