РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-265684/22-110-1998

г. Москва

21 апреля 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 27 марта 2023 года 

Решение в полном объеме изготовлено 21 апреля 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" 129110, 

<

...>;,2, ОГРН: 

<

***>) к акционерному обществу "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА" (107078, 

<

...>, СТР.1, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 512 570,11 руб.,  а также встречный иск ,

при участии:

от истца – ФИО3 по дов.  от 02.11.2022,

от ответчика- ФИО4 по дов.  от  30.12.2022,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" обратилось с иском к акционерному обществу "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА" (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 479 959,19 руб. задолженности по договору от 06.07.2020 №242-13/20, 34 437,07 руб. неустойки на сумму 479 959,19 руб. с 01.10.2022 по дату фактического исполнения обязательства.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, предъявил встречный иск  о взыскании 6 959,41 руб. неустойки по договору №242-13/20 от 06.07.2020. 

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между АО «ЦЭНКИ» (Исполнитель) и АО «Корпорация «ВНИИЭМ» (Заказчик) был заключен договор от 06.07.2020 № 242-13/20 (далее - Договор), в соответствии с условиями которого Исполнитель обязуется выполнить работу по теме «Согласование инструкции по заправке (сливу) жидкости и газов корректирующей двигательной установки для космического аппарата дистанционного зондирования Земли» (далее - Работа).

Согласно п. 2.1 Договора, его цена является фиксированной и составляет 685 655,98 руб.

АО «ЦЭНКИ» в полном объёме были выполнены предусмотренные Договором работы, что подтверждается актом сдачи-приёмки выполненных работ от 19.05.2021 №242-13/20-1. Согласно данному акту, стоимость выполненных работ составила 685 655,98 руб., задолженность за выполненные работы -479 959,19 руб.

В соответствии с п. 2.4 Договора окончательный расчёт за выполненные работы Заказчик осуществляет в течение 20 банковских дней после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Таким образом, выполненные АО «ЦЭНКИ» работы по акту от 19.05.2021 №242-13/20-1 подлежали оплате в срок не позднее 17.06.2021. Однако по состоянию на 23.09.2022 выполненные АО «ЦЭНКИ» работы в полном объеме не оплачены, задолженность АО «Корпорация «ВНИИЭМ» составляет 479 959,19 руб., просрочка - 463 дня.

Согласно ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга.

Согласно п. 6.3 Договора в случае просрочки Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены неисполненного обязательства.

Таким образом, за нарушение сроков оплаты выполненных АО «ЦЭНКИ» работ по акту от 19.05.2021 № 242-13/20-1 стоимостью 479 959,19 руб. за период с 18.06.2021 по 31.03.2022 подлежит уплате неустойка в размере 34 437,07 руб.

Вместе с тем, истцом неверно определен период просрочки.

В соответствии с п.5.3 договора оплата осуществляется на основании счетов.

Счет №97 от 28.05.2021 на сумму 479 959,19 руб. и счет-фактура поступили в адрес ответчика 21.06.2021 с письмом исх. № 383-8502/091 от 07.06.2021 (вх. от 21.06.2021 №5263/х/П).

Таком образом, с ответчика подлежит взысканию неустойка за период с 19.07.2021 по 31.03.2022 в размере 30 717,39 руб., а также неустойка на сумму  479 959,19  руб.,  исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату оплаты,  с 02.10.2022  по день фактической оплаты.

При указанных обстоятельствах первоначальный иск подлежит частичному удовлетворению.

При этом встречный иск подлежит удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с Ведомостью исполнения Договора срок выполнения работы Т0 + 60 дней, где Т0 - дата подписания обеими Сторонами Договора и направления инструкции по заправке (сливу) жидкости и газов корректирующей двигательной установки для космического аппарата дистанционного зондирования Земли в соответствии си. 3.1 Договора.

Указанная Инструкция была направлена Ответчику с письмом АО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 21.01.2021 исх. № АХ-21/237/х. Следовательно, срок выполнения работ по Договору истек 22.03.2021.

В соответствии с п. 3.4 Договора датой выполнения Работ является дата подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Акт № 242-13/20-1 сдачи-приемки выполненных работ по Договору утвержден Заказчиком 19.05.2021. Следовательно, АО «ЦЭНКИ» допущена просрочка выполнения работ по Договору длительностью 58 дней (с 23.03.2021 по 19.05.2021).

В соответствии с п. 6.2 Договора в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены неисполненного обязательства.

В соответствии с п. 6.2 Договора АО «ЦЭНКИ» подлежит уплате неустойка в размере 6 959 (Шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять) руб., 41 коп., исходя из следующего расчета:

479 959,19 х 58 х 1/300 х 7,5 % = 6 959,41 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично-479 959,19  руб.. задолженности, 30 717,39 руб.  неустойки, неустойки по день фактической оплаты. Встречный иск удовлетворить в полном объеме-6 959,41 руб.

Произвести зачет требований.

Взыскать с  акционерного общества "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА" (ОГРН: 

<

***>)  в пользу  акционерного общества "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" (ОГРН: 

<

***>) 479 959 руб. 19 коп. задолженности, 23 757 руб. 88  коп. неустойки,  неустойку на сумму  479 959,19  руб.,  исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату оплаты,  с 02.10.2022  по день фактической оплаты, 11 155 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:

ФИО1