39_10926080 

Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-9890/21

11 мая 2021 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А, Морозовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению МИНСТРОЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к ООО "РЕГИОН ПРОЕКТ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки выполненных строительно-монтажных работ по  Государственному контракту от 09.08.2019 № Ф.2019.051,  

при участии в заседании: согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 216 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

 Обязать ООО "РЕГИОН ПРОЕКТ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  безвозмездно устранить недостатки выполнения строительно-монтажных работ по  Государственному контракту от 09.08.2019 № Ф.2019.051 в срок по 30.06.2021г., а именно:  

 - устранить течь с вентиляционной решетки в ванной комнате и в районе потолочного  светильника на кухне;  

 - устранить провал реечного потолка в санузлах жилой части, в санузле для  инвалидов, в стерилизационной;  

 - восстановить асфальтовое покрытие на парковке; 

 - заделать усадочные траншеи в углах помещений с кафельной плиткой;   - проверить наличие и работоспособность греющего кабеля на вводе ХВС.  

 В остальной части требований отказать. 

 Взыскать с ООО "РЕГИОН ПРОЕКТ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

В соответствии с частью 1 статьи 259 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции  обжалуемого решения.  

Судья Е.А. Морозова